141_37541492 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-201460/23-141-1588

г. Москва

10 ноября 2023г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 ноября 2023г.  Мотивированное решение изготовлено 10 ноября 2023г.  

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел дело по иску ПАО «Ростелеком» (ИНН 

<

***>) к ООО «Транс-Групп» (ИНН 

<

***>) о взыскании 988 573руб. 61коп. 

В судебное заседание явились: от истца – не явился, извещен, от ответчика – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Ростелеком» обратилось с исковым заявлением к ООО  «Транс-Групп» о взыскании 988 573руб. 61коп. неустойки по договору № 10203748 от  16.12.2022г.  

Лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, извещены надлежащим  образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также  о рассмотрении искового заявления в случае неявки сторон или какой-либо из сторон и  в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного  заседания и открытия судебного заседания в первой инстанции.  

Исковое заявление рассмотрено в отсутствие представителей лиц, участвующих  в деле, в порядке ч. 4 ст. 121, ст.ст. 123, 137 ч.ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ по имеющимся в  деле материалам.  

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых  требований по следующим основаниям.  

Как усматривается из материалов дела, 16.12.2022г. между истцом и ответчиком  заключен договор № 10203748.  

В соответствии с вышеуказанным договором ответчик обязался выполнить  работы, а истец принять и оплатить их.  

Как следует из приложения № 4 к договору (график исполнения обязательств)  дата окончания исполнения обязательства – 20.12.2022г., однако ответчик свои  обязательства в сроки, установленные договором не выполнил.  

Пунктом 8.1. договора предусмотрено, что за нарушение ответчиком сроков  выполнения работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах  выполненных работ, предусмотренных договором, истец вправе взыскать с ответчика  неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от общей цены договора.  

Согласно п. 3.1. договора его общая цена составляет 3 938 540руб. 29коп.  

Учитывая, что ответчиком работы в срок, установленный договором, не  исполнены, доказательств обратного в материалы дела не представлено, то истец  просит взыскать неустойку, предусмотренную п. 8.1. договора, что по его расчету  составляет 988 573руб. 61коп. за период с 21.12.2022г. по 28.08.2023г.  

Размер неустойки судом проверен, признан правильным и соответствующим  последствиям нарушения обязательства, в связи с чем подлежащим взысканию с  ответчика в судебном порядке.  

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины  относятся на ответчика.  

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167-171, 176  АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Групп» (ИНН  

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества «Ростелеком» (ИНН  

<

***>) 988 573руб. 61коп. неустойки и 22 771руб. 00коп. расходов по уплате  госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия.  

Судья А.Г. Авагимян