Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

16. 02. 2018 года.                                             Дело № А40-153021/17-43-1365

Резолютивная часть решения объявлена 05. 02. 2018 года.

Решение изготовлено в полном объеме 16. 02. 2018 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " Строительная компания " МСМ-1 " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " СМУ 15 " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 9 975 266 руб. 60 коп. – долга, неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 01/03 от 01.03.2017 г., от ответчика – не явился. 

Изучив, имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск  заявлен о взыскании 9 975 266 руб. 60 коп. – долга, неустойки, на основании статей 309, 310 ГК РФ. 

Истец направил в судебное заседание представителя, который заявил об уменьшении размера исковых требований до 7 253 378 руб. 08 коп., в том числе: 6 618 100 руб. 00 коп. – долга, 635 278 руб. 08 коп. – неустойки, в связи с частичным погашением ответчиком суммы долга до предъявления истцом иска в суд (платежным поручением № 663 от 14.07.2017 г.) и перерасчётом суммы неустойки, поддержал заявленный иск повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, с учётом заявления об уменьшении размера исковых требований; представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо иных ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Заявление истца об уменьшении размера исковых требований до 7 253 378 руб. 08 коп., в том числе: 6 618 100 руб. 00 коп. – долга, 635 278 руб. 08 коп. – неустойки, соответствует требованиям ст. 49 АПК РФ, является правом истца, не ухудшает процессуальное положение ответчика и принимается судом к рассмотрению. 

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в соответствии со ст. 41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, в отсутствие возражений со стороны ответчика, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

01.12.2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МСМ-1» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СМУ 15» (Заказчик) был заключен Договор № 62.

В соответствии с пунктом 1 Договора Исполнитель обязуется выполнить/предоставить работы/услуги по перебазировке (монтаж/демонтаж, перевозка башенного крана и крановых путей на объект и с объекта) кранов марки «КБ-503», с заводским номером № 531, (далее -«строительная техника») и эксплуатации строительной техники на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Конкретный перечень работ и сроки предоставления строительной техники определяются в согласованных с Исполнителем Заявках Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю и являющихся неотъемлемой частью Договора.

На основании пункта 2.3.3. Исполнитель вправе требовать исполнения в полном объеме обязательств Заказчика в соответствии с Договором.

Согласно пункту 3 Договора стоимость/цена работ по базировке одной единицы строительной техники, включая демонтаж и вывоз с объекта, составляет 400 000 рублей с учетом НДС 18%; предоставление услуг по эксплуатации строительной техники за один месяц составляет 390 000 тысяч рублей с учетом НДС 18%; работа машинистов оплачивается отдельно из расчета фактически отработанных смен каждого машиниста и составляет 290 рублей в час. Оплата по Договору начисляется с даты подачи заявки на работу строительной техники.

Разделом 4 Договора предусмотрен порядок оплаты Заказчика, а именно: 4.2. расчеты по Договору производятся на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформляемых в порядке, установленном Договором. 4.2.1.Основанием для расчетов по Договору за выполненные работы по перебазировке строительной техники являются справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, составленные на основании актов о приемке выполненных работ формы № КС-2. Основанием для расчетов по Договору за работы/услуги, выполненные/предоставленные строительной техникой за определенный отчетный период, предоставляется справка для расчетов за выполненные работы, подписываемая Сторонами на бланке формы № ЭСМ-7, утвержденном Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 18. 11.97 г. №78, которая одновременно является актом о приемке выполненных работ.

Расчет с исполнителем по Договору за предоставленные услуги строительной техники и работу машинистов за отчетный период производится Заказчиком ежемесячно на основании платежных документов Исполнителя, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

Датой оплаты Заказчиком платежей по договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Работы/услуги, обусловленные Договором № 62 от 01 декабря 2016 года и Приложением №1 к нему, были оказаны Заказчику надлежащем образом и в установленные сроки, что подтверждается в том числе и акт выполненных работ № 359 от 31.12.2016 г., справка № 359 по форме ЭСМ-7 от 30.12.2016г., акт выполненных работ № 41 от 31.01.2017 г., справка № 41 по форме ЭСМ-7 от 31.01.2017 г., акт выполненных работ № 87 от 28.02.2017 г., справка №87 по форме ЭСМ-7 от 28.02.2017 г., акт выполненных работ № 137 от 31.03.2017 г., справка № 137 по форме ЭСМ-7 от 31.03.2017 г., акт выполненных работ № 194 от 30.04.2017 г., справка № 194 по форме ЭСМ-7 от 30.04.2017 г., акт выполненных работ № 253 от 31.05.2017 г., справка № 253 по форме ЭСМ-7 от 31.05.2017 г., акт выполненных работ № 331 от 30.06.2017 г., справка № 331 по форме ЭСМ-7 от 30.06.2017 г. подписанными обеими сторонами (Заявителем и Исполнителем) Договора.

Согласно положениям Договора, а так же Приложению № 1 к Договору и вышеперечисленным актам выполненных работ, справок по форме № КС-2, справок по форме № КС-3, справок по форме ЭМС-7, Заказчик должен был уплатить Исполнителю 3 928 800 рублей 00 копеек в срок указанный пунктом 4.6. настоящего договора. По состоянию на 19.05.2017г. на расчетный счет Исполнителя поступила сумма 500 000 рублей 00 копеек. Сумма задолженности составила 3 428 800 рублей 00 копеек.

01 декабря 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МСМ-1» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СМУ 15» (Заказчик) были заключен Договор № 63. В соответствии с пунктом  1 Договора Исполнитель обязуется выполнить/предоставить работы/услуги по перебазировке (монтаж/демонтаж, перевозка башенного крана и крановых путей на объект и с объекта) кранов марки «КБ-503», с заводским номером № 650, (далее -«строительная техника») и эксплуатации строительной техники на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Конкретный перечень работ и сроки предоставления строительной техники определяются в согласованных с Исполнителем Заявках Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю и являющихся неотъемлемой частью Договора.

На основании пункта 2.3.3. Исполнитель вправе требовать исполнения в полном объеме обязательств Заказчика в соответствии с Договором.

Согласно пункту 3 Договора стоимость/цена работ по базировке одной единицы строительной техники, включая демонтаж и вывоз с объекта, составляет 400 000 рублей с учетом НДС 18%; предоставление услуг по эксплуатации строительной техники за один месяц составляет 390 000 рублей с учетом НДС 18%; работа машинистов оплачивается отдельно из расчета фактически отработанных смен каждого машиниста и составляет 290 рублей в час. Оплата по Договору начисляется с - даты подачи заявки на работу строительной техники.

Разделом 4 Договора предусмотрен порядок оплаты Заказчика, а именно: 4.2. расчеты по Договору производятся на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформляемых в порядке, установленном Договором. 4.2.1.Основанием для расчетов по Договору за выполненные работы по перебазировке строительной техники являются справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, составленные на основании актов о приемке выполненных работ формы № КС-2. 4.2.2.Основанием для расчетов по Договору за работы/услуги, выполненные/предоставленные строительной техникой за определенный отчетный период, является справка для расчетов за выполненные работы, подписываемая Сторонами на бланке формы № ЭСМ-7, утвержденном Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.97 г. №78, которая одновременно является актом о приемке выполненных работ.

4.6. Расчет с исполнителем по Договору за предоставленные услуги строительной техники и работу машинистов за отчетный период производится Заказчиком ежемесячно на основании платежных документов Исполнителя, до   15  (пятнадцатого)  числа месяца,  следующего  за отчетным.

4.7. Датой оплаты Заказчиком платежей по договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Работы/услуги, обусловленные Договором № 63 от 01 декабря 2016 года и Приложением № 1 к нему, были оказаны Заказчику надлежащем образом и в установленные сроки, что подтверждается в том числе и акт выполненных работ № 358 от 31.12.2016 г., справка № 358 по форме ЭСМ-7 от 30.12.2016г., акт выполненных работ № 42 от 31.01.2017 г., справка № 42 по форме ЭСМ-7 от 31.01.2017 г., акт выполненных работ № 85 от 28.02.2017 г., справка №85 по форме ЭСМ-7 от 28.02.2017 г., акт выполненных работ № 118 от 31.03.2017 г., справка № 118 по форме ЭСМ-7 от 31.03.2017 г., акт выполненных работ № 196 от 30.04.2017г., справка № 196 по форме ЭСМ-7 от 30.04.2017 г., акт выполненных работ № 255 от 31.05.2017г., справка № 255 поформе ЭСМ-7 от 31.05.2017 г., акт выполненных работ № 330 от 30.06.17г. справка № 330 по форме ЭСМ-7 от 30.06.2017 г. подписанными обеими сторонами (Заявителем и Исполнителем) Договора.

Согласно положениям Договора, а так же Приложению № 1 к Договору и вышеперечисленным актам выполненных работ, справок по форме» КС-2 справок по форме № КС-3, справок по форме ЭМС-7, Заказчик должен был уплатить Исполнителю 3 837 420 рублей 00 копеек в срок указанный пунктом 4.6. настоящего договора. Оплата по договору № 63 от 01 декабря 2016 года ни разу не производилась. Задолженность составила 3 837 420 рублей 00 копеек.

01 декабря 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МСМ-1» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СМУ 15» (Заказчик) были заключен Договор № 64.

В соответствии с пунктом 1 Договора Исполнитель обязуется выполнить/предоставить работы/услуги по перебазировке (монтаж/демонтаж, перевозка башенного крана и крановых путей на объект и с объекта) кранов марки «КБ-503», с заводским номером № 543, (далее -«строительная техника») и эксплуатации строительной техники на объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Конкретный перечень работ и сроки предоставления строительной техники определяются в согласованных с Исполнителем Заявках Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), направляемых Исполнителю и являющихся неотъемлемой частью Договора.

На основании пункта 2.3.3. Исполнитель вправе требовать исполнения в полном объеме обязательств Заказчика в соответствии с Договором.

Согласно пункту 3 Договора стоимость/цена работ по базировке одной единицы строительной техники, включая демонтаж и вывоз с объекта, составляет 400 000 рублей с учетом НДС 18%; предоставление услуг по эксплуатации строительной техники за один месяц составляет 390 000 рублей с учетом НДС 18%; работа машинистов оплачивается отдельно из расчета фактически отработанных смен каждого машиниста и составляет 290 рублей в час. Оплата по Договору начисляется с даты подачи заявки на работу строительной техники.

Разделом 4 Договора предусмотрен порядок оплаты Заказчика, а именно: 4.2. расчеты по Договору производятся на основании актов о приемке выполненных работ исправок о стоимости выполненных работ и затрат, оформляемых в порядке, установленном Договором. 4.2.1.Основанием для расчетов по Договору за выполненные работы по перебазировке строительной техники являются справки о стоимости выполненных работ затрат по форме № КС-3, составленные на основании актов о приемке выполненных работ формы № КС-2. 4.2.2. Основанием для расчетов по Договору за работы/услуги, выполненные/предоставленные строительной техникой за определенный отчетный период, является справка для расчетов за выполненные работы, подписываемая Сторонами на бланке формы № ЭСМ-7, утвержденном Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.97 г. №78, которая одновременно является актом о приемке выполненных работ.

Расчет с исполнителем по Договору за предоставленные услуги строительной техники и работу машинистов за отчетный период производится Заказчиком ежемесячно на основании платежных документов Исполнителя, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

Датой оплаты Заказчиком платежей по договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Работы/услуги, обусловленные Договором № 64 от 01 декабря 2016 года и Приложением № 1 к нему, были оказаны Заказчику надлежащем образом и в установленные сроки, что подтверждается в том числе и акт выполненных работ № 357 от 31.12.2016 г., справка № 357 по форме ЭСМ-7 от 30.12.2016г., акт выполненных работ № 43 от 31.01.2017 г., справка № 43 по форме ЭСМ-7 от 31.01.2017 г., акт выполненных работ № 88 от 28.02.2017 г., справка №88 по форме ЭСМ-7 от 28.02.2017 г., акт выполненных работ № 113 от 31.03.2017 г., справка № 113 по форме ЭСМ-7 от 31.03.2017 г., акт выполненных работ № 195 от 30.04.2017 г., справка № 195 по форме ЭСМ-7 от 30.04.2017 г., акт выполненных работ № 254 от 31.05.2017 г., справка № 254 по форме ЭСМ-7 от 31.05.2017 г., акт выполненных работ № 332 от 30.06.2017 г., справка № 332 по форме ЭСМ-7 от 30.06.2017 г. подписанными обеими сторонами (Заявителем и Исполнителем) Договора.

Согласно положениям Договора, а так же Приложению № 1 к Договору и вышеперечисленным актам выполненных работ, справок по форме № КС-2, справок по форме № КС-3, справок по форме ЭМС-7, Заказчик должен был уплатить Исполнителю 3 398 600 рублей 00 копеек, в срок указанный пунктом 4.6. настоящего договора. По состоянию на 04.05.2017г. на расчетный счет Исполнителя поступила сумма 1 846 720 рублей 00 копеек. Сумма задолженности составила 1 551 880 рублей 00 копеек.

После обращения истца с иском в суд задолженность была частично оплачена ответчиком и на момент рассмотрения спора составила 6 618 100 руб. 00 коп.

Согласно ст. 632 ГК РФ, По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование истца о взыскании долга в размере 6 618 100 руб. 00 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

В соответствии с п. 5.6. Договоров, если Заказчиком нарушены сроки оплаты, предусмотренные настоящим договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,2 % (ноль целых дух десятой) процента от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Соглашением сторон в соответствии со ст. ст. 421, 431 ГК РФ стороны вправе предусмотреть размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

Расчет пени судом проверен арифметически и методологически выполнен верно.

Требование истца о взыскании пени в сумме 635 278 руб. 08 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в  соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

Уплаченная по платежному поручению № 529 от 16.08.2017 года, госпошлина в сумме 13 609 руб. 11 коп., в связи с уменьшением суммы исковых требований, подлежит возврату Истцу.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-425, 431-434, 606-608, 610, 614, 632-641 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 155, 156, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Заявление истца об уменьшении размера исковых требований до 7 253 378 руб. 08 коп., в том числе: 6 618 100 руб. 00 коп. – долга, 635 278 руб. 08 коп. – неустойки принять.

Взыскать с ООО " СМУ 15 " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Строительная компания " МСМ-1 " (ОГРН 

<

***>) 7 253 378 руб. 08 коп., в том числе: 6 618 100 руб. 00 коп. – долга, 635 278 руб. 08 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 59 266 руб. 89 коп.

Требования истца о взыскании долга в сумме 2 000 000 руб. 00 коп., неустойки в сумме 521 888 руб. 52 коп. оставить без удовлетворения.

Возвратить ООО " Строительная компания " МСМ-1 " (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета РФ, уплаченную по платежному поручению № 529 от 16.08.2017 года, госпошлину в сумме 13 609 руб. 11 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов