ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 182832/23-67-1505

г. Москва

21 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения оглашена 06 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2023 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПСТРОЙИНВЕСТ" (121108, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, ГЕРАСИМА КУРИНА УЛ., Д. 10, К. 1, ПОМЕЩ. I, КОМ./КАБ. 11/208, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.08.2018, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙМЕКС" (420061, РОССИЯ, РЕСП. ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ Г.О., КАЗАНЬ Г., НИКОЛАЯ ЕРШОВА УЛ., Д. 1А, ПОМЕЩЕНИЕ 739, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.10.2013, ИНН: 

<

***>) о взыскании 10 063 022,29 руб., 

при участии:

от истца: ФИО2, дов. от 24.03.2023г.

от ответчика: ФИО3, пред. паспорт 

 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПСТРОЙИНВЕСТ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙМЕКС" (далее – ответчик) о взыскании стоимости переданного давальческого материала по договорам № 17-06-2019/КСИ от 17.06.2019 г., № КСИ-09-08/2019-МТЦ от 09.08.2019 г., № КСИ-02-09/2020 от 02.09.2020 г., № КСИ-01-11-2020/ЖДЗ от 07.12.2020 г., № КСИ-08-06/2020 от 08.06.2020 г. в размере 9 958 660 руб. 98 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.06.2023 по 07.08.2023 в размере 104 361 руб. 31 коп., а так же с 08.08.2023 по дату фактического исполнения обязательства.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «КапСтройИнвест» (далее - Истец / Генподрядчик) и ООО «Раймекс» (далее - Ответчик / Субподрядчик) заключены договоры (далее - Договоры):

№ 17-06-2019/КСИ от 17.06.2019 г. (далее - Договор №1), согласно которому Субподрядчик принимает на себя обязательства в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить отделочные работы на объекте: Жилой дом по адресу: г. Москва, ТИНАО, пос. Внуковское, деревня «Рассказовка» согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат фактически выполненных работ и оплатить их.

№ КСИ-09-08/2019-МТЦ от 09.08.2019 г. (далее - Договор №2). согласно которому Субподрядчик принимает на себя обязательства в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить отделочные работы на объекте: Многофункциональный торговый комплекс по адресу: г. Москва, ТИНАО, пос. Внуковское, деревня «Рассказовка» согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат фактически выполненных работ и оплатить их.

№ КСИ-02-09/2020 от 02.09.2020 г. (далее - Договор №3), согласно которому Субподрядчик принимает на себя обязательства в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работы по демонтажу/монтажу вентилируемого фасада и монтажу молниезащиты на объекте: «Жилой дом № 1», расположенного по адресу: г. Москва, ТИНАО. пос. Внуковское, деревня «Рассказовка». Боровское ш.. 28 км., вл. 1, 3/У 13/9А. а Генподрядчик обязуется принять результат фактически выполненных работ и оплатить их.

№ КСИ-01-11-2020/ЖДЗ от 07.12.2020 г. (далее - Договор №4), согласно которому Субподрядчик принимает на себя обязательства в сроки и на условиях настоящего Договора и проектной документации (шифр проекта: 04/04-3-Р-ЖДЗ-КЖ1) выполнить работы по горизонтальной и вертикальной гидроизоляции на Объекте: г. Москва. ТИНАО, пос. Внуковское, ТПУ «Рассказовка», 3/У, 13/9А, а Генподрядчик обязуется принять результат фактически выполненных работ и оплатить их.

№ КСИ-08-06/2020 от 08.06.2020 г. (далее - Договор №5), согласно которому Субподрядчик принимает на себя обязательства в сроки и на условиях настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) выполнить комплекс работ по кладке наружных и внутренних стен из кирпича и пеноблока на Объекте: г. Москва, ТИНАО, поселение Внуковское, деревня «Рассказовка» (Жилой дом № 2), а Генподрядчик обязуется принять результат фактически выполненных работ и оплатить их.

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами строительного подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 22.2 Договоров Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке направив Субподрядчику уведомление о расторжении Договора не менее чем за 15 календарных дней предполагаемой даты расторжения Договора в случае нарушения по вине Субподрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличения срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

В связи с тем, что Субподрядчик неисполнением обязательств и увеличением срока окончания строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) дней, ООО «КапСтройИнвест» было принято решение о расторжении Договора.

Согласно п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Договоры прекращаются с момента получения данного уведомления.

16.12.2021 г. ООО «КапСтройИнвест» направило в адрес ООО «Раймекс» Уведомление о расторжении Договоров исх. №03-21-281 от 15.11.2021 г. (РПО 11936152012386). Почтовое отправление с уведомлением о расторжении Договоров не получено ООО «Раймекс», возвращено отправителю 21.01.2022 г. ввиду истечения срока хранения.

Таким образом, Договоры № 17-06-2019/КСИ от 17.06.2019 г., № КСИ-09-08/2019-МТЦ от 09.08.2019 г., № КСИ-02-09/2020 от 02.09.2020 г., № КСИ-01-11-2020/ЖДЗ от 07.12.2020 г., № КСИ-08-06/2020 от 08.06.2020 г. - расторгнуты с 21.01.2022 г.

• Ответчик безосновательно удерживает переданный Истцом давальческий материал и оборудование.

В рамках Договоров № 17-06-2019/КСИ от 17.06.2019 г.. № КСИ-09-08/2019-МТЦ от 09.08.2019 г., № КСИ-02-09/2020 от 02.09.2020 г., № КСИ-01-11-2020/ЖДЗ от 07.12.2020 г., № КСИ-08-06/2020 от 08.06.2020 г. - ООО «КапСтройИнвест» в пользу ООО «Раймекс» был передан давальческий материал и оборудование.

Ответчик не предоставил Истцу отчет об использовании давальческого материала и оборудования в общем количестве 126 643,238 единиц, общей стоимостью 8 298 884,15 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономично и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

В силу п. 1 ст. 713 ГК РФ подрядчик обязан по окончании работ предоставить генеральному строительному подрядчику отчет о расходовании МТР.

В соответствии со ст. 714 ГК РФ подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

В силу п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1105 ГК РФ, в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Исходя из того, что договорные отношения между ООО «КапСтройИнвест» и ООО «Раймекс» расторгнуты, у ООО «Раймекс» отсутствуют правовые основания удерживать переданные ООО «КапСтройИнвест» материалы и оборудование в общем количестве 126 643,238 единиц, общей стоимостью 8 298 884,15 рублей.

В данном случае Ответчик не осуществил возврат предоставленных Истцом давальческих материалов и оборудования, не использованных при производстве работ, такие материалы и оборудование стоит считать реализованными Ответчику по стоимости передачи с начислением НДС 20% в размере 1 659 776,83 рублей, в связи с чем Ответчик обязан произвести их оплату.

Таким образом, на ООО «Раймекс» возлагается обязанность по выплате в пользу ООО «КапСтройИнвест» стоимости переданного давальческого материала, а также НДС 20% в общем размере 9 958 660,98 рублей.

На основании статьи 728 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

По использованию давальческого материала Подрядчик не отчитался, стоимость материалов не компенсировал.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права. 

На основании изложенного, требование истца о взыскании стоимости переданного давальческого материала по договорам № 17-06-2019/КСИ от 17.06.2019 г., № КСИ-09-08/2019-МТЦ от 09.08.2019 г., № КСИ-02-09/2020 от 02.09.2020 г., № КСИ-01-11-2020/ЖДЗ от 07.12.2020 г., № КСИ-08-06/2020 от 08.06.2020 г. в размере 9 958 660 руб. 98 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.06.2023 по 07.08.2023 в размере 104 361 руб. 31 коп., а так же с 08.08.2023 по дату фактического исполнения обязательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

В соответствии с п.48 Постановления Пленума Верховного суда от 24 марта 2016 г. № 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.06.2023 по 07.08.2023 в размере 104 361 руб. 31 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 08.08.2023 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемых на сумму долга в размере 9 958 660 руб. 98 коп.  подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙМЕКС" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН: 

<

***>) стоимость переданного давальческого материала по договорам № 17-06-2019/КСИ от 17.06.2019 г., № КСИ-09-08/2019-МТЦ от 09.08.2019 г., № КСИ-02-09/2020 от 02.09.2020 г., № КСИ-01-11-2020/ЖДЗ от 07.12.2020 г., № КСИ-08-06/2020 от 08.06.2020 г. в размере 9 958 660 (девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 98 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.06.2023 по 07.08.2023 в размере 104 361 (сто четыре тысячи триста шестьдесят один) руб. 31 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 08.08.2023 по дату фактического исполнения обязательств, начисляемых на сумму долга в размере 9 958 660 руб. 98 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 73 315 (семьдесят три тысячи триста пятнадцать) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев