Арбитражный суд Республики Тыва

Кочетова ул., д. 91, г. Кызыл, 667000, тел. (39422) 2-11-96 (факс) 

http://www.tyva.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А69-1115/2021

г. Кызыл

08 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения оглашена 28 октября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 08 ноября 2021 года.

Арбитражный суд Республики Тыва в составе: судьи Чигжита Ш.С., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казённого учреждения Республики Тыва "Госстройзаказ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ВИКСАР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1608707 руб. 40 коп.,

при участии в заседании: 

ФИО2 - представителя истца по доверенности от 11.08.2021,

установил:

государственное казённое учреждение Республики Тыва "Госстройзаказ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с иском, уточнённым 17.09.2021, к обществу с ограниченной ответственностью "ВИКСАР" (далее – ответчик) о взыскании 1608707 руб. 40 коп., в том числе 73644 руб. 63 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств за период с 01.12.2020 по 15.09.2021 и 1535062 руб. 77 коп. и штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 5% от цены контракта по государственному контракту от 23.01.2019 №2-19 на приобретение 12 жилых благоустроенных помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва.

Дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие представителя ответчика, извещённого надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель истца поддержала уточнённые исковые требования.

Как установлено судом и следует из материалов дела, на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), протокола электронного аукциона № 0112200000818004343 между истцом (Покупатель) и ответчиком (Продавец) заключён государственный контракт от 23.01.2019 № 2-19 в редакции дополнительного соглашения от 04.03.2019.

Согласно предмету контракта, Продавец обязуется передать в государственную собственность жилые помещения экономического класса - квартиры площадью не менее 48 квадратных метров в количестве 12 единиц, расположенных в границах территории округа «п. Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна Республики Тыва» («Квартира»), а Покупатель обязуется принять Квартиры и оплатить обусловленную контрактом цену.

Продавец обязан передать Квартиры покупателю в срок до 30.11.2019 (пункт 1.7 контракта). 

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и положениями настоящего контракта и составляет 30 701 255 руб. 40 коп. (пункт 2.1 контракта).

Согласно пункту 2.3 контракта оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет продавца платежными поручениями в следующем порядке:

- авансовый платеж предусмотрен в размере 30% от стоимости государственного контракта в течение 15 дней с момента поступления авансовых средств на счет покупателя от главного распорядителя бюджетных средств;

а) в случае передачи готовых квартир (купли-продажи объекта недвижимости):

•  расчет производится покупателем в течение 30 дней с момента регистрации перехода прав на жилые помещения в государственную собственность и подписания сторонами акта приема - передачи жилых помещений;

б) в случае передачи квартир путем строительства в будущем (договор строительного подряда): 

• расчет производится ежемесячно в течение 30 дней после представления подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на сумму за вычетом 30 % процента в счет частичного погашения авансового платежа до полного освоения полученного аванса. Если в строящемся объекте недвижимости часть помещений принадлежит или будет принадлежать продавцу или третьим лицам, оплата актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 производится пропорционально общей площади квартир покупателя. Оплата по формам № КС-2 и № КС-3 в суммарном итоге не может превышать 95 % цены контракта.

- окончательный расчет в размере 5 % от цены контракта производится Покупателем в течение 30 дней с момента регистрации перехода прав на жилые помещения в государственную собственность и подписания сторонами акта приема-передачи жилых помещений.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта квартира передается продавцом в течение двух дней со дня передачи документов на государственную регистрацию перехода права собственность Покупателю. Продавец передает квартиру по Акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями Сторон. Форму Акта приема-передачи определяет покупатель (пункт 4.2 государственного контракта).

В разделе 6 контракта Стороны предусмотрели ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 6.2 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня), причем санкции применяются с учетом взаимных зачетов.

Пунктом 6.5 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 535 062 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч шестьдесят два) рублей 77 копеек, определенном постановлением № 1042, составляющий 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Согласно пункту 6.7 контракта за просрочку исполнения Контракта, Продавец уплачивает Покупателю пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения продавцом (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных продавцом (подрядчиком, исполнителем).

На основании платежных поручений от 20.03.2019 № 49976 на 3744477 руб. 42 коп., № 49977 на 5465899 руб. 20 коп., от 16.08.2019 № 644431 на 6017501 руб. 41 коп., от 07.11.2019 № 990898 на 1777758 руб. 50 коп., от 24.12.2019 № 334267 на 4331949 руб. 82 коп., от 08.04.2020 № 779923 на 1592652 руб. 60 коп., от 21.07.2020 № 301758 на 3107722 руб. 80 коп., от 13.08.2020 № 406660 на 626555 руб. 08 коп., от 18.08.2020 № 416939 на 77824 руб. 82 коп., от 12.11.2020 № 814614 на 1070202 руб. 70 коп., от 13.04.2020 № 737560 на 796817 руб., истец перечислил ответчику оплату по контракту за приобретение жилых благоустроенных помещений в общей сумме 28 609 361 руб. 31 коп.

Истец представил подписанные сторонами контракта справки формы КС-3 от 24.07.2019 № 1 на 8596430 руб. 59 коп., от 16.10.2019 № 2 на 2539655 руб., от 12.11.2019 № 1 на 6188499 руб. 75 коп., всего на 17324585 руб. 34 коп.

Требованием от 01.12.2020 истец указал ответчику, что по состоянию на 25.11.2020 квартиры им не переданы, в связи с чем, истцом начислена неустойка в виде пени в размере 1944412 руб. 84 коп. и штрафа в размере 5% от цены контракта 1535062 руб. 77 коп. истец предложил уплатить пени и штраф до 07.12.2020.

Истец со ссылкой на то, что ответчик обязательства по контракту не исполнил и квартиры не передал, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Оценив представленные доказательства, арбитражный суд удовлетворяет исковые требования по следующим основаниям.

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Материально-правовым требованием настоящего иска является требование о взыскании неустойки в связи с нарушением выполнения условий государственного контракта.

Между сторонами заключен договор купли-продажи вещи в будущем.

Правоотношения сторон регулируются главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом № 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации, по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем", предметом договора купли-продажи может быть как товар, имеющийся в наличии у продавца в момент заключения договора, так и товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара (договор купли-продажи будущей вещи).

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из частей 5, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В пункте 36 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, разъяснено, что пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.

Из материалов дела следует, что ответчик до настоящего времени условия контракта от 23.01.2021 № 2-19 не исполнил и не сдал истцу в соответствии с условиями контракта, жилые благоустроенные помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, чем нарушил предусмотренный пунктом 1.7 контракта срок передачи квартир, поскольку по условиям контракта квартиры должны быть переданы до 30.11.2019.

Согласно пункту 6.7. контракта, за просрочку исполнения Контракта, Продавец уплачивает Покупателю пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения продавцом (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных продавцом (подрядчиком, исполнителем).

За нарушение обязательства истец на основании пунктов 6.5., 6.7. контракта начислил ответчику неустойку в виде пени в размере 73644 руб. 63 коп. за период с 01.12.2019 по 15.09.2021, используя ключевую ставку по периодам действия на сумму долга 657884 руб. 03 коп., а также в виде штрафа в размере 1 535 062 руб. 77 коп.

Суд принимает представленный истцом расчёт пени и штрафа. 

На основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требовании и возражений.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Свою процессуальную обязанность по представлению отзыва на исковое заявление ответчик не исполнил. Ответчик несёт риск наступления последствий совершения или несовершения процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, обстоятельства, на которые ссылается истец, считаются признанными ответчиком.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств надлежащего исполнения условий контракта, суд удовлетворяет требование истца о взыскании с ответчика 73644 руб. 63 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 23.01.2019 №2-19 за период с 01.12.2020 по 15.09.2021 и 1535062 руб. 77 коп. штрафа за неисполнение обязательств по контракту в размере 5% от цены контракта, всего 1608707 руб. 40 коп.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Определением от 04.05.2021 истцу предоставлялась отсрочка уплаты государственной пошлины. 

С учётом результата рассмотрения спора, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Тыва 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВИКСАР" (дата регистрации: 04.09.2013, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 

<

...> этаж 3, офис 306) в пользу государственного казённого учреждения Республики Тыва "Госстройзаказ" (дата регистрации: 19.12.2011, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 

<

...> этаж 2 кабинет 10) 73644 руб. 63 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 23.01.2019 №2-19 за период с 01.12.2020 по 15.09.2021 и 1535062 руб. 77 коп. штрафа за неисполнение обязательств по контракту в размере 5% от цены контракта, всего 1608707 руб. 40 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВИКСАР" государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 29087 руб.

Решение может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Тыва.

СудьяШ.С.Чигжит