ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-75421/20-2-390

г. Москва

21 сентября 2020г.

Резолютивная часть решения объявлена 10 сентября 2020г.

Полный текст решения изготовлен сентября 21 сентября  2020г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи - Махлаевой Т.И. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» 

к ответчику: ООО «Бизнес-Трейд»

о расторжении договора от 07.11.2016 г. № Ю8-16-302-17554(975146) 

при участии:

От заявителя: ФИО2 (паспорт, диплом, дов. От 17.04.19 г.) 

От ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО «Селенгинский завод железобетонных изделий» с исковым заявлением в котором просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.11.2016г. №Ю8-16-302-17554(975146), заключенный между ООО «Бизнес-Трейд» и ПАО «МОЭСК».

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, не явился,  отзыва на иск не представил, требования не оспорил.

В соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ суд  рассматривает дело в отсутствие ответчика по имеющимся документам.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела 07.11.2016г. между ПАО «МОЭСК» (работает под брендом «Россети Московский регион») и ООО «Бизнес - Трейд» заключен договор технологического присоединения №Ю8-16-302-17554(975146).

В соответствии с п. 2. Договора: Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения земельного участка без строения, расположенного(ой) (который(ая) будет располагаться) по адресу: 140000, Московская обл, Ленинский р-н, Молоковское с/п, западнее д. Андреевское, кадастровый номер: 50:21:0060403:4170.

В соответствии с п. 11 Договора внесение платы (всего: 6 024 385,69 рублей) за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

-Платеж 10% - 602 438,57 рублей в течение 15 дней со дня заключения Договора;

-Платеж 30% - 1 807 315,71 рублей в течение 60 дней со дня заключения Договора;

-Платеж 20% - 1 204 877,13 рублей в течение 180 дней со дня заключения Договора;

-Платеж 30% - 1 807 315,71 рублей в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

-Платеж 10% - 602 438,57 рублей в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Заявителем договорные обязательства по оплате не исполнялись надлежащим образом, в связи с чем, сетевая организация вынуждена была обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением.

Исковые требования ПАО «МОЭСК» удовлетворены в полном объеме, в связи с чем, ООО «Бизнес-Трейд» (ИНН 

<

***>) перед ПАО «МОЭСК» имеет неисполненные обязательства в размере 2 469 611 руб. 07 коп. согласно решению Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-138344/17-41-1301 от 10.10.2017г.

Определением Арбитражного суда Москвы от 12.03.2019г. по делу № А40-283645/18 в отношении ООО «Бизнес-Трейд» (127473, 

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Москвы от 18.10.2019г. по делу № А40-283645/18 в отношении ООО «Бизнес-Трейд» (127473, 

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) введена процедура конкурсного производства.

По общему правилу, установленному статьей 63 Закона о банкротстве, с даты вынесения арбитражным судом определения о введения наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного законом порядка, рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о банкротстве и удовлетворяются в общем порядке, предусмотренном статьями 134, 142 названного Закона.

Определением Арбитражного суда Московской области по Делу № А40-283645/18- 36-251 «Ф» требования ПАО «МОЭСК» к должнику ООО «Бизнес-Трейд» признаны обоснованными, включены в реестр требований кредиторов должника в размере 2 469 611 руб. 07 коп. в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Осуществление фактического технологического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям может быть осуществлено Сетевой организацией только после исполнения Заявителем своих обязательств по выполнению технических условий.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Пунктом 16(5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической эгнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее - Правила ТП) закреплено право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении Договора в случае, нарушения заявителем установленного Договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении следующего обстоятельства:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Неотъемлемой частью и приложением к Договору являются технические условия от 07.11.2016 №Ю8-16-202-19630(975146/102/Ю8) (далее - Технические условия), предусматривающие выполнение мероприятий по технологическому присоединению, как со стороны Сетевой организации, так и со стороны Заявителя.

Однако, до настоящего времени, Заявителем не выполнены мероприятия, предусмотренные ТУ от 07.11.2016 №Ю8-16-202-19630(975146/102/Ю8).

В настоящее время срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 27.10.2018., а по состоянию на февраль 2020 Заявитель не направил в адрес Сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, и надлежащим образом не исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение, уменьшив размер платы и сорвав сроки её внесения, предусмотренные Договором.

ПАО «МОЭСК» в адрес ООО «Бизнес-Трейд» совместно с претензией от 04.03.2020 г. № ЮЭС/05/179 направлено соглашение о расторжении Договора ТП, акт сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг, фактически понесенных затрат, связанных с исполнением обязательств по Договору ТП со стороны сетевой организации) с требованием возместить разницу, между фактически понесёнными затратами Сетевой организации и суммой, оплаченной по Договору в размере 4 583 146, 51 руб. по реквизитам указанным в счёте на оплату, из которой:

-стоимость фактических затрат на подготовку технических условий: 56 616,00 руб.

-стоимость затрат на выполнение технических условий (акты по форме КС): 5 128 969,08 руб.

-сумма оплаты по Договору: 602 438,57 руб.

Однако до настоящего времени ответчиком направленные документы не подписаны, экземпляры ПАО «МОЭСК» в установленный срок не возвращены. Претензия в добровольном порядке не удовлетворена. Заявлений о расторжении Договора от конкурсного управляющего в рамках полномочий, установленных ст. 19 ФЗ «О банкротстве» в адрес ПАО «МОЭСК» не поступало.

При изучении представленных доказательств, руководствуясь статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценив согласно положениям статей 65, 68, 71, 75 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства во взаимосвязи и совокупности, суд пришел к выводу о том, что ответчиком нарушены существенные условия договора.

На основании изложенного требования истца о расторжении договора являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310 ГК РФ, ст.ст.  104, 110, 121, 123, 156, 167-171,319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.11.2016г. №Ю8-16-302-17554(975146), заключенный между ООО «Бизнес-Трейд» и ПАО «МОЭСК».

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ТРЕЙД" (127473, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО, 19/15, СТР.1, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.01.2010, ИНН: 

<

***>) в пользу ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, 

<

...>, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: 

<

***>) расходы по госпошлине в сумме 6 000,00 руб. (шесть тысяч рублей).

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья                                                                                          Махлаева Т.И.