23/2019-249126(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-34557/2019

город Новосибирск

26 ноября 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курмыгиной А.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску администрации города  Барабинска Барабинского района Новосибирской области,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания»,  г. Новосибирск,  

об обязании устранить недостатки. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания»  (ОГРН 1155476026463) устранить дефекты асфальтового покрытия дворовых  проездов территории многоквартирного дома по адресу: г. Барабинск, ул. Сельская,  дом 6, в период гарантийного срока, в весенний период 2020 года:  

1. дворовой проезд, ориентир подъезд № 2- № 4 продольные и поперечные  трещины асфальтового покрытия шириной раскрытия 1-2 мм;  

2. дворовой проезд, ориентир подъезд № 4- № 8 продольные и поперечные  трещины асфальтового покрытия шириной раскрытия 4-5 мм;  

3. дворовой проезд, ориентир вход в подъезд № 6 поперечная трещина  асфальтового покрытия шириной раскрытия 1-2 мм;  

4. дворовой проезд, ориентир подъезд № 6- № 7 в месте образования продольной  трещины асфальтового покрытия с шириной раскрытия 4-5 мм образовались  неровности асфальтового покрытия;  

5. дворовой проезд, ориентир парковочные места выкрашивание поверхности  асфальтового покрытия.  

6. отсутствие уклона асфальтового покрытия. 

7. застой воды на въезде на территорию многоквартирного дома, а также вдоль  бордюрного камня.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания» (ОГРН 1155476026463) в доход федерального бюджета Российской  Федерации 6000 рублей государственной пошлины по иску.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 

Дата 06.08.2019 6:46:35

Кому выдана Серёдкина Екатерина Леонидовна