АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-32991/2022

Нижний Новгород                                                                                                    24 января 2023 года

Резолютивная часть объявлена 16.01.2023

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-827) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1

при участии представителей сторон:

от истца: до перерыва- ФИО2 (паспорт), ФИО3 (доверенность), после перерыва- не явились,

от ответчика: до перерыва- ФИО4 (доверенность), после перерыва- не явились,

от третьего лица: не явились,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о понуждении к исполнению обязательств по договору, 

при участии третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью "ТК-Энергострой" (ИНН: 

<

***>).

и   у с т а н о в и л:

иск заявлен о понуждении ПАО «Россети Центр и Приволжье» выполнить обязательства, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.01.2022 № 521087997, а именно осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств индивидуального предпринимателя ФИО2, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношении с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150кВт (изменяется точка); категория надежности: 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ.; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств- 0 кВт.

Требование основано на статьях 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее – Закон об электроэнергетике), п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее - Правила №861) и мотивировано необоснованным уклонением ответчика от технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям.

В судебном заседании  16.01.2023 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв на пять минут.

После перерыва судебное заседание продолжено.

Истец, ответчик и третье лицо явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Дело рассмотрено без участия представителей истца, ответчика и третьего лица по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик исковые требования  не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, заслушав до перерыва доводы истца и ответчика, суд установил следующее. 

Сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  от 12.01.2022 № 521087997, по условиям которого сетевая организация (ответчик) принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (истца), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт; категория надежности третья; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 150 кВт (от абонентских сетей, ввод демонтируется); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ., максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств -0 кВт.  Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункты 1,2 договора).

Технологическое присоединении необходимо для объекта (административное здание) заявителя,  по адресу: 

<

...>  (пункт 3 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению шесть месяцев со дня заключения договора (пункт 6 договора).

Согласно пункту 12 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 53/1 от 17.12.2020 и составляет 113 409 руб., в том числе НДС 20%  в сумме 18 901 руб.50 коп.

В соответствии с пунктом 13 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем и следующем порядке: 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета на оплату сетевой организацией; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня внесения первого платежа, но не позже дня фактического присоединения; 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Сторонами подписаны технические условия № ННЭ/21/Р21-02-173

Истец исполнил обязательства договора. По платежным поручениям от 12.01.2022 №3 и от 11.03.2022 №72 истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 45 363 руб. 60 коп.  

В нарушение условий договора (п.6 договора от 12.01.2022 № 521087997) ответчик технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя не  осуществил. 

Истец  направил ответчику претензию от 12.09.2022, в которой ПАО «Россети Центр и Приволжье» предложено исполнить обязательства, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.01.2022 № 521087997 и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих  устройств истца: административного здания, по адресу: 

<

...>.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» ответ на претензию не выслало.

До настоящего момента ответчиком не осуществлено фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям, что явилось основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

Правила №861 в пункте 7 устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). 

В соответствии с пунктом 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил №861).

Судом установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен договором от 12.01.2022 № 521087997 (п.6 договора) 6 месяцев со дня заключения договора.

Фактическое присоединение объекта  истца ответчиком в установленный срок не осуществлено.

В силу ст. 12 ГК РФ присуждение к исполнению обязанности в натуре является одним из предусмотренных законом способов защиты нарушенного права.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по  выполнению обязательств по договору по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца: административного здания,  по адресу: 

<

...>

Согласно пункту 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

В силу пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд не принимает довод ответчика о невозможности исполнения решения суда в заявленный истцом срок в связи с тем, что работы по строительству объектов занимаются подрядные организации. Ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих факт осуществления действий, направленных на исполнение принятых на себя обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.01.2022 № 521087997. Заключив договор па выполнение подрядных работ с третьим лицом, ответчиком в течение длительного времени не предпринималось никаких действий, направленных на понуждение третьего лица к его исполнению. Более того, правоотношения ответчика с третьими лицами не влекут приостановление, прекращение принятых договорных обязательств ответчика перед истцом в силу действующих норм гражданского законодательства.

Исходя из указанных разъяснений, с учетом характера заявленного требования, возможности ответчика по исполнению принятых обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, суд считает один месяц со дня вступления в законную силу решения суда  разумным и достаточным сроком для его исполнения. Вопреки доводам ответчика суд не установил обстоятельств для установлениях иных сроков исполнения.

Также отклоняются доводы ответчика, сводящиеся к тому, что подключение к электрическим сетям не было произведено ответчиком ввиду значительного объема работ, препятствующего своевременному исполнению договора и влекущего увеличение срока исполнения обязательств по договору. Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, или иных обстоятельств, препятствовавших исполнению своих обязательств в установленный договором срок, ответчик не представил. Необходимость осуществления для исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения ряда мероприятий, требующих определенных затрат времени, судом во внимание приняты быть не могут, поскольку данные обстоятельства не исключают его вину в неисполнении обязательств по договору перед истцом.

При указанных обстоятельствах требование истца подлежит удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся  на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170,319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

обязать публичное  акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) не позднее одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу выполнить обязательства, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.01.2022 № 521087997, заключенным с индивидуальным предпринимателем ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), а именно исполнить мероприятия по реализации технических условий № ННЭ/21/Р21-02-173 до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 

<

...>.

Взыскать с  публичного  акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  .

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья                                                     С.Г. Окутин