АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-10516/2023  « 07 » сентября 2023 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном дело заседании по исковому заявлению  Управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж, г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕНЬСТРОЙ», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2, представитель по доверенности № 8 от 09.01.2023,  диплом ВГУ № 3560 от 30.06.2004;  

от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен; 

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «КАМЕНЬСТРОЙ», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления решения в  законную силу устранить следующие недостатки выполненных работ:  

1. По муниципальному контракту от 02.08.2022 № 20221496:  

- ул. 9 Января, 150 - устранить шелушение - 15м2; разрушение кромки  по всей длине с двух сторон, ямочность (провал) - 30 м2; заделать место  вырубки, заделать швы раствором ;  

- ул. 9 Января, 200 - устранить шелушение вдоль кромки- 45м2; заделать  швы раствором; поднять борта -4м;  

- ул. Вольная, 44 (ул. Керамическая, 37) - устранить шелушение,  асфальто-бетонного покрытия у бортов - 20 м2, заделать швы раствором,  поднять борта -8м.  

2. По муниципальному контракту от 02.08.2022 № 20221495:  

- ул. 9 Января, 210 - устранить шелушение- 126 м2, заменить борта-6 м,  проседания асфальто-бетонное покрытия -20 м2, трещины в асфальтобетонном покрытии по всей длине; заделать швы раствором.  

- ул. Машиностроителей, 18 - устранить шелушение-5 м2 вдоль бортов и  у контейнерной площадки,  

- ул. Торпедо, 176 - устранить шелушение-5 м2, заменить борта-1 м;  заделать швы раствором по всей длине,  

- ул. 60 Армии, 3 (ул. 60 Армии, 5) - устранить шелушение-2 м2;  заделать место вырубки;  

- ул. Хользунова, 66-68 - заделать место вырубки. 

3. По муниципальному контракту от 09.08.2022 № 20221561:  

- ул. Хользунова, 76 - устранить шелушение-10 м2; заделать место  вырубки, проседания асфальто-бетонного покрытия-12 м2; заделать швы  раствором.  

4. По муниципальному контракту от 02.08.2022 № 20221497  

- ул. Беговая, 59 - устранить шелушение вдоль бортов; заделать швы  раствором,  

- ул. Карпинского, 33 - устранить шелушение по всей площади; заделать  швы раствором,  

- ул. Карпинского, 61 - устранить шелушение вдоль бортов; поднять  борта -5 м; заделать швы раствором; заделать место вырубки.  

5. По муниципальному контракту от 09.08.2022 № 20221511  

ул. Беговая, 203а - переделать въезд во двор - 96 м2; заменить борта -20  шт.; устранить шелушение вдоль бортов; заделать швы раствором,  

- ул. 45 Стрелковой дивизии, 263 - поднять борта - 6 шт.; устранить  шелушение вдоль бортов; заделать швы раствором,  

ул. 45 Стрелковой дивизии, 267 - устранить шелушение - 10 м2; поднять  борта —20 шт.; восстановить проседание асфальто-бетонного покрытия- 22  м2; заделать швы раствором.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «КАМЕНЬСТРОЙ», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета РФ 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Е.С. Завидовская