АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-3489/2020

г. Чебоксары

15 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 09 декабря 2020 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Павловой Е.В.

рассмотрев в заседании суда дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "АЛСНАБ"   

(424000, 

<

...>, каб. 301, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к муниципальному бюджетному учреждению "Управление жилищным фондом города Чебоксары"   

(428022, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 290255 руб. 39 коп.,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

Администрации города Чебоксары Чувашской Республики (428032, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

при участии: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 23.11.2020 (до перерыва)

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 24.03.2020,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "АЛСНАБ" обратилось в суд с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению "Управление жилищным фондом города Чебоксары" о взыскании 290255 руб. 39 коп. штрафов.

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по передаче для сноса многоквартирных жилых домов, в рамках контрактов от 08.02.2017 № Ф.2017.1049, № Ф.2017.1099, № Ф.2017.1108, № Ф.2017.1109, № Ф.2017.1110, № Ф.2017.1124, № Ф.2017.1127, № Ф.2017.1163, от 26.12.2017 № Ф.2017.585181, № Ф.2017.585340, № Ф.2017.585513, № Ф.2017.590116, от 26.02.2018 № Ф.2018. 64948.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 15 час. 00 мин. 09.12.2020.

Представитель истца в судебном заседании до перерыва исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании в удовлетворении требований просила отказать.

Третье лицо в судебное заседание не явилось.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствии истца и третьего лица.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд установил.

08 февраля 2017 между Муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик), заключен контракт № Ф.2017.1049, по условиям которого  заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Согласно пункта 1.2. контракта заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке предусмотренные контрактом.

Цена контракта составляет 697 000 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 2.2. контракта предусмотрено, что цена контракта включает в себя все расходы подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (пункт 2.3. контракта).

Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 30 дней на основании подписанных сторонами акта о приёмке выполненных работ формы № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного подрядчиком. Авансирование не предусмотрено (пункт 2.4. контракта).

Согласно пункта 3.1.1. контракта подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего контракта.

Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом заказчику в течение 3 дней после приостановления выполнения работ.

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к контракту) (пункт 4.1. контракта).

Согласно пункта 4.2. контракта срок исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту с момента подписания контракта в течение 60 дней с момента заключения контракта.

После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом (пункт 4.4. контракта).

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заказчиком уведомления, указанного в п. 4.4 контракта, подрядчик представляет заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной календарным планом, и акт сдачи-приемки работ, подписанный подрядчиком, в 2 экземплярах (пункт 4.5. контракта).

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. (пункт 7.2. контракта).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 17 425 руб. 00 коп. (пункт 7.3. контракта).

Пунктом 9.3. контракта предусмотрено, что контракт может быть расторгнут: по соглашению сторон; по решению суда; в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 календарных дней с даты его получения (пункт 9.4. контракта).

Расторжение контракта производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении (пункт 9.5. контракта).

В случае расторжения контракта по инициативе любой из сторон, стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, исполненных подрядчиком (пункт 9.6. контракта).

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (пункт 9.7. контракта).

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (пункт 9.11. контракта).

Согласно пункта 12.1. контракта контракт действует с момента заключения его сторонами до 31.05.2017 г.

Согласно технического задания срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента заключения контракта. Условия выполнения работ: работы выполняются подрядчиком (субподрядчиком), его силами и средствами с учетом выполнения работ по сносу аварийных многоквартирных домов по мере их расселения, с последующим вывозом мусора и приведением территории в надлежащее состояние.

МБУ "Управление жилищным фондом города Чебоксары" письмом от 20.03.2017 № 23-0-730 просило приступить к сносу дома, расположенного по адресу: 

<

...> в срок до 27.03.2017.

Письмом от 23.05.2017 ответчик уведомил истца о том, что жилые помещения в мн6огоквартирных жилых домах № 2 по ул. Левобережная, № 15,30 по ул. Сосновская, № 35 по ул. Фучука, № 2 по ул. Пристанционная, № 74 по ул. Ашмарина г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу домов в срок до 26.05.2017 во исполнении контрактов от 08.02.2017 № Ф.2017.1049, № Ф.2017.1099, № Ф.2017.1108, № Ф.2017.1110, Ф.2017.1163.

Письмом от 02.10.2017 ответчик уведомил истца о том, что жилые дома № 2а по ул. Юности г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1049.

Письмом от 02.10.2017 ответчик уведомил истца о том, что жилые дома № 2а по ул. Юности г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1049.

Письмом от 02.10.2017 ответчик уведомил истца о том, что нежилые помещения дома № 2а по ул. Центральная по ул. Центральная в п. Октябрьская г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома с 10.04.2018 во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1049.

Письмом от 09.04.2018 ответчик уведомил истца о том, что жилые дома № 2а по ул. Юности г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1049.

08 февраля 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.1099 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена контракта составляет 336 000 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с момента подписания Контракта в течение 60 дней с момента заключения Контракта (пункт 4.2. контракта).

Пунктом 7.3. контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 8 400 руб. 00 коп.

01.06.2020 стороны подписали соглашение о расторжении контракта № Ф.2017.1099 от 08.02.2017.

Письмом от 14.06.2017 ответчик уведомил истца о том, что жилые дома № 47 по ул. Родниковая г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1099 в срок до 19.08.2017.

08 февраля 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.1108 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 438 000 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 10950 руб. 00 коп.

19.11.2019 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2017.1108.

Письмом от 28.03.2019 ответчик сообщил истцу, что обстоятельства препятствующие сносу дома № 1б по ул. Усадская г. Чебоксары устранены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1108 в срок до 13.04.2019.

08 февраля 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.1109 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 614 000 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 15350 руб. 00 коп.

Письмом от 30.01.2018 ответчик сообщил, что дома освобождены и просил приступить к сносу домов во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1109 с 01.02.2018 и завершить работы до 02.03.2018.

08 февраля 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.1110 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> Ю. Фучука, 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 674 000 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 16850 руб. 00 коп.

18.11.2019 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2017.1110.

Письмом от 22.11.2017 ответчик сообщил истцу, что жилые помещения дома №  34 по ул. Ю.Фучука г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1110 не позднее 24.11.2017.

Письмом от 12.02.2018 ответчик сообщил истцу, что жилые помещения дома №  36 по ул. Ю.Фучука г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1110 не позднее 13.12.2018.

08 февраля 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.1124 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> ФИО3, д. 16, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 502405 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 12560 руб. 13 коп.

Письмом от 25.01.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 16/31 (16) по ул. ФИО3 в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1124 и завершить работы до 14.02.2018.

Письмом от 08.05.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения в доме № 29 по ул. Ашмарина г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1124 и завершить работы до 23.05.2018.

Письмом от 26.04.2019 ответчик уведомил истца, что жилые помещения в доме № 15 по ул. Бичурина г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1124 и завершить работы до 14.05.2018.

14.11.2019 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2017.1124.

08 февраля 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.1127 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 386000 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 9650 руб. 00 коп.

21.11.2019 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2017.1127.

Письмом от 28.12.2017 ответчик уведомил истца, что жилые помещения домов № 1а и 1б по ул. Котовского в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу домов во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1127.

08 февраля 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.1163 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 426000 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта, что составляет 10650 руб. 00 коп.

Письмом от 09.01.2018 ответчик уведомил истца, что согласие собственника дома № 17/19 по ул. Клубная в г. Чебоксары получено и просит приступить к сносу домов во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1163 и завершить работы до 23.01.2017.

Письмом от 13.08.2019 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 102/64 по ул. Ашмарина в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу домов во исполнении контракта от 08.02.2017 № Ф.2017.1163, работы завершить до конца августа 2019.

28.05.2020 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2017.1163.

26 декабря 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.585513 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 1274224 руб. 92 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (пункт 4.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта за каждый факт заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб. 00 коп.

Согласно приложения № 2  к контракту выполнение работ в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта, кадастровые работы в течение 20 календарных дней с момента сноса МКД.

Письмом от 10.01.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 2 по ул. Бичурина в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585513.

Письмом от 26.04.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 10 по ул. Бичурина в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585513, работы завершить до 11.05.2018.

Письмом от 26.04.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 13 по ул. Бичурина в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585513, работы завершить до 21.06.2018.

21.11.2019 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2017.585513 от 26.12.2017.

26 декабря 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.585181 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> корп. а., ул. Пристанционная, д.4 корп. б, ул. Электрозаводская, д.5, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 663177 руб. 56 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (пункт 4.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта за каждый факт заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб. 00 коп.

Согласно приложения № 1  к контракту срок выполнения работ в течение 95 календарных дней с момента заключения.

Согласно приложения № 2  к контракту выполнение работ в течение 75 календарных дней с момента заключения контракта, кадастровые работы в течение 20 календарных дней с момента сноса МКД.

Письмом от 19.01.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения домов № 2 корп. а и № 4 корп. а по ул. Пристанционная в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585181.

Письмом от 30.01.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 4 корп. б. по ул. Пристанционная в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585181, работы завершить до 19.02.2018.

Письмом от 02.07.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 5 по ул. Электрозаводская в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585181, работы завершить до 20.07.2018.

Письмом от 22.07.2019 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 3 по ул. Пристанционная в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585181, работы завершить до 07.08.2019.

19.11.2019 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2017.585181.

26 декабря 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.585340 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 310000 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (пункт 4.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта за каждый факт заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб. 00 коп.

Согласно приложения № 1  к контракту срок выполнения работ в течение 65 календарных дней с момента заключения.

Согласно приложения № 2  к контракту выполнение работ в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта, кадастровые работы в течение 20 календарных дней с момента сноса МКД.

Письмом от 12.02.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 17 корп. 24 по ул. Репина в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585340.

18.11.2019 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2017.585340.

26 декабря 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2017.590116 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 858264 руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (пункт 4.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта за каждый факт заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб. 00 коп.

Согласно приложения № 1  к контракту срок выполнения работ в течение 80 календарных дней с момента заключения.

Согласно приложения № 2  к контракту выполнение работ в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта, кадастровые работы в течение 20 календарных дней с момента сноса МКД.

Письмом от 19.01.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 46 по ул. Серафимовича в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585116.

Письмом от 06.03.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 44 по ул. Серафимовича в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585116, работы завершить в срок до 21.03.2018.

Письмом от 12.02.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 48 по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2017 № Ф.2017.585116.

01.06.2020 стороны подписали соглашение о расторжении контракта №Ф.2017.590116 от 26.12.2017.

26 декабря 2017 г. между муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Алснаб» (Подрядчик) заключен контракт № Ф.2018. 64948 на аналогичных условиях, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> согласно Техническому заданию (Приложение №1 к контракту), которое является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет 56793 руб. 81 коп, НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Оплачивается заказчиком за счет субсидий из бюджета г. Чебоксары по адресной инвестиционной программе (пункт 2.1. контракта).

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (пункт 4.1. контракта).

Пунктом 7.3. контракта за каждый факт заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб. 00 коп.

Согласно приложения № 1  к контракту срок выполнения работ в течение 110 календарных дней с момента заключения.

Согласно приложения № 2  к контракту выполнение работ в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта, кадастровые работы в течение 20 календарных дней с момента сноса МКД.

Письмом от 22.05.2019 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома № 9 по ул. Энергетиков в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2018 № Ф.2018.64948, работы завершить до 07.06.2018.

Письмом от 19.09.2018 ответчик уведомил истца, что жилые помещения домах №  13 и № 18 по ул. Энергетиков в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2018 № Ф.2018.64948, работы завершить до 28.09.2018.

Письмом от 08.02.2019 ответчик уведомил истца, что согласие собственника дома № 20 по ул. Энергетиков в г. Чебоксары получено и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2018 № Ф.2018.64948, работы завершить до 25.02.2019.

Письмом от 22.05.2019 ответчик уведомил истца, что жилые помещения дома №  9 по ул. Энергетиков в г. Чебоксары освобождены и просит приступить к сносу дома во исполнении контракта от 26.12.2018 № Ф.2018.64948, работы завершить до 07.06.2018.

28.05.2020 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту № Ф.2018.64948.

В подтверждении выполнения работ по спорным контрактом, истец в материалы дела представил акты о приемке выполненных работ и затрат от 10.10.2017 № 2 на сумму 66161 руб. 22 коп., от 07.12.2018 № 49 на сумму 578571 руб. 76 коп., от 19.02.2020 № 1 на сумму 832 руб. 20 коп., от 10.10.2017 № 1 на сумму 49771 руб. 44 коп., от 31.05.2018 № 30 на сумму 1664 руб. 38 коп., от 04.10.2017 № 1 на сумму 67588 руб. 48 коп.,  от 08.09.2017 № 1 на сумму 95491 руб. 20 коп., от 08.09.2017 № 1 на сумму 50097 руб. 60 коп., от 08.11.2017 № 4 на сумму 101523 руб. 38 коп., от 21.11.2018 № 43 на сумму 936 руб. 23 коп., от 10.03.2020 № 3 на сумму 216186 руб. 06 коп. (ответчиком акт не подписан), от 22.05.2018 № 27 на сумму 280385 руб. 85 коп., от 22.05.2018 № 26 на сумму 332315 руб. 37 коп., от 12.01.2018 № 1 на сумму 210745 руб. 00 коп., от 21.11.2018 № 45 на сумму 1016 руб. 36 коп., от 22.09.2017 № 1 на сумму 240426 руб. 37 коп., от 21.11.2018 № 46 на сумму 1016 руб. 36 коп., от 26.11.2018 № 47 на сумму 210745 руб., от 06.06.2018 № 31 на сумму 153876 руб. 10 коп, от 25.09.2018 № 34 на сумму 723 руб. 79 коп., от 10.03.2020 № 2 на сумму 102394 руб. 14 коп. (акт ответчиком не подписан), от 12.10.2018 № 37 на сумму 187767 руб. 93 коп., от 22.10.2018 № 38 на сумму 723 руб. 79 коп., от 30.01.2018 № 9 на сумму 189155 руб. 03, от 30.01.2018 № 10 на сумму 189293 руб. 48 коп., от 28.11.2018 № 48 на сумму 2823 руб., от 31.05.2018 № 29 на сумму 1905 руб. 48 коп., от 09.10.2017 3 1 на сумму 119370 руб. 60 коп., от 22.01.2018 № 2 на сумму 174320 руб. 99 коп., от 20.03.2018 № 18 ан сумму 118584 руб. 38 коп., от 23.03.2018 № 20 на сумму 149956 руб. 36 коп., от 23.08.2018 № 21 на сумму 149678 руб. 02 коп., от 13.03.2019 № 3 на сумму 90562 руб., 51 коп., от 22.05.2018 № 22 на сумму 57648 руб. 64 коп., от 16.11.2018 № 41 на сумму 1534 руб. 35 коп., от 10.12.2018 № 50 на сумму 61021 руб. 15 коп., от 05.03.2018 № 15 на сумму 154464 руб. 86 коп., от 16.02.2018 № 14 на сумму 247317 руб. 96 коп., от 28.11.2018 № 47 на сумму 9845 руб. 17 коп., от 09.07.2018 № 32 на сумму 171309 руб. 83 коп., от 25.09.2018 № 35 на сумму 1409 руб. 04 коп., от 19.11.2018 № 42 на сумму 821834 руб. 1 коп., от 03.12.2018 № 48 на сумму 1409 руб. 03 коп., от 22.03.2018 № 19 на сумму 55048 руб. 26 коп., от 27.04.2018 № 23 на сумму 611534 руб. 15 коп., от 19.03.2018 № 17 на сумму 55700 руб. 61 коп. (ответчиком акт не подписан), от 18.12.2018 № 54 ан сумму 61452 руб. 24 коп., от 05.02.2019 № 1 на сумму 139993 руб. 36 коп., от 22.02.2019 № 2 на сумму 143707 руб. 88 коп.

Претензиями от 02.12.2019 истец просил ответчика выплатить неустойки за просрочку исполнения обязательства заказчиком, установленную в пункте 7.2. контрактов (т. 2 л.д. 99-114).

Полагая, что ответчик допустил нарушение обязательств по передаче домов к сносу в рамках спорных контрактов, истец обратился в суд с иском.

 Проанализировав сложившиеся между сторонами правоотношения сторон, суды пришли к правильному выводу о том, что они подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде и нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (часть 2 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться способами, предусмотренными законом или договором.

 В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

Согласно пункту 4.2 контрактов от 08.02.2017 № Ф.2017.1049, № Ф.2017.1099, № Ф.2017.1108, № Ф.2017.1109, № Ф.2017.1110, № Ф.2017.1124, № Ф.2017.1127, № Ф.2017.1163 срок исполнения подрядчиком своих обязательств установлен в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. По контрактам от 26.12.2017  № Ф.2017.585181 установлен в течение 95 календарных дней с момента заключения контракта, по контрактам № Ф.2017.585340, № Ф.2017.585513 установлен в течение 65 календарных дней с момента заключения контракта, по контракту № Ф.2017.590116 установлен в течение 80 календарных дней с момента заключения контракта, от 26.02.2018 № Ф.2018. 64948 установлен в течение 110 календарных дней с момента заключения контракта.

В силу пункта 7.3 контрактов от 08.02.2017 № Ф.2017.1049, № Ф.2017.1099, № Ф.2017.1108, № Ф.2017.1109, № Ф.2017.1110, № Ф.2017.1124, № Ф.2017.1127, № Ф.2017.1163 штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процентов цены контракта. Согласно пунктом 7.3. контрактов  от 26.12.2017 № Ф.2017.585181, № Ф.2017.585340, № Ф.2017.585513, № Ф.2017.590116, от 26.02.2018 № Ф.2018. 64948 установлено, что за каждый факт заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб. 00 коп.

Кроме того, пунктом 12.1 спорных контактов стороны согласовали конкретный срок действия контрактов.

При этом, спорные контракты не содержат положений, в соответствии с которыми определен срок передачи заказчиком подрядчику подлежащие сносу объекты. Напротив техническими заданиями к контрактам определено, что работы выполняются подрядчиком (субподрядчиком), его силами и средствами с учетом выполнения работ по сносу аварийных многоквартирных домов по мере их расселения, с последующим вывозом мусора и приведением территории в надлежащее состояние, в определенные сроки с момента заключения контрактов.

Следовательно, довод заявителя о том, что неисполнение истцом обязательств имеет прямую причинно-следственную связь с неисполнением обязательств ответчиком, выразившихся в несвоевременном предоставлении объектов для выполнения работ по сносу домов, является несостоятельным по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Согласно пункту 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В силу 1 статьи 9 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, указанных в данном пункте.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В силу пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). Реализация исполнителем своего права, предоставленного указанными положениями, должна сопровождаться четким и безоговорочным извещением заказчика о намерении исполнителя воспользоваться этим правом.

В рассматриваемом случае доказательств реализации соответствующего права на приостановление обязательства по выполнению работ в рамках спорных контрактов с доведением такой информации до ответчика истец в материалы дела не представил.

Как разъяснено в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

Протолковав условия договора по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимая во внимание буквальное значение содержания спорных контрактов, суд пришел к выводу, что условия контракта не содержат обязательства заказчика по передаче подрядчику объектов для выполнения работ в определенный срок. Факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, истцом не доказан, правовые основания для применения к заказчику штрафных санкций отсутствуют. Ответственность, установленная в пункте 7.3 контракта, у ответчика не наступила.

В силу изложенного, суд в удовлетворении требований о взыскании 290255 руб. 39 коп. штрафа отказывает.

Расходы по оплате государственной пошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса относит на истца.

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова