АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-9127/2023

г. Астрахань

23 июля 2024 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Абдуллина Р.Р. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яхъяевой Р.Ф.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Континет»  удовлетворить.  

Внести в муниципальный контракт от 05.07.2022 № 65 на выполнение работ по  разработке научно-проектной документации по объекту: «Проведение работ по замене  межэтажного перекрытия над нежилым помещением № 34, расположенным на первом этаже  здания-памятника культурного наследия регионального значения «Дом Сергеева, сер. XIX  в.», расположенного по адресу: ул. Кирова/ул. Ахматовская, 15/6 литера «А» в Кировском  районе г. Астрахани», следующие изменения:  

Пункт 2.2 Контракта изложить в следующей редакции: 

«Начало выполнения работ: с момента выдачи задания на проведение работ от  службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области –  «__»____________2022 года.  

Окончание работ: в течение 485 рабочих дней с момента начала выполнения работ.».  

Пункт 11.1 Контракта изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и  действует до 31.07.2024 года. При этом окончание указанного срока не освобождает  Стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий  настоящего Контракта.».  

Приложение № 3 к Контракту «График выполнения работ» изложить в новой  редакции:  

«Приложение № 3 к муниципальному контракту № 65 от «05» июля 2022 г. (в новой  редакции)  

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Выполнение работ по разработке научно-проектной документации на проведение  работ по замене межэтажного перекрытия над нежилым помещением № 34, расположенном  

на первом этаже здания-памятника культурного наследия регионального значения «Дом  Сергеева, сер. XIX в.», расположенного по адресу: ул. Кирова/ул. Ахматовская, 15/6 литера  

«А» в Кировском районе г. Астрахани. 

 № 

Наименование  работ  

Объем работ 

(тыс. руб.)  

2022-2024 год 

Август 2022 

по 

Август 

2023  

Сентябрь 2023 

«23»  Июля  

2024  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

Проектные работы 

809,562040  

2 

Прохождение  

историко-культурной 

экспертизы и  государственной  экспертизы  

213,47511  

ЗАКАЗЧИК: 

Начальник УКС Администрации города Астрахани _________________Е.В. ФИО1  

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «КОНТИНЕНТ» ________________Р.Р. ФИО2.» 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Р.Р. Абдуллин