269/2023-86886(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Саратов Дело № А57-12553/2022  229 марта 20238 года  марта 2023 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Государственное казенное учреждение Саратовской области  

«Управление капитального строительства» удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  

застройщик «Строительная компания «Система» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>): 

1. Устранить в рамках гарантийных обязательств по государственному контракту от  

13.05.2020 № 0860500000220000025 следующие недостатки работ, выполненных на объекте  

капитального строительства «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с  

универсальным залом 42x24 в г. Саратов», а именно: - протекает кровля в игровом зале; 

- у узлов диагональных связей ветровых балок отсутствуют 50% сварных швов;  - не окрашены металлоконструкции в игровом зале над балконом;  

- бетонная плитка на крыльце со стороны ул. Чернышевского отслаивается; 

все двери на улицу имеют плохой притвор и продуваются, отсутствует подпор  нижней защелки.  

2. Выполнить работы по устранению недостатков согласно следующей таблице:  

Перечень работ: 

Объём работ: 

 

Протекает кровля в игровом зале 

 

Произвести замену неправильно  

108 шт. 

 

установленных крепёжных саморезов на  

 

кровле 

 

Заделка повреждённых участков кровли  

0,5 м2 

 

Герметизация стыков на кровле  

5 м.п. 

 

Устройство примыкания к вентиляционному  

1 м.п. 

 

каналу 

 

Закрепить молниезащиту на кровле согласно  

230 шт. 

 

проектных решений 

 

У узлов диагональных связей ветровых балок отсутствуют 50% сварных швов  

 

Выполнить сварку элементов 

32 м.п. 

 

металлоконструкций 

 

Не окрашены металлоконструкции в игровом зале над балконом 

 

Зачистка поверхности от копоти 

1 м2 

 

Окраска поверхности эмалью ПФ-115 в два  

1 м2 

 

слоя 

 

Бетонная плитка на крыльце со стороны ул. Чернышевского отслаивается 

 

Демонтаж бетонной плитки 

45,2 м2 

 

Устройство бесшовного покрытия из 

 45,2 м2 

 

резиновой крошки толщиной 10 мм согласно 

 

проектных решений 

 

Все двери на улицу имеют плохой притвор и продуваются, отсутствует подпор 

 

нижней защёлки 

 

Выполнить дополнительное уплотнение для  

8 м.п. 

плотного прилегания дверей снизу 

 

3. Устранить недостатки, для исправления которых нужно выполнить наружные  

работы, в течение 30 дней с момента наступления благоприятных условий: температуры  воздуха не ниже +5°С и сухой погоды, но не позднее 30.05.2023.  

4. Устранить остальные недостатки в течение 30 дней с момента вступления решения  суда в законную силу.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Строительная компания «Система» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г. Саратов, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Строительная компания «Система» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г. Саратов, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТИЗА И  ОЦЕНКА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саратов, за проведение судебной  экспертизы денежные средства в размере 210 000 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области ФИО1  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.01.2022 5:05:24

 Кому выдана ФИО1