АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-11357/2024

г. Ярославль

28 декабря 2024 года

Резолютивная часть решения оглашена  18 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шмидько Е.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тищенко А.В.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Главстрой Волга» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Властстрой и Ко» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 430 000 руб.

при участии:

от истца - ФИО1 (представитель по доверенности от 09.01.2024, диплому);

от ответчика – не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой Волга» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Властстрой и Ко» о взыскании 1 430 000 руб. неустойки за нарушение сроков исполнения мирового соглашения за период с 17.07.2023 по 27.04.2024 с продолжением начисления неустойки до даты фактического исполнения мирового соглашения в размере 5000 руб. за каждый день просрочки.

Также в порядке распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, истец просит взыскать с ответчика 27 300 руб. расходов по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением суда от 29.07.2024 в деле произведена замена судьи Шадриновой Л.А. на судью Шмидько Е.Ю.

В ходе рассмотрения дела от ответчика поступил письменный отзыв. Требования не признает, сообщает о предъявлении результата работ истцу для принятия и об отказе истца от подписания актов выполненных работ.

В судебном заседании представитель истца поддержал требования в полном объеме, ходатайствовал о приобщении к материалам дела поступивших до отложения судебного разбирательства дополнительных доказательств по делу, а именно копий письма от 09.10.2024 № 2699, акта обследования от 03.10.2024, письма от 15.10.2024 № 76, акта о совершении исполнительских действий от 15.10.2024.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о дате и месте судебного разбирательства явку представителя в судебное заседание не обеспечил. В порядке ст. 156 АПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело без участия ответчика.

Рассмотрев материалы дела, суду становил следующее.

28.03.2023 определением Арбитражного суда Ярославской области по делу                             №А82-19563/2022 утверждено мировое соглашение, согласно которому ООО «Властстрой иКо» приняло на себя обязательства об устранении строительных недостатков/дефектов в выполненных ООО «Властстрой и Ко» в согласованные в мировом соглашении сроки.

В целях урегулирования спора по делу №А82-19563/2022 ООО «Властстрой и Ко» приняло на себя обязательство в срок до 14 июля 2023 года выполнить за свой счет работы по устранению недостатков/дефектов в выполненных ООО «Властстрой и Ко» работах и передать ООО «Главстрой Волга» по акту об устранении недостатков/дефектов, а именно:

1. ООО «Властстрой и Ко» приняло обязательство  в срок до 14 июля 2023 года безвозмездно устранить недостатки/дефекты работ, выполненных по договорам подряда № ГСВ-Д-19-51 от 12.04.2019 г. и № ГСВ-Д-19-52 от 12.04.2019 г. на многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...> (строительный адрес: г. Ярославль, Кировский район, квартал ул. Свободы, 

<

...> этап, строение 6), зафиксированные в акте осмотра декоративной отделки фасада жилого дома 2 этапа строительства (многоквартирный жилой дом стр. № 6) от 16.09.2022 г. и на схемах фасадов, в том числе:

- выполнить работы по устранению дефектов по отслоению штукатурного слоя на торцах плит перекрытия и на козырьках входных групп секций 1 и 2: очистить отслоившийся штукатурный слой с торцов плит перекрытия и на козырьках входных групп секций 1 и 2; выполнить работы по оштукатуриванию торцов плит перекрытия и козырьков входных групп секций 1 и 2 по сетке из стекловолокна ячейкой 10*10мм с предварительной грунтовкой поверхностей и окраской торцов плит с предварительной грунтовкой/оштукатуриванию декоративной штукатуркой торцов плит перекрытия в районе отделки фасадов декоративной штукатуркой согласно проекту 13/2017/6-АР5. Ориентировочная площадь поверхностей  – 127 м2.

2. ООО «Властстрой и Ко» приняло обязательство  в срок до 14 июля 2023 года безвозмездно устранить недостатки/дефекты работ, выполненных по договору подряда № ГСВ-Д-19-166 от 20.11.2019 г. на многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...> (строительный адрес: г. Ярославль, Кировский район, квартал ул. Свободы, 

<

...> этап, строение 1), зафиксированные в акте осмотра декоративной отделки фасада жилых домов 3 этапа строительства (многоквартирный жилой дом стр. № 1, стр. № 4) от 16.09.2022 г. и на схемах фасадов, в том числе:

- выполнить работы по устранению дефектов по отслоению штукатурного слоя на торцах плит перекрытия: очистить отслоившийся штукатурный слой с торцов плит перекрытия; выполнить работы по оштукатуриванию торцов плит перекрытия по сетке из стекловолокна ячейкой 10*10мм с предварительной грунтовкой поверхностей и окраской торцов плит с предварительной грунтовкой/оштукатуриванию декоративной штукатуркой торцов плит перекрытия в районе отделки фасадов декоративной штукатуркой согласно проекту 13/2017/3-АР5-1. Ориентировочная площадь поверхностей  –  172 м2

3. ООО «Властстрой и Ко» приняло обязательство  в срок до 14 июля 2023 года безвозмездно устранить недостатки/дефекты работ, выполненных по договору подряда № ГСВ-Д-19-167 от 20.11.2019 г. на многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...> (строительный адрес: г. Ярославль, Кировский район, квартал ул. Свободы, 

<

...> этап, строение 4), зафиксированные в акте осмотра декоративной отделки фасада жилых домов 3 этапа строительства (многоквартирный жилой дом стр. № 1, стр. № 4) от 16.09.2022 г. и на схемах фасадов, в том числе:

- выполнить работы по устранению дефектов по отслоению штукатурного слоя на торцах плит перекрытия: очистить отслоившийся штукатурный слой с торцов плит перекрытия; выполнить работы по оштукатуриванию торцов плит перекрытия по сетке из стекловолокна ячейкой 10*10мм с предварительной грунтовкой поверхностей и окраской, торцов плит с предварительной грунтовкой/оштукатуриванию декоративной штукатуркой торцов плит перекрытия в районе отделки фасадов декоративной штукатуркой согласно проекту13/2017/3-АР5-4. Ориентировочная площадь поверхностей  – 60 м2

ООО «Властстрой и Ко» приняло обязательство  в срок до 14 июля 2023 года безвозмездно устранить недостатки/дефекты работ, выполненных по договору подряда № ГСВ-Д-19-51 и № ГСВ-Д-19-52 от 12.04.2019 г. на многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...> (строительный адрес: г. Ярославль, Кировский район, квартал ул. Свободы, 

<

...> этап, строение 6), зафиксированные в акте осмотра декоративной отделки фасада жилого дома 2 этапа строительства (многоквартирный жилой дом стр. № 6) от 16.09.2022 г. и на схемах фасадов, в том числе:

- выполнить работы по устранению дефектов по устройству деформационных швов: произвести демонтаж треснутого/дефектного герметика, уплотнительного шнура и произвести работы по устройству деформационного шва: выполнить установку уплотнительного шнура и заполнение шва герметиком в соответствии с проектом 13/2017/6-АР5.  Ориентировочная протяженность деформационных швов – 230 м.п

5. ООО «Властстрой и Ко» приняло обязательство  в срок до 14 июля 2023 года безвозмездно устранить недостатки/дефекты работ, выполненных по договору подряда № ГСВ-Д-19-166 от 20.11.2019 г. на многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...> (строительный адрес: г. Ярославль, Кировский район, квартал ул. Свободы, 

<

...> этап, строение 1), зафиксированные в акте осмотра декоративной отделки фасада жилых домов 3 этапа строительства (многоквартирный жилой дом стр. № 1, стр. № 4) от 16.09.2022 г. и на схемах фасадов, в том числе:

- выполнить работы по устранению дефектов по устройству деформационных швов: произвести демонтаж треснутого/дефектного герметика, уплотнительного шнура и произвести работы по устройству деформационного шва: выполнить установку уплотнительного шнура и заполнение шва герметиком в соответствии с проектом 13/2017/6-АР5.  Ориентировочная протяженность деформационных швов – 130 м.п

По состоянию на 02.07.2024 в нарушение условий утвержденного мирового соглашения ООО «Властстрой и Ко» не исполнило принятые на себя обязательства, не устранило выявленные недостатки/дефекты в согласованные сторонами в пункте 3 мирового соглашения сроки.

В пункте 5 мирового соглашения Стороны согласовали, что случае нарушения ООО «Властстрой и Ко» сроков выполнения работ по устранению недостатков/дефектов в рамках гарантийных обязательств, согласованных в пункте 3 мирового соглашения, ООО «Главстрой Волга» имеет право начислить Ответчику штрафную неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

11.08.2023 письмом исх. № гсв-исх-23-62 ООО «Главстрой Волга» обращалось в адрес ООО «Властстрой и Ко» с требованием в течение 3 рабочих дней с даты получения настоящей претензии направить в адрес ООО «Главстрой Волга» график производства работ по устранению недостатков/дефектов с датой окончания работ не позднее 10.09.2023, обеспечить выполнение работ по устранение недостатков/дефектов в максимально короткие сроки.

23.01.2024 письмом исх. № ГСВ-исх-24-02 ООО «Главстрой Волга» обращалось в адрес ООО «Властстрой и Ко» с требованием в течение 3 рабочих дней с даты получения настоящей претензии направить в адрес ООО «Главстрой Волга» график производства работ по устранению недостатков/дефектов, обеспечить выполнение работ по устранение недостатков/дефектов в максимально короткие сроки.

26.04.2024 письмом исх. № ГСВ-исх-24-25 обращалось в адрес ООО «Властстрой и Ко» с требованием в течение 3 рабочих дней с даты получения настоящей претензии направить в адрес ООО «Главстрой Волга» график производства работ по устранению недостатков/дефектов, обеспечить выполнение работ по устранение недостатков/дефектов в максимально короткие сроки и оплатить сумму штрафной неустойки за нарушение сроков устранения недостатков/дефектов в размере 1 430 000 рублей за период просрочки с 17.07.2023 по 27.04.2024 – 286 дней, расчет: 5000*286=1 430 000 руб.

Претензионные письма ООО «Главстрой Волга» оставлены ООО «Властстрой и Ко» без ответа.

01.03.2024 Арбитражным судом Ярославской области выдан исполнительный лист серия ФС № 040512423 на принудительное исполнение мирового соглашения, который 12.03.2024 ООО «Главстрой Волга» был предъявлен для исполнения в службу судебных приставов.

22.03.2024 ОСП по Кировскому и Ленинскому районам г. Ярославля в отношении ООО «Властстрой и Ко» возбуждено исполнительное производство №102500/24/76003-ИП.

ООО «Властстрой и Ко» требования ОСП по Кировскому и Ленинскому районам                                 г. Ярославля по состоянию на 02.07.2024 не исполнило.

В мировом соглашении, утвержденном определением Арбитражного суда Ярославской области от 28.03.2023 по делу №А82-19563/2022 стороны определили перечень недостатков/дефектов и срок устранения выявленных недостатков/дефектов.

Срок, предусмотренных мировым соглашением, ООО «Властстрой и Ко» нарушен, что по мнению истца,  является основанием для начисления штрафной неустойки.

При заключении мирового соглашения стороны в пункте 5 достигли соглашения о последствиях неисполнения ответчиком обязательств в согласованный срок, предусмотрели на такой случай начисление штрафной неустойки и установили методику ее исчисления – «Истец имеет право начислить ответчику штрафную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки».

Таким образом, стороны в мировом соглашении установили возможность предъявления к ООО «Властстрой и Ко» требований об уплате неустойки за нарушение условий мирового соглашения.

Поскольку в настоящий момент мировое соглашение ответчиком не исполнено, истец обратился в суд с рассматриваемым требованием.

Согласно статье 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта стороны могут заключить мировое соглашение.

В статье 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Как разъяснено в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее - Постановление № 50), мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 15 Постановления № 50 разъяснено, что утвержденное судом мировое соглашение основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях, влечет за собой окончательное прекращение гражданско-правового спора (полностью либо в соответствующей части).

Если стороны при заключении мирового соглашения прямо не оговорили в нем иные правовые последствия для соответствующего правоотношения (включающего как основное обязательство, из которого возникло заявленное в суд требование (требования), так и дополнительные), такое соглашение сторон означает полное прекращение спора, возникшего из этого правоотношения. В связи с этим последующее выдвижение в суде новых требований из того же правоотношения, независимо от того, возникло такое требование из основного либо из дополнительного обязательства, не допускается.

Согласно пункту 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в мировом соглашении может быть установлена неустойка за нарушение сторонами принятых на себя обязательств.

Истец основывал свои требования на неисполнении ответчиком пункта 3 утвержденного Арбитражным судом Ярославской области по делу № А82-19563/2022 мирового соглашения, достигнутого сторонами.

В мировом соглашении стороны установили возможность предъявления к ответчику требований об уплате неустойки за нарушение условий мирового соглашения (пункт 5).

Заключая мировое соглашение, ответчик должен был предполагать возможность возникновения для него в случае нарушения условий соглашения неблагоприятных правовых последствий в виде установленной пунктом 5 мерой ответственности.

Материалами дела подтверждается факт неисполнения ответчиком обязательств, взятых на себя при заключении мирового соглашения, в том числе сведениями предоставленными Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области по запросу суда.

В нарушении правил статьи 65 АПК РФ, ответчиком не представлены в материалы дела доказательства исполнения условий мирового соглашения в части пункта 3 в установленные сроки, в связи с чем суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований.

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании неустойки за нарушение условий мирового соглашения подлежит удовлетворению в заявленном размере.

При обращении в суд истцом  перечислено в доход федерального бюджета 27 300  руб. государственной пошлины по платежному поручению от 07.05.2024 №125.

Соответственно, с учетом результатов рассмотрения спора в порядке ст. 110 АПК РФ суд признает ко взысканию с ответчика в пользу истца – 27 300 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Властстрой и Ко» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Главстрой Волга» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 430 000 руб. штрафной неустойки за нарушение сроков исполнения мирового соглашения по делу №А82-19563/2022 за период с 17.07.2023 по 27.04.2024 с продолжением начисления неустойки до даты фактического исполнения мирового соглашения в размере 5000 руб. за каждый день просрочки, а также 27 300 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Е.Ю. Шмидько