АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-6833/2024

г. Нижний Новгород                                                                                 30 сентября 2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 05.09.2024.

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Селезневой Марины Романовны (шифр дела в отделе судьи 42-66),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ануфриевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Мистер Элит Строй" (ИНН 

<

***>) к ответчику: ООО "Спутник" (ИНН 

<

***>) о взыскании 4 968 277,22 руб.,

 

при участии в судебном заседании представителей:

от ответчика - ФИО1 (доверенность от 09.02.2024), 

 

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление ООО "Мистер Элит Строй" (ИНН 

<

***>) к ответчику: ООО "Спутник" (ИНН 

<

***>) о взыскании 4 968 277,22 руб.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 07.043.2024 указанное заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 06.08.2024, ответчику предложено представить отзыв.

В ходе предварительного судебного заседания представитель истца поддержал заявленные требования.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 06.08.2024 завершено предварительное судебное заседание, дело назначено к судебному разбирательству на 29.08.2024, ответчику повторно предложено представить отзыв.

 В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 29.08.2024 объявлен перерыв до 05.09.2024, после перерыва рассмотрение дела продолжено.

Представитель истца поддержала заявленные требования в полном объеме.

Ответчик какой-либо позиции в материалы дела не представил, явку уполномоченного представителя в судебное заседание не обеспечил, в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее извещение сторон о рассмотрении дела.

Заслушав доводы представителя истца, исследовав в полном объеме представленные в материалы дела доказательства, установлены следующие фактические обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "СПУТНИК" (заказчик) и ООО "Мистер Элит Строй" (подрядчик) заключен договор подряда № МЭС - 48 от 05.07.2022, согласно которому ООО "Мистер Элит Строй" обязуется выполнить работы по устройству натяжных потолков на объекте заказчика жилой дом №12 секции 1, 2 при осуществлении комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково (ЖК "Большое Путилково").

Во исполнение обязательств по данному договору и дополнительному соглашению № 1 от 27.02.2023 ООО "Мистер Элит Строй" выполнены работы, а ООО "СПУТНИК"  приняты работы на общую сумму 3 156 901 руб. 80 коп. на основании акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2022  на сумму 1 114 948 руб. 00 коп., акта № 2 от 31.12.2022 на сумму 523 889 руб. 40 коп., акта № 3 от 31.01.2023 на сумму 804 268 руб. 60 коп., акта № 4 от 28.02.2023 на сумму 555 946 руб. 80 коп., акта № 5 от 30.04.2023 на сумму 157 849 руб. 00 коп.

Согласно представленным в материалы дела документам, ООО "СПУТНИК" оплатило работы на общую сумму 2 954 251 руб. 84 коп., задолженность по указанному договору составляет 44 804 руб. 87 коп., по оплате гарантийного удержания 157845 руб. 09 коп.

В силу п.п.3.2.1. Заказчик производит предварительную оплату работ в размере 50% от суммы Договора, что составляет 1 702 230 руб., в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания договора. Заказчик производит окончательную оплату работ в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-З в порядке, предусмотренном договором (п. 3.2.2. договора).

В порядке обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ Подрядчик удерживает сумму в размере 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ (п. 3.4 договора).

Удержанная сумма обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подлежит оплате подрядчику в следующем порядке и сроки: 5 % в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сдачи заказчиком работ, выполняемых по договору, службе клиентского сервиса (СКС) (п. 5 договора).

В связи с отсутствием установленных в договоре условий о службе клиентского сервиса, сумма гарантийного удержания подлежит оплате заказчиком в сроки, установленные договором для окончательной оплаты работ.

В соответствии с п. 6.2 договора в случае задержки оплаты работ заказчик обязан оплатить неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

С учетом обстоятельств дела за период с 14.06.2023 по 14.02.2024 начислена неустойка в сумме 202 649 руб. 96 коп. 

Претензии истца № 237 от 13.10.2023, № 12 от 24.01.2024 об оплате задолженности и неустойки оставлены ООО "СПУТНИК" без удовлетворения.

Между ООО «СПУТНИК» (заказчик) и ООО «Мистер Элит Строй» (подрядчик) заключен договор подряда № МЭС - 62, согласно условиям которого ООО «Мистер Элит Строй» обязуется выполнить работы по устройству натяжных потолков на объекте заказчика «Жилой дом № 63 при осуществлении застройки территории жилого микрорайона в северовосточной части г. Люберцы Московской области» по адресу: Московская область, г. Люберцы, жилой микрорайон в северо-восточной части 

<

...> пусковой комплекс, 1-й этап (жилые дома №№ 61,62,63,64) (ЖК «Люберцы»).

Во исполнение обязательств по данному договору и дополнительному соглашению № 1 от 30.04.2023 ООО "Мистер Элит Строй" выполнены работы, а ООО "СПУТНИК"  приняты работы на общую сумму 6894560 руб. 00 коп. на основании акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2022 на сумму 926497 руб. 50 коп., акта № 2 от 31.12.2022 на сумму 1369502 руб. 50 коп., акта № 3 от 31.01.2023 на сумму 1185437 руб. 10 коп., по акту № 4 от 31.03.2023 на сумму 3054778 руб. 80 коп., по акту № 5 от 31.05.2023 на сумму 358344 руб. 10 коп. Кроме того, ООО «Мистер Элит Строй» выполнены дополнительные работы по акту № 296 от 30.04.2023 на сумму 88 231 руб., акту № 485 от 31.05.2023 на сумму 131 776 руб. 20 коп. Общая сумма выполненных дополнительных работ по договору составила 220 007 руб. 20 коп.

Согласно представленным в материалы дела документам, ООО "СПУТНИК" оплатило работы на общую сумму 5758257 руб. 93 коп., задолженность по указанному договору составляет 1011581 руб. 21 коп., по оплате гарантийного удержания 344728  руб. 00 коп.

Согласно п.п.3.2.1. заказчик производит окончательную оплату работ в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-З в порядке, предусмотренном договором (п. 3.2.2. договора).

В порядке обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подрядчик удерживает сумму в размере 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ (п. 3.4 договора). Удержанная сумма обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подлежит оплате подрядчику в следующем порядке и сроки: 5 % в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сдачи заказчиком работ, выполняемых по договору, службе клиентского сервиса (СКС) (п. 5 договора).

В связи с отсутствием установленных в договоре условий о службе клиентского сервиса, сумма гарантийного удержания подлежит оплате заказчиком в сроки, установленные договором для окончательной оплаты работ.

В соответствии с п. 6.2 договора в случае задержки оплаты работ заказчик обязан оплатить неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

С учетом обстоятельств дела за период с 08.06.2023 по 14.02.2024 начислена неустойка в сумме 34 178 руб. 99 коп. 

Претензии истца № 238 от 13.10.2023, № 12 от 24.01.2024 об оплате задолженности и неустойки оставлены ООО «Спутник» без удовлетворения.

Вместе с тем между ООО «СПУТНИК» (заказчик) и ООО «Мистер Элит Строй» (подрядчик) заключен договор подряда № МЭС – 301 от 16.02.2023, согласно условиям которого последний обязуется выполнить работы по устройству натяжных потолков на объекте заказчика «Жилой дом №21 секция 3 при осуществлении комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково (ЖК «Большое Путилково»).

Во исполнение обязательств по данному договору ООО "Мистер Элит Строй" выполнены работы, а ООО "СПУТНИК"  приняты работы на общую сумму 2942501 руб. 83 коп. на основании акта о приемке выполненных работ № 1 от 31.05.2023 на сумму 1 817 000 руб., акта № 2 от 30.06.2023 на сумму 934 216 руб., акта № 3 от 31.07.2023 на сумму 191 285 руб. 83 коп. Кроме этого, ООО «Мистер Элит Строй» выполнены дополнительные работы по акту № 598 от 28.07.2023 на сумму 44 489 руб. 50 коп.

Согласно представленным в материалы дела документам, ООО "СПУТНИК" оплатило работы на общую сумму 2171250 руб. 92 коп., задолженность по указанному договору составляет 668615 руб. 35 коп., по оплате гарантийного удержания 147125 руб. 09 коп.

В силу п.п.3.2.1. заказчик производит окончательную оплату работ в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-З в порядке, предусмотренном договором (п. 3.2.2. договора).

В порядке обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подрядчик удерживает сумму в размере 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ (п. 3.4 договора). Удержанная сумма обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подлежит оплате подрядчику в следующем порядке и сроки: 5 % в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сдачи заказчиком работ, выполняемых по договору, службе клиентского сервиса (СКС) (п. 5 договора).

В связи с отсутствием установленных в договоре условий о службе клиентского сервиса, сумма гарантийного удержания подлежит оплате заказчиком в сроки, установленные договором для окончательной оплаты работ.

В соответствии с п. 6.2 договора в случае задержки оплаты работ заказчик обязан оплатить неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

С учетом обстоятельств дела за период с 08.08.2023 по 14.02.2024 начислена неустойка в сумме 15580  руб. 64 коп. 

Претензии истца № 235 от 13.10.2023, № 12 от 24.01.2024 об оплате задолженности и неустойки оставлены ООО «Спутник» без удовлетворения.

Также между ООО «СПУТНИК» (заказчик) и ООО «Мистер Элит Строй» (подрядчик) был заключен договор подряда № МЭС – 302 от 17 февраля 2023 года, согласно условиям которого ООО «Мистер Элит Строй» обязуется выполнить работы по устройству натяжных потолков на объекте заказчика «Жилой дом №65 при осуществлении застройки территории жилого микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы Московской области» по адресу: Московская область, г. Люберцы, жилой микрорайон в северо-восточной части 

<

...> (ЖК «Люберцы»).

Во исполнение обязательств по данному договору ООО "Мистер Элит Строй" выполнены работы, а ООО "СПУТНИК"  приняты работы на общую сумму 6604641 руб. 50 коп. на основании акта № 1 о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2023 г. на сумму 2 302 760 руб., акта № 2 от 30.09.2023 на сумму 1 232 892 руб., акта № 3 от 30.10.2023 на сумму 1 800 348 руб., акта № 4 от 30.11.2023 на сумму 1 185 000 руб. 80 коп., акта № 5 от 31.012.2023 на сумму 83 640 руб. Кроме этого, ООО «Мистер Элит Строй» были выполнены дополнительные работы по акту № 970 от 20.11.2023 на сумму 30 800 руб. 70 коп.

Согласно представленным в материалы дела документам, ООО "СПУТНИК" оплатило работы на общую сумму 4539320 руб. 41 коп., задолженность по указанному договору составляет 1765889 руб. 05 коп., по оплате гарантийного удержания 330232 руб. 04 коп.

В силу п.п.3.2.1. заказчик производит окончательную оплату работ в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-З в порядке, предусмотренном договором (п. 3.2.2. договора).

В порядке обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подрядчик удерживает сумму в размере 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ (п. 3.4 договора). Удержанная сумма обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подлежит оплате подрядчику в следующем порядке и сроки: 5 % в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сдачи заказчиком работ, выполняемых по договору, службе клиентского, сервиса (СКС) (п. 5 договора).

В связи с отсутствием установленных в договоре условий о службе клиентского сервиса, сумма гарантийного удержания подлежит оплате заказчиком в сроки, установленные договором для окончательной оплаты работ.

В соответствии с п. 6.2 договора в случае задержки оплаты работ заказчик обязан оплатить неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

С учетом обстоятельств дела за период с 09.12.2023 по 14.02.2024 начислена неустойка в сумме 14253  руб. 62 коп. 

Претензии истца № 240 от 13.10.2023, № 12 от 24.01.2024 об оплате задолженности и неустойки оставлены ООО «Спутник» без удовлетворения.

Вместе с тем между ООО «СПУТНИК» (заказчик) и ООО «Мистер Элит Строй» (подрядчик) заключен договор подряда № МЭС - 303 от 17 февраля 2023 года, согласно условиям которого ООО «Мистер Элит Строй» обязуется выполнить работы по устройству натяжных потолков на объекте заказчика «Жилой дом № 66 секции 8,9 при осуществлении застройки территории жилого микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы Московской области» по адресу: Московская область, г. Люберцы, жилой микрорайон в северо-восточной части 

<

...> (ЖК «Люберцы»).

Во исполнение обязательств по данному договору ООО "Мистер Элит Строй" выполнены работы, а ООО "СПУТНИК"  приняты работы на общую сумму 2 987 913 руб. 60 коп. на основании акта о приемке выполненных работ № 1 от 30.04.2023 на сумму 1 717292,20 руб., по акту № 2 от 30.06.2023  на сумму 755 867 руб. 80 коп., по акту № 3 от 31.08.2023 на сумму    217 368  руб. 00 коп., по акту № 4 от 30.09.2023 на сумму 297 385 руб. 60 коп.

Согласно представленным в материалы дела документам, ООО "СПУТНИК" оплатило работы на общую сумму 2564995 руб. 77 коп., задолженность по указанному договору составляет 273552 руб. 15 коп., по оплате гарантийного удержания 149395 руб. 68 коп.

В силу п.п.3.2.1. заказчик производит окончательную оплату работ в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-З в порядке, предусмотренном договором (п. 3.2.2. договора).

В порядке обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подрядчик удерживает сумму в размере 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ (п. 3.4 договора). Удержанная сумма обеспечения выполнения подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ подлежит оплате подрядчику в следующем порядке и сроки: 5 % в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты сдачи заказчиком работ, выполняемых по договору, службе клиентского сервиса (СКС) (п. 5 договора).

В связи с отсутствием установленных в договоре условий о службе клиентского сервиса, сумма гарантийного удержания подлежит оплате заказчиком в сроки, установленные договором для окончательной оплаты работ.

В соответствии с п. 6.2 договора в случае задержки оплаты работ заказчик обязан оплатить неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

С учетом обстоятельств дела за период с 07.10.2023 по 14.02.2024 начислена неустойка в сумме 5 540 руб. 22 коп. 

Претензии истца № 239 от 13.10.2023г., № 12 от 24.01.2024г. об оплате задолженности и неустойки оставлены ООО «Спутник»  без удовлетворения.

Задолженность по договорам признана ответчиком подписанием акта сверки расчетов за период август 2022 года - декабрь 2023 года.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В статьях 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно статье  431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

С учетом статей 1, 9 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Подписав контракт на данных условиях, стороны действовали в соответствии с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе и как следствие согласились с условиями договоров. 

Факт ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком подтвержден материалами дела.  

В нарушение стать 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каких-либо опровергающих доводы истца доказательств, ответчиком в материалы дела не представлено.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Неустойка является одни из способов обеспечения обязательств в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

Представленные в материалы дела расчеты и период проверены судом и признаны обоснованными, ходатайств о снижении неустойки применительно к статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено. 

Принимая во внимание изложенное, заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по государственной пошлине согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с ООО «Спутник» (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «Мистер Элит Строй» (ИНН 

<

***>)  4 893 738 руб. 56 коп. долга, 74 538 руб. 66 коп. неустойки,  неустойку с 15.02.2024 за каждый день просрочки по день оплаты исходя из 0,01 % от стоимости неоплаченных работ, а также 47 841 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                         Селезнева М.Р.