/

 

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело №

А33-1389/2018

г. Красноярск

21 января 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена «14» января 2019 года. 

Полный текст постановления изготовлен          «21» января 2019 года.

 

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бутиной И.Н.,

судей: Споткай Л.Е., Усиповой Д.А., 

секретаря судебного заседания Каверзиной Т.П., 

при участии:

от ответчика - акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»: Кошкарова В.Р., представителя по доверенности от 01.01.2019 № ВСНК-51-19, паспорт,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» 

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от «20» сентября 2018 года по делу № А33-1389/2018, принятое судьей Курбатовой Е.В.  

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная группа Ангара» (ИНН 3849016052, ОГРН 1113850021625, далее – ООО «Строительная группа Ангара», истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к акционерному обществу «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ИНН 7710007910, ОГРН 1028800000855, далее – АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», ответчик) о взыскании:

-   379 721 рубля 70 копеек неосновательного обогащения по договору подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д на выполнение работ;

-   3 125 549 рублей 56 копеек неосновательного обогащения по договору подряда от 16.12.2015 №3175716/0081Д на выполнение работ;

-   787 006 рублей 20 копеек неустойки за просрочку обязательств по оплате по договору подряда от 16.12.2015 № 3175716/0081Д за период с 11.05.2017 по 27.11.2017;

-   1 519 988 рублей 27 копеек неустойки за просрочку обязательств по оплате по договору подряда от 24.02.2016 № 3175716/0275Д на выполнение работ за период с 30.04.2017 по 27.11.2017;

-   240 539 рублей 98 копеек неосновательного обогащения по договору подряда от 11.02.2015 № 3175715/0245Д на выполнение работ;

-   396 912 рублей 04 копеек неустойки за просрочку обязательств по оплате по договору подряда от 17.12.2014 № 3175714/1094Д на выполнение работ за период с 02.03.2017 по 27.11.2017; 313 080 рублей 81 копеек неустойки за просрочку обязательств по оплате по договору подряда № 3175714/1176Д на выполнение работ от 12.12.2014 за период с 02.03.2017 по 27.11.2017.

Решением суда от 20.09.2018 иск удовлетворен частично: с АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» в пользу ООО «Строительная группа Ангара» взыскано 2 283 362 рубля 21 копеек неустойки, в доход федерального бюджета 19 182 рубля 43 копейки государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд.

Заявитель со ссылкой на пункт 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 06.06.2014 №35 полагает, что начисление договорной неустойки после прекращения договорных правоотношений является неправомерным, в связи с чем просил решение суда первой инстанции изменить в части взыскания 2 283 362 рублей 21 копейки,  взыскав с АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» неустойку в общей сумме 619 255 рублей 34 копеек, начисленную в связи с нарушением обязательств по договорам от 12.12.2014 № 3175714/1176Д за период с 30.05.2017 по 13.06.2017, от 17.12.2014   3175714/1098Д - с 02.03.2017 по 13.06.2017, от 24.02.2016 № 3175716/0275Д – с 02.03.2017 по 15.03.2017 (до прекращения действия договора 16.03.2017). Как полагает заявитель жалобы, неустойка за просрочку выполнения обязательств по договору от 16.12.2015              № 3175716/0081Д не может быть взыскана в связи прекращением действия этого договора с  16.03.2017 (дата начисления неустойки – 11.05.2017). 

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 30.11.2018 апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на 14.01.2019.

Истец отзыв на апелляционную жалобу в материалы дела не представил.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. 

На вопрос суда апелляционной инстанции заявитель жалобы пояснил, что, по его мнению, после прекращения действия договора может быть применена ответственность только в виде взыскания процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем истец в рамках настоящего спора не заявлял.  

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с требованиями статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (путем размещения публичного извещения о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы на официальном сайте Третьего арбитражного апелляционного суда: http://3aas.arbitr.ru/, а также в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) в сети «Интернет»), явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил.

При изложенных обстоятельствах в силу статей 121 - 123, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает жалобу в отсутствие представителя истца. 

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Поскольку соответствующих возражений от сторон не поступило, судебный акт подлежит проверке апелляционной инстанцией в обжалуемой части - в части взыскания неустойки в сумме 1 664 106 рублей 87 копеек.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Между ООО «Строительная группа Ангара» (подрядчиком) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (заказчиком) был заключен договор подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д на выполнение работ «на объекте Юрубчено-Тохомское мнр. Пункт сбора на площадке скважины № 5. Замерная установка. Реконструкция».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы по реконструкции объекта «Юрубчено-Тохомское мнр. Пункт сбора на площадке скважины № 25. Замерная установка. Реконструкция», включая добычу грунта из карьера № 13.

Подрядчик также обязался выполнить все работы по строительству объекта собственными силами и с привлечением субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, содержащей перечень и состав работ, подлежащих выполнению, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат Заказчику техническим заданием и передать Заказчику завершенный строительством объект, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 43 461 260 рублей 53 копейки в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат, которая является твердой договорной ценой и составляет - 34 717 864 рубля 54 копейки;

-   стоимость материалов поставки заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 8 743 395 рублей 99 копеек.

Согласно пунктом 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начала работ - 15.01.2015, окончание работ - 15.05.2015.

В соответствии с пунктом 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 30.06.2016 на сумму 22 559 рублей 24 копейки, № 2 от 30.06.2016 на сумму 901 919 рублей 96 копеек, № 3 от 30.06.2016 на сумму 1 018 085 рублей 19 копеек, № 4 от 07.06.2016 на сумму 118 014 рублей 33 копейки, № 5 от 30.06.2016 на сумму 104 413 рублей 22 копейки, № 6 от 30.06.2016 на сумму 259 581 рубль 32 копейки, № 7 от 30.06.2016 на сумму 173 048 рублей 13 копеек, № 8 от 09.12.2016 на сумму 621 359 рублей 13 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 30.06.2016 на сумму 3 064 013 рублей 24 копеек, № 2 от 09.12.2016 на сумму 733 203 рублей 77 копеек.

29.12.2016 ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» Соглашением № 3175714/1099Д010 расторгли договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № 3175714/1099Д с 29.12.2016.

В соответствии с указанным соглашением оплата выполненных на момент заключения соглашения этапов работ должна была быть произведена заказчиком подрядчику не позднее 90 дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) и формы КС-3.

В соответствии с пунктом 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Истец указывает, поскольку 29.12.2017 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда, оснований для резервирования суммы в размере 379 721 рубль 70 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату.

16.12.2015 между ООО «Строительная группа Ангара» (подрядчиком) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (заказчиком) был заключен договор подряда № 3175716/0081Д на выполнение строительно-монтажных работ «на объекте «Юрубчено-Тохомское мнр.» Обустройство промышленной площадки Юр-5. Межплощадочные сети, эстакады. 10-й участок, 11 -й участок, 12-й участок (УПН-УПТГ)».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы на объекте «Юрубчено-Тохомское мнр.» Обустройство промышленной площадки Юр-5. Межплощадочные сети, эстакады. 10-й участок, 11 -й участок, 12-й участок (УПН-УПТГ), включая добычу грунта из карьера № 7а.

Подрядчик также обязался выполнить все работы по строительству объекта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, содержащей перечень и состав работ, подлежащих выполнению, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат заказчику техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 334 733 733 рубля 39 копеек. Стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой.

Согласно пункту 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2.КС-3)

В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начала работ - 01.02.2016, окончание работ - 30.09.2017.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 31.03.2016 на сумму 2 050 313 рублей 42 копейки, № 2 от 31.03.2016 г. на сумму 3 990 939 рублей 29 копеек, № 3 от 11.04.2016 на сумму 6 033 рублей 58 копеек, № 4 от 11.04.2016 на сумму 2 178 101 рубль 73 копейки, № 5 от на сумму 3 496 630 рублей 64 копейки, № 6 от 11.04.2016 на сумму 4 002 319 рублей 66 копеек, № 9 от 31.05.2016 на сумму 3 894 564 рубля 37 копеек, № 8 от 31.05.2016 на сумму 4 326 124 рубля 87 копеек, № 10 от 30.06.2016 на сумму 302 152 рубля 96 копеек, № 11 от 10.10.2016 на сумму 5 577 345 рублей 72 копейки, № 12 от 10.10.2016 на сумму 3 212 329 рублей 39 копеек, № 13 от 31.10.2016 на сумму 1 256 418 рублей 85 копеек, № 16 от 31.10.2016 на сумму 846 876 рублей 30 копеек, № 15 от 31.10.2016 на сумму 1 548 707 рублей 21 копейка, № 14 от 31.10.2016 на сумму 3 664 102 рубля 38 копеек, № 19 от 10.11.2016 на сумму 3 225 658 рублей 80 копеек, № 18 от 10.11.2016 на сумму 4 505 548 рублей 63 копейки, № 20 от 31.11.2016 на сумму 86 351 рубль 16 копеек, № 21 от 10.03.2017 на сумму 953 639 рублей 21 копейка, № 22 от 10.03.2017 на сумму 1 664 980 рублей 95 копеек, № 23 от 10.03.2016 на сумму 1613 772 рубля 87 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2016 на сумму 7 128 678 рублей 20 копеек, № 2 от 11.04.2016 на сумму 11426 041 рубль 02 копейки, № 3 от 31.05.2016 г. на сумму 10 231 089 рублей 32 копейки, № 3 от 30.06.2016 на сумму 356 540 рублей 49 копеек, № 4 от 10.10.2016 на сумму 10 371 816 рублей 63 копейки, № 5 от 31.10.2016 на сумму 8 777 882 рубля 66 копеек, № 6 от 10.11.2016 на сумму 9 122 824 рубля 77 копеек, № 7 от 31.11.2016 на сумму 101 894 рубля 37 копеек, № 8 от 10.03.2017 на сумму 4 994 223 рубля 78 копеек.

09.01.2016           ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» соглашением № 3175716/0081Д006 расторгли договор подряда № 3175716/0081Д с 09.01.2017.

В соответствии с указанным соглашением оплата выполненных на момент заключения соглашения этапов работ должна была быть произведена подрядчику не позднее 60 дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) и формы КС-3.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило в полном объеме.

Общий размер задолженности по договору № 3175716/0081Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составлял 4 609 612 рублей 58 копеек.

В соответствии с пунктом 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Истец указывает, что поскольку 09.01.2017 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда, оснований для резервирования суммы в размере 3 125 549 рублей 56 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату.

В соответствии с пунктом 16.2 договора за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

10.03.2017 были подписаны последние КС-2 и КС-3 по настоящему договору,следовательно, были завершены последние этапы работ. 60-дневный срок на оплатувыполненных этапов работ истек 10.05.2017.

Согласно расчету истца, неустойка на сумму долга 4 609 612 рублей 58 копеек составляет 926 532 рубля 12 копеек; на сумму долга 3 125 549 рублей 56 копеек - 628 235 рублей 46 копеек. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 4 744 512 рублей 59 копеек - 10 % = 474 451 рубль 25 копеек; по сумме долга - 3 125 549 рублей 56 копейки -10 % = 312 554 рубля 95 копеек.

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате, согласно расчету истца, составляет 787 006 рублей 20 копеек.

24.02.2016 между ООО «Строительная группа Ангара» (подрядчиком) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (заказчиком) был заключен договор на выполнениестроительно-монтажных работ № 3175716/0275Д на выполнение работ по строительству«Юрубчено-Тохомское нмр. Кустовое основание № 28».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы по строительству в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1 цена договора в соответствии с расчетом цены договора не превысит 115 447 702 рубля 12 копеек и включает: стоимость работ - 114 341 125 рубля 45 копеек; стоимость материально-технических ресурсов - 1 136 549 рублей 67 копеек.

Согласно  пункту   4.1   договора  подряда  заказчик   оплачивает   подрядчику   стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании предоставленных подрядчиком, надлежаще оформленных первичных документов и после подписания заказчиком актов приемки выполненных работ, в соответствии с процедурой приемки.

В соответствии с пунктом 5.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ - 01.07.2016, срок окончания выполнения работ - 30.11.2016.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 30.04.2016 на сумму 2 972 516 рублей 34 копейки, № 2 от 10.10.2016 на сумму 471 053 рубля 93 копейки, № 3 от 1 884 223 рубля 22 копейки, № 4 от 31.10.2016 на сумму 3 343 941 рубль 70 копеек, № 5 от 31.10.2016 на сумму 89 295 рублей 51 копейка, № 6 от 31.10.2016 на сумму 3 206 851 рубль 43 копейки, № 7 от 31.12.2016 на сумму 6 830 519 рублей 43 копейки, № 8 от 31.12.2016 на сумму 32 634 рубля 43 копейки, № 9 от 31.12.2016 на сумму 827 736 рублей 59 копеек, № 10 от 31.12.2016 на сумму 265 373 рубля 89 копеек, № 11 от 31.12.2016 на сумму 309 943 рубля 58 копеек, № 12 от 31.12.2016 на сумму 3 552 449 рублей 99 копеек, № 13 от 31.01.2017 на сумму 538 775 рублей 54 копейки, № 14 от 31.01.2016 на сумму 1 814 259 рублей 83 копейки, № 15 от 31.01.2017 на сумму 1 420 120 рублей 15 копеек, № 16 от 28.02.2017 на сумму 805 603 рубля 47 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 30.04.2016 на сумму 3 507 569 рублей 28 копеек, № 2 от 10.10.2016 на сумму 2 779 227 рублей 04 копейки, № 3 от 31.10.2016 на сумму 7 835 304 рубля 60 копеек, № 4 от 31.12.2016 г. на сумму 13 946 016 рублей 33 копейки, 5 от 31.01.2017 на сумму 4 452 323 рубля 51 копейка, № 6 от 28.02.2017 на сумму 950 612 рублей 09 копеек.

08.02.2017           ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» Соглашением  №  3175716/0275Д007  расторгли  договор  подряда  на  выполнение строительно-монтажных работ № 3175716/0275Д был расторгнут с 08.02.2017.

В соответствии с указанным соглашением оплата выполненных на момент заключения соглашения этапов работ должна была быть произведена подрядчику не позднее 60 дней с момента подписания соответствующих первичных учетных документов и подписания актов сдачи-приемки.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило.

Общий размер задолженности по договору № 3175716/0275Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составляет 6 436 388 рублей 77 копеек.

В соответствии с пунктом 4.2 договора подряда заказчик производит гарантийные удержания в размере 10 % от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с пунктом 23.2 договора.

В соответствии с пунктом 23.2.1 договора подряда зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не позднее 60 дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Истец указывает, что поскольку 08.02.2017 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда, оснований для резервирования суммы в размере 1 673 552 рубля 64 копейки у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату.

В соответствии с пунктом 24.1 договора подряда конкретные нарушения и меры ответственности за них установлены сторонами в приложении № 19.

Согласно приложению № 19 за задержку заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20 % от своевременно не оплаченной суммы.

28.02.2017 были подписаны последние КС-2 и КС-3 по настоящему договору, следовательно, были завершены последние этапы работ. 60-дневный срок на оплату выполненных этапов работ истек 29.04.2017.

Согласно расчету истца, неустойка на сумму долга 6 436 388 рублей 77 копеек составляет 1 364 514 рублей 42 копейки; на сумму долга 1 673 552 рубля 64 копейки - 354 793 рубля 16 копеек. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 20 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 6 436 388 рублей 77 копеек - 20 % = 1 287 277 рублей 75 копеек; по сумме долга - 1 163 552 рубля 64 копейки - 20 % = 232 710 рублей 52 копейки

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате за выполненные работы, согласно расчету истца, составляет 1 519 988 рублей 27 копеек.

11.02.2015 между ООО «Строительная группа Ангара» (подрядчиком) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (заказчиком) был заключен договор подряда № 3175715/0245Д на выполнение работ «на объекте «Юрубчено-Тохомское мнр. Водопроводные очистные сооружения».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта «Юрубчено-Тохомское мнр. Водопроводные очистные сооружения».

Подрядчик обязался выполнить все работы по строительству объекта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, содержащей перечень и состав работ, подлежащих выполнению, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат заказчику техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 42 319 191 рублей 35 копеек в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет — 29 241 722 рубля 52 копейки;

-   стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет- 13 077 468 рублей 83 копейки.

Согласно пунктом 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3).

В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ 15.03.2015, окончание работ-22.03.2016.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 31.03.2016 на сумму 47 608 рублей 79 копеек, № 3 от 165229 рублей 25 копеек, № 5 от 31.03.2016 на сумму 106 032 рубля 33 копейки, № 2 от 31.03.2016 на сумму 160 203 рубля 99 копеек, № 4 от 31.03.2016 на сумму 102 808 рублей 36 копеек, № 6 от 30.06.2016 на сумму 922 561 рубль 84 копейки, № 7 от 30.06.2016 на сумму 195 478 рублей 15 копеек, № 8 от 30.06.2016 на сумму 69 339 рублей 67 копеек, № 9 от 30.06.2016 на сумму 229 066 рублей 11 копеек, № 10 от 30.09.2016 на сумму 428 108 рублей 36 копеек, № 11 от 30.11.2016 на сумму 55 940 рублей 07 копеек, № 12 от 09.12.2016 на сумму 1 120 101 рубль 69 копеек, № 13 от 09.12.2016 на сумму 474 470 рублей 22 копейки и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2016 на сумму 376 267 рублей 04 копейки, № 1 от 31.03.2016 на сумму 310 354 рубля 57 копеек, № 2 от 30.06.2016 на сумму 1 671 406 рублей 01 копейка, № 3 от 30.09.2016 на сумму 505 167 рублей 86 копеек, № 4 от 30.11.2016 на сумму 66 009 рублей 28 копеек, № 5 от 09.12.2016 на сумму 1 881 594 рубля 85 копеек.

29.12.2016 ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» соглашением № 3175715/0245ДО расторгли договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № 3175715/0245Д с 29.12.2016.

В соответствии с указанным соглашением оплата выполненных на момент заключения соглашения этапов работ должна была быть произведена Подрядчику в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) и формы КС-3.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило в полном объеме.

В соответствии с пунктом 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Истец указал, что поскольку 08.02.2017 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда, оснований для резервирования суммы в размере 240 539 рублей 97 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»   не   имеется,   указанная   сумма   является   неосновательным обогащением и подлежит возврату.

17.12.2014 между ООО «Строительная группа Ангара» (подрядчиком) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (заказчиком) был заключен договор подряда № 3175714/1098Д на выполнение работ «на объекте Юрубчено-Тохомское мнр. Пункт сбора на площадке скважины № 25. Замерная установка. Реконструкция».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы по реконструкции объекта «Юрубчено-Тохомское мнр. Пункт сбора на площадке скважины № 25. Замерная установка. Реконструкция», включая добычу грунта из карьера № 13.

Подрядчик обязался выполнить все работы по строительству объекта собственными силами и с привлечением субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, содержащей перечень и состав работ, подлежащих выполнению, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат заказчику техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 60 797 063 рубля 11 копеек в том числе:

-       стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат, которая является твердой договорной ценой и составляет - 47 905 854 рубля 27 копеек;

-       стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 12 891 208 рублей 84 копейки.

Согласно пункту 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с пунктом 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ-15.01.2015, окончание работ - 15.05.2015.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 16.11.2015 на сумму 54 077 рублей 60 копеек, № 2 от 16.11.2015 на сумму 59 363 рубля 05 копеек, № 2 от 16.11.2015 на сумму 390 973 рубля 09 копеек, № 4 от 16.11.2015 на сумму 323 345 рублей 74 копейки, № 5 от 30.11.2015 на сумму 243 рубля 67 копеек, № 5 от 13.05.2016 на сумму 311 637 рублей 08 копеек, № 6 от 13.05.2016 на сумму 135 609 рублей 96 копеек, № 7 от 13.05.2016 на сумму 25 563 рубля 69 копеек, № 8 от 13.05.2016 на сумму 270 163 рубля 64 копейки, № 9 от 13.05.2016 на сумму 34 298 рублей 14 копеек, № 10 от 13.05.2016 на сумму 1 105 236 рублей 57 копеек, № 12 от 13.05.2016 на сумму 69 015 рублей, № 13 от 13.05.2016 на сумму 29 717 рублей 71 копейка, № 11 от 13.05.2016 на сумму 115 667 рублей, № 14 от 30.06.2016 на сумму 963 421 рубль 81 копейка, № 15 от 30.06.2016 на сумму 72 169 рублей 86 копеек, № 16 от 10.10.2016 на сумму 221 415 рублей 67 копеек, № 17 от 10.10.2016 на сумму 66 953 рубля 97 копеек, № 18 от 10.10.2016 на сумму 418 284 рубля 11 копеек, № 19 от 10.10.2016 на сумму 297 213 рублей 27 копеек, № 20 от 10.10.2016 на сумму 227 275 рублей 26 копеек, № 21 от 30.11.2016 на сумму 563 681 рубль 27 копеек, № 22 от 10.11.2016 на сумму 696 989 рублей 86 копеек, № 25 от 30.11.2016   на сумму 725 745 рублей 27 копеек, № 24 от 30.11.2016 на сумму 279 473 рубля 92 копейки, № 23 от 30.11.2016 на сумму 2 325 014 рублей 37 копеек, № 26 от 30.11.2016 на сумму 879 123 рубля 79 копеек, № 46 от 31.12.2016 на сумму 190 726 рублей 48 копеек, № 44 от 31.12.2016 на сумму 536 941 рубль 52 копейки, № 41 от 31.12.2016 г. на сумму 2 802 545 рублей 15 копеек, № 47 от 31.12.2016 на сумму 95 671 рубль 74 копейки, № 45 от 31.12.2016 на сумму 47 470 рублей 18 копеек, № 43 от 31.12.2016 на сумму 67 312 рублей 20 копеек, № 42 от 31.12.2016 на сумму 227 186 рублей 22 копейки, № 40 31.12.2016 г. 23 422 рубля 14 копеек, № 39 от 31.12.2016 на сумму 465 565 рублей 55 копеек, № 38 от 31.12.2016 на сумму 492 838 рублей 52 копейки, № 37 от 31.12.2016 на сумму 248 863 рубля 08 копеек, № 36 от 31.12.2016 на сумму 367 003 рублей 86 копеек, № 34 от 31.12.2016 55 807 рублей 63 копейки, № 35 от 31.12.2016 на сумму 181 995 рублей 75 копеек, № 32 от 31.12.2016 на сумму 1 202 511 рублей 67 копеек, № 33 от 31.12.2016 на сумму 754 372 рубля 34 копейки, № 28 от 31.12.2016 на сумму 127 055 рублей 55 копеек, № 29 от 31.12.2016 на сумму 18 382 рубля 43 копейки, № 30 от 31.12.2016 г. на сумму76 408 рублей 98 копеек, № 31 от 31.12.2016 на сумму 655 рублей 68 копеек, № 48 от 31.12.2016 на сумму 44 422 рубля 39 копеек, № 49 от 31.12.2016 г. на сумму 105 45 рубля 63 копейки и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 1 от 16.11.2015 на сумму 133 859 рублей 97 копеек, № 1 от 16.11.2015 на сумму 842 896 рублей 22 копейки, № 3 от 30.11.2015 г. на сумму 287 рублей 53 копейки, № 2 от 13.05.2016 на сумму 2 474 352 рубля 37 копеек, № 3 от 30.06.2016 на сумму 1 221 998 рублей 17 копеек, № 4 от 10.10.2016 на сумму 1452 747 рублей 89 копеек, № 5 от 10.11.2016 на сумму 1 487 591 рубль 93 копейки, № 5 от 30.11.2016 на сумму 4 967 041 рубль 67 копеек, № 6 от 31.12.2016 на сумму 9 596 481 рубль 79 копеек.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило в полном объеме.

Общий размер задолженности по договору № 3175714/1098Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составляет 2 756 257 рублей 69 копеек.

В соответствии с пунктом 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Истец указал, что поскольку договор подряда фактически прекратил свое действие оснований для резервирования суммы в размере 1 108 862 рубля 88 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату.

В соответствии с пунктом 16.2 договора за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

31.12.2016 были подписаны последние КС-2 и КС-3 № по настоящему договору, следовательно, были завершены последние этапы работ. 90-дневный срок на оплату выполненных этапов работ истек 01.03.2017.

Согласно расчету истца, неустойка на сумму долга 2 756 257 рублей 69 копеек составляет 746 945 рублей 83 копейки; на сумму долга 1 108 862 рубля 88 копеек - 300 501 рубль 84 копейки. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 2 860 257 рублей 69 копеек - 10 % = 286 025 рублей 76 копеек; по сумме долга - 1 108 862 рубля 88 копеек -10 % = 110 886 рублей 28 копеек.

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате, согласно расчету истца, составляет 396 912 рублей 04 копейки.

12.12.2014 между ООО «Строительная группа Ангара» (подрядчиком) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (заказчиком) был заключен договор подряда на выполнение работ № 3175714/1176Д «по строительству объекта «Карьер № 7а».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта «Карьер № 7а» в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 30 233 822 рубля 35 копеек в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет — 29 016 568 рублей 77 копеек;

-   стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 1 217 253 рубля 58 копеек.

Согласно пунктом 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ-22.01.2015, окончание работ-30.05.2015.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС -2): № 1 от 31.03.2015 1 680 980 рублей 48 копеек, № 2 от 31.03.2015 на сумму 173 358 рублей 15 копеек, № 3 от 31.03. 2015 на сумму 198 140 рублей 92 копейки, № 4 от 30.04.2015 на сумму 725 923 рубля 41 копейка, № 5 от 30.06.2015   на сумму 668 918 рублей 84 копейки, № 6 от 30.04.2015 на сумму 142 213 рублей 71 копейка, № 7 от 30.04.2015 на сумму 961 832 рубля 36 копеек, №8 от 31.08.2016 на сумму 315 955 рублей 21 копейка, № 9 от 31.08.2016 на сумму 372 677 рублей 51 копейка, № 10 от 09.12.2016        на сумму 1 583 129 рублей 26 копеек, № 11 от 09.12.2016 на сумму 628 975 рублей 95 копеек, № 12 от 09.12.2016 на сумму 2 485 190 рублей 52 копейки, № 13 от 09.12.2016 на сумму 943 953 рубля 63 копейки, № 14 от 09.12.2016 на сумму 148 036 рублей 56 копеек, № 15 от 28.02.2017 на сумму 291 223 75 копеек, № 16 от 28.02.2017 на сумму 1 536 434 рубля 59 копеек, № 17 от 28.02.2016 на сумму 274 103 рубля 12 копеек, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2015 на сумму 2 421 925 рублей 87 копеек, № 2 от 30.04.2015 на сумму 856 625 рублей 02 копейки, № 3 от 30.06.2015 на сумму 789 324 рубля 23 копейки, № 4 от 30.04.2016 на сумму 1 302 774 рубля 36 копеек, № 5 от 31.08.2015 на сумму 812 686 рублей 61 копейка, № 6 от 09.12.2016 на сумму 6 831 357 рублей 39 копеек, № 7 от 28.02.2107 на сумму 2 480 078 рублей 52 копейки.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило в полном объеме.

Общий размер задолженности по договору № 3175714/1176Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составляет 2 356 074 рубля 59 копеек.

В соответствии с пунктом 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Истец указывает, что поскольку договор подряда фактически прекратил свое действие оснований для резервирования суммы в размере 774 733 рубля 60 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату.

В соответствии с пунктом 16.2 договора за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

28.02.2017 были подписаны последние КС-2 и КС-3 по настоящему договору, следовательно, были завершены последние этапы работ. 90-дневный срок на оплату выполненных этапов работ истек 29.05.2017.

Согласно расчету истца, неустойка на сумму долга 2 356 074 рубля 59 копеек составляет 428 805 рублей 58 копеек; на сумму долга 774 733 рубля 60 копеек - 141 001 рубль 52 копейки. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 2 356 074 рубля 59 копеек - 10 % = 235 607 рублей 45 копеек; по сумме долга - 774 733 рубля 60 копеек -10 % = 77 473 рубля 36 копеек.

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате, согласно расчету истца, составляет 313 080 рублей 81 копейка.

Указывая на изложенные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из установленного факта нарушения заказчиком обязательства по оплате работ, следовательно, наличия у подрядчика оснований для начисления неустойки.

Повторно рассмотрев материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исследовав доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы в силу следующего. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правоотношения истца и ответчика возникли из договоров № 3175714/1099Д от 22.12.2014, №   3175715/0245Д   от   11.02.2015,   №   3175716/0081Д от 16.12.2015, №3175714/1176Д от  12.12.2014, №3175714/1098Д от 17.12.2014, № 3175716/0081Д от 16.12.2015, №3175716/0275Д от 24.02.2016, являющихся по своей правовой природе договором строительного подряда, регламентированы положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условия спорных договоров подпадают под определение статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В статьях 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что основанием для возникновения у заказчика обязательств по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения; по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения настоящего спора,  задолженность по оплате выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в размере 16 158 333 рублей 63 копеек оплачена в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 11.04.2018 № 104 (по договору от 12.12.2014 № 3175714/1176Д); платежным поручением от 11.04.2018 № 122 (по договору от 17.12.2014 №3175714/1098Д); платежным поручением от 11.04.2018 № 112 (по договору от 16.12.2015 № 3175716/0081Д); платежными поручениями от 11.04.2018 № № 129-131 (по договору от 24.02.2016 № 3175716/0275Д), и сторонами не оспаривается.

С учетом данного обстоятельства, в уточненном исковом заявлении истец просил взыскать с ответчика неосновательное обогащение (гарантийные удержания) по договору от 22.12.2014 № 3175714/1099Д в сумме 279 721 рублей 70 копеек, от 11.02.2015 № 3175715/0245Д в сумме 240 539 рублей 98 копеек, от 16.12.2015 № 3175716/0081Д в сумме 3 125 549 рублей 56 копеек, а также начисленную неустойку.

Суд первой инстанции, установив, что срок выплаты гарантийных удержаний по договорам подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д, от 11.02.2015 № 3175715/0245Д, от 16.12.2015 № 3175716/0081Д в общем размере 3 745 811 рублей 24 копеек не наступил, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворении требования о взыскании неосновательного обогащения (в виде гарантийного удержания) в указанной части. С учетом данного вывода, оснований для взыскания неустойки, начисленной на указанные суммы, судом также не установлено. В связи с этим суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца в указанной части.

В данной части решение суда сторонами не обжалуется, поэтому в этой части не подлежит проверке судом апелляционной инстанции.

Вместе с тем ответчик не согласен с взысканием с него неустойки в сумме 1 664 106 рублей 87 копеек, полагая неправомерным взыскание с него неустойки в сумме 619 255 рублей 34 копеек, начисленной в период после прекращения действия договоров от 16.12.2015 № 3175716/0081Д, от 24.02.2016 № 3175716/0275Д с 16.03.2017 (подробный расчет приведен в апелляционной жалобе).

Повторно оценив этот довод, коллегия судей пришла  к выводу о том, что указанная позиция ответчика правильно признана судом первой инстанции несостоятельной как основанная на неверном толковании и понимании заявителем норм действующего законодательства и условий заключенного договора подряда.

В силу пункта 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий (пункт 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Стороны не вправе требовать возвращения того, что исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон (пункты 2 и 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 2 пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение после расторжения договора либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения, сохраняют свое действие и после расторжения договора. При расторжении договора сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещение убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Согласно пункту 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7) окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, в частности, обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (пункты 3 и 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ни положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни условиями договора подряда от 22.12.2014 №3175714/1099Д иного не установлено.

Напротив, пунктом 16.2 договоров предусмотрено, что неустойка начисляется в предусмотренном этом пункте размере от своевременно неуплаченной суммы за каждый день просрочки.  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пеню), которой признается определенная законом или договором денежная сумма.

Пунктом 4 статьи 395 указанного Кодекса установлено, что в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные данной статьей, проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

В пункте 42 Постановления № 7 разъяснено, что если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца 1 пункта 1 статьи 394 Гражданского кодекса Российской Федерации, то положения пункта 1 статьи 395 названного Кодекса не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установив, что в пункте 16.2 договоров сторонами согласована неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы, суд, установив факт просрочки оплаты работ, правомерно взыскал с общества неустойку, в том числе за период после прекращения действия договоров от 16.12.2015 № 3175716/0081Д, от 24.02.2016                           № 3175716/0275Д.

Иные доводы жалобы сводятся к несогласию с выводами суда, при этом не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются несостоятельными и не могут служить основанием для отмены судебного акта.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Решение суда в обжалуемой части является законным и обоснованным.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя апелляционной жалобы. 

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от «20» сентября 2018 года по делу № А33-1389/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

 

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

 

Председательствующий

И.Н. Бутина

Судьи:

Л.Е. Споткай

 

Д.А. Усипова