АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-4073/2024

19 сентября 2024 года

город Омск

Резолютивная часть решения вынесена 08 мая 2024 года, полный текст решения изготовлен 19 сентября 2024 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Микуцкой А.П., рассмотрев исковое заявление  акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 5506225921, ОГРН 1135543015145) к обществу с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр - Флэш» (ИНН 5506205121, ОГРН 1085543042705) о взыскании 197 062 руб. 66 коп.

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Омскэлектро» (далее - АО «Омскэлектро», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области c исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр - Флэш»  (далее – ООО «Консалтинговый центр -Флэш», ответчик) о взыскании 197 062 руб. 66 коп. неустойки за период с 01.06.2023 по 11.01.2024, с дальнейшим начислением пени по день фактического исполнения обязательства, но не позднее 31.05.2024, а также расходов по уплате государственной пошлины.

Определением от 19.03.2024 указанное исковое заявление принято к производству с дальнейшим рассмотрением дела в порядке упрощенного производства без вызова сторон, в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), ответчику предложено в срок до 10.04.2024 представить письменный мотивированный отзыв на требования, а также в срок до 03.05.2024 дополнительные пояснения в обоснование своей позиции (пункт 5,6 определения).

В сроки, установленные в определении от 19.03.2024, ответчик, надлежащим образом извещённый о рассмотрении дела, в том числе, путём размещения информации на сайте арбитражного суда (сервис «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), отзыв на требования не представил.

08.05.2024 Арбитражным судом Омской области, в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ, вынесена резолютивная часть решения по делу № А46-4073/2024, согласно которой суд взыскал с ООО «Консалтинговый центр - Флэш»  в пользу АО «Омскэлектро» 197 062 руб. 66 коп. неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по теплотехническому присоединению, начисленную за период с 01.06.2023 по 11.01.2024, неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по теплотехническому присоединению, рассчитанную как произведение 0,25 % ставки и общего размера платы по договору в сумме 350 333 руб. 62 коп. за каждый день просрочки за период с 12.01.2024 по день фактического исполнения обязательства, но не позднее 31.05.2024; а также 6 912 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В материалы дела 13.09.2024 поступила апелляционная жалоба ответчика на решение по настоящему делу. 

С учетом принятой судом резолютивной части решения по делу, судом подготовлено настоящее мотивированное решение.

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

30.06.2022 между АО «Омскэлектро» (сетевая организация) и ООО «Консалтинговый центр - Флэш» (заявитель) подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 658/22 (далее - договор № 658/22).

В соответствии с условиями заключенного договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – ВРУ  в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами, принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств -  150 кВт, категория надежности - 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 10 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 0 кВт. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта, расположенного (который будет располагаться): нежилое здание (контора ПМК-5) по адресу:  

<

...>.

Пункты 4 и 5 Договора указывают, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть до 31.05.2023 (с учетом изменений в ТУ от 09.03.2023). 

По условиям договора стороны исполняют обязательства по технологическому присоединению следующим образом: Сетевая организация - до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя (пункт 6 договора), Заявитель - в пределах границ участка (пункт 8 договора).

Согласно пункту 8 Договора Заявитель обязался выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях (пункт 11 технических условий), оплатить расходы на технологическое присоединение и уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

В силу пункта 10 технических условий сетевая организация осуществляет: строительство ЛЭП-10 кВт соответствующей марки и сечения; от ВЛ-10 кВт (РП 569-ОП 68- ОП 220-ТП 5025- ОП 166 - ТП 5135) до границ участка заявителя (которая является границей балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон); установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности); для установки средств коммерческого учета электрической энергии  (мощности) выполняет монтаж опоры на границе балансовой принадлежности сторон, либо в месте, максимально к ней приближенном, в котором имеется техническая возможность установки (в сторону КТП-ТУ-658/22); подключение ВЛ-10 кВт выполняет через отключательный  пункт оборудованный средствами грозозащиты.  

Срок действия технических условий в соответствии пунктом 4 Договора от 30.06.2022 № 658/22, пунктом 12 приложения № 1 к договору составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 23.12.2021 № 666/96, и составляет 291 944 руб. 68 коп., кроме того НДС 20% в сумме 58 388,94 руб.; всего с НДС – 350 333,62 руб. (пункт 10 договора). 

Как указывает истец, мероприятия по технологическому присоединению ответчиком не исполнены до настоящего времени. 

Пунктом 17 договора от 30.06.2022 № 658/22 в соответствии с типовой формой Правил № 861 предусмотрена ответственность за нарушение одной из сторон сроков осуществления мероприятий, а именно обязанность уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки; при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В силу положений абзаца 3 подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 договор должен содержать обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

В связи с нарушением сроков выполнения мероприятий по договору ответчику начислена неустойка за период просрочки с 01.06.2023 по 11.01.2024 в размере 197 062 руб. 66 коп.

АО «Омскэлектро» направило в адрес ООО «Консалтинговый центр - Флэш» претензию  от 11.01.2024 № 10-10/исх-01-11/15 с требованием об оплате неустойки за нарушение договорных обязательств, а также с предложением выполнить возложенные на заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

Указанная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд находит исковые требования АО «Омскэлектро» подлежащим удовлетворению, исходя из следующего. 

Согласно пункту 16 (6) Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Как следует из материалов дела, ответчиком обязательства по выполнению мероприятий по осуществлению технологического присоединения не исполнены до настоящего времени.

В силу пункта 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (пункт 1 статьи 421 ГК РФ).

Из пункта 4 статьи 421 и пункта 1 статьи 424 ГК РФ следует, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

Перечень существенных условий договора об осуществлении технологического присоединения установлен в пункте 16 Правил № 861. В частности, к существенным условиям договора об осуществлении технологического присоединения относятся:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Учитывая неисполнение принятых на себя обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, истец обоснованно усмотрел основания для взыскания неустойки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором денежную сумму.

Как указано выше, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктом 16 Правил № 861, пунктом 5 Договора   от 30.06.2022 составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть не позднее 31.05.2023 (с учетом изменения ТУ от 09.03.2023).

Учитывая, что мероприятия по технологическому присоединению ответчиком не исполнены до настоящего времени, истец начислил неустойку за период с 01.06.2023 по 11.01.2024 в сумме 197 062 руб. 66 коп.

Проверив расчет неустойки, суд признает его арифметически верным, а само требование подлежащим удовлетворению.

Предусмотренных статьей 401 ГК РФ оснований для освобождения ответчика от оплаты неустойки не усматривается.

В силу статьи 333 ГК РФ суд вправе уменьшить размер взыскиваемой неустойки только в случае явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Вместе с тем, ответчик ходатайство о снижении неустойки не заявил и не представил каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушенных ответчиком обязательств.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая характер допущенных нарушений при исполнении обязательств по договору, период не исполнения ответчиком договорных обязательств, суд находит подлежащую взысканию неустойку соразмерной последствиям нарушенного обязательства, а требование подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

Также истцом заявлено требование о взыскании неустойки с 12.01.2024 по день фактического исполнения обязательства, но не позднее 31.05.2024. 

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ                    от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Поскольку мероприятия по технологическому присоединению на дату принятия решения по делу ответчиком не было исполнено, требование о взыскании неустойки по день фактического исполнения мероприятий по технологическому присоединению, но не позднее 31.05.2024 подлежит удовлетворению. 

Таким образом, исковые требования как законные, обоснованные и подтвержденные материалами дела, подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с нормами статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В связи с удовлетворением иска расходы по государственной пошлине в размере                 6 912 руб. 00 коп. возлагаются на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 123, 156, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр - Флэш»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 644016, 

<

...>) в пользу акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 644027, 

<

...>) 197 062 руб. 66 коп. неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по теплотехническому присоединению, начисленную за период с 01.06.2023 по 11.01.2024, неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по теплотехническому присоединению, рассчитанную как произведение 0,25 % ставки и общего размера платы по договору в сумме 350 333 руб. 62 коп. за каждый день просрочки за период с 12.01.2024 по день фактического исполнения обязательства, но не позднее 31.05.2024; а также 6 912 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 настоящего Кодекса.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Омской области.

Судья                                                                                                А.П. Микуцкая