АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-7339/2022

г. Оренбург

31 октября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена       28 октября 2022 года

В полном объеме решение изготовлено        31 октября 2022 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи      Сиваракши В.И. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ресурс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Русстройэлектро" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании суммы основного долга за выполненные работы по договору № 188 от 23.08.2021 года в сумме 299 910,0 рублей, договорной неустойки в сумме 16 920,0 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 10 047 рублей.

Представители сторон:

от истца - ФИО2, доверенность от 25.04.2022 года № б/н, постоянная, копия диплома, паспорт,

от ответчика - не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии с частью 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Информация о времени и месте судебного заседания размещена на сайте Арбитражного суда Оренбургской области, что подтверждается отчетом о публикации судебных актов.

Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" (далее - истец, ООО "Ресурс") обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Русстройэлектро" (далее - ответчик, ООО "Русстройэлектро") о взыскании суммы основного долга за выполненные работы по договору № 188 от 23.08.2021 года в сумме 299 910,0 рублей, договорной неустойки в сумме 16 920,0 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 10 047 рублей.

В обоснование заявленных требований истец указывает на неоплату ответчиком выполненных и принятых работ, ссылки ответчика на непредставление документов, предусмотренных договором, находит несостоятельными, поскольку работы не выполнялись из давальческих материалов.

Ответчик указывает на отсутствие у него обязанности по оплате работ, поскольку истцом не предоставлены установленные договором документы.

В судебном заседании арбитражным судом установлены следующие обстоятельства дела.

ООО "Русстройэлектро" (генподрядчик) и ООО "Ресурс" (подрядчик) 23.08.2021 года заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ № 188 (далее - договор № 188), согласно пункту 2.1. которого подрядчик по заданию генподрядчика обязуется в соответствии с условиями договора, проектной и рабочей документации выполнить работы по строительству объекта: "ВЛ-10кВ 2020г. Западная группа месторождений. Лот № 1", а именно:

- строительно-монтажные работы;

- полный комплекс пусконаладочных работ;

- поставку оборудования и материалов подрядчика (за исключением оборудования и материалов генподрядчика, указанных в Приложении      № 1.4);

- поставку оборудования и материалов поставки генподрядчика (в случае отсутствия у генподрядчика возможности обеспечить своевременную поставку для выполнения работ по договору. При этом подрядчик информирует генподрядчика о производителях и поставщиках, комплектации поставляемых материалов и оборудования (Приложение     № 1.4);

- иные, неразрывно связанные со строящимся объектом,  работы; устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ, а также в период гарантийной эксплуатации объекта;

- сдачу объекта по акту приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11)/акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и выполнение обязательств в  течение гарантийного срока, 

а генподрядчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 3.1. договора № 188 стороны согласовали стоимость договора (договорную цену) - 1 133 750,40 рублей, в том числе НДС.

Согласно пунктам 3.5. и 3.6. договора № 188, стоимость услуг генподряда по договору определяется в процентном отношении от стоимости подписанной справки КС-3 подрядчика и устанавливается сторонами в размере 4%. Расчет за оказание услуг генподряда производится путем проведения сторонами зачета встречных однородных требований. на сумму произведенного зачета встречных однородных требований уменьшается сумма, подлежащая перечислению подрядчику.

Согласно пункту 6.2. договора № 188, подрядчик обязан ежемесячно  представлять на рассмотрение и согласование генподрядчику первичную учетную документацию, подписанную уполномоченным представителем подрядчика и заверенную печатью подрядчика, в порядке и объеме, установленном договором. Первичная учетная документация должна быть представлена с официальным сопроводительным письмом и только после согласования со строительным контролем заказчика в следующие сроки:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленного в соответствии с "Порядком определения стоимости работ" (по форме Приложения № 1А) и "Порядком определения стоимости работ" к наряд-заказу (по форме Приложения № 1.1А) до 18 числа отчетного месяца;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) до 27 числа отчетного месяца;

- счета-фактуры до 27 числа отчетного месяца;

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) (переданный подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5) до 18 числа отчетного месяца;

- общий журнал работ (форма № КС-6) до 18 числа отчетного месяца;

- акт выполнения ключевых событий (по форме Приложения № 2.4 к наряд-заказу) до 30 числа отчетного  месяца;

- отчет о расходе материалов в строительстве в соответствии с производственными нормами (форма № М-29) (переданный подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5) до 18 числа отчетного месяца;

- материального отчета по форме М-19 до 18 числа отчетного месяца;

- документы, подтверждающие понесенные прочие затраты - до 13 числа месяца, следующего за отчетным;

- акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15), переданного генподрядчиком подрядчику, с указанием его марки, количества и стоимости до 18 числа отчетного месяца;

- акт смонтированного оборудования (переданный подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5) до 18 числа отчетного месяца;

- накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15), переданного генподрядчиком подрядчику, с указанием его марки, количества и стоимости до 18 числа отчетного месяца;

- акт приема-передачи не использованных подрядчиком материалов и оборудования поставки генподрядчика в течение 5 (пяти) дней после окончания выполнения работ;

- справка на оказанные услуги по добыче песка (переданная подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5) с указание стоимости услуг по добыче песка, грунта до 18 числа отчетного месяца;

- акт приемки-передачи песка (переданный подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5) до 18 числа отчетного месяца;

- типовые формы расчетов и подтверждающие документы, согласованные заказчиком для подтверждения расчетов прочих затрат - до 13 числа месяца, следующего за отчетным.

Одновременно с  первичной учетной документацией, указанной в пункте 6.2., подрядчик предоставляет генподрядчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с действующими руководящими документами (РД-11-02-2006) (пункт 6.5 договора № 188).

В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от подрядчика полного пакета документов, поименованных в   п. 6.2 и 6.5 настоящего договора, генподрядчик обязан направить подрядчику подписанный журнал учета выполненных работ       (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при наличии подписанных с обеих сторон документов, перечисленных в пункта 6.2 и 6.5 настоящего договора (пункт 6.8 договора № 188).

Объемы выполненных работ считаются принятыми после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при наличии подписанных с обеих сторон документов, перечисленных в пунктах 6.2 и 6.5 настоящего договора (пункт 6.9 договора № 188).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему договору генподрядчик имеет право отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также не оплачивать соответствующий объем работ до устранения подрядчиком выявленных недостатков в работах или в оформлении документов, указанных в пункта 6.2, 6.5 (пункт 6.11 договора № 188).

Из пункта 7.1 договора № 188 следует, что оплата выполненных работ по настоящему договору производится генподрядчиком после подписания выполненных работ между генподрядчиком и заказчиком в размере 91% от 100% стоимости принятых к учету работ за отчетный период путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 90 календарных дней но не ранее 60 календарных дней с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления подписанных в оригинале:

- акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2), при этом выполненные работы должны быть подтверждены организацией по СК, а акт - принят  (подписан) полномочным сотрудником/работником представителя генподрядчика;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- счета-фактуры;

- справки на оказанные услуги по добыче песка (переданной подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5);

- акт приемки-передачи песка (переданный подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5);

- акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15), переданного генподрядчиком подрядчику;

- акт смонтированного оборудования (переданный подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5);

- накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), переданных генподрядчиком подрядчику

- акта приема-передачи не использованных подрядчиком материалов и оборудования поставки генподрядчика;

- отчета о расходе материалов в строительстве (форма № М-29);

- акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35 - переданная подрядчику на электронном носителе по "Перечню ЛНД и форм генподрядчика" Приложение № 5);

- акта об оказании услуг генподряда (Приложение № 13);

- акта зачета встречных однородных требований (Приложение № 14),

оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также пункта 6.4. настоящего договора.

оставшиеся 5% от стоимости принятых к учету работ за весь период строительства (отложенный платеж) генподрядчик перечисляет в течение 30 календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11/(акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, за исключением случаев предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего пункта.

Окончательный  (последний) платеж по договору производится при наличии акта сверки взаимных расчетов по договору при условии 100% возврата или оплаты материалов и оборудования поставки генподрядчика, полученных подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, но не использованных при строительстве объекта, за исключением случая, когда подрядчик согласовал с генподрядчиком отмену мероприятий по возврату не использованных в процессе строительства материалов (пункт 7.2 договора № 188).

Пунктом 26.25 договора № 188 определено, что за нарушение генподрядчиком сроков оплаты, предусмотренных договором, подрядчик вправе взыскать с генподрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, которые взимаются не более чем за 30 календарных дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

Сторонами 29.11.2021 года подписано дополнительное соглашение № 1 к договору № 188, согласно которому общая стоимость договора (договорная цена) уменьшена до 1 029 397,25 рублей, исключены пункты 3.5 и 3.6. договора.

Сторонами 30.11.2021 года подписаны акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 за ноябрь 2021 года № 1-1 на сумму 799 373,76 рублей (без НДС), № 1-2 на сумму 58457,28 рублей (без НДС), справка № 1 о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на сумму 1 029 397,25 рублей (с НДС).

Объект "Реконструкция существующей линии ВЛ-10 кВ от существующей опоры № 31/2 до существующей опоры № 98" (указанные виды работ отражены в актах формы № КС-2  и № КС-3) введен в действие, о чем 19.12.2021 года составлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

По платежному поручению от 05.04.2022 года № 244 ООО "Русстройэлектро" перечислило ООО "Ресурс" 729 397,25 рублей в качестве оплаты по договору № 188.

Направленная 19.04.2022 года истцом претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения ООО "Ресурс" в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд первой инстанции считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Проанализировав характер спорных правоотношений, исходя из содержания прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором       № 188, суд первой инстанции классифицирует их как правоотношения по договору подряда, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, ввиду согласования сторонами существенных условий договора подряда об его предмете и сроках выполнения работ. Исследуемый договор соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, следовательно, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности рассматриваемого договора у судебной коллегии не имеется.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

На основании положений пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Доказательством сдачи подрядчиком результатов работы и приемки его заказчиком может являться акт, удостоверяющий приемку выполненных работ (пункт 4 статьи 753, статья 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу положений статей 702, 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 года   № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы.

В силу положений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельство выполнения истцом работ на общую сумму                1 029 397,25 рублей подтверждается актами от 30.11.2021 года                    № 1-1 и № 1-2 о приемке выполненных работ формы № КС-2, а также справкой № 1 о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

В суде первой инстанции ответчик не заявил возражений относительно объемов, стоимости, качества и сроков выполненных истцом работ.

Поскольку обязательства, возникшие из договора № 188, и актов о приемке выполненных работ, носят возмездный характер, ответчик обязан оплатить полученное им предоставление.

Доказательств оплаты в полном размере принятых работ, ответчиком в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах судом первой инстанции удовлетворяются исковые требования о взыскании с ответчика долга по договору № 188  в размере 299 910,0 рублей.

В отзыве ответчик указывает на неисполнение истцом обязательств, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 договора № 188 в части предоставления документов, за исключением актов от 30.11.2021 года                    № 1-1 и № 1-2 о приемке выполненных работ формы № КС-2, а также справки № 1 о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. По мнению ответчика, у него не возникло обязательство по оплате принятых к учету работ.

Данный довод ответчика арбитражным судом не принимается.

Как указывает истец, все работы по договору № 188 выполнены его иждивением, доказательств обратного ответчиком не предоставлено, в связи с чем, необходимость в предоставлении документов, поименованных в пункте 7.1 отсутствует. Данное обстоятельства также подтверждается подписанием ответчиком актов от 30.11.2021 года № 1-1 и № 1-2 о приемке выполненных работ формы № КС-2, а также справки № 1 о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 (пункт 6.8 договора № 188). Объект введен в действие, о чем 19.12.2021 года составлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

Кроме того, договор № 188 сторонами заключен не в целях выполнения истцом строительных работ как таковых, он направлен на достижение результата этих работ, пригодного для использования.

Так же суд отмечает, что непредставление истцом документов, поименованных в пунктах 7.1 и 7.2. договора № 188, само по себе, не может являться основанием для отказа в приемке и оплате выполненных работ. В данном случае суд учитывает, что ответчиком не представлено доводов об отсутствии потребительской ценности выполненных истцом работ и необходимости их переделки. Кроме того, отсутствие указанных документов не влечет за собой негодность результата работ.

Согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен, признан арифметически и методологически верным.

С учетом изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

При цене иска 316 830 рублей размер государственной пошлины в соответствии с пунктом 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 9 337 рублей, истцом произведена уплата государственной пошлины в этом размере, что подтверждается платежным поручением от 26.05.2022 года № 759.

Вместе с тем, в просительной части искового заявления истцом указана государственная пошлина в размере 10 047 рублей, данная сумма истцом в бюджет не уплачена и не подлежит возврату из федерального бюджета либо взысканию с ответчика.

На основании части 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежат взысканию судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 9 337 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 171 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Русстройэлектро" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ресурс" сумму основного долга за выполненные работы по договору        № 188 от 23.08.2021 года в сумме 299 910,0 рублей, договорную неустойку в сумме 16 920,0 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 337 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (www.18aaс.ru).

Судья                                                                   В.И. Сиваракша