АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-848/2017

г. Магадан

28 июня 2017 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи М.В. Ладуха, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального  образования «Ольский городской округ» в лице Администрации муниципального  образования «Ольский городской округ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 685910, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Магаданстальизделия» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>)  об обязании устранить недостатки  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Обязать ответчика, общество с ограниченной ответственностью  «Магаданстальизделия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), устранить в  безвозмездном порядке в месячный срок со дня вступления настоящего решения в  законную силу недостатки, допущенные при строительстве многоквартирных домов,  расположенных в 

<

...>, д. 14 путем выполнения работ,  перечисленных в акте обследования жилых домов по ул. Ленина, 

<

...> в поселке  Армань от 13.03.2017:  

 По 8-квартирному жилому дому, расположенному по адресу: Магаданская  

область, 

<

...>: 

- Квартира № 1: произвести работы по разборке полов, устройству перекрытия над  проветриваемым подпольем, покрытию линолеумом на теплой основе; установка  плинтусов.  

- Квартира № 2: провести работы по разборке полов, устройству перекрытия над  проветриваемым подпольем, покрытию линолеумом на теплой основе; установка  плинтусов, ремонт изоляции оконных блоков.  

- Квартира № 3: провести работы по разборке полов, устройству перекрытия над  проветриваемым подпольем, покрытию линолеумом на теплой основе; установка  плинтусов, ремонт изоляции оконных блоков.  

- Квартира № 4: провести работы по разборке полов, устройству перекрытия над  проветриваемым подпольем, покрытию линолеумом на теплой основе; установка  плинтусов.  

- Квартира № 5: провести работы по снятию линолеума, покрытию полов плитой  ОСП-3 12мм, провести работы по обратному покрытию полов линолеумом с установкой  плинтусов.  

- Квартира № 6: провести работы по снятию линолеума, покрытию полов плитой  ОСП-3 12мм, провести работы по обратному покрытию полов линолеумом с установкой  плинтусов; провести ремонт изоляции оконных блоков.  

- Квартира № 7: провести работы по снятию линолеума, покрытию полов плитой  ОСП-3 12мм, провести работы по обратному покрытию полов линолеумом с установкой  плинтусов; провести ремонт изоляции оконных блоков.  

- Квартира № 8: провести работы по снятию линолеума, покрытию полов плитой  ОСП-3 12мм, провести работы по обратному покрытию полов линолеумом с установкой  плинтусов.  

 По 8-квартирному жилому дому, расположенному по адресу: Магаданская область,  

<

...>: 

- Квартира № 1: провести работы по разборке полов, устройству перекрытия над  проветриваемым подпольем, покрытию линолеумом на теплой основе; установка  плинтусов, ремонт изоляции оконных блоков.  

- Квартира № 2: провести работы по разборке полов, устройству перекрытия над  проветриваемым подпольем, покрытию линолеумом на теплой основе; установка  плинтусов.  

- Квартира № 3: провести работы по разборке полов, устройству перекрытия над  проветриваемым подпольем, покрытию линолеумом на теплой основе; установка  плинтусов.  

- Квартира № 4: провести работы по разборке полов, устройству перекрытия над  проветриваемым подпольем, покрытию линолеумом на теплой основе, работы по  установке плинтусов, провести ремонт изоляции оконных блоков.  

- Квартира № 5: провести работы по снятию линолеума, покрытию полов плитой  ОСП-3 12мм, провести работы по обратному покрытию полов линолеумом с установкой  плинтусов; провести ремонт изоляции оконных блоков.  

- Квартира № 6: провести работы по снятию линолеума, покрытию полов плитой  ОСП-3 12мм, провести работы по обратному покрытию полов линолеумом с установкой  плинтусов.  

- Квартира № 7: провести работы по снятию линолеума, покрытию полов плитой  ОСП-3 12мм, провести работы по обратному покрытию полов линолеумом с установкой  плинтусов.  

-Квартира № 8: провести работы по снятию линолеума, покрытию полов плитой  ОСП-3 12мм, провести работы по обратному покрытию полов линолеумом с установкой  плинтусов; провести ремонт изоляции оконных блоков.  

 по обоим 8-квартирным жилым домам № 13, № 14, расположенным по адресу:  

<

...> выполнить  

следующие работы: 

 - провести ремонт изоляции по периметру оконных блоков с восточной стороны (в  доме № 13 со стороны улицы, в доме № 14 - со стороны двора и квартиры № 2);  

- выполнить проход (лаз) в подполье в обоих домах для технической эксплуатации  зданий, ближе к выходу канализации,  

- провести дополнительную прошивку потолка в помещении узла управления, - установить заслонки в системе вентиляции, - усилить полы на первом этаже лестничных клеток, 

- провести устройство перекрытия над проветриваемым подпольем с помощью  плиты ОСП -3 12 мм.  

Выдать исполнительный лист истцу после вступления решения в законную силу. 

2. Взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью  «Магаданстальизделия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек, о чем налоговому  органу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

3. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

4.Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом  рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Судья М.В. Ладуха