45/2021-13747(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-13617/2020

город Вологда

09 февраля 2021 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Пултэк» в срок до  31.08.2021 устранить недостатки выполненных работ по муниципальным кон- трактам:  

По муниципальному контракту от 17.07.2017 № 0130300017017000009- 0784775-01 на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия с пешеход- ным переходом при ремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды:  

- провести планировочные работы после восстановления насыпи на площади 240 кв.м.;  

- восстановить прослойку из нетканого синтетического материала по при- готовленному основанию на площади 275 кв.м.;  

- восстановить подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебня  (гравия) для строительных работ марки Др.8. фракция 10-20 мм объемом 48 куб.  м.;  

- восстановить подстилающие и выравнивающие слои оснований из песча- но-гравийной смеси, объемом 58 куб. м.;  

- восстановить основание городских проездов, толщиной слоя 16 см из бе- тона класса В15 (М200) с укладкой сетки сварной из арматурной проволоки  диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150x150 мм на площади 100,5 кв.м.;  

- восстановить укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов  и путепроводов геоячейками типа «ПРУДОН-494», с заполнением растительным  грунтом с посевом трав, высотой ячеек: 10 см на площади 178 кв.м.;  

- восстановить трубопроводы диаметром 200 мм из безнапорных труб длиной 4 м.;  

- восстановить дождеприемники - 2 фасонных части; 

- восстановить металлическое ограждение и его окрасочное покрытие  длиной 30 м.;  

- восстановить металлическое барьерное ограждение с шагом стоек 1 м  

длиной 63 м.;  

По муниципальному контракту от 21.07.2017 № 0130300017017000008-  0784775-02 на выполнение работ по ремонту водопропускного сооружения при  ремонте моста через реку Ластовка в д. Слуды:  

- выполнить восстановление дорожной насыпи из грунта 2 гр объемом 314  куб.м.;  

- выполнить восстановление дорожной насыпи из глины с ее доставкой  объемом 800 куб. м.;  

- провести восстановление трубопроводов из железобетонных безнапор- ных раструбных труб диаметром 1000 мм с герметизацией стыков после восстановления основания длиной 30 м.;  

- восстановить дорожное покрытие из сборных шестигранных железобе- тонных плит после восстановления насыпи, объемом 3,36 куб.м. и в количестве 2  плит дорожных ПДН, ПДО/бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры  112,52 кг/(серия 3.503.1-91 вып. 1);  

По муниципальному контракту от 02.10.2017 № 1 на выполнение работ по  берегоукреплению водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д.  Слуды:  

- восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 454 кг.; 

- восстановить окраску с огрунтовкой по металлу швеллеров эмалью ЭП- 1236 на площади 24,05 кв.м.;  

- восстановить армирование грунтовых насыпей георешетками на площади 90 кв.м.;  

По муниципальному контракту от 03.10.2017 № 2 на выполнение работ по  устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста  через реку Ластовка в д. Слуды:  

- установить на место упавшие дорожные плиты после восстановления ос- нования, объемом 4 куб.м.;  

- восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с  армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 4,8 куб.м.;  

- установить уголок металлический в тело железобетона при бетонирова- нии весом 0,2 т.;  

- провести засыпку пазух песком природным для строительных работ по- вышенной крупности и крупным объемом 5,6 куб.м.;  

По муниципальному контракту от 27.11.2017 № 1 на выполнение работ по  устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста  через реку Ластовка в д. Слуды (крепление дна и откосов):  

- восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с  армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 2 куб.м.;  

- установить уголок металлический в тело железобетона при бетонирова- нии, весом 0.4 т.;  

По муниципальному контракту от 30.11.2017 № 2 на выполнение работ по  устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста  через реку Ластовка в д, Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструкций):  

- провести засыпку пазух песком природным для строительных работ по- вышенной крупности и крупным объемом 56 куб.м.;  

- восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 0,2414 т.;  

По муниципальному контракту от 01.12.2017 № 3 на выполнение работ по  устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста  через реку Ластовка в д. Слуды (устройство дорожных покрытий и крепление  дна и откосов):  

- установить на место упавшие дорожные плиты после восстановления ос- нования объемом 5 куб.м.;  

- восстановить укрепление дна и откосов монолитным железобетоном с  армированием проволокой арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-01 объемом 8 куб.м.;  

По муниципальному контракту от 04.12.2017 № 4 на выполнение работ  по устройству подпорной стены части откоса водопропускного сооружения моста через реку Ластовка в д. Слуды (засыпка песком и монтаж металлоконструк- ций):  

- провести засыпку пазух песком природным для строительных работ по- вышенной крупности и крупным объемом 5,6 куб.м.;  

- восстановить металлический каркас из швеллера № 16 весом 0,5304 т.;  

- восстановить окраску с огрунтовкой по металлу швеллеров эмалью ЭП- 1236 на площади 40,885 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пултэк» в феде- ральный бюджет 48 000 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелля- ционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа,  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5  статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судья Н.А. Колтакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 5:37:31

Кому выдана Колтакова Наталия Александровна