АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, 

<

...>

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-10084/2024

17 апреля 2025 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена 3 апреля 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 17 апреля 2025 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Лемешко А.В., рассмотрел в открытом судебном заседании материалы искового заявления:

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница»

к Акционерному обществу «Азнакаевский завод «Нефтемаш»

о взыскании 271 818,15 рублей.

При участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСКАПСТРОЙ", СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

При участии:

от Службы финансового надзора Республики Крым – ФИО1, представитель по доверенности, 

от иных лиц – не явились.

УСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Акционерному обществу «Азнакаевский завод «Нефтемаш» о взыскании 271 818,15 рублей.

29.11.2024 посредством системы электронной подачи документов «Мой арбитр» от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым последний просил суд в удовлетворении исковых требований отказать на основании доводов, изложенных в отзыве.

Определением суда от 12.12.2024 ходатайство Акционерного общества «Азнакаевский завод «Нефтемаш» удовлетворено, привлечено к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора: 

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСКАПСТРОЙ", ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***> (129329, 

<

...>) 

Определением суда от 03.03.2025 привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора: 

- СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (295051, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г СИМФЕРОПОЛЬ, Б-Р ЛЕНИНА, ЗД. 5/7; ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Информация о движении дела и определения суда опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет http://www.crimea.arbitr.ru и сайте http://kad.arbitr.ru.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела, в том числе путем опубликования указанной информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с учетом положений части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязывающих участников арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи, в связи с чем, суд на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело при имеющейся явке.

Исследовав обстоятельства дела, имеющиеся в материалах дела доказательства, пояснения сторон судом установлено следующее.

26.12.2020 между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» и Акционерным обществом «Азнакаевский завод Нефтемаш» был заключен Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Казанки», №ВЦП-0015 (далее - Контракт № 1).

20.12.2020 между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» и Акционерным обществом «Азнакаевский завод Нефтемаш» был заключен Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского, пункта в с. Севастьяновка», №ВЦП-0020 (далее-Контракт№2). 

26.12.2020 между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» и Акционерным обществом «Азнакаевский завод Нефтемаш» был заключен Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Зеленое» №ВЦП-0013 (далее - Контракт № 3).

На основании поручения Главы Республики Крым от 20.04.2022 № 1/01-32/2027, приказов Службы финансового надзора Республики Крым от 23.08.2022№ 247 «О проведении внеплановой выездной проверки в ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ», от 13.09.2022 № 271 «О внесении изменений в приказ Службы финансового надзора Республики Крым от 23.08.2022 № 247», в период с 25.08.2022 по 19.10.2022 проведена внеплановая выездная проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета Республики Крым бюджетному учреждению, и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверности отчетов об исполнении государственных заданий; использования средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым; осуществление расходов бюджета Республики Крым на реализацию региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»; соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В соответствии с Актом внеплановой выездной проверки в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ») № 07.2- 05/07 от 10 ноября 2022 года (далее - Акт) выявлены нарушения при исполнении Контрактов.

В соответствии п. 26 Акта выявлены следующие нарушения при исполнении Контракта № 1:

Общая стоимость работ по Контракту составляет: 12 328 810,00 (Двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек).

В ходе проверки выполнен сравнительный анализ объема работ и затрат, включенных в Сводный сметный расчет Контракта № ВЦП-0015 с объемом работ, затрат, принятым ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и оплаченным согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Контракт от 26.12.2020 № ВЦП-0015, ЛСР № 02-01-02, ЛСР №07-01- 01, КС-2, КС-3.

Сопоставлением объема работ, затрат, включенных в Сводный сметный расчет Контракта №ВЦП-0015 с объемом работ, затрат, включенных в КС-2 и оплаченных Больницей на основании КС-3, установлено следующее.

Согласно Сводному сметному расчету Контракта № ВЦП-0015 на оборудование в сумме 2 385 050, 00 руб., включенное в ЛСР № 02-01-02, начисление НДС не предусмотрено.

Согласно актам КС-2 от 18.12.2021 №3, №4, №5 Подрядчик сдал, а Заказчик принял оборудование на сумму 2 286 643,87 руб., в том числе: КС-2 от 18.12.2021 №3 на сумму 1 739749,97 руб.; КС-2 от 18.12.2021 №4 на сумму 187 727,32 руб.; КС-2 от 18.12.2021 №5 на сумму 359 166,58 руб.

Однако, установлено, что в акты КС-2 от 18.12.2021 №4, №5 кроме стоимости оборудования, включен НДС на общую сумму 90 606,05 руб., не предусмотренный условиями Контракта № ВЦП-0015, в том числе: в КС- 2 от 18.12.2021 №4 - НДС 10% на сумму 18 772,73 руб.; в КС-2 от 18.12.2021 №5 - НДС 20% на сумму 71 833,32 руб.

На основании актов КС-2 от 18.12.2021 №3, №4, №5 генеральным директором АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» ФИО2, главным врачом ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» ФИО3 подписана Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.12.2021 №3 на общую сумму 2 377 249,92 руб., в том числе: стоимость оборудования на сумму 2 286 643,87 руб.; НДС на сумму 90 606,05 руб.

В соответствии с п. 26 Акта внеплановой выездной проверки в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ») от 10.11.2022 № 07.2- 05/07, установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 101 Федерального закона №44-ФЗ ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» надлежащим образом не осуществлен контроль за исполнением подрядчиком условий Контракта от 26.12.2020 № ВЦП-0015: Заказчиком не проверена информация, содержащаяся в КС-2, на соответствие стоимости поставленного оборудования проектной документации (АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» в акты КС-2 от 18.12.2021 №4, №5 включен НДС на общую сумму 90 606,05 руб., не предусмотренный проектной документацией и условиями Контракта № ВЦП-0015).

На основании указанного, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница», в соответствии с ч. ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит уплатить излишне оплаченную сумму НДС по контракту № ВЦП-0015 от 26.12.2020 в размере 90 606 (девяносто тысяч шестьсот шесть) рублей 05 копеек.

В соответствии п. 16 Акта выявлены следующие нарушения при исполнении Контракта № 2:

В ходе проведения проверки, был осуществлен контроль по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Севастьяновка», работы по которому осуществлялись в соответствии с контрактом № ВЦП-0020 от 26.12.2020.

В ходе проверки выполнен сравнительный анализ объема работ и затрат, включенных в Сводный сметный расчет Контракта № ВЦП-0020 с объемом работ и затрат, принятых ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» согласно актам о приемке выполненных работ, форма КС-2 (далее - акты КС- 2) и оплаченным согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат, форма КС-3.(Контракт от 26.12.2020 № ВЦП-0020, ЛСР № 02-01-02, ЛСР № 07-01-01, КС-2, КС-3) (Сравнительный анализ объема работ и затрат, включенных в Сводный сметный расчет Контракта № ВЦП-0020 с объемом работ и затрат, включенным в КС-2, КС-3 в Приложении 43 к акту).

Сопоставлением объема работ, затрат, включенных в Сводный сметный расчет Контракта №ВЦП-0020 с объемом работ, затрат, включенных в КС-2 и оплаченных Больницей на основании КС-3, установлено следующее.

Согласно Сводному сметному расчету Контракта № ВЦП-0020 на оборудование в сумме 2 385 050, 00 руб., включенное в ЛСР № 02-01-02, начисление НДС не предусмотрено.

Согласно актам КС-2 от 18.12.2021 №3, №4, №5 Подрядчик сдал, а Заказчик принял оборудование на сумму 2 286 643,87 руб., в том числе: КС- 2 от 18.12.2021 №3 на сумму 1 739 749,97 руб.; КС-2 от 18.12.2021 №4 на сумму 187 727,32 руб.; КС-2 от 18.12.2021 №5 на сумму 359 166,58 руб.

Однако, установлено, что в акты КС-2 от 18.12.2021 №4, №5 кроме стоимости оборудования, включен НДС на общую сумму 90 606,05 руб., не предусмотренный условиями Контракта № ВЦП-0020, в том числе: в КС-2 от 18.12.2021 №4 -НДС 10% на сумму 18 772,73 руб.; в КС-2 от 18.12.2021 №5 - НДС 20% на сумму 71 833,32 руб.

На основании актов КС-2 от 18.12.2021 №3, №4,, №5 генеральным директором АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» ФИО2, главным врачом ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» ФИО3 подписана Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.12.2021 № 3 на общую сумму 2 377 249,92 руб., в том числе: стоимость оборудования на сумму 2 286 643,87 руб., НДС на общую сумму 90 606,05 руб.

В соответствии с п.16 Акта внеплановой выездной проверки в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ») от 10.11.2022 № 07.2- 05/07, установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 101 Федерального закона №44-ФЗ ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» надлежащим образом не осуществлен контроль за исполнением подрядчиком условий Контракта от 26.12.2020 № ВЦП-0020: Заказчиком не проверена информация, содержащаяся в КС-2, на соответствие стоимости поставленного оборудования проектной документации (АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» в акты КС-2 от 18.12.2021 №4, №5 включен НДС на общую сумму 90 606,05 руб., не предусмотренный проектной документацией и условиями Контракта № ВЦП-0020).

На основании указанного, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница», в соответствии с ч. ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит уплатить излишне оплаченную сумму НДС по контракту № ВЦП-0020 от 26.12.2020 в размере 90 606 (девяносто тысяч шестьсот шесть) рублей 05 копеек.

В соответствии и. 26 Акта выявлены следующие нарушения при исполнении Контракта № 3:

В ходе проверки выполнен сравнительный анализ объема работ и затрат, включенных в Сводный сметный расчет Контракта № ВЦП-0013 с объемом работ, затрат, принятым ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» согласно актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и оплаченным согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

Контракт от 26.12.2020 № ВЦП-0013, ЛСР № 02-01-02, ЛСР № 07-01- 01, ЛСР № 07-01-02, КС-2, КС-3.

Сопоставлением объема работ, затрат, включенных в Сводный сметный расчет Контракта №ВЦП-0013 с объемом работ, затрат, включенных в акты КС-2 и оплаченных Больницей на основании справок КС-3, установлено следующее.

Согласно Сводному сметному расчету Контракта № ВЦП-0013 на оборудование в сумме 2 385 050, 00 руб., включенное в ЛСР № 02-01-02, начисление НДС не предусмотрено.

Согласно актам КС-2 от 18.12.2021 №2, №3, №4 Подрядчик сдал, а Заказчик принял оборудование на сумму 2 286 643,87 руб., в том числе: КС-2 от 18.12.2021 №2 на сумму 1 739 749,97 руб.; КС-2 от 18.12.2021 №3 на сумму 187 727,32 руб.; КС-2 от 18.12.2021 №4 на сумму 359 166,58 руб.

Однако, проверкой установлено, что в акты КС-2 от 18.12.2021 №3, №4 кроме стоимости оборудования включен НДС на общую сумму 90 606,05 руб., не предусмотренный условиями Контракта № ВЦП-0013, в том числе: в КС-2 от 18.12.2021 №3 - НДС 10% на сумму 18 772,73 руб.; в КС-2 от 18.12.2021 №4 - НДС 20% на сумму 71 833,32 руб.

На основании актов КС-2 от 18.12.2021 №2, №3, №4 генеральным директором АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» ФИО2, главным врачом ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» ФИО3 подписана Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.12.2021 № 3 на общую сумму 2 377 249,92 руб., в том числе: стоимость оборудования на сумму 2 286 643,87 руб.; НДС на сумму 90 606,05 руб.

В соответствии с п.26 Акта внеплановой выездной проверки в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ») от 10.11.2022 № 07.2- 05/07, установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 101 Федерального закона №44-ФЗ ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ» надлежащим образом не осуществлен контроль за исполнением подрядчиком условий Контракта от 26.12.2020 № ВЦП-0013: Заказчиком не проверена информация, содержащаяся в КС-2, на соответствие стоимости поставленного оборудования проектной документации (АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» в акты КС-2 от 18.12.202.1 №4, №5 включен НДС на общую сумму 90 606,05 руб., не предусмотренный проектной документацией и условиями Контракта № ВЦП-0013).

На основании указанного, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Бахчисарайская центральная районная больница», в соответствии с ч. ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит уплатить излишне оплаченную сумму НДС по контракту № ВЦП-0013 от 26.12.2020г. в размере 90 606 (девяносто тысяч шестьсот шесть) рублей 05 копеек.

Основная сумма задолженности по всем договорам по состоянию на 17.05.2024 составляет: 271 818 (двести семьдесят одна тысяча восемьсот восемнадцать) рублей 15 копеек.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

По своей правовой природе спорный контракт представляет собой контракт на выполнение работ для государственных/муниципальных нужд, правоотношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде на выполнение проектных и изыскательских работ, условиями заключенного контракта, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ, Закон о контрактной системе).

К отношениям сторон подлежат применению общие нормы о договоре подряда и обязательствах, которые регламентируются положениями статей 702, 708, 711, 720, 740, 746, 758, 763, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Как указано в статье 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).

В соответствии с п. 1.1 Контракта №ВЦП-0015 Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Казанки», указанному в Приложении 1 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.

В соответствии с п. 2.1 Контракта цена контракта составляет 13 373 640,00 руб., включая НДС.

Во исполнение требований действующего законодательства о налоге на добавленную стоимость Подрядчиком и Заказчиком были подписаны локальные сметные расчеты:

- Локальный сметный расчет №02-01-02.1 «Технологические решения» - без НДС (Приложение №2);

- Локальный сметный расчет №02-01-02.2 «Технологические решения» - НДС 10% (Приложение №3);

- Локальный сметный расчет №02-01-02.3 «Технологические решения» - НДС 20% (Приложение №4).

При приемке выполненных работ и подписании актов формы КС-2 №3 от 18.12.2021 (Приложение №5), №4 от 18.12.2021 (Приложение №6), №5 от 18.12.2021 (Приложение №7) приемка осуществлялась в соответствии с Локальными сметными расчетами №02-01-02.1 «Технологические решения» - без НДС, №02-01-02.2 «Технологические решения» - НДС 10%, №02-01-02.3 «Технологические решения» - НДС 20%, что подтверждается актами формы КС-2 (Приложение №№ 5, 6, 7, страница 1, первая строка после наименования документа АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).

Оформление локальных сметных расчетов с выделенной применимой ставкой НДС не повлекло за собой увеличение цены Контракта, что подтверждается ценой контракта (13 373 640,00 руб., включая НДС (п. 2.1 Контракта, приложение №1 к исковому заявлению) и Актом приемки законченного строительством объекта формы КС-11 от 09.06.2022 (Приложение №8, страница 4, п. 12 Стоимость принимаемых основных фондов – 12 321 948,04 руб., включая НДС).

В соответствии с п. 1.1 Контракта №ВЦП-0020 Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Севастьяновка», указанному в Приложении 1 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.

В соответствии с п. 2.1 Контракта цена контракта составляет 13 471 920,00 руб., включая НДС.

Во исполнение требований действующего законодательства о налоге на добавленную стоимость Подрядчиком и Заказчиком были подписаны локальные сметные расчеты:

- Локальный сметный расчет №02-01-02.1 «Технологические решения» - без НДС (Приложение №9);

- Локальный сметный расчет №02-01-02.2 «Технологические решения» - НДС 10% (Приложение №10);

- Локальный сметный расчет №02-01-02.3 «Технологические решения» - НДС 20% (Приложение №11).

При приемке выполненных работ и подписании актов формы КС-2 №3 от 18.12.2021 (Приложение №12), №4 от 18.12.2021 (Приложение №13), №5 от 18.12.2021 (Приложение №14) приемка осуществлялась в соответствии с Локальными сметными расчетами №02-01-02.1 «Технологические решения» - без НДС, №02-01-02.2 «Технологические решения» - НДС 10%, №02-01-02.3 «Технологические решения» - НДС 20%, что подтверждается актами формы КС-2 (Приложение №№ 12, 13, 14, страница 1, первая строка после наименования документа АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).

Оформление локальных сметных расчетов с выделенной применимой ставкой НДС не повлекло за собой увеличение цены Контракта, что подтверждается ценой контракта (13 471 920,00 руб., включая НДС (п. 2.1 Контракта, приложение №9 к исковому заявлению) и Актом приемки законченного строительством объекта формы КС-11 от 09.06.2022 (Приложение №15, страница 4, п. 12 Стоимость принимаемых основных фондов – 13 402 460,59 руб., включая НДС).

В соответствии с п. 1.1 Контракта №ВЦП-0013 Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту, обязуется выполнить все предусмотренные проектной (рабочей) документацией строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Зеленое», указанному в Приложении 1 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.

В соответствии с п. 2.1 Контракта цена контракта составляет 13 208 270,00 руб., включая НДС.

Во исполнение требований действующего законодательства о налоге на добавленную стоимость Подрядчиком и Заказчиком были подписаны локальные сметные расчеты:

- Локальный сметный расчет №02-01-02.1 «Технологические решения» - без НДС (Приложение №16);

- Локальный сметный расчет №02-01-02.2 «Технологические решения» - НДС 20% (Приложение №17);

- Локальный сметный расчет №02-01-02.3 «Технологические решения» - НДС 10% (Приложение №18).

При приемке выполненных работ и подписании актов формы КС-2 №2 от 18.12.2021 (Приложение №19), №3 от 18.12.2021 (Приложение №20), №4 от 18.12.2021 (Приложение №21) приемка осуществлялась в соответствии с Локальными сметными расчетами №02-01-02.1 «Технологические решения» - без НДС, №02-01-02.3 «Технологические решения» - НДС 10%, №02-01-02.2 «Технологические решения» - НДС 20%, что подтверждается актами формы КС-2 (Приложение №№ 19, 20, 21, страница 1, первая строка после наименования документа АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ).

Оформление локальных сметных расчетов с выделенной применимой ставкой НДС не повлекло за собой увеличение цены Контракта, что подтверждается ценой контракта (13 208 270,00 руб., включая НДС (п. 2.1 Контракта, приложение №12 к исковому заявлению) и Актом приемки законченного строительством объекта формы КС-11 от 09.06.2022 (Приложение №22, страница 4, п. 12 Стоимость принимаемых основных фондов – 12 694 023,11 руб., включая НДС).

В соответствии с п. 2.3. заключенных Контрактов цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы (п. 2.3.1) и при изменении объема и (или) видов выполняемых работ (п. 2.3.2).

Заказчик производит оплату за выполненные работы в пределах цены Контракта, в соответствии со Сметой контракта, в сроки, установленные Контрактом за фактически выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-фактуры (при необходимости) с приложением накладных на примененные материалы и оборудование, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (п. 3.1 Контракта).

Оплата за выполненные работы производится на основании сданных Подрядчику и подписанных сторонами: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, основная) с приложением всех необходимых расчетов, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС- 3) (п. 3.3 Контракта).

В соответствии с п. 5.3.1 Контракта Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ. 

При выполнении работ (оказании услуг) подрядчик (исполнитель) на основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса обязан предъявить к оплате заказчику соответствующую сумму налога на добавленную стоимость, исчислить ее и уплатить в бюджет.

Согласно п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость" по смыслу положений пунктов 1 и 4 статьи 168 НК РФ сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена при определении окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по итогам соответствующего налогового периода.

При этом предъявляемая к оплате сумма НДС является частью цены, подлежащей уплате одной стороной договора в пользу другой. Публично-правовые отношения по уплате НДС в бюджет складываются между налогоплательщиком, то есть лицом, реализующим товары (работы, услуги), и государством, и покупатель товаров (работ, услуг) в данных отношениях не участвует (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.09.2009 N 5451/09).

Оформление локальных сметных расчетов с выделенной применимой ставкой НДС не повлекло за собой увеличение цены Контрактов.

Факт надлежащего исполнения подрядчиком работ подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

При указанных обстоятельствах заказчик был обязан оплатить выполненные работы подрядчика по согласованной цене, а потому на стороне подрядчика не возникло неосновательного обогащения.

Истолковав вышеуказанные нормы применительно к рассматриваемому спору, исследовав и оценив доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями норм статей 64, 64, 71 АПК РФ, суд приходит к выводам об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ту сторону, что их понесла.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья И. А. Ищенко