АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело №А23-8438/2020

31 марта 2022 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено 31 марта 2022 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Инстрой" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 300004, 

<

...>, этаж 2 к Государственному  бюджетному учреждению здравоохранения Калужской области "Центральная районная больница Хвастовичского района" (ОГРН1024000598313, ИНН 

<

***>) 249360, 

<

...>, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Министерства здравоохранения Калужской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 248016, 

<

...>; Управления Федерального Казначейства по Калужской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 248009, 

<

...>; Министерства конкурентной политики Калужской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 248001, 

<

...> 

о взыскании о взыскании 1 360 000 руб.

при участии в судебном заседании: 

ответчика - представителя ФИО2 по доверенности от 20.07.2020     № 294,

от третьего лица (Министерство здравоохранения Калужской области - представителя ФИО3 по доверенности от 05.07.2019 № 04-М3/1244-19,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "Инстрой" обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к Государственному  бюджетному учреждению здравоохранения Калужской области "Центральная межрайонная больница №2" о взыскании ущерба на сумму 1 360 000 руб. по контракту № 66 на поставку модульного здания фельдшерско-акушерского пункта Идентификационный код закупки 202402401692040240100100590012511244 от 26.05.2020.

В судебном заседании представители ответчика и третьего лица просили в иске отказать.

Представитель ответчика поддержал ходатайство о вызове в качестве свидетеля ФИО4

На основании ст. 56 Арбитражного процессуального кодекса ходатайство о вызове свидетеля судом удовлетворено,  в качестве свидетеля допрошен ФИО4

Свидетель пояснил, что подпись на договоре и приложении №2 к договору ему не принадлежит, работы в д. Коренево не осуществлял, а также иные пояснения согласно аудиозаписи судебного заседания.

Судом также принято во внимание, что в деле имеются достаточные доказательства для рассмотрения спора, по существу.

26.05.2020 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен контракт №66 на поставку модульного здания   фельдшерско-акушерского пункта.

Согласно пункта 1.1 контракта, поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку модельного здания фельдшерско-акушерского пункта в соответствии со спецификацией (приложение №1 к контракту) и надлежащим образом выполнить работы по подготовке основания под установку модульного здания фельдшерско-акушерского пункта, доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу товара в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара, прокладке внутренних инженерных сетей, а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный товар и надлежащим образом выполненные работы.

Технические характеристики товара указаны в техническом задании (приложение №2).

Поставка товара осуществляется в место поставки по адресам: Калужская область, Жиздринский район, д. Коренево, д. Младенск; Людиновский район, д. Космачи, д. Голосиловка.

Цена Контракта составляет 11 375 000 руб., в т.ч. НДС 1 895 833 руб. 33 коп.

Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с выполнением контракта, в том числе затраты на предпродажную подготовку, транспортировку (в том числе отгрузка, разгрузка), сборку, установку, монтаж, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по контракту (п. 2.1. контракта).

Оплата 100 процентов стоимости товара производится за счет средств областного бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ представителем заказчика, подтверждающих факт выполнения работ по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу товара согласно условиям контракта, при предоставлении поставщиком документов на оплату (счет на оплату, акт приема-передачи и счет-фактуру) (п. 2.3. контракта).

Порядок и сроки поставки согласованы в разделе 4 контракта.

4.1.Поставщик обязан приступить к выполнению работ по подготовке снования под установку фельдшерско-акушерского пункта в течение 7 дней после получения письменной заявки от Заказчика.

Поставщик обязан поставить товар в течение 30 дней с момента подготовленного основания под установку фельдшерско-акушерского пункта. Срок подготовки основания не должен превышать 30 дней.

Поставщик обязан выполнить работы по сборке, установке и монтажу в течение 7 дней после поставки товара.

Поставщик обязан проложить внутренние инженерные сети в течение 7 дней после сборки, установки и монтажа.

 О начале выполнения Работ, указанных в пункте 4.1 настоящего Контракта, Поставщик должен уведомить Заказчика не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты выполнения Работ и согласовать время.

Поставщик имеет право с согласия Заказчика на досрочное выполнение Работ.

Поставка и разгрузка Товара, иные Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляются силами и средствами Поставщика. Обязанность по обеспечению транспортом лежит на Поставщике. Разгрузка Товара по адресу осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

Датой выполнения работ считается дата подписания соответствующего акта о выполнении работ в соответствии с приложениями к настоящему Контракту.

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.

Порядок приемки товара, качество согласованы в разделе 6 контракта.

Прием Товара по количеству и качеству (комплектности) осуществляется в полном соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 2.

После выполнения работ по подготовке основания под установку Товара, Поставщик представляет акт выполненных работ (Приложение № 3) в адрес Заказчика.

6.3.При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а)товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

б)Акт приема-передачи товара (приложение № 4 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика);

в)гарантию производителя на товар;

г)гарантию Поставщика на товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на товар, оформленную в виде отдельного документа;

6.4.После выполнения Работ по сборке, установке, монтажу Товара, Поставщик представляет акт выполненных работ (Приложение № 5) в адрес Заказчика.

6.5.После выполнения Работ по прокладке внутренних инженерных сетей, Поставщик представляет акт выполненных работ (Приложение № 6) в адрес Заказчика.

6.6.Для проверки предоставленных Поставщиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе.Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

 Приемка результатов поставки Товара и выполнения работ, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.1 и п. 6.3 - 6.5 настоящего Контракта, и оформляется актом приемки выполненных работ (Приложение № 7), который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), Поставщиком (уполномоченным представителем Поставщика).

 По результатам экспертизы поставляемого Товара и установления соответствия Товара по количеству и качеству условиям Контракта, документ о приемке результата поставки, подписывается уполномоченным представителем Заказчика незамедлительно после приемки и передается уполномоченному представителю Поставщика.

 По результатам экспертизы, и в случае определения несоответствия, в том числе по качеству, поставляемого (поставленного) Товара требованиям настоящего Контракта (наличие визуальных дефектов: нарушение целостности упаковки и т.д.), Заказчик отказывается от приемки Товара и в присутствии представителя Поставщика, составляют акт осмотра несоответствия Товара с указанием в нем наименования и количества Товара, причин несоответствия. Акт осмотра подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. Одновременно уполномоченный представитель Заказчика оформляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке результата поставки, а также поставленного Товара и передает указанный акт осмотра и мотивированный отказ уполномоченному представителю Поставщика, или указанный документ направляется непосредственно по адресу Поставщика.

6.10.Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения и устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком в настоящем отказе.

6.11.В случае несоответствия по количеству поставленного Товара, заказчик оформляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке результата поставки, и передает его уполномоченному представителю Поставщика, или направляет непосредственно по адресу Поставщика.Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения указанного мотивированного отказа, обязан поставить недостающее количество Товара.

6.12.При обнаружении несоответствия Товара условиям Контракта в период его эксплуатации, по результатам экспертизы, стороны составляют акт осмотра Товара в 2 экземплярах. Для составления указанного акта Заказчик направляет по факсу (либо нарочно) уведомление о необходимости прибытияПоставщика (уполномоченного представителя) для составления данного акта. Уведомление направляется за 2 рабочих дня до дня составления акта. В случае неявки Поставщика или уполномоченного представителя для составления акта в нем делается отметка, акт в данном случае считается надлежащимобразом оформленным. В день составления акта осуществляется его передача Поставщику или уполномоченному представителю лично, почтой или по факсу (с последующим направлением оригинала почтой). В течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня составления акта Поставщик должен осуществитьзамену Товара на Товар соответствующий условиям Контракта или устранить выявленные замечания.

В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества (комплектности) Товара, проведенных Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) Товара проводятся за счет Поставщика.

Контракт вступает в силу момента его заключения и действует до « 01» декабря 2020, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств (п. 12.1. контракта).

Проанализировав условия заключенного Контракта и его предмет, учитывая, что в предмет Контракта входит не только поставка товара, но и выполнение работ по его монтажу, а также сведения, указанные в техническом задании, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе он носит смешанный характер, содержащий элементы договоров поставки и подряда, соответственно правоотношения сторон по данному договору регулируются нормами гл. 30  и гл. 37  Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положениями Федерального закона от 05.04.2005 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Так, в соответствии со ст. 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

Согласно п. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (ст. 768 ГК РФ).

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из п. 1 ст. 457 ГК РФ следует, что срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

18.06.2020, 22.06.2020, 25.06.2020 между истцом и ответчиком подписаны акты выполненных работ по подготовке основания под установку фельдшерско-акушерского пункта (т. 1 л.д. 29-33).

В связи с нарушением истцом установленных п. 4.1. контракта сроков, 11.09.2020 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №3761, размещено в единой информационной сети в сфере закупок 11.09.2020, направлено в адрес истца (т. 1 л.д. 63-71).

В силу п. 13 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Правилами части 8 статьи 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В то же время, частью 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор, может быть расторгнут, по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу части 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Условиями контракта предусмотрена возможность одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в случае нарушения поставщиком срока и качества выполнения работ по каждому этапу, указанному в п. 4  Контракта (п. 13.2. контракта).  

В связи с невыполнением истцом условий контракта, решение вступило в силу, контракт расторгнут.

Телеграммой от 14.10.2020 ответчик уведомил истца о проведении обследования (т. 1 л.д. 81-84).

По результатам обследования ЗАО «Радиан» сделаны следующие выводы: технические характеристики фундаментных плит, расположенных в населенных пунктах Калужская область, Жиздринский район, д. Коренево, д. Младенск; Людиновский район, д. Космачи, д. Голосиловка не соответствуют техническому заданию по габаритным размерам, толщине бетона, имеют отклонения по вводам коммуникаций, и также требованиям, предъявляемым к законченным бетонным  и железобетонным конструкциям в части пункта 5.18 «Приемка бетонных и железобетонных  конструкций и их частей» табл. 5.12 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (т. 1 л.д. 89).

22.10.2020 ФАС по Калужской области принято решение о включении истца в реестр недобросовестных поставщиков (т. 1 л.д. 72-74).

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно статье 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Поскольку ответчик нарушил сроки выполнения работ, суд находит отказ истца от договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ правомерным.  

В силу п. 23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

08.10.2021 истцом ответчику направлена претензия об оплате  1 360 000 руб за подготовку оснований под установку фельдшерско-акушерского пункта (т. 1 л.д. 36-37).

В обоснование требования о взыскании 1 360 000 руб.  истцом представлены договоры, платежные поручения, справки о стоимости выполненных работ, товарные накладные, акты выполненных работ, расчет (т. 1 л.д. 145-152, т. 2 л.д. 84, 106-132, т. 3 л.д. 29-32).

Согласно п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 №35 «О последствиях расторжения договора», если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 ст. 425 ГК РФ).

Вместе с тем, соотнести представленные истцом документы в обоснование выполнения работ с рассматриваемым спором в полном объеме не представляется возможным, в том числе с учетом их дат (после вступления в силу решения об одностороннем отказе от контракта).

Судом неоднократно разъяснялось право на заявление ходатайства о назначении судебной экспертизы.

Вместе с тем, истец возражал против назначения экспертизы.

Кроме того, в силу п. 2.3. контракта приемке и оплате подлежат полностью законченные работы.

В связи с чем, представленный истцом расчет судом отклоняется.

Доводы истца об отсутствии этапов и стоимости этих этапов к рассматриваемому спору отношения не имеют.

Доводы истца о возможности выполнения работ до 01.12.2020 по п. 12.1. контракта основаны на ошибочном толковании условий контракта.

Ссылки истца на злоупотребление ответчика, расторжением контракта за 80 дней до срока его окончания, не имеет значение для рассмотрения дела.

С учетом изложенного, поскольку установить стоимость качественно выполненных работ не представляется возможным, ввиду отсутствия ходатайства о назначении судебной экспертизы, в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Одновременно истцом заявлено требование о взыскании расходов на оплату юридических услуг в сумме 20 000 руб.

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам относятся, в том числе, и расходы, подлежащие выплате лицам, оказывающим юридическую помощь (представителям).

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу норм части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

При этом, разумность пределов расходов на оплату услуг представителя определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, поскольку критерии разумных пределов законом не определены.

Критерий разумных пределов предусмотрен процессуальным законодательством как гарантия злоупотребления правом и недопущения взыскания несоразмерных нарушенному праву сумм.

Независимо от способа определения размера вознаграждения (почасовая оплата, заранее определенная твердая сумма гонорара, абонентская плата, процент от цены иска) и условий его выплаты (например, только в случае положительного решения в пользу доверителя) суд, взыскивая фактически понесенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы.

Такие расходы должны быть реальными, экономически оправданными, разумными и соразмерными с последствиями, вызванными предметом спора.

Указанное предоставляет арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя. 

В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.09.1999 № 48 "О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг" при рассмотрении споров, связанных с оплатой оказанных в соответствии с договором правовых услуг, арбитражным судам необходимо руководствоваться положениями статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по смыслу которых исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при совершении указанных в договоре действий (деятельности).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, учитывая при этом, что в силу норм статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации оно несет риск наступления последствий совершения или несовершения им соответствующих процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В обоснование предъявленных судебных расходов истцом представлены соглашение №2020/03-Д об оказании юридической помощи от 02.11.2020, платежное поручение №28 от 29.01.2021 (т. 1 л.д. 139, т. 2 л.д. 6).

Вместе  с тем, ввиду отказа в иске, требование о взыскании расходов на оплату услуг представителя удовлетворению также не подлежит.

Ссылки и на иную судебную практику подлежат отклонению, поскольку указанная судебная практика сформирована по делам с иными фактическими обстоятельствами.

Иные доводы участвующих в деле лиц являются несостоятельными, поскольку не соответствуют нормам права, подлежащим применению при рассмотрении настоящего спора и фактическим обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Расходы по уплате государственной пошлины судом распределяются на основании ст.ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на истца и подлежат взысканию в федеральный бюджет ввиду предоставления отсрочки.

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Инстрой" в доход федерального бюджета государственную пошлину на сумму 26 600 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья                                                         В.В. Жадан