188/2019-4130(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  15 января 2019 года А46-18691/2017  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску Казенного учреждения Омской области  "Управление дорожного хозяйства Омской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно- производственная компания «Дорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании 4 183 538 руб. 50 коп. и обязании совершить действия,  

В заседании приняли участие: от истца – ФИО2 по доверенности от 14.08.2018 № 55 АА 1965287; от ответчика – ФИО3 по доверенности от 14.01.2019; 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная  компания «Дорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить недостатки, в  результатах выполненных работ во исполнение обязательств по государственному контракту   № 2016.111747 от 27.06.2016 г., в течение месяца после вступления решения в законную силу,  а именно:  

- привести в соответствие с проектной документацией автомобильную дорогу  Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – дорога «Челябинск – Омск –  Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области» и устранить  выявленные дефекты, указанные в акте от 20.07.2017 г. предписании № 18/6 от 26.06.2017, в  частности:  

2.1. просадки покрытия и дефектов устраненного слоя шероховатой поверхности  обработки;  

2.2. просадки обочин и откосной части насыпи автомобильной дороги; 2.3. просадки грунта под укреплением из железобетона водопропускных труб; 2.4. просадки грунта на присыпных бермах; 2.5. обустройство автомобильной дороги (дорожные знаки, сигнальные столбики). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная  компания «Дорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу казенного  учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 778 953 руб. 50 коп., штраф в размере  709 181 руб. 00 коп., а так же расходы по оплате государственной пошлины в сумме 11 452  руб.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить казенному учреждению Омской области «Управление дорожного хозяйства  Омской области» (ИНН 5502050244, ОГРН 1025500530252) из федерального бюджета 30 665  руб. государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению № 1155 от 11.09.2017.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме).  

Судья В.А. Баландин