Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-11124/2019

20 мая 2020 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г. Л., при  ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по  исковому заявлению Администрации муниципального образования "Поселок Сангар"  Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Северагростроймонтаж"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании безвозмездно устранить недостатки  выполненных результатов работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Северагростроймонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки строительства  жилого дома по адресу: Кобяйский улус, 

<

...>, в течение 6 месяцев  с момента вступления в законную силу судебного акта:  

2 

Выравнивание (штукатурка и покраска)  лоджий, балконов  

Во всех лоджиях,  

балконов жилых  помещений дома, а  именно в квартирах  

 № 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27,28  

160 м2 

3 

Произвести укрепительные работы порога  балконной двери  

Квартира № 1 Квартира  

 № 2 Квартира № 3  Квартира № 4 Квартира  

 № 5 Квартира № 6  Квартира № 7 Квартира  

 № 8 Квартира № 9  

Квартира № 10  Квартира № 11  Квартира № 12  Квартира № 13  Квартира № 14  

2 балконном двери 1  

балконная дверь 

1 балконная дверь  2 балконной двери 2  

балконной двери 1  

балконная дверь 1  балконная дверь 1  балконная дверь  

1 балконная дверь  2 балконной двери 1  

балконная дверь 1  балконная дверь 1  балконная дверь 1  балконная дверь  

Квартира № 15  Квартира № 16  Квартира № 17  Квартира № 18  Квартира № 19  Квартира № 20  Квартира № 21  Квартира № 22  Квартира № 23  Квартира № 24  Квартира № 25  Квартира № 26  Квартира № 27  Квартира № 28  

1 балконная дверь 1  

балконная дверь 1  балконная дверь  

1 балконная дверь  2 балконной двери 1  

балконная дверь 1  балконная дверь 1  балконная дверь  

1 балконная дверь  2 балконной двери 1  

балконная дверь 1  балконная дверь  

1 балконная дверь  2 балконной двери  

4 

Завершение устройства отмостки под  зданием и устройство отмостки под  

входные лестницы 

Отмостки под  входные двери (под  крыльцом): Подъезд №  

1 Подъезд № 2 

9,6 м2 9.6 м2 

5 

Частичная замена цокольного перекрытия  профлистами  

По оси здания № 1 от Б  до Ж  

14,26 м2 

6 

Утеплить температурный шов под зданием  

По оси здания № 3 По  оси здания № 5  

16,7 п.м. 16,7 п.м.  

7 

Устранить разгерметизацию утепления  полов 1-го этажа по всему периметру  

здания 

По всему периметру  здания  

ПО п.м. 

8 

Устранить разгерметизацию утепления стен  на уровне перекрытия 1-го и 2-го этажей на  лестничных маршах обеих  

подъездов 

Подъезд № 1 Подъезд   № 2  

3,2 п.м. 3,2 п.м. 

9 

Покраска карниза крыши 

Карниз крыши дома по  всему периметру  

23,9 м2 

10 

Отопление исправить по проекту 

По всему дому  

(квартиры № 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  28, в том числе  помещения общего  

пользования 

относящееся к  общему имуществу  

многоквартирного дома)  

Согласно проектно- сметной  

документации на дом 

Утопить распределительные коробки и 

оборудования электроприборов в квартирах  и заделать по проекту  

Квартира № 1 Квартира   № 2 Квартира № 3  

Квартира № 4 Квартира   № 5 Квартира № 6  

Квартира № 7 

5 коробок 4 коробок  4 коробок  

5 коробок 5 коробок 4 коробок 4 коробок 

Квартира № 8  

Квартира № 9 

Квартира № 10  Квартира № 11  Квартира № 12  Квартира № 13  Квартира № 14  Квартира № 15  Квартира № 16  Квартира № 17  Квартира № 18  Квартира № 19  Квартира № 20  Квартира № 21  Квартира № 22  Квартира № 23  Квартира № 24  Квартира № 25  

4 коробок  4 коробок  5 коробок  4 коробок  4 коробок  4 коробок  4 коробок  4 коробок  4 коробок  4 коробок  4 коробок  5 коробок  4 коробок  4 коробок  :4 КОробоК  

4 коробок  5 коробок  4 коробок  

12, 13, 14, 15, 16, 17,  18, 19, 20, 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, в  

том числе  

помещения общего  пользования  

относящееся к  

общему имуществу  многоквартирного  

дома) 

пайки пластиковых  труб веси системы  отопления дома  

13 

Произвести регулировку оконных  блоков и балконных дверей с заменой  утеплителя  

Квартира № 1 

Квартира № 2 

Квартира № 3 

Квартира № 4 

Квартира № 5' 

Квартира № 6 

Квартира № 7 

Квартира № 8 

Квартира № 9 

2 балконной двери  

6 окоп  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

2 окна  2 балконной двери  

1 3 окна 

2 балконной двери  

6 окоп  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

1 окно  1 балконная дверь  

1 окно  

• 

Квартира № 10 

Квартира № 11 

Квартира № 12 

Квартира № 13 

Квартира № 14 

Квартира № 15 

Квартира № 16 

Квартира № 17 

Квартира № 18 

Квартира № 19 

2 балконной двери  

6 окон  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

1 окно  1 балконная дверь  

1 окно  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

6 окон  2 балконной двери  

'1 окно  

14 

Квартира № 20 

Квартира № 21 

Квартира № 22 

Квартира № 23 

Квартира № 24 

Квартира № 25 

Квартира № 26 

Квартира № 27 

Квартира № 28 

1 балконная дверь  

1 окно  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

6 окон  2 балконной двери  

1 окно  1 балконная дверь  

1 окно  1 балконная дверь  

2 окна  1 балконная дверь  

2 окна  2 балконной двери  

6 окон  

Шпаклевка, покраска стен и потолков в квартирах и в коридоре 

Подъезд № 1  Подъезд № 2  

43,2 м2  43,2 м2  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северагростроймонтаж"  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб.  

государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  

течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).  

Судья Г.Л. Николаева