Арбитражный суд Мурманской области

ул. Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183038

e-mail: murmansk.info@arbitr.ru

http://murmansk.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

город Мурманск                                                                        Дело  №А42-5299/2020

Резолютивная часть решения оглашена 21 сентября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 23 сентября 2020 года

Судья Арбитражного суда Мурманской области Быкова Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Веста – 2С" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: ул. Сетевая, д. 16, г. Пушкин, 

<

...>, представитель истца адвокат Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро «ФИО2, ФИО3 и Партнеры» ФИО2 имеет адрес: пр.Вознесенский, д. 49, а/я 526, 

<

...>)

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес: ул. Подстаницкого, д.1, 

<

...>) 

о взыскании 8 392 086 рублей 73 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца – ФИО2 по доверенности;

ответчика – ФИО4 по доверенности;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Веста – 2С"  (далее – истец, Подрядчик, Общество) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – ответчик, Заказчик, Фонд) о взыскании задолженности по 9 договорам в общей сумме 8 392 086 рублей 73 копейки.

В ходе рассмотрения дела и в судебном заседании  Подрядчик уточняет размер исковых требований, просит взыскать задолженность в сумме 8 392 077 рублей 73 копейки.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ уточнения размера исковых требований принимаются судом.

Заказчик в судебном заседании против иска возражает.

Выслушав сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

10.07.2017 ответчиком (как заказчиком) и истцом (как подрядчиком)  заключен Договор № 39/КР/ОКН-2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить, в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим   заданием,   работы   по   капитальному   ремонту   крыши   и   фасада многоквартирных ломов, которые являются объектами культурного наследия, выявленным объектами культурного наследия, расположенных по адресам: 

<

...> и 

<

...>.

Согласно пункту 2.1 Договора стоимость работ по Договору составляет 25 975 933 рубля 26 копеек.

08.09.2017 истцу перечислен авансовый платеж 7 792 777 рублей 17 копеек (платежные поручения № 1696 от 08.09.2017, № 1696 от 08.09.2017).

Актом приемки в эксплуатацию от 04.10.2018, актом приемки в эксплуатацию от 10.10.2018, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 31.10.2017 (составлена 25.12.2017), актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 31.10.2017 (составлена 25.12.2017), актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 10.01.2018, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 16.10.2018, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 14.01.2018 работы Фондом приняты.

За выполненные по Договору № 39/КР/ОКН-2017 от 10.07.2017 работы истцу оплачено 25 975 933 рублей 26 копеек; не оплачено - 739 580 рублей 02 копейки.

10.07.2017 сторонами заключен Договор № 40/КР/ОКН-2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследим, расположенных на территории Мурманской области, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить, в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим заданием, работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, который является объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия, расположенным по адресу: 

<

...>.

Согласно пункту 2.1 Договора стоимость работ составляет 29 943 746 рублей. 42 копейки.

13.09.2017 истцу поступил авансовый платеж 8 983 123 рубля 93 копейки (платежное поручение № 1727 от 13.09.2017).

В соответствии с актом приемки в эксплуатацию, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 16.10.2018 работы Заказчиком приняты в полном объеме.

По Договору № 40/КР/ОКН-2017 от 10.07.2017 оплачено Заказчиком 28 461 530 рублей 97 копеек; не оплачено - 1 482 215 рублей 45 копеек.

17.07.2017 истцом (как подрядчиком) и ответчиком (как заказчиком) заключен Договор № 41/КР/ОКН-2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных ломов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области (далее по тексту - Договор), по которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить, в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим заданием, работы по капитальному ремонт) крыши и фасада многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, выявленным объектами культурного наследия, расположенных по адресам: 

<

...> и 

<

...>.

В пункте 2.1 Договора стороны согласовали стоимость работ 18 809 035 рублей 70 копеек.

14.09.2017 Заказчиком перечислен аванс 1 706 806 рублей 16 копеек (платежное поручение № 751 от 14.09.2017), 3 935 904 рублей 55 копеек (платежное поручение № 749 от 14.09.2017).  

Актами приемки в эксплуатацию, актом о приемке выполненных работ КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 31.10.2017 (составлен 25.12.2017), актом о приемке выполненных работ КС-2 и справкой о стоимости работ КС-3 от 20.12.2017, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 04.10.2018, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 08.11.2018 работы ответчиком у истца приняты в полном объеме.

За период 14.09.2017 - 26.08.2019 на основании Договора № 41/КР/ОКН-2017 от 17.07.2017 Заказчиком оплачено 17 765 270 рублей 11 копеек, не оплачено - 1043765 рублей 59 копеек.

12.07.2017 ответчиком и истцом заключен Договор № 47/KP/OKI1-2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области, согласно условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим заданием, работы по капитальному ремонту фасада многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, выявленным объектами культурного наследия, расположенных по адресам: 

<

...> и 

<

...>.

Пунктом 2.1 Договора согласована стоимость работ по данному договору в 29 867 752 рубля 08 копеек.

13.09.2017 Обществу перечислены в качестве аванса 4 313 128 рублей 66 копеек (платежное поручение № 1725 от 13.09.2017), 26.09.17 - 4 647 196 рублей 97 копеек (платежное поручение № 1843 от 26.09.2017).

Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 01.10.2018, актом приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, от 26.09.2018 работы приняты в объеме, установленном договором.

Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 08.11.2018, актом приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> от 08.11.2018 работы приняты в объеме, установленном договором.

По Договору № 47/КР/ОКН-2017 от 12.07.2017 истцу оплачено 29 617 854 рубля 94 копейки, не оплачено - 1 249 897 рублей 14 копеек.

25.07.2017 истцом и ответчиком заключен Договор № 48/КР/ОКН-2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области (далее по тексту - Договор), согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить, в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим заданием, работы по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома, который является объектом культурного наследия, выявленным объектами культурного наследия, расположенным по адресу: 

<

...>.

В соответствии с пунктом 2.1 Договора стоимость работ по договору - 34 396 158 рублей 85 копеек.

14.09.2017 Обществу перечислен аванс 10 318 847 рублей 66 копеек (платежное поручение № 750 от 14.09.2017).

Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 12.04.2018, актом приемки в эксплуатацию от 14.04.2018, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 26.07.2018, актом приемки в эксплуатацию от 08.11.2018 работы приняты в полном объеме.

По Договору № 48/КР/ОКН-2017 от 25.07.2017 истцу оплачено 33 287 904 рублей 84 копеек, не оплачено - 1 108 254 рублей 01 копейка.

21.07.2017 ответчиком (заказчиком) и истцом (подрядчиком) заключен Договор № 52/КР/ОКН-2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области (далее по тексту - Договор).

Согласно данному Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить) в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим заданием, работы по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома, который является объектом культурного наследия, выявленным объектами культурного наследия, расположенным по адресу: 

<

...>, на сумму 25 671 585 рублей 59 копеек.

26.09.2017 от Фонда поступил авансовый платеж 7 701 475 рублей 68 копеек (платежное поручение № 843 от 26.09.2017).

Согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке стоимости работ формы КС-3 от 20.09.2018, акту приемки в эксплуатацию от 18.10.2018, акту о приемке выполненных работ формы КС-2 и справке стоимости работ формы КС-3 от 14.01.2019, акту приемки в эксплуатацию от 30.11.2018 работы выполнены Подрядчиком в полном объеме.

По Договору № 52/КР/ОКН-2017 от 21.07.2017 истцу перечислено ответчиком  24 400 842 рубля 10 копеек; не оплачено -  1 270 743 рубля 49 копеек.

17.07.2017 сторонами заключен Договор № 54/КР/ОКН-2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить, в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим заданием, работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, стоимостью 5 718 486 рублей 45 копеек.

13.09.2017 Фондом перечислен аванс 1 715 545 рублей 94 копеек (платежное поручение № 1724 от 13.09.2017).

Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 26.09.2018, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 26.09.2018, акт приемки в эксплуатацию от 26.09.2019 подтверждают выполнение и  принятие Фондом работ по договору в полном объеме.

По Договору № 54/КР/ОКН-2017 от 17.07.2017 Обществу поступило 5 552 516 рублей 08 копеек, не оплачено - 165 970 рублей 37 копеек.

15.09.2017 ответчиком (заказчиком) и истцом (подрядчиком) заключен Договор № 122/КР/ОКН-2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области (далее по тексту - Договор).

Согласно указанному договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим заданием, выполнить работы по капитальному ремонту крыши и фасада в многоквартирном доме, который является объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия, расположенным по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ  составляет 16 289 987 рублей 35 копеек.

28.12.2017 истцу поступил аванс 4 879 509 рублей 58 копеек (платежное поручение № 609 от 28.12.2017).

Актом приемки в эксплуатацию от 17.05.2018, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 17.05.2018, Актом приемки в эксплуатацию от 08.11.2018, актом о приемке выполненных работ КС-2 и справкой о стоимости работ КС-3 от 08.11.2018 подтверждается выполнение и принятие работ полном объеме.

По Договору № 122/KP/OKН-2017 от 15.09.2017 выполнено работ на 16 289 987 рублей 35 копеек; не оплачено - 805 119 рублей 08 копеек.

11.10.2017 сторонами заключен Договор № 154/КР/ОКН-2017 на выполнение работ по капитальному ремонт}} общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области (далее по тексту - Договор), согласно которому Общество обязуется по заданию Фонда в соответствии с рабочей и проектной документацией техническим заданием, выполнить работы по капитальному ремонту крыши и фасада в многоквартирном доме, который является объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия, расположенным по адресу: 

<

...>.

Стоимость работ по Договору составляет 17 280 081 рубль 45 копеек.

28.12.2017 Фондом перечислен аванс 5 184 024 рублей 44 копеек.

Актом приемки в эксплуатацию от 24.09.2018, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 14.09.2018 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 14.09.2018, Актом приемки в эксплуатацию от 30.11.2018, актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 14.01.2019 и справкой о стоимости работ формы КС-3 от 14.01.2019 подтверждается, что работы выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком в полном объеме.

По Договору № 154/KP/OKI1-2017 от 11.10.2017 истцу оплачено ответчиком 16 753 549 рублей 42 копейки; не оплачено - 526 532 рубля 03 копейки.

Ответчику направлялись претензии, оставленные без удовлетворения Фондом.

Истец просит взыскать по 9 договорам – 8 392 077 рублей 73 копейки, что совпадает с расчетом ответчика (том 5).

         23.06.2020 Подрядчик обратился в суд с соответствующим иском.

Суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Спора по фактам выполнения работ по 9 договором, по размеру задолженности нет.

Факты выполнения Подрядчиком работ по 9 договорам, не полной оплаты работ  подтверждены представленными в материалы дела доказательствами.

Рассматриваемые отношения сторон возникли на основании договора строительного подряда. 

В соответствии со статьями 309, 310, 740, 746 ГК РФ обязательства по договору строительного подряда должны исполняться его сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Выполненная Подрядчиком работа должна быть оплачена Заказчиком.

Предусмотренных законом оснований для освобождения Фонда от оплаты (отсрочки оплаты) выполненных по его заданию Обществом работ нет.  Несформированность фонда капитального ремонта, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт не освобождают Фонд, выступающий в качестве стороны по договору, от обязанности по оплате строительных работ.   

Задолженность в сумме 8 392 077 рублей 73 копейки подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 64 960 рублей 00 копеек подлежат взысканию с Заказчика в пользу истца.

         Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Мурманской области

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Веста-2С»  задолженность в сумме 8 392 077 рублей 73 копейки и судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 64 960 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано  в суд апелляционной инстанции месячный срок  со дня принятия.

Судья                                                                                             Н.В. Быкова