АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-22160/2020 

город Нижний Новгород 05 февраля 2024 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Годухина Артема Евгеньевича (шифр дела  59-723) при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сосиной Анастасией  Владимировной, рассмотрев в судебном заседании дело по иску товарищества собственников жилья  "Астра" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Нижний Новгород,  

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Старт-Строй" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Нижний Новгород,  

при участии в деле общества с ограниченной ответственностью "Линия" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>; 603001, 

<

...>),  

о понуждении безвозмездно устранить недостатки выполненных работ, с участием представителей лиц, участвующих в деле: не явились; 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Старт- Строй" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Нижний Новгород, в течение 30 дней с  момента вступления в законную силу решения суда по делу исполнить гарантийные обязательства в  отношении дома № 111, корпус 1 (расположенного по адресу: 

<

...>) путём устранения недостатков (с учетом экспертного заключения,  выполненного АКО "Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости"), а  именно: устранить дефекты в местах примыкания вентиляционных шахт и дефлекторов к стенам  надстроек на кровле в соответствии с типовыми решениями компании Технониколь: «ТН-Кровля  Стандарт»; выполнить ремонтные работы на участке от шва до водоприемной воронки с заменой  утеплителя (при разрушении его структуры), шириной до 2 метров (до 1 метра в каждую сторону от  оси, соединяющей центр водоприемной воронки и шов между вентиляционной шахтой и надстройкой  на кровле); выполнить ремонт мест примыкания кровли к стенам надстроек на кровле (с целью  предупреждения протечек).  

В остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  "Старт-Строй" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), город Нижний Новгород, в пользу  товарищества собственников жилья "Астра" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), 

<

...> 000 руб. расходов по государственной пошлине и 55 000 руб. 00 коп. за проведение  судебной экспертизы.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия,  если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента  принятия решения.  

 Судья А.Е. Годухин