И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Москва                                                                                 дело № А40-223724/22-151-1696

05.05.2023 года.                                                       

Резолютивная часть решения объявлена 10.04.2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 05.05.2023 года.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «КАПИТЕЛЬ» (ОГРН 1077746155211) 

к ответчику ООО «АКТОРИЯ» (ОГРН 1137746526433) 

о взыскании 1 000 517,91 руб.

при участии

от истца: Матвеева О.С. по доверенности от 01.06.2022

от ответчика: Аксенова Е.А. по доверенности от 11.11.2022 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании штрафа в размере 1 000 517, 91 руб.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме. Ответчик против удовлетворения требований возражал.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам. 

18 декабря 2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» (далее по тексту - ООО «КАПИТЕЛЬ», Генподрядчик, Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «АКТОРИЯ» (далее по тексту - ООО «АКТОРИЯ», Подрядчик, Ответчик) был заключен Договор № 1812/АСЕР-7-11/ДДв от 18 декабря 2020 года (далее по тексту - Договор), в соответствии с условиями которого, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу дверей МОП 1 этажа по дизайн-проекту на Объекте: «Апартаменты по адресу: ЦАО, Таганский район, Серебряническая набережная, вл. 7-11» в соответствии с Проектной, Рабочей документацией за Цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок строительства Объекта, установленные Графиком производства работ, а Генподрядчик - принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Договор заключен во исполнение Договора № СМР-СЕР-7-11 от 27 июня 2018 года, заключенного между АО «Центр-Инвест» (Застройщик) и ООО «КАПИТЕЛЬ» подрядных работ по строительству Апартаментов по адресу: ЦАО, Таганский район, Серебряническая набережная, вл. 7-11».

Согласно п. 2.4. Договора, результатом выполненных Работ по Договору является законченный строительством Объект, который введен в эксплуатацию и в отношении, которого получено Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, подписан Итоговый акт исполнения обязательств между Сторонами (Приложение № 3) к Договору.

В соответствии с п. 3.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить Работы (оказать услуги) в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение № 4).

Согласно п. 4.1.1. цена Договора в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение № 1) составляет 5 095 629 (Пять миллионов девяносто пять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 35 копеек, в том числе НДС 20% 849 271 рубль 56 копеек, формируется из расходов, возникающих в связи с выполнением Подрядчиком функций в соответствии с настоящим Договором.

Согласно п. 4.2.1. Договора, ценой Договора является стоимость всего фактически выполненного Подрядчиком объема Работ, в том числе, но не ограничиваясь: стоимость всех Работ согласно Проектной и Рабочей документации; стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта Изделий, Конструкций и Материалов, поставляемого Подрядчиком в соответствии с

Протоколом договорной цены (Приложение №1); затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание; таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления; транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Подрядчиками которые включают также расходы на получение, разгрузку, хранение и последующее использование материалов в соответствии с настоящим Договором; накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы любого характера в соответствии с законодательством Российской федерации; стоимость понесенных Подрядчиком затрат, в том числе сезонного характера, необходимые для производства работ до сдачи Объекта, эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи); все расходы Подрядчика связанные с внесением любых изменений и прочие расценки, указанные в настоящем Договоре, включают все затраты, издержки Подрядчика за выполнение Работ в полном объеме; включают расходы на получение, разгрузку, хранение и последующее использование материалов в соответствии с настоящим Договором, а также погрузку, транспортировку и удаление излишних материалов; все расходы Подрядчика возникающие в связи с осуществлением Работ в соответствии со всеми применимыми требованиями государственных органов в области техники безопасности, а также требованиями Генподрядчика, касающимися техники безопасности, охраны и безопасности Объекта и правил пожарной защиты, включая непредвиденные.

Цена Договора установлена в российских рублях и не подлежат изменению в случае колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению к российскому рублю.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ (оказания услуг), не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

В соответствии с п. 4.3.2. Договора оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Генподрядчиком в течение 22 (двадцати двух) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за отчетный месяц, при условии подтверждения работ Застройщиком и Генподрядчиком (пп. 6.1.1. - 6.1.2. настоящего Договора) размере 97 % от Стоимости работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3). В случае перечисления авансового платежа согласно условиям настоящего Договора, оплата выполненных Работ производится с учетом удержания авансового платежа, перечисленного Подрядчику.

При этом денежная сумма в размере 3% от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) удерживается Генподрядчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств (сумма гарантийного удержания).

Сумма гарантийного удержания на период гарантийных обязательств (эксплуатации) в размере 3 (Трех) % от стоимости Работ, выплачивается Подрядчику в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента окончания гарантийного (эксплуатационного) периода, на основании выставленного счета.

При этом согласно п. 4.3.6. Договора оплата Работ, выполненных Подрядчиком, будет осуществлена при условии предоставления Подрядчиком в полном объеме следующих документов: Подписанных Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), при этом Акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и любые иные аналогичные документы, используемые Сторонами, никоим образом не ограничивают, не уменьшают или не отменяют обязательства или ответственность Подрядчика по настоящему Договору (пп. 4.3.6.1 Договора); Исполнительной документации на выполненный в отчетном периоде объем Работ (пп. 4.3.6.2. Договора); Технических паспортов и сертификатов на материалы, использованные при выполнении Работ в отчетном периоде (пп. 4.3.6.3 Договора); Отчетов по входному контролю качества за отчетный период (пп. 4.3.6.4 Договора); отчетов по лабораторному контролю. (Согласно требованиям Гост, СНиП и иных нормативных документов регулирующие качество строительства) (пп. 4.3.6.5 Договора); заполненных за отчетный период, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, общих и специальных журналов работ, а также журнала учета выполненных работ (КС-ба) (пп. 4.3.6.6 Договора); документов, подтверждающих оплату выставленных Генподрядчиком штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором (пп. 4.3.6.7. Договора).

Согласно п. 4.3.7. Договора, Генподрядчик оставляет за собой право удерживать причитающиеся Подрядчику суммы платежей по настоящему Договору до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся к Работам необходимая документация, которая должна соответствовать условиям Договора, и не является основанием для каких-либо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений. Суммы платежей, удержанные по причине несвоевременной подачи необходимой документации, выплачиваются в следующем месяце.

Порядок сдачи-приемки работ установлен разделом 6 Договора.

В соответствии с п. 15.2. Договора гарантийный срок на результат выполненных Работ, Материалов, Конструкций и Изделий смонтированного на Объекте устанавливается с даты подписания Итогового акта исполнения своих обязательств сторонами (Приложение №3), а в случае досрочного расторжения - с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных до даты расторжения Договора Работ (п.6.2.9.Договора) и составляет: на строительно-монтажные и общестроительные работы - 60 (Шестьдесят) месяцев; на Материалы - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего Материала, но не менее Гарантийного срока, указанного в п. 15.2.1 Договора; на мягкие кровли - 10 лет.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ сторон от исполнения обязательств по Договору не допускается.

По состоянию на дату подачи настоящего искового заявления Генподрядчиком произведено авансирование Подрядчика в рамках Договора на сумму в размере 4 942 760,47 руб. (Четыре миллиона девятьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят рублей сорок семь копеек), в т.ч. НДС, Подрядчиком выполнены работы по Договору на сумму 5 095 629,35 руб. (Пять миллионов девяносто пять тысяч шестьсот двадцать девять рублей тридцать пять копеек), в т.ч. НДС и с учетом суммы гарантийного удержания в размере 152 868,88 руб. (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей восемьдесят восемь копеек), в т.ч. НДС, что подтверждается платежным поручением № 24 от 12.01.2021 г. па сумму 1 998 200,00 руб., актом зачета взаимных требований от 30.06.2021 г. на сумму 2 494 422,44 руб., актом зачета взаимных требований от 30.09.2021 г. на сумму 450 138,03 руб. и актами о приемке выполненных работ № 1 и 2 (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 и 2 (форма КС-3) за следующие периоды: с

18.12.2020      г. по 30.04.2021 г., с 01.05.2021 г. по 31.08.2021 г., при этом Подрядчиком не производилась оплата Генподрядчику штрафных санкции по Договору в размере 1 000 517,91 руб. (Один миллион пятьсот семнадцать рублей девяносто одна копейка), без НДС, исходя из следующих обстоятельств: 

Штрафные санкции по Договору:

• 21 июля 2021 года Генподрядчиком была направлена претензия (исх. № 1195 от 21.07.2021 г.) в адрес Подрядчика с требованием об оплате штрафных санкций за нарушение сроков выполнения обязательств Подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания, в соответствии с п. 16.17. Договора в размере 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей ноль копеек).

По состоянию на 06 июля 2021 года обязательства вышеозначенного Договора Подрядчиком не были исполнены в полном объеме, о чем свидетельствует служебная записка начальника участка ООО «КАПИТЕЛЬ» от 06 июля 2021 года.

При этом Подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения своих обязательств, установленных протоколами рабочих совещаний со сроками исполнения/выполнения работ по предоставлению гарантийных писем на несданный объем исполнительной документации до 19.05.2021, 21.05.2021, 28.05.2021 г., 05.06.2021 г.

В соответствии с п. 16.17. Договора за нарушение сроков выполнения обязательств Подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания, Генеральный подрядчик оставляет за собой право выставить штрафные санкции в размере 10 000 (десяти) тысяч рублей за каждое выявленное нарушение. За неоднократное нарушение (3-х и более раз) Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

При этом, согласно п. 1.34. Договора «Протокол рабочего совещания» - Протокол, отражающий суть (итоги) рабочего совещания. Настоящий протокол оформляется Генеральным подрядчиком и предоставляется в адрес Подрядчика, путем его направления на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в Договоре.

При этом Подрядчик, получивший настоящий Протокол, обязуется в течение 1 (одного) дня направить в адрес Генерального подрядчика (на адрес электронной почты, указанный в Договоре) подписанный Протокол (скан версия) либо дать мотивированные замечания к настоящему Протоколу. В случае не направления Подрядчиком в адрес Генерального подрядчика в срок, подписанного со своей стороны Протокола, Протокол считается подписанным Подрядчиком без замечаний.

29 июля 2021 года Генподрядчиком была направлена претензия (исх. № 1261 от 29.07.2021 г.) в адрес Подрядчика с требованием об оплате штрафных санкции за нарушение сроков выполнения обязательств Подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания, в соответствии с п. 16.17. Договора в размере 30 000,00 руб. (Тридцать тысяч рублей ноль копеек).

По состоянию на 29 июля 2021 года обязательства вышеозначенного Договора Подрядчиком не были исполнены в полном объеме, о чем свидетельствует служебная записка начальника участка ООО «КАПИТЕЛЬ» от 29 июля 2021 года.

При   этом   Подрядчиком   допущено   нарушение   сроков   выполнения   своих   обязательств, установленных протоколами рабочих совещаний со сроками исполнения/выполнения работ по предоставлению гарантийных писем на несданный объем исполнительной документации до 05.06.2021 г., 19.07.2021 г., 22.07.2021 г.

В соответствии с п. 16.17. Договора за нарушение сроков выполнения обязательств Подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания, Генеральный подрядчик оставляет за собой право выставить штрафные санкции в размере 10 000 (десяти) тысяч рублей за каждое выявленное нарушение. За неоднократное нарушение (3-х и более раз) Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

При этом, согласно п. 1.34. Договора «Протокол рабочего совещания» - Протокол, отражающий суть (итоги) рабочего совещания. Настоящий протокол оформляется Генеральным подрядчиком и предоставляется в адрес Подрядчика, путем его направления на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в Договоре.

При этом Подрядчик, получивший настоящий Протокол, обязуется в течение 1 (одного) дня направить в адрес Генерального подрядчика (на адрес электронной почты, указанный в Договоре) подписанный Протокол (скан версия) либо дать мотивированные замечания к настоящему Протоколу. В случае не направления Подрядчиком в адрес Генерального подрядчика в срок, подписанного со своей стороны Протокола, Протокол считается подписанным Подрядчиком без замечаний.

22 сентября 2021 года Генподрядчиком была направлена претензия (исх. № 1725 от 22.09.2021 г.) в адрес Подрядчика с требованием о незамедлительном завершении и сдачи работ по Договору в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, выполнении требований установленных протоколом рабочего совещания от 01 сентября 2021 года, произвести оплату суммы вышеозначенных штрафных санкций в размере 1 120 655,94 руб. (Один миллион сто двадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 94 копейки).

В соответствии с п. 16.2. Договора за нарушение срока завершения Работ в полном объеме, указанного в п. 3.3. Договора, Генподрядчик вправе требовать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 %, от цены Договора за каждый день просрочки.

Следовательно, по состоянию на 21 сентября 2021 года, неустойка за нарушение срока завершения работ в полном объеме (п. 16.2. Договора) за период с 26.03.2021 г. по 21.09.2021 г. составляет 917 213,28 руб.

Согласно служебной записке начальника участка ООО «КАПИТЕЛЬ» от 09 сентября 2021 года, Подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения обязательств, установленных протоколом рабочего совещания от 01 сентября 2021 года, а именно п. 2 (предоставить гарантийное письмо на предоставление ИД на все виды работ, указанные в приложении к Протоколу рабочего совещания) и п. 3 (предоставить подписанную ИД на все виды работ). Сроки выполнения указанных обязательств - до 16 августа 2021 года. В связи с чем, Генподрядчиком принято решения применить штрафные санкции согласно п. 16.6. и п. 16.17. Договора.

Согласно п. 16.6. Договора, в случае нарушения срока предоставления Генподрядчику Исполнительной документации Генподрядчик вправе требовать с подрядчика неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки.

Следовательно, по состоянию на 21 сентября 2021 года, неустойка за нарушение срока предоставления Генподрядчику Исполнительной документации (п. 16.6. Договора) за период с 17.08.2021 г. по 21.09.2021 г. составляет 183 442,66 руб.

Согласно п. 16.17. Договора, за нарушение сроков выполнения обязательств Подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания, Генподрядчик оставляет за собой право выставить штрафные санкции в размере 10 000 (десяти) тысяч рублей за каждое выявленное нарушение. За неоднократное нарушение (3-х и более раз) Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 300 (триста тысяч) рублей.

Размер штрафной санкции за нарушение срока выполнения обязательств, установленных протоколом рабочего совещания, составляет 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек).

В соответствии с п. 16.20. Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустойки (штрафа), предусмотренных Договором, Генподрядчик имеет право производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа) или удерживать оплату по Договору до исполнения обязательств Подрядчиком по уплате неустойки (штрафа).

30 сентября 2021 года ООО «КАПИТЕЛЬ» был произведен зачет взаимных требований на сумму 450 138,03 руб. (Четыреста пятьдесят тысяч сто тридцать восемь рублей три копейки), в рамках исполнения сторонами обязательств по Договору, однако данный акт зачета взаимных требований возвращен в адрес Генподрядчика не был, в связи с чем, ООО «КАПИТЕЛЬ» повторно 12 января 2022 года направило в адрес Ответчика претензию с требованием о необходимости незамедлительной, в срок не позднее 31 января 2022 года, оплаты суммы вышеозначенных штрафных санкций в размере 1 000 517,91 руб. (Один миллион пятьсот семнадцать рублей девяносто одна копейка), с приложением акта зачета взаимных требований от 30 сентября 2021 года и акта взаимных расчетов между ООО «КАПИТЕЛЬ» и ООО «АКТОРИЯ» за период: 01.01.2021 г. - 12.01.2022 г.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования в части, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 333, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

Как указано истцом в иске, сумма требований 1 000 517 руб. 91 коп. состоит из следующих сумм (за вычетом 450 138 руб. 00 коп., в отношении которых истцом был произведён зачет взаимных требований в одностороннем порядке): 

А) 300 000 руб. 00 коп. – штрафные санкции за неоднократное нарушение (3 и более раз) сроков выполнения обязательств Подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания (п. 16.17 Договора); 

Б) 30 000 руб. 00 коп. – штрафные санкции за нарушение сроков выполнения обязательств ответчиком (являющегося Подрядчиком), установленных протоколом рабочего совещания (п. 16.17 Договора); 

В) 917 213 руб. 28 коп. – неустойка за нарушение срока завершения Работ в полном объеме, указанного в п. 3.3 Договора в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки; 

Г) 183 422 руб. 66 коп. – расчет процентов по задолженности, возникшей с 17.08.2021 г. за нарушение срока представления Генподрядчику исполнительной документации в размере 0,1% за каждый день просрочки; 

Д) 20 000 руб. 00 коп. – штрафная санкция за нарушение сроков выполнения обязательств Подрядчиком, установленных протоколом рабочего совещания.

Ответчиком заявлено о несоразмерности взыскиваемой истцом неустойки последствиям ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств, в связи с чем ответчик просит применить ст. 333 ГК РФ и снизить взыскиваемую истцом неустойку.

В силу ст. 333 Гражданского кодекса РФ суд наделен правом уменьшения неустойки в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Судом установлено, что истец предъявляет требования к ответчику за неисполнение обязательств неимущественного характера, при этом истцом, в нарушение ст. 65 АПК РФ, не представлено доказательств несения негативных последствий. Из материалов дела следует, что ответственность генподрядчика составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка, при этом для подрядчика ответственность составляет 0.1%. 

Институт неустойки необходим, чтобы находить баланс между законными интересами кредитора и должника. Кредитору нужно восстановить имущественные потери от нарушения обязательства, но он не должен получить сверх того прибыль.

Суд полагает, что снижение суммы неустойки обеспечит баланс интересов сторон и позволит истцу в должной мере компенсировать имущественные потери в результате нарушения ответчиком своих обязательств по договору. Делая такой вывод, суд принимает во внимание принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности последствиям нарушения обязательства. В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование истца о взыскании с ответчика штрафа подлежит удовлетворению частично в общей сумме 500 000 руб. 00 коп..

В остальной части требований суд отказывает. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца подлежащими удовлетворению в части.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 333, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 ГК РФ, ст. 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «АКТОРИЯ» (ОГРН 1137746526433) в пользу ООО «КАПИТЕЛЬ» (ОГРН 1077746155211) неустойку в размере 500 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 23 005 руб.

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                    К.В. Вольская