51_14983798  

Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-90689/23

19 декабря 2023 года

г.Москва

 

Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов ,  при ведении протокола помощником судьи Т.В. Забелиной  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-90689/23 по исковому заявлению 

ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО ФИБРОБЕТОН (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) об обязании, взыскании,  

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.  

Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать ООО «Фибробетон» безвозмездно устранить в месячный срок после  вступления в силу решения Арбитражного суда Московской области недостатки работ,  выполненные по Договору от 05.02.2018 № 1463-К, указанные в Рекламационных актах от  15.02.2023 и 07.04.2023, на объекте по адресу: 

<

...>, а именно:  

- требуется покрас угла фасада в районе 1 этажа (1 м.кв.);  - отслоение окрасочного слоя на козырьке подъезда запасного выхода (1 м.кв.);  

- отслоение окрасочного слоя локальными участками в районе цокольной части фасада  и в районе 9 этажа на торце многоквартирного дома и со стороны проезжей части (7 м.кв.).  

 Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков устранения недостатков  работ, определенных в Рекламационных актах, предусмотренную Договором, в размере  2 436 690,28 руб. (два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто рублей  28 коп.) за период с 16.05.2023 по 16.10.2023;  

 Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков устранения недостатков  работ, определенных в Рекламационных актах, за период с 17.10.2023 по дату фактического  исполнения обязательства по устранению недостатков (дефектов) капитального ремонта;  

 Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый  день в случае просрочки исполнения решения Арбитражного суда Московской области;  

 Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов судебные расходы, понесенные Истцом по оплате  государственной пошлины в размере 35 183 руб. (тридцать пять тысяч сто восемьдесят три  рубля 00 коп.);  

6. Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов судебные расходы, понесенные Истцом по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб. (шесть тысяч рублей 00 коп.).  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.С. Солдатов