АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-63970/23-143-495

г. Москва

22 июня 2023 года

Резолютивная часть решения вынесена 29 мая 2023 года  Мотивировочная часть решения изготовлена 22 июня 2023 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе: Председательствующего судьи Судья О.С. Гедрайтис рассмотрев материалы дела в порядке упрощенного судопроизводства по иску ФКР Москвы (ИНН 7701090559) к ООО «Космос» (ИНН 3702689919) 

о взыскании неустойки по Договору № ПКР-001995-18 в размере 322 864 руб. 98 коп.,  без вызова сторон,  

УСТАНОВИЛ:

ФКР Москвы обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к  ООО «Космос» о взыскании неустойки по Договору № ПКР-001995-18 в размере 322  864 руб. 98 коп.  

По всем имеющимся и указанным адресам арбитражным судом было направлено  определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в  порядке упрощенного производства по делу. Указанное определение сторонами  получено.  

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного  производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия  решения арбитражный суд располагает сведениями о получении стороной копии  определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в  порядке упрощенного производства.  

В установленные определением суда от 03.04.2023 сроки для представления  сторонами дополнительных доказательств и документов в порядке ч. 3 ст. 228 АПК РФ,  ответчик отзыв на иск не представил.  

31.05.2023 (согласно штампу канцелярии) в Арбитражный суд г. Москвы  поступило заявление Ответчика о составлении мотивировочного решения.  

Рассмотрев представленные документы, суд считает исковые требования  подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между ФКР Москвы (Истец) и ООО «Космос»  (Ответчик) заключен Договор № ПКР-001995-18 на выполнение работ по разработке  проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном доме и на выполнение работ по капитальному ремонту  

общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва. ЦАО,  Краснопрудная, д. 11, по условиям которого Генподрядчик обязуется выполнить  Работы по Договору, как в целом, гак и по отдельным элементам (системам) здания по  каждому Объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам  (системам) здания в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к  настоящему Договору).  

Задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для  требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и  по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки выполнения этапов работ  по отдельным элементам (системам) здания, за исключением случаев, специально  оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего  законодательства РФ.  

Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным элементам (системам)  здания по каждому Объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным  элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для  определения имущественных санкций в случае нарушения Генподрядчиком сроков  производства Работ.  

В силу п. 4.2. договора продолжительность производства работ на Объекте(-ах)  определяется Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

Согласно п. 4.2.1. договора начальный срок выполнения работ - согласно Графика  производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

В силу п. 4.2.2. договора конечный срок выполнения работ - последний день  установленного срока выполнения работ согласно Графика производства и стоимости  работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

Согласно п. 6.1.10. Генподрядчик обязан выполнить и сдать Работы по Объекту в  объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать работы по Актам согласно п.  1.3, п. 1.4, п. 1.8 настоящего Договора.  

В соответствии с п.12.6, за невыполнение или ненадлежащее исполнение  Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте(-ах) в  соответствии с Графиком производства работ, Генподрядчик уплачивает Заказчику  неустойку в размере:  

- 0,1% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания или  этапа работ по отдельному элементу (системе) здания, за каждый день просрочки до  фактического завершения выполнения работ по данному элементу (системе) здания или  этапу работ по отдельному элементу (системе) здания, в случае просрочки  продолжительностью от 1 до 10 календарных дней;  

- 0,2% от стоимости соответствующих работ по элементу (системе) здания или  этапа работ по отдельному элементу (системе) здания, за каждый день просрочки до  фактического завершения выполнения работ по данному элементу (системе) здания или  этапу работ по отдельному элементу (системе) здания, в случае просрочки  продолжительностью свыше 10 календарных дней.  

В связи с ненадлежащим исполнением Ответчиком договорных обязательств,  истцом Ответчику начислена неустойка в размере 322 864 руб. 98 коп.  

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия, которая последним  оставлена без удовлетворения, в связи с чем, Истец обратился в суд с настоящим  исковым заявлением.  

Ответчик с исковыми требованиями не согласился, представил отзыв на исковое  заявление, в соответствии с которым просил суд отказать в удовлетворении исковых  требований, так как, по мнению Ответчика взыскания неустойки, является Истцом  злоупотреблением правом.  

Довод Ответчика судом отклоняется, поскольку мера ответственности в виде  неустойки, является одним из условий Договора, подписанного Ответчиком.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

При заключении Договора Ответчик был осведомлен о наличии определенных  предпринимательских рисков.  

 Являясь субъектом предпринимательской деятельности, Ответчик, в  соответствии со ст. 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой  риск, а, следовательно, должен и мог предположить и оценить возможность  отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с  неисполнением принятых по договору обязательств. Являясь субъектом гражданских  правоотношений, Ответчик обязан не только знать нормы гражданского  законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.  

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют  принадлежащие им гражданские права (п. 1 ст. 9 ГК РФ).  

Договором, заключенным между Сторонами, предусмотрена ответственность  Ответчика за ненадлежащее выполнение своих обязательств, таким образом,  подписанием Договора Ответчик подтвердил, что будет нести ответственность в случае  нарушения его условий.  

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона.  Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, кроме случаев  прямо предусмотренных в законе или договоре.  

Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в  заключение договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме  случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными  правовыми актами (пункт 4 статьи 421 ГК РФ).  

Ответчик, заключая договор, согласился на его условия, в том числе касающиеся  сроков (промежуточных и окончательного) выполнения работ и ответственности за их  нарушение.  

Предложений об изменении условий Договора в части ответственности Сторон в  адрес Истца от Ответчика не поступало ни при заключении Договора, ни при его  

Таким образом, доводы Ответчика о злоупотреблении правом со стороны Истца  несостоятельны.  

Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов  защиты нарушенного права.  

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.  

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных  действий.  

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что исковые требования полежат  удовлетворению в указанной выше части, так как, Истцом представлены в материалы  дела доказательства в обоснование позиции по спору.  

Кроме того, суд также учитывает, что ответчик своим правом о заявлении  ходатайства о снижении размера неустойки не воспользовался, соответствующего  ходатайства не заявил.  

Судебные расходы относятся на Ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 307- 310, 401, 965,  1064 ГК РФ, ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Космос» в пользу ФКР Москвы 322 864 руб. 98 коп. неустойки,  9 457 руб. 00 коп расходов по уплате госпошлины по иску.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может  быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке  упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления  мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном  объеме.  

Судья О.С. Гедрайтис