Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Волгоград                                                                                            Дело №А12-30572/2018

«13» ноября 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 06.11.2018 г.

Полный текст решения изготовлен 13.11.2018 г.  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Альферац" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании пеней по государственному контракту от 13.11.2018 г. № 816187 в размере  23 314 руб. 3 коп. и  об обязании устранить недостатки работ  

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 14.09.2018 г.; 

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 15.06.2018 г.;

установил:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" (далее – ГБУЗ «ВОКПД», истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Альферац» (далее – ООО «Альферац», ответчик) о взыскании пеней по государственному контракту от 13.11.2018 г. № 816187 с учетом уточнения истцом требований в порядке ст. 49 АПК РФ в размере  23 314 руб. 3 коп. и  об обязании устранить недостатки работ, а именно протечку кровли в месте прилегания слуховых окон и ската кровли, в месте прохода вентиляционных каналов через скат кровли в административном здании общей площадью 849,4 кв.м. (литер Д) по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина -54.

Истец в судебном заседании на основании ст. 49 АПК РФ заявил отказ от требований в части обязания ответчика выполнить обязательства по устранению недостатков работ по государственному контракту от 13.11.2018 г. №816167. 

В силу ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (ч. 5 ст. 49 АПК РФ).

Рассматривая заявление о частичном отказе от исковых требований, суд не усматривает  противоречия закону или нарушения права других лиц, в связи с чем, принимает отказ истца  от части исковых требований. 

В судебном заседании истец поддержал исковые требования о взыскании с ответчика пеней по государственному контракту от 13.11.2018 г. № 816187 за период с 16.04.2018 г. по 08.06.2018 г. (54 дня) в размере 21 544 руб. 02 коп., с 09.06.2018 г. по 15.06.2018 г. (7 дней) в размере 1 770 руб. 01 коп., на общую сумму 23 314 руб. 03 коп. 

Изучив основания заявленных требований, исследовав материалы дела, арбитражный суд находит исковое заявление подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен государственный контракт от 13.11.2017 г. №816187, предметом которого является выполнение работ Подрядчиком по капитальному ремонту фасадов помещений ГБУЗ «ВОКПД», расположенных по адресу: г. Волгоград, проспект им В.И.Ленина, 54 (далее – Контракт).

Срок выполнения работ – с 20.02.2018 г. по 15.04.2018 г. (п. 3.1. Контракта).

Цена Контракта составляет 1 595 853 руб. 40 коп. с учетом НДС (п. 4.1. Контракта).

Приёмка-сдача работ по Контракту сторонами произведена путём подписания актов выполненных работ от 28.05.2018 г., 13.06.2018 г.

Пунктом 9.7. Контракта предусмотрено начисление пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трёхсотой, действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем). 

На основании указанного пункта Контракта истцом к взысканию с ответчика с учётом уточнений заявлена неустойка в размере 23 314 руб. 03 коп. за период с    16.04.2018 г. по 08.06.2018 г. (54 дня), с 09.06.2018 г. по 15.06.2018 г. с применением ставки рефинансирования ЦБ РФ 7,25 %. 

В соответствии со статьями 702, 711 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить работы в порядке, предусмотренном договором.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Ответчик в ходе рассмотрения дела представил отзыв, в котором привёл контррасчёт пеней за период с 16.04.2018 г. по 07.06.2018 г. (53 дня), с 09.06.2018 г. по 14.06.2018 г. (6 дней), размер которых составил 22 662 руб. 21 коп. 

            Суд соглашается с доводом ответчика о том, что день приемки работ не подлежит включению в период просрочки обязательства. 

            Таким образом, с ответчика подлежат взысканию пени за период с 16.04.2018 г. по 07.06.2018 г. (53 дня)  в размере 21 145 руб. 06 коп., с 09.06.2018 г. по 14.06.2018 г. в размере 1 517 руб. 15 коп. на общую сумму 23 010 руб. 60 коп.

В силу ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

решил:

Принять отказ государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от требований об обязании  общества с ограниченной ответственностью "Альферац" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) выполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от 13.11.2018 г. № 816187 на капитальный ремонт кровли зданий ГБУЗ «ВОКПД» по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина- 54, устранив протечки кровли в месте прилегания слуховых окон и ската кровли, в месте прохода вентиляционных каналов через скат кровли в административном здании общей площадью 849,4 кв.м. (литер Д) по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина -54.

Производство по делу в указанной части прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альферац" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени в размере 23 010 руб. 60 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альферац" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 974 руб. 

Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 26 руб. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                     Л.В. Напалкова