487/2023-337431(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А57-15438/2023

город Саратов

12 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 05 декабря 2023 года. Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2023 года. 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Бурганова Б.Р., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании дело  

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик «Межрегионстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Государственному  казенному учреждению Саратовской области «Управление капитального строительства»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: 

от истца – представителя ФИО2, по доверенности от 01.11.2020,  иные лица, участвующие в деле, не явились,  

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось ООО СЗ «Межрегионстрой»  с исковым заявлением, согласно которому заявитель просит обязать ГКУ СО «УКС» заключить  дополнительное соглашение об увеличении цены контракта муниципального контракта   № 0860500000221000005 от 26.02.2021 года на выполнение работ по строительству объекта  капитального строительства: «Плавательный бассейн по адресу: 

<

...>», заключенного между ГКУ Саратовской области «Управление  капитального строительства» и ООО СЗ «Межрегионстрой», изложив пункт 3.1. в следующей  редакции:  

«3.1. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения  контракта и составляет 89 859 400,00 (восемьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят девять  тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 20%.  

Цена контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других  обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по  контракту.  

В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том  числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в контракт включается  обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате на размер налогов, сборов и  иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных  с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и  сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. Цена государственного контракта может  быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных контрактом объема работ,  и иных условий исполнения государственного контракта».  

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации был объявлен перерыв с 28.11.2023 по 05.12.2023.  

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом. 

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте  проведения судебного заседание, об объявленных перерывах в судебном заседании была так же  размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области -  http://www.saratov.arbitr.ru.  

Исследовав представленные доказательства, проверив доводы, изложенные в исковом  заявлении и отзыве, с учетом мнений участников судебного процесса, приходит к следующему.  

Как следует из искового заявления, 26 февраля 2021 года между ООО СЗ  «Межрегионстрой» (Подрядчик) и ГКУ Саратовской области «Управление капитального  строительства» заключен муниципальный контракт № 0860500000221000005 на выполнение работ  по строительству объекта капитального строительства: «Плавательный бассейн по адресу:  

<

...>» в сроки, предусмотренные  контрактом в объеме и содержанию, предусмотренными проектной документацией.  

Согласно п.2.1. срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта  до 30 сентября 2021 г.  

29.12.2022 ООО СЗ «Межрегионстрой» обратилось в адрес ГКУ Саратовской области  «Управление капитального строительства» с письмом о рассмотрении вопроса об увеличении  цены контракта и заключении дополнительного соглашения, на основании положительного  экспертно-консулътационного заключения (Исх. № 812-С от 29.12.2022 г.). Однако, в адрес ООО  СЗ «Межрегионстрой» (30.12.2022 исх. 01-01/3611) поступил ответ с отказом увеличить  вышеуказанный государственный контракт, в связи с отсутствием финансирования.  

31 января 2023 года ООО СЗ «Межрегионстрой» повторно обратилось с претензионным  письмом о заключении дополнительного соглашения об увеличении цены контракта.  

ООО СЗ «Межрегионстрой» обращалось с претензионным письмом в адрес ответчика, на  которое ответа не поступало.  

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с исковыми  требованиями.  

В пункте 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если  иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором.  

Пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие  связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного  характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а  государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и  оплатить их или обеспечить их оплату.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации  государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о  стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке  финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.  

Согласно пункту 2 статьи 767 Гражданского кодекса Российской Федерации изменения  условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами,  указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон  допускаются в случаях, предусмотренных законом. Срок выполнения работ является  существенным условием договора подряда в силу статей 432, 708 Гражданского кодекса  Российской Федерации  

В соответствии со статьями 34, 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) изменение существенных условий контракта при  его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,  указанных в данном Законе.  

Как отражено в пункте 9 Обзора судебной практики применения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного  Суда Российской Федерации 28.06.2017, стороны не вправе дополнительным соглашением  изменять сроки выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное  не установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом.  

Сохранение условий государственных и муниципальных контрактов в том виде, в котором  они были изложены в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в  документации об аукционе, невозможность ведения переговоров между заказчиками и  участниками закупок (статья 46 Закона о контрактной системе) и исполнение контракта на  условиях, указанных в документации, направлены на обеспечение равенства участников  размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение в связи с этим  эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования,  на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов с тем,  чтобы исключить случаи обхода закона - искусственного ограничения конкуренции при  проведении аукциона и последующего создания для его победителя более выгодных условий  исполнения контракта.  

Согласно пункту 3.1 Контракта контракта является твердой и определяется на весь срок  исполнения контракта.  

Цена контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других  обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по  контракту.  

В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том  числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в контракт включается  обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате на размер налогов, сборов и  иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных  с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и  сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. Цена государственного контракта может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ,  и иных условий исполнения государственного контракта.  

Согласно пункту 3.6. Контракта превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ по  строительству объекта не принимаются и не оплачиваются.  

Изменения существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случае  предусмотренных статьей 95 и 112 Закона, а именно:  

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема  работ, качества оказываемых работ и иных условий контракта;  

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом  которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,  сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов  культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного  законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цепы  контракта;  

- если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению  работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта  обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения  изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в  контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не  превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в  случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств,  по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных  средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения  контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока  осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате  неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным  законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом  обеспечения исполнения контракта;  

- допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон в  случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при  уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств  лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения  государственного контракта обеспечивает согласование новых условий государственного  контракта, в том числе цены и (или) сроков  

исполнения государственного контракта и (или) количества товара, объема работы или  услуги, предусмотренных государственным контрактом (пункт 11.6. Контракта).  

Исследовав и оценив в совокупности все документы, представленные в материалы дела,  с учетом статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд пришел к  выводу о том, что цена Контракта могут быть изменены только в случаях, установленных статьей  95 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; при этом обстоятельства, указанные истцом в обоснование  исковых требований, не соответствуют какому-либо из оснований, указанных в части 1 статьи 95  Закона № 44-ФЗ и допускающих изменение существенных условий государственного  (муниципального контракта).  

Определение цены Контракта осуществлено при его заключении; Подрядчик на стадии  проведения аукциона, предшествующей заключению Контракта, принял на себя обязанность по  выполнению работ в соответствии с документацией аукциона и должен был оценить с учетом  надлежащей степени заботливости и осмотрительности возможность выполнения всего перечня  работ на условиях их оплаты по определенной цене до того, как приступил к их выполнению.  

Истец, являясь профессиональным участником предпринимательской деятельности в  сфере строительного подряда, проявляя должную осмотрительность, заботливость и осторожность  при заключении государственного контракта, мог и должен был предполагать возможные  предпринимательские риски, в том числе проблемы с обеспечением строительными материалами  и другие проблемы экономического характера.  

В материалы дела не представлены решение об изменении твердой цены Контракта;  не представлены доказательства согласования новых сметных расчетов с ответчиком.  

Внесение изменений в контракт, заключенный в соответствии с положениями Закона  « № 44-ФЗ, возможно только при совокупности условий, определенных в подпункте «а» пункта 2  Постановления Правительства № 1315.  

Одним из основных условий является то, что обязательства по контракту не исполнены. 

Между тем, обязательства по контракту исполнены, 22.06.2022 получено разрешение на  ввод объекта в эксплуатацию, то есть взаимные обязательства сторон по предмету контракта  полностью исполнены и прекращены.  

Таким образом, отсутствует совокупность условий для изменения (увеличения) цены  контракта, предусмотренная Постановлением № 1315.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья  740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения  государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или  

муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или  муниципальных нужд.  

Срок выполнения работ и цена является существенным условием договора подряда  (контракта) (статьи 432, 708, 709, 766 ГК РФ).  

Недопустимость изменения сторонами сроков выполнения работ по государственному  (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с  ним контрактом, обеспечивает равенство участников размещения заказов и свободу конкуренции  (пункт 9 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  28.06.2017).  

При данных обстоятельствах, а также учитывая, что суд не установил наличие оснований  для изменения существенных условий контракта относительно цены, оснований для обязания  заключить соглашение об изменении цены контракта с учетом представленных истцом доводов и  документов у суда не имеется.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью  специализированный застройщик «Межрегионстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Государственному казенному учреждению Саратовской области «Управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), отказать.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд  Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области Б.Р. Бурганов