654/2020-2693(1) 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

дело № А40-88290/19 

Резолютивная часть постановления объявлена 21 января 2020 года  Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2020 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е. Судей Тетюка В.И., Бодровой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика на  решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2019г. (резолютивная часть от  18.09.2019г.) по делу № А40-88290/19  

по иску ТСЖ "АТЛАНТ" (ОГРН 

<

***>) к ООО "СЭМБО" (ОГРН 

<

***>) об обязании и взыскании, 

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 11.02.2019, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 28.06.2018 

У С Т А Н О В И Л:

ТСЖ "АТЛАНТ" (Заказчик) предъявило ООО "СЭМБО" (Подрядчик) иск об  обязании безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по контракту на  выполнение работ по капитальному ремонту № 01/2017/ККР от 30.03.2017г., указанные  в заключении эксперта № 210918-38 от 21.09.2018г. ООО «МНСЭ»; взыскании штрафа  по п. 7.7 контракта в размере 62 067 руб. 71 коп, расходов по проведению обследования  в размере 85 400 руб. 00 коп. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49  АПК РФ).  

Кроме того, истцом предъявлено требование о взыскании расходов на оплату  услуг представителя в размере 40 000 руб.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176  АПК РФ 18.09.2019г., изготовленным в полном объеме 01.11.2019г. исковые  требования удовлетворены.  

Не согласившись решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

В судебное заседание суда апелляционной инстанции явились Истец и Ответчик;  заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.  

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, полагает  мировое соглашение подлежащим принятию судом, а производство по апелляционной  жалобе – прекращению.  

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ,  поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными  на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об  условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не  противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.  

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное ТСЖ "АТЛАНТ" (Истец) и ООО "СЭМБО" (Ответчик)  по делу № А40-88290/19 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а  именно:  

«Товарищество собственников жилья «Атлант» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***> КПП 771501001), именуемое далее «Истец», в лице Председателя  Правления ФИО4, действующей на основании Устава, с  одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Сэмбо» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице представителя  ФИО3, действующей на основании доверенности от  28.06.2018 б/н, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,  

с целью урегулирования спора, рассматриваемого в рамках дела № А40-88290/19- 5-791, по иску Истца к Ответчику об обязании безвозмездно устранить недостатки  работ, выполненных по контракту от 30.03.2017 № 01/2017/ККР на выполнение работ  по капитальному ремонту, о взыскании 147 468 руб., пришли к соглашению о  заключении мирового соглашения (далее - Соглашение) на следующих условиях:  

Условия мирового соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение заключено между Сторонами в соответствии со  ст. ст.49,139 АПК РФ для урегулирования возникшего спора по обоюдному согласию.  

1.2. По условиям настоящего мирового соглашения Ответчик принимает на  себя следующие обязательства:  

1.3. в двухмесячный срок с даты начала проведения работ безвозмездно  устранить недостатки работ, выполненных по контракту на выполнение работ по  капитальному ремонту № 01/2017/ККР от 30.03.2017г., которые указаны в Акте об  осмотре от 13.11.2019, составленном Сторонами, а именно: устранить протечки кровли  (подъезд 3, крыша балкона 25-го этажа, кв. 250), отслоения в местах стыков старого и  нового гидроизоляционного слоев  и их укладку обратным способом, протечку на крыше балкона кв.250, 25й этаж  (заменить кровельный ковер площ.15 кв.м.). Срок начала выполнения работ - 30 апреля  2020 года.  

1.3.1. в срок 10 (десять) рабочих дней с даты вступления в силу определения,  которым утверждается Соглашение, выплатить Истцу денежные средства в размере  198 891, 71 (Сто девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто один 71/100) рублей в  счет возмещения расходов.  

1.4. Настоящим Стороны подтверждают, что: 

- они ознакомились со всеми условиями Соглашения и подтверждают свое  намерение закончить дело мировым соглашением на вышеуказанных условиях;  

- условия Соглашения не нарушают права и законные интересы, как Сторон  настоящего соглашения, так и третьих лиц;  

- заключая Соглашение, Стороны действуют добровольно, без всякого  принуждения со стороны, сознают возникающие вследствие этого правовые  последствия.  

1.5. Сторонам известно о том, что в случае неисполнения Ответчиком  условий настоящего Соглашения, Истец вправе обратиться в Арбитражный суд города  Москвы с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение  мирового соглашения.  

1.6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, при условии его  последующего утверждения определением Девятого арбитражного апелляционного  суда и действует до полного исполнения Ответчиком принятых на себя обязательств по  Соглашению.  

1.7. Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для  каждой Стороны, и один экземпляр - для Девятого арбитражного апелляционного суда.  Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст.150 и 151  АПК РФ Сторонам известны и понятны».  

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2019г. (резолютивная часть от  18.09.2019г.) по делу № А40-88290/19 отменить.  

Производство по делу прекратить. 

Возвратить ТСЖ "АТЛАНТ" из федерального бюджета государственную  пошлину в размере 5 712 руб., уплаченную при подаче иска по платежному поручению  от 03.04.2019г. № 143.  

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.  

Председательствующий судья Е.Е. Кузнецова 

Судьи В.И. Тетюк  

 Е.В. Бодрова  

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.