Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, 

<

...>

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-8643/2025

«27»

августа

2025 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«13» 

августа

2025 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«27»

 августа

2025 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР» к МКУ «Калининградская служба заказчика» о взыскании 971 988 рублей

при участии в заседании:

от истца: Подтоптанный Д.А. по доверенности

от ответчика: ФИО2 по доверенности 

установил. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР» обратилось в суд с иском (уточенным) к муниципальному казенному учреждению «Калининградская служба заказчика» о взыскании неустойки в сумме 971 988 рублей.

В связи с отсутствием возражений суд перешел к рассмотрению дела в судебном заседании первой инстанции. 

Судом установлено. 

Между сторонами был заключен муниципальный контракт от 12.12.2023 № 330/2023.

По условиям контракта ООО «СТК ПАРТНЕР» (подрядчик) обязалось выполнить работы по благоустройству территории общего пользования, прилегающей к озеру Летнее в г. Калининграде, а МКУ «Калининградская служба заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта его цена согласована 3 785 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 5.2 контракта оплата за работы производится в течение не более чем 2 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке работ в ЕИС.    

Имущественная ответственность сторон за нарушение условий контракта согласована в разделе 1 контракта.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 14.01.2025 по делу № А21-8800/2024 с заказчика в пользу подрядчика взыскан основной долг по контракту от 12.12.2023 № 330/2023 в сумме 3 785 000 рублей.

В рамках дела № А21-8800/2024 установлено, что 05.04.2024 в ЕИС подрядчик разметил документ о приемке работ.

 Решение вступило в силу 28.04.2025 и было исполнено заказчиком 17.06.2025.

По настоящему делу подрядчик просил взыскать неустойку по положениям пункта 11.10 контракта за период с 15.04.2024 по 17.06.2025 в сумме 971 988 рублей, исходя из расчета: 3 785 000 х 18% х 428 : 300.

Расчет судом проверен, признан обоснованным.  

Заказчик просил применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер неустойки, ссылаясь на то, что задержка в оплате была вызвана меняющейся практикой в отношении применения НДС.

Суд не установил оснований для снижения законной неустойки.

Требования подрядчика подлежат удовлетворению на основании положений статей 330 ГК РФ, положений контракта.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР» неустойку в сумме 971 988 рублей, расходы по госпошлине в сумме 53 599 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР» из Федерального бюджета госпошлину в сумме 3992 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья О.Н.Шкутко