ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-27206/2024

г. Новосибирск

04 сентября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Марченко В.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ  ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС-ПЛЮС"  (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

об исполнении гарантийных обязательств по муниципальным контрактам №  65/21 от 23.08.2021, № 107/22 от 05.09.2022, № 37/21 от 02.07.2021, № 83/22 от  

08.08.2022, при участии представителей: истца – не явился (извещен), ответчика – не явился (извещен), 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС- ПЛЮС" (ОГРН 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения в  законную силу, при наступлении климатических условий (в сухую погоду, весной и  летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С),  

устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по  муниципальному контракту от 07.09.2020 № 93/20 на объектах:  

 - объект «ул. Кирова» по муниципальному контракту № 65/21 от 23.08.2021: 

1. Выкрашивание, истираемость, выбоины верхнего слоя а/б покрытия – 32250 м2  (на всей протяжённости участка).  

- объект «ул. Октябрьская магистраль» по муниципальному контракту № 65/21 от  23.08.2021:  

1. Разрушение а/б на примыканиях к колодцам в районе пересечения с ул.  Сербренниковской - 3шт.  

- объект «ул. ФИО1» по муниципальному контракту № 107/22 от  05.09.2022:  

1. Выкрашивание (выбоины) верхнего слоя а/б покрытия проезжей части – 2  м2 (ФИО1,41 0,5 м2; ФИО1,41/1 1 м2; на пересечении с ул.  Виталия Потылицына 0,5 м2);  

2. Просадка колодцев и выкрашивания а/б на примыканиях к колодцам – 3 шт.  (на пересечении с ул. Виталия Потылицына).  

- объект «ул. ФИО2» по муниципальному контракту № 37/21 от  02.07.2021:  

1. Выкрашивание (выбоины) верхнего слоя а/б покрытия проезжей части - 0,5 м2  (ФИО2,63 граница участка; на пересечении с ул. Толстого);  

2. Просадка колодцев и выкрашивания а/б на примыканиях к колодцам – 2 шт.  (ФИО2,66 1 шт.; ФИО2,64 1 шт.);  

3. Выкрашивание а/б в местах отбора проб – 3 шт. (ФИО3,63 2 шт.;  ФИО2,64 1 шт.).  

- объект «ул. Большевистская» по муниципальному контракту № 83/22 от  08.08.2022:  

1. Выкрашивание (выбоины) верхнего слоя а/б покрытия проезжей части – 5 м2 (по  правой полосе от эстакады до Большевистская,37).  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС- ПЛЮС" (ОГРН 

<

***>) доход федерального бюджета расходы на оплату  государственной пошлины в размере 24 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со  дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья В.Г. Осипов