АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994, официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-236881/17

02 ноября 2018 года

город Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2018 года 

Полный текст постановления изготовлен 02 ноября 2018 года  

Арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Кобылянского В.В., судей Беловой А.Р., Ядренцевой М.Д., при участии в заседании: 

от истца: общества с ограниченной ответственностью «Хартинг» - ФИО1  по дов. от 01.12.2017,  

от ответчика: общества с ограниченной ответственностью «Строй сервис» - Кузне- цов В.Н. по дов. от 21.06.2016, ФИО2, ФИО3 по дов. от  20.12.2017,  

рассмотрев 30 октября 2018 года в судебном заседании кассационную жалобу ответчика (истца по встречному иску) общества с ограниченной ответственностью  «Строй сервис»  

на решение от 23 апреля 2018 года Арбитражного суда города Москвы, принятое судьей Коноваловой Е.В., 

и постановление от 18 июля 2018 года  

Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Савенковым О.В., Александровой Г.С., Алексеевой Е.Б., по иску общества с ограниченной ответственностью «Хартинг» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строй сервис»  о расторжении договора, взыскании долга  

и по встречному иску о понуждении предоставить архитектурный проект и рабочую  документацию, взыскании задолженности,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Хартинг» (да- лее – истец, ООО «Хартинг») обратилось в Арбитражный суд города Москвы к об- ществу с ограниченной ответственностью «Строй сервис» (далее – ответчик, ООО  «Строй сервис») с иском о расторжении договора от 06.07.2017 № 01-05/07/17  аренды офисных помещений (офисных площадей) в бизнес-центре «Аэродом», за- ключенного между сторонами, и взыскании 4 255 675,32 руб. долга.  

ООО «Строй сервис» обратилось в арбитражный суд со встречным иском, с  учетом принятых судом уточнений заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о понуждении арендатора представить архитектурный проект и рабочую документацию в течение 15  дней с момента вступления решения в законную силу и взыскании 5 319 594,15 руб.  задолженности по арендным платежам за пять месяцев.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2018 года, остав- ленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного  суда от 18 июля 2018 года, первоначальные исковые требования удовлетворены ча- стично: с ООО «Строй сервис» в пользу ООО «Хартинг» взыскан основной долг в  размере 4 255 675,32 руб.; в удовлетворении остальной части первоначального иска  и удовлетворении встречного иска отказано.  

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО «Строй сервис» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой,  в которой просит названные решение и постановление отменить и направить дело  на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указывая на нарушение и непра- 

вильное применение судами норм права и несоответствие выводов судов фактиче- ским обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам.  

В обоснование приведенных в кассационной жалобе доводов ответчик по  первоначальному иску указывает, что судами неправильно применены нормы статей 328, 406, 607, 716, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации; условие  об объекте аренды согласовано сторонами, которые имели ясное представление о  месте, площади и порядке расположения арендуемого помещения; невозможность  выполнения отделочных работ обусловлена неисполнением обязательств истца по  предоставлению проектной документации. Суды неправильно применили статьи  431 и 708 Гражданского кодекса Российской Федерации; вывод судов о несогласо- ванности окончательного срока выполнения отделочных работ противоречит фак- тическим обстоятельствам дела и основан на неправильном толковании условий  договора. Суды не применили нормы статей 314, 327.1, 328, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации и не приняли во внимание сложившуюся судебную  практику; начальный момент периода выполнения отделочных работ определен  указанием на действия истца по предоставлению проектной документации; условие  о сроке предоставления проектной документации не может быть признано несогла- сованным, поскольку истец признавал за собой наличие обязанности по предоставлению проектной документации и совершал действия, направленные на ее исполнение; неправильное определение предмета доказывания привело к тому, что суды  не установили обстоятельства, которые подтверждают, что ответчик предпринял  все разумные действия, направленные на получение проектной документации от  истца, однако, ввиду длительного неисполнения истцом данной обязанности, ответчик был лишен возможности выполнить отделочные работы. Суд не поставил  на обсуждение сторон вопрос о заключенности договора; суд, определив не заяв- ленное сторонами обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотре- ния дела (незаключенность договора), не раскрыл перед сторонами предмет дока- зывания и не выяснил позицию сторон относительно вопроса о заключенности договора, что свидетельствует о наличии существенных нарушений норм процессуального права. Незаконно признав договор незаключенным, суды не рассматривали  встречные исковые требования по существу; ответчик вправе требовать исполне- 

ния обязательства по предоставлению проектной документации; требование о  взыскании денежных средств является законным, поскольку в результате нарушений, допущенных истцом, на стороне ответчика возникли убытки. Суды не установили в связи с чем истец не исполнил обязанность по предоставлению проектной  документации, не установили, что ответчик был лишен возможности выполнить  отделочные работы в результате нарушений, допущенных истцом.  

ООО «Хартинг» представило отзыв с возражениями на кассационную жалобу, в котором указало, что основанием удовлетворения иска послужил факт отсут- ствия в натуре помещения, подлежащего передаче арендатору, то есть неисполне- ние ответчиком существа арендного обязательства, предусмотренного пунктом 1  статьи 611 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Явившиеся в судебное заседание суда кассационной инстанции представите- ли ответчика поддержали доводы и требования кассационной жалобы, представи- тель истца возражал против доводов жалобы, указывая на законность и обоснован- ность принятых судебных актов.  

Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав  объяснения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в  деле, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материально- го и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжа- луемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и  имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит осно- ваний для отмены обжалуемых решения и постановления ввиду следующего.  

Как следует из материалов дела и установлено судами, между ЗАО «Хартинг» (правопредшественник истца, арендатор) и ООО «Строй сервис» (арендода- тель) заключен договор от 06.07.2017 № 01-05/07/17 аренды офисных помещений  (офисных площадей) в бизнес-центре «Аэродом».  

По условиям договора арендуемые помещения – нежилые помещения пло- щадью 435,5 кв.м., при этом в аренду подлежат передаче помещения площадью 407  кв.м. (блок 5, 6, 7), которые указаны на поэтажном плане с границами арендуемых  помещений.  

Срок начала аренды начинается ориентировочно с даты 15.10.2017 по факту  подписания акта приема-передачи арендуемых помещений (пункт 3.3). Стороны  установили, что точная дата начала аренды будет определена в дополнительном со- глашении – графике проведения отделочных работ, которое будет подписано сторонами после разработки необходимой для проведения работ документации.  

Арендатор перечислил арендодателю авансовые платежи в сумме  3 191 756,49 руб. и страховой депозит в сумме 1 063 918,83 руб.  

Арендатор 26.10.2017 направил уполномоченных представителей по месту  нахождения арендованных помещений для их осмотра и приемки, по результатам  которого установил, что арендованное помещение не соответствуют условиям договора, что послужило основанием для отказа в его принятии.  

Полагая допущенные арендодателем нарушения существенными, истец  направил ответчику претензию с предложением расторгнуть договор аренды и тре- бованием вернуть авансовые платежи в сумме 3 191 756,49 руб. и страховой депозит в сумме 1 063 918,83 руб.  

Претензионные требования истца ответчиком в добровольном порядке не  исполнены, что и послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд  с первоначальным иском.  

Ссылаясь на то, что невозможность проведения отделочных работ обуслов- лена ненадлежащим исполнение арендатором своих обязательств по договору, вы- разившихся в не предоставлении архитектурного проекта и рабочей документации,  арендодатель обратился в суд со встречным иском об обязании арендатора пред- ставить документацию и взыскании арендных платежей за пять месяцев.  

Частично удовлетворяя первоначальный иск и отказывая во встречном иске,  суды обеих инстанций, исследовав и оценив представленные в материалы дела до- казательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основываясь на буквальном толковании текста договора, со- держащего элементы аренды и подряда, руководствуясь положениями статей 381.1,  421, 432, 702, 708, 740, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, исхо- дили из того, что спорный договор, во исполнение которого, истцом был перечис- лен авансовый платеж и страховой депозит, является незаключенным ввиду несо- 

гласованности сторонами существенных условий, в частности, о сроках проведения  отделочных работ и об объекте аренды.  

При этом суды исходили из того, что примерное изображение на плане гра- ниц помещения не привело к определенному соглашению сторон об объекте аренды, поскольку одна из сторон ссылается на неведение относительно местоположе- ния внешних границ помещения и внутренних перегородок; согласно приложению   № 2 к договору передаваемые в аренду помещения не имеют технического описа- ния и отображены схематично на плане этажа в составе площади, которая также не  имеет технического инвентаризационного описания; объект аренды не ограничен  строительными конструкциями, т. е. не создан в натуре, а отсутствие договоренно- сти сторон о сроках проведения строительных работ препятствует индивидуально- му определению объекта аренды; отсутствие технической обособленности помещения подтверждается актом осмотра от 26.10.2017 и заключением специалиста о  проведении строительно-технического исследования от 27.10.2017 № 335; доказательств, подтверждающих выполнение ответчиком действий, направленных на  конкретизацию сроков выполнения работ и получения от истца необходимой документации, материалы дела не содержат.  

Установив, что в данном случае договор считается незаключенным, а бес- спорных доказательств исполнения ответчиком обязательств и выполнения преду- смотренных в договоре работ материалы дела не содержат, суды пришли к выводу,  что при отсутствии встречного предоставления в виде пользования помещением и  недостижении сторонами соглашения по существенным условиям договора у ответчика отсутствуют основания для удержания перечисленного истцом авансового  платежа и страхового депозита, в связи с чем, указанные денежные средства под- лежат возврату истцу на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской  Федерации, а поскольку по условиям договора момент начала аренды определяется  датой подписания акта приема-передачи объекта аренды, который сторонами не  подписан, фактическое пользование объектом аренды со стороны арендатора от- сутствует, не имеется оснований для начисления и взыскания арендодателем  арендных платежей.  

Оснований не согласиться с выводами судов кассационная коллегия не  усматривает и признает, что судами установлены все существенные обстоятельства  дела, правильно применены правовые нормы, регулирующие спорные правоотно- шения, спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и пред- ставленными доказательствами при правильном применении норм процессуального права.  

Приведенные в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о наруше- нии судами норм материального и процессуального права, а фактически сводятся к  несогласию с выводами судов и направлены на переоценку исследованных судами  доказательств и установленных обстоятельств, что в силу положений статьи 286  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в пол- номочия суда кассационной инстанции.  

Нарушений судами норм процессуального права, являющихся безусловным  основанием для отмены судебных актов, кассационной коллегией не установлено.  

Таким образом, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для  отмены принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 апреля 2018 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2018 года по де- лу № А40-236881/17 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Строй сервис» – без удовлетворения.  

Председательствующий-судья В.В. Кобылянский  

Судьи: А.Р. Белова 

 М.Д. Ядренцева