6/2024-29979(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина, д. 74, г. Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-13369/2023

г. Тюмень

22 февраля 2024 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании исковое заявление Государственного казенного учреждения  Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области» (ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 

<

***>, адрес: 625002, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Богема» (ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 02.03.2022, ИНН: 

<

***>, адрес: 625026, 

<

...>,  помещ. 306) о безвозмездном устранении недостатков работ, руководствуясь статьями 110, 167-170,  176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Богема» в течение месяца с даты  вступления настоящего решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по  государственному контракту № 038/22 от 25.07.2022 в соответствии с результатами и выводами  судебной строительно-технической экспертизы, проведенной ООО «Альянс-Эксперт» по делу №  А70-13369/2023 (экспертное заключение от 07.02.2024), в том числе:  

- выполнить комплекс мероприятий по полному переустройству кровли здания,  расположенного по адресу: 

<

...>, включая демонтаж покрытия  кровли из наплавляемого материала, демонтаж уклонообразующего материала, демонтаж слоя  утеплителя, переустройство межплитных швов в перекрытии кровли с предварительной просушкой  конструкций, устройство утепления, уклонообразующей стяжки, устройство кровли из  наплавляемых материалов. Ведомость объемов работ по устранению недостатков представлена в  таблице 4.1 Экспертного заключения ООО Альянс-Эксперт судебной строительно-технической  экспертизы по делу № А70-13369/2023 от 07.02.2024.  

- выполнить восстановительный ремонт в помещениях здания на 3,4,5 этажах. Объем работ,  необходимый для устранения последствий протечек представлен в таблице 4.2 Экспертного  заключения ООО Альянс-Эксперт судебной строительно-технической экспертизы по делу № А7013369/2023 от 07.02.2024.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Богема» в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Тюменской области.  

 Судья Михалева Е.В.  

Код для входа в режим ограниченного доступа: