Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А72-19435/2019

г. Ульяновск

27 мая  2020

Резолютивная часть решения объявлена 20.05.2020 

Полный текст решения изготовлен 27.05.2020

Арбитражный суд Ульяновской  области в составе судьи О.А.Слепенковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ю.И.Кольник,  

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Жилпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Запад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск,

о взыскании 9 302 617 руб. 26 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, паспорт, доверенность,

от ответчика – не явились, уведомлены;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилпроект» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Запад» о взыскании 9 302 617 руб. 26 коп., которое принято к производству в рамках дела № А72-19435/2019.

Истец представил ходатайство об уточнении исковых требований в части размера процентов, в соответствии с которым просит взыскать с ответчика 822 186 руб. 38 коп. процентов за период с 01.10.2017 по 17.03.2020, в остальной части исковые требования поддерживает в заявленном размере.

На основании ст. 49 АПК РФ суд удовлетворил данное ходатайство.

Представитель истца настаивает на удовлетворении иска с учетом его уточнения.

Ответчик возражений на иск не представил.

На основании ст. 156 АПК РФ суд рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

При этом суд руководствовался следующим. 

Как усматривается из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «Жилпроект»  (подрядчик) и ООО «Запад» заключены договоры на выполнение проектных работ и ведение авторского надзора (с дополнительными соглашениями): 

1) от 23.08.2016 № 254/08/16  выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и получения положительного заключения экспертизы проектной документации (далее — проектная документация) жилого дома № 34 (по генплану) в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска в отношении объекта: «Многоквартирный жилой дом №34 (по генплану) в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 2 333 440  руб.; окончательный расчет предусмотрен в течение 15 банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

2) от 23.08.2016 № 255/08/16 на выполнение работ по разработке проектной ирабочей документации (далее — проектная документация) жилого дома № 32 (по генплану) в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска в отношении объекта: «Многоквартирный жилой дом №32 (по генплану) в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 1 965 726 руб.; окончательный расчет по Договору (с учетом изменения общей стоимости работ по настоящему Договору и фактически выплаченных сумм производится Заказчиком после разработки документации в стадии «Рабочая документация» в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ;

3) от 23.08.2016 № 256/08/16 (с дополнительными соглашениями) на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и получения положительного заключения экспертизы проектной документации (далее — проектная документация) жилого дома № 33 (по генплану) в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска в отношении объекта: «Многоквартирный жилой дом №33 (по генплану) в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 1 870 610 руб.; окончательный расчет Заказчик осуществляет в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

4) от 31.10.2016 № 418/10/16 ведение авторского надзора застроительством объекта: «Многоквартирный жилой дом №29 в 6-м квартале жилого микро- района «Запад-1» в Засвияжском районе г.Ульяновска» в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» общей стоимостью 240 000 руб.; ЗАКАЗЧИК оплачивает вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЮ за выполненную работу по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами актов о приёмки выполненных работ;

5) от 09.11.2016 № 344/11/16 (с дополнительным соглашением) на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации (далее — проектная документация) в отношении объекта: «Многоквартирный жилойдом №37 (по генплану) в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 1 976 413,23 руб.; окончательный расчет по Договору (с учетом изменения общей стоимости работ по настоящему Договору и фактически выплаченных сумм производится Заказчиком после разработки документации в стадии «Рабочая документация» в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ;

6) от 15.11.2016 № 253/11/16 (с дополнительным соглашением) на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для объекта: «Многоквартирный жилой дом № 36 (по генплану) в 13-мквартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г.Ульяновска» общей стоимостью 2 593 340,88 руб.; окончательный расчет Заказчик осуществляет в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

7) от 20.03.2017 № 4/17 на выполнение работ по разработке рабочей документации (далее-проектная документация) объекта: «Многоквартирный жилой дом №45 (по генплану) в третьем квартале малоэтажной застройки жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г.Ульяновска» общей стоимостью 443 248,5 руб.; Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или иными не запрещенными законодательством способами;

8) от 20.03.2017 № 5/17 на выполнение работ по разработке рабочей документации (далее-проектная документация) объекта: «Многоквартирный жилой дом №46 (по генплану) в третьем квартале малоэтажной застройки жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г.Ульяновска» общей стоимостью 457 914,45 руб.; Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или иными не запрещенными законодательством способами;

9) от 20.03.2017 № 6/17 на выполнение работ по разработке рабочей документации (далее-проектная документация) объекта: «Многоквартирный жилой дом №47 (по генплану) в третьем квартале малоэтажной застройки жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г.Ульяновска» общей стоимостью 443 248, 5 руб.; Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или иными не запрещенными законодательством способами;

10) от 20.03.2017 № 7/17 на выполнение работ по разработке рабочей документации (далее-проектная документация) объекта: «Многоквартирный жилой дом №48 (по генплану) в третьем квартале малоэтажной застройки жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г.Ульяновска» общей стоимостью 457 914,45 руб.; Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» или иными не запрещенными законодательством способами;

11) от 25.05.2017 № 204/05/17 на ведение авторского надзора за строительством объекта: «Многоквартирный жилой дом № 32 в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» на общую сумму 180 000 руб.; Заказчик оплачивает вознаграждение Исполнителю за выполненную работу по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами актов о приёмки выполненных работ;

12) от 20.07.2017 № 479/07/17 на ведение авторского надзора за строительством объекта: «Многоквартирный жилой дом № 35 в 13-м квартале жилого микрорайона «За-пад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» на общую сумму 240 000 руб.; Заказчик оплачивает вознаграждение Исполнителю за выполненную работу по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами актов о приёмки выполненных работ;

13) от 17.10.2017 № 480/10/17 на ведение авторского надзора за строительством объекта: «Многоквартирный жилой дом № 37 в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» общей стоимостью 180 000 руб.; Заказчик оплачивает вознаграждение Исполнителю за выполненную работу по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами актов о приёмки выполненных работ;

14) от 08.11.2017 № 490/11/17 на ведение авторского надзора за строительством объекта: «Многоквартирный жилой дом № 36 в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» общей стоимостью 180 000 руб.;  Заказчик оплачивает вознаграждение Исполнителю за выполненную работу по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами актов о приёмки выполненных работ;

15) от 17.12.2017 № 488/12/17 на ведение авторского надзора за строительством объекта: «Многоквартирный жилой дом № 33 в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» общей стоимостью 180 000  руб.; Заказчик оплачивает вознаграждение Исполнителю за выполненную работу по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами актов о приёмки выполненных работ;

16) от 13.03.2018 № 61/03/18 на выполнение работ по корректировке проектной документации в части применения железобетонных перегородок толщиной 80мм в отношении Объекта: «Многоквартирный жилой дом № 36 в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 177 200 руб.; Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

17) от 13.03.2018 № 62/03/18 на выполнение работ по корректировке проектной документации в части применения железобетонных перегородок толщиной 80мм в отношении Объекта: «Многоквартирный жилой дом № 33 в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 354 000 руб.; Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

18) от 02.04.2018 № 11/18 на выполнение работ по разработке проектной документации (стадия «П») в отношении Объекта: «Многоквартирный жилой дом № 39 в 7-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 1 148 160 руб.; Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

19) от 02.04.2018 № 12/18 на  выполнение работ по разработке проектной документации (стадия «П») в отношении Объекта: «Многоквартирный жилой дом № 40 в 7-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 868 370 руб.; Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

20) от 01.08.2018 № 19/18 на выполнение работ поразработке варианта наружных сетей бытовой канализации проектной и рабочейдокументации разделов «ВК», «НВК», «ПЗУ», для объекта: «Многоквартирный жилой дом №30 в 6-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г.Ульяновска» общей стоимостью 50 000 руб.; Оплата полностью выполненных работ осуществляется «Заказчиком» на основании акта сдачи-приемки работ в размере 100%, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами;

21) от 17.09.2018 № 25/18 на выполнение работ покорректировке подключения схемы электроснабжения для объекта: «Многоквартирный жилой дом № 30 в шестом квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 50 000 руб.; Оплата полностью выполненных работ осуществляется «Заказчиком» на основании акта сдачи-приемки работ в размере 100%, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами;

22) от 05.10.2018 № 28/18 выполнение работ поразработке и корректировке системы отопления и гидравлического расчета в отношении объектов: «Многоквартирные жилые дома № 29, 30 в 6-м квартале жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска» общей стоимостью 54 888 руб.; Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или иными не запрещенными законодательством способами. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»;

23) от 17.12.2018 № 30/18 на выполнение работ по корректировке рабочей документации в части раздела ОВ на установку гибридных кровельных вентиляторов для объектов: « Многоквартирные жилые дома №49,50 в третьем квартале малоэтажной застройки жилого микрорайона «Запад-1» в Засвияжском районе г.Ульяновска стоимостью 65 000 руб.; Оплата   выполненных работ осуществляется «Заказчиком» в размере 100%, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

Работы со стороны истца выполнены в полном объеме, что подтверждается подписанными обеими сторонами без замечаний актами выполненных работ, однако оплачены не в полном объеме.

По расчету истца, общий размер задолженности составляет 8 621 955 руб. 23 коп. (Договор № 254/08/16 от 23.08.2016 - 1 028 440 рублей 00 копеек; Договор № 255/08/16 от 23.08.2016 - 72 580,80 рублей; Договор № 256/08/16 от 23.08.2016 - 569 880 рублей 00 копеек; Договор №418/10/16 от 31.10.2016 - 240 000 рублей 00 копеек; Договор № 344/11/16 от 09.11.2016 - 1 089 913,23 рублей; Договор № 253/11/16 от 15.11.2016 – 823 112,75 рублей; Договор № 4/17 от 20.03.2017 - 443 248,50 рублей; Договор № 5/17 от 20.03.2017 - 457 914,45 рублей; Договор № 6/17 от 20.03.2017 - 443 248,50  рублей; Договор № 7/17 от 20.03.2017 - 437 914,45  рублей; Договор № 204/05/17 от 25.05.2017 - 108 000 рублей 00 копеек; Договор № 479/07/17 от 20.07.2017 - 120 000 рублей 00 копеек; Договор № 480/10/17 от 17.10.2017 - 90 000 рублей 00 копеек; Договор № 490/11/17 от 08.11.2017 - 90 000  рублей 00 копеек; Договор № 488/12/2017 от 17.12.2017 54 000 рублей 00 копеек;  Договор № 61/03/18 от 13.03.2018 -67 730  рублей 00 копеек; Договор № 62/03/2018 от 13.03.2018 - 300 000 рублей 00 копеек; Договор № 11/18 от 02.04.2018 - 1 148 160 рублей 00 копеек; Договор № 12/18 от 02.04.2018 - 868 370 рублей 00 копеек; Договор № 19/18 от 01.08.2018 - 50 000 рублей 00 копеек; Договор № 25/18 от 17.09.2018 - 50 000 рублей 00 копеек;  Договор № 28/18 от 05.10.2018 - 4 442,55 рубля; Договор № 30/18 от 17.12.2018 - 65 000 рублей 00 копеек).

Ответ на претензию от ответчика не поступил, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав  и оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

Заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ (статья 762 ГК РФ).

Таким образом, основанием для возникновения обязанности по оплате выполненных работ является исполнение обязательств по Договору и приемка заказчиком результатов работ.

По правилам части 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из буквального толкования приведенных норм следует, что по договору подряда для заказчика прежде всего имеет значение достижение подрядчиком определенного вещественного результата.

Из положений статьи 702 ГК РФ, с учетом разъяснений пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000  N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является их сдача заказчику путем подписания акта выполненных работ.

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В данном случае акты выполненных работ по всем 23 договорам подписаны ответчиком без замечаний, возражений на иск, доказательств оплаты не представлено.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, требования истца по взысканию задолженности подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии со ст.395 ГК РФ  в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.

Истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 822 186 руб. 38 коп. процентов за период с 01.10.2017 по 17.03.2020.

Расчет исковых требований  судом проверен, прав и законных интересов  ответчика представленный расчет не нарушает.

Таким образом, требования истца о взыскании процентов на сумму долга являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленном размере. 

При данных обстоятельствах исковые требования следует удовлетворить в полном объеме.

Кроме того, истец просит взыскать с истца 50 000 рублей судебных расходов, связанных с обращением с исковым заявлением в Арбитражный суд Ульяновской области и представлением интересов истца в Арбитражном суде Ульяновской области.

В подтверждение несения судебных расходов представлены договор на оказание юридических услуг от 12.07.2019  № 1122/19, расходно-кассовый ордер на сумму 50 000 руб., доверенность.

По представленному договору исполнитель ФИО1 оказал консультационную и юридическую помощь заказчику, целью указанного договора является, разрешение конфликтной и спорной ситуации в рамках консультирования и разработки правовой документации для обращения в суд, представление интересов заказчика в суде, по спору связанному с взысканием задолженности по договорам на выполнение проектных работ, заключенных между ООО "ЖилПроект" и ООО "Запад". 

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

 Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

После принятия итогового судебного акта по делу лицо, участвующее в деле, вправе обратиться в суд с заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с рассмотрением дела, о возмещении которых не было заявлено при его рассмотрении. При рассмотрении заявления по вопросу о судебных издержках суд разрешает также вопросы о распределении судебных издержек, связанных с рассмотрением данного заявления (п.28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление N 1), при рассмотрении заявления по вопросу о судебных издержках суд разрешает также вопросы о распределении судебных издержек, связанных с рассмотрением данного заявления. С учетом этого, заявления о возмещении судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением заявления по вопросу о судебных издержках, поданное после вынесения определения по вопросу о судебных издержках, не подлежит принятию к производству и рассмотрению судом.

Таким образом, право на возмещение издержек, связанных с рассмотрением заявления о возмещении судебных расходов, может быть реализовано только при рассмотрении заявления о взыскании судебных расходов по делу, то есть, после принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вопрос о возмещении всех судебных расходов по делу, в том числе связанных с издержками, понесенными при рассмотрении заявления о возмещении расходов, может быть поставлен на разрешение суда исключительно в рамках одного заявления (Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2018 N 302-ЭС18-8872 по делу N А33-8093/2016).

Суд определяет размер судебных расходов  исходя из  фактически оказанных представителем услуг,  исходя из продолжительности разбирательства, заседаний, степени участия представителя в заседаниях, представленных документов, пояснений, с учетом сложности дела, при состязательной процедуре.

Суд не считает рассматриваемое заявление подлежащим удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства (пункт 13 Постановления Пленума  ВС РФ № 1).

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1  расходы представителя, необходимые для исполнения его обязательства по оказанию юридических услуг, например расходы на ознакомление с материалами дела, на использование сети "Интернет", на мобильную связь, на отправку документов, не подлежат дополнительному возмещению другой стороной спора, поскольку в силу статьи 309.2 ГК РФ такие расходы, по общему правилу, входят в цену оказываемых услуг, если иное не следует из условий договора (часть 1 статья 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статья 110 АПК РФ).

К таким расходам следует отнести:   подготовка искового материала и  подача искового материала, подготовка дополнений искового материала и подача дополнений, подготовка отзыва и подача отзыва  в суд  - соотносятся между собой как часть и целое.

Кроме того, суд считает, что расходы на устные консультации, юридическую экспертизу документов в силу ст. ст. 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не относятся к судебным расходам и не подлежат отнесению на ответчика, что подтверждается соответствующей судебной практикой (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2019 N 11АП-18137/2019 по делу N А65-19338/2019).

Оценив объем оказанных юридических услуг и их стоимость с точки зрения разумности по указанным выше критериям, учитывая невысокую сложность дела, отсутствие возражений со стороны ответчика, небольшую продолжительность  по времени судебных заседаний, суд считает, что предъявленная сумма судебных расходов  разумна и обоснованна в размере 30 000 руб.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176-177, 180-182  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Запад» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилпроект» 8 621 955 руб. 23 коп.- основной долг, 822 186 руб. 38 коп.- проценты, 30 000 руб.- судебные расходы, 69 513 руб.- госпошлину.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Запад» в доход федерального бюджета 708 руб.- госпошлину.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения путем подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья                                                             О.А.Слепенкова