ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А45-25966/2024

г. Новосибирск

02 октября  2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября  2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова  В.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного  заседания   Савченко   А.А.,    рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление дорожного строительства"   (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ОГРН 

<

***>), г.  Новосибирск 

об  исполнении   гарантийных  обязательств по   муниципальному   контракту   от   08.04.2019 № 27/19 и от   25.02.2020 № 17/20,

при участии представителей: 

истца – ФИО1 (доверенность от 02.05.2024, паспорт, диплом);

ответчика – ФИО2 (доверенность от 15.07.2024, паспорт, диплом),

установил:

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства" (далее - истец) обратилось в суд с исковым заявлением,  уточненным  в   порядке  статьи 49  Арбитражного  процессуального кодекса  Российской    Федерации  в   редакции от  24.09.2024,        к обществу с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (далее – ответчик) об  обязании ответчика  в течении месяца с момента вступления решения в законную силу, при наступлении климатических условий (в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С), устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту от 25.02.2020 №17/20:

на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска» (участок от ПК 2+70 до ПК 15+55), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: ул.Большевистская № 119а-123/1:

- выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 10 шт. (четная сторона в сторону Бугринского моста: пересечение с ул. Добролюбова; Большевистская, 26, 26а, 26в, 44; нечетная сторона: Большевистская, 143; после ООТ «Мелькомбинат» в 20 метрах правая полоса; Большевистская, 125/9 правая полоса; Большевистская, 123; Большевистская,121);

-выкрашивание продольного шва – 15 п.м (на примыкании между ул. Большевистская, 127 и 125/1; на примыкании ул. Большевистская, 119а).

по муниципальному контракту от 08.04.2019 №27/19:

на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска (участок от дома № 48 до ул. Выборная (от ПК 15+55 до ПК 30+34,8)), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: перекресток ул. Большевистская и ул. Днепрогэсовская; ул. Большевистская № 229»:

-выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 10шт. (четная сторона: Болыпевистская,48; ООТ «Днепрогэсовская»; Большевистская, 130в; перед ООТ «Храм» над р.Плющиха; нечетная сторона: под надземным пешеходным переходом Болыневистская,229; после ООТ «Храм» над р.Плющиха; на повороте на ул.Днепрогэсовскую; ООТ «Днепрогэсовская»; Большевистская, 175/6 напротив стоматологии №4; Большевистская, 151 напротив «Wildberris» правая полоса).

Определением от 31.07.2024 исковое заявление принято судом к производству, назначено предварительное судебное заседание на 22.08.2024. Определением  от 22.08.2024  суд   завершил   подготовку   дела   к  судебному   разбирательству и   назначил  дело  к   судебному   разбирательству  на    16.09.2024.    16.09.2024   суд  в  порядке    статьи   163   Арбитражного    процессуального    кодекса   Российской    Федерации    объявил  перерыв   в    судебном  заседании   до   25.09.2024 в  11 часов  20  минут.    

В  обоснование   исковых  требований    истец   указал  на    заключение   между   сторонами   спора    муниципального   контракта    № 17/20 от   25.02.2020 на   выполнение     мероприятий  по   национальному  проекту   «Безопасные  и  качественные   автомобильные  дороги»,  в   частности на   выполнение   работ   по   объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевитской в Октябрьском районе г. Новосибирска» (участок от ПК2+70 до ПК 15+55), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: ул. Большевитская №119а-123/1.

После завершения работ, объект  принят в эксплуатацию приемочной комиссией 27.10.2020.

18.04.2024  на   объекте  выявлены следующие недостатки (дефекты):

1.           Выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 23шт. (четная сторона в сторону Бугринского моста: пересечение с ул. Добролюбова; напротив выезда с автосалона «Фастар» Большевистская, 14/2; Большевистская, 14/3; поворот на ул. Обскую возле дома по ул. БольшевистскойДб; Большевистская,26, 26а, 26в, 44; нечетная сторона: Большевистская, 143; Большевистская, 135 Мелькомбинат; Большевистская, 141 средняя полоса; после ООТ «Мелькомбинат» в метрах 20 средняя полоса и правая; АЗС «Газпромнефть» Большевистская, 131к1 правая полоса; Болыиевистская,131кЗ; ООТ "Труд" правая полоса напротив парковочного кармана; Большевистская,131к7 возле примыкания; Большевистская, 125/9 правая полоса; Большевистская, 125; Большевистская, 123; Большевистская, 121; Болыпевистская,101 напротив выезда с ул. Добролюбова) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

2.           Колейность на а/б покрытии проезжей части глубиной от 27 до 30мм -350м2 (чётная сторона в сторону Бугринского моста: перед светофором Большевистская, 14/1 левая и средняя полосы 50*7=350м2) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

3.           Выкрашивание а/б покрытия в местах отбора проб - 14шт. (четная сторона в сторону Бугринского моста: Большевистская, 16, 22; напротив спуска с пешеходного надземного перехода Большевистская,26в; Болыдевистская,32, 34; нечетная сторона: АЗС «Газпромнефть» Большевистская, 131к1 левая и правая полосы; Большевистская,131кЗ левая полоса; Большевистская,131к7 левая полоса; Большевистская, 123; Большевистская, 103 левая полоса) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

4.           Выбоины (выкрашивание) а/б покрытия проезжей части - 2,5м2 (Большевистская, 135 Мелькомбинат средняя полоса; на примыкании Большевистская, 119а) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

5.           Выкрашивание продольного шва - 15п.м (на примыкании между Большевистская, 127 и 125/1; на примыкании Большевистская, 119а) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017,0 чем составлен акт гарантийного обследования объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевитской в Октябрьском районе г. Новосибирска» (участок от ПК2+70 до ПК 15+55), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: ул. Большевитская №119а-123/1.

Согласно условиям Контракта гарантийный срок на результат выполненных работ, конструктивные элементы установлен пунктом 6.2 Контракта; течение гарантийного срока установлено с момента (даты) подписания Сторонами Контракта Акта приемки объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта. Гарантийный срок составляет:

- основание дорожной одежды - 6 лет;

- нижний слой и верхний слой а/б покрытия - 5 лет;

- бортовые камни - 5 лет.

Таким образом, выявленные Заказчиком недостатки (дефекты), возникли в пределах гарантийного срока.

На  момент    рассмотрения дела   в  суде  не   устранены    следующие   дефекты на    объекте:

- выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 10 шт. (четная сторона в сторону Бугринского моста: пересечение с ул. Добролюбова; Большевистская, 26, 26а, 26в, 44; нечетная сторона: Большевистская, 143; после ООТ «Мелькомбинат» в 20 метрах правая полоса; Большевистская, 125/9 правая полоса; Большевистская, 123; Большевистская,121);

-выкрашивание продольного шва – 15 п.м (на примыкании между ул. Большевистская, 127 и 125/1; на примыкании ул. Большевистская, 119а).

Кроме  того,   сторонами    08.04.2019  заключен   муниципальный   контракт   № 27/19  на выполнение мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улицах города Новосибирска, на   выполнение   работ   по   объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска (участок от дома № 48 до ул. Выборная (от ПК 15+55 до ПК 30+34,8)), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: перекресток ул. Большевистская и ул. Днепрогэсовская; ул. Большевистская № 229».

После завершения работ, объект  принят в эксплуатацию приемочной комиссией 16.09.2010.

18.04.2024  на   объекте  выявлены следующие недостатки (дефекты):

1.           Выбоины (выкрашивание) а/б покрытия проезжей части - 128,1м2 (четная сторона: возле надземного пешеходного перехода магазин «Лента»; нечетная сторона: Большевистская, 177/3 «Аккумуляторы»; перед надземным пешеходным переходом Большевистская, 175/5; Большевистская, 175/6 напротив Волга моторос автозапчасти средняя полоса 30*3,5) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

2.           Трещины на тротуаре - 9п.м (после надземного пешеходного перехода «Лента» по четной стороне; Большевистская, 177/24 и 177к7) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

3.           Выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 28шт. (четная сторона: Большевистская,48; АЗС «Газпромнефть» Большевистская,50; Автомойка «Янтарь» Болыпевистская,52 (на тротуаре); после поворота в микрорайон Европейский берег автомойка «Янтарь» (на тротуаре); ООТ «Днепрогэсовская»; выезд со 2-ой Обской; АЗС «Лукойл» Большевистская, 130; Большевистская, 13Ов; перед ООТ «Храм» над р.Плюпшха; под надземным пешеходным переходом Большевистская, 140; нечетная сторона: под надземным пешеходным переходом Болыневистская,229; перед ООТ «Храм»; после ООТ «Храм» над р.Плюпшха; на повороте на ул. Днепрогэсовскую; ООТ «Днепрогэсовская»; в 30 метрах от Большевистская, 177к1 (на тротуаре); Большевистская, 175/6 напротив стоматологии №4 и мотоцентра; Большевистская, 171 средняя и правая полосы, на парковочном кармане; Большевистская, 153; между Большевистская, 153 и 151 средняя полоса; Большевистская,151 напротив «Wildberris» средняя полоса и правая) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

4.           Выкрашивание а/б покрытия в местах отбора проб - 18шт. (четная сторона: АЗС «Газпромнефть» Большевистская,50; перед надземным пешеходным переходом ООТ «Инструментальный завод»; перед ООТ «Днепрогэсовская»; под надземным пешеходным переходом Большевистская, 140; нечетная сторона: после ООТ «Храм» над р.Плющиха; Большевистская, 177к1 «Дом крепежа»; перед надземным пешеходным переходом Большевистская, 175/5; Большевистская, 175/6 напротив стоматологии №4 и мотоцентра; Болыдевистская,171 магазин «Магнит») - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

5.           Колейность (выкрашивание по полосам наката) на а/б покрытии от 25 до 33мм - 5100м2 (четная сторона: левая крайняя полоса от надземного пешеходного перехода ООТ «Инструментальный завод» карта 2023 года до окончания разделительного ограждения 100*3; от ООТ «Днепрогэсовская» до примыкания Большевистская, 140 левая и средняя полосы 400*6; от Большевистская,229 Храм до въезда в автоцентр Большевистская, 177/1 левая и средняя полосы 400*6) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

6.           Просадка а/б покрытия проезжей части - 20м2 (на остановочной площадке ООТ «Инструментальный завод») - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

7.           Разрушение (просадка, провал) а/б покрытия тротуара - 2м2 (автомойка «Янтарь» Большевистская,52) - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017;

8.           Раскрытие шва м/у бордюрным камнем и а/б покрытием на тротуаре - 35п.м (Большевистская, 177к1 и ООТ «Днепрогэсовская») - нарушено требование п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017, о чем составлен акт гарантийного обследования объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска (участок от дома № 48 до ул. Выборная (от ПК 15+55 до ПК 30+34,8)), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: перекресток ул. Большевистская и ул. Днепрогэсовская; ул. Большевистская № 229», выполненного по муниципальному контракту № 27/19 от 08.04.2019.

Согласно условиям Контракта гарантийный срок на результат выполненных работ, конструктивные элементы установлен пунктом 6.2 Контракта; течение гарантийного срока установлено с момента (даты) подписания Сторонами Контракта Акта приемки объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта. Гарантийный срок составляет:

- основание дорожной одежды - 6 лет;

- нижний слой и верхний слой а/б покрытия - 5 лет.

Таким образом, выявленные Заказчиком недостатки (дефекты), возникли в пределах гарантийного срока.

На  момент    рассмотрения дела   в  суде  не   устранены    следующие   дефекты на    объекте:

-выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 10шт. (четная сторона: Болыпевистская,48; ООТ «Днепрогэсовская»; Большевистская, 130в; перед ООТ «Храм» над р. Плющиха; нечетная сторона: под надземным пешеходным переходом Болыневистская,229; после ООТ «Храм» над р. Плющиха; на повороте на ул.Днепрогэсовскую; ООТ «Днепрогэсовская»; Большевистская, 175/6 напротив стоматологии №4; Большевистская, 151 напротив «Wildberris» правая полоса).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в уточненной редакции.

Представитель ответчика в   судебном  заседании    25.09.2024   представил   письменное   заявление   в  порядке  части  3  статьи   49   Арбитражного процессуального   кодекса  Российской Федерации   о   признании  исковых   требований   в  полном   объеме,  заявил   о намерении   устранить   дефекты  при  благоприятных   погодных   условиях.

Проанализировав представленные   в  материалы  дела    доказательства,   заслушав   представителей   истца и   ответчика, суд приходит к следующему.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Ответчиком заявлено о признании исковых  требований в  полном   объеме. Суд, установил, что признание иска соответствует закону и не нарушает прав других лиц, вследствие чего суд принимает признание иска ответчиком (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Признание    иска   подписано   представителем  по    доверенности   ФИО2, представленная  суду   доверенность   №  43  от   15.07.2024 на   имя   ФИО2,  наделяет   последнюю  правом  на   признание  иска.  

Согласно пункту 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Поскольку ответчик признал иск полностью и   обязался   устранить    недостатки  работ  при   благоприятных   погодных   условиях, и  судом признание иска принято, исковые требования подлежат удовлетворению.

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

В силу положений статьи 333.40 Налогового кодекса РФ при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

С учетом изложенного взыскиваемая с ответчика государственная пошлина по настоящему делу подлежит уменьшению на 70% от установленного размера.

Поскольку судом фактически рассмотрены два исковых требования имущественного характера, не подлежащие оценке, (из двух контрактов) с ответчика в доход федерального бюджета подлежит   взысканию государственная пошлина в размере 3 600 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями  49, 110, 167 – 171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л:

Исковые требования МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"  (ОГРН 

<

***>) об  исполнении   гарантийных  обязательств по   муниципальному   контракту   от   08.04.2019 № 27/19 и от 25.02.2020 № 17/20 удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ОГРН 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения в законную силу, при наступлении климатических условий (в сухую погоду, весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С), устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту от 25.02.2020 №17/20:

на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска» (участок от ПК 2+70 до ПК 15+55), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: ул. Большевистская № 119а-123/1:

- выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 10 шт. (четная сторона в сторону Бугринского моста: пересечение с ул. Добролюбова; Большевистская, 26, 26а, 26в, 44; нечетная сторона: Большевистская, 143; после ООТ «Мелькомбинат» в 20 метрах правая полоса; Большевистская, 125/9 правая полоса; Большевистская, 123; Большевистская,121);

-выкрашивание продольного шва – 15 п.м (на примыкании между ул. Большевистская, 127 и 125/1; на примыкании ул. Большевистская, 119а).

по муниципальному контракту от 08.04.2019 №27/19:

на объекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе г. Новосибирска (участок от дома № 48 до ул. Выборная (от ПК 15+55 до ПК 30+34,8)), в том числе ликвидация мест концентрации ДТП: перекресток ул. Большевистская и ул. Днепрогэсовская; ул. Большевистская № 229»:

-выкрашивание и просадка смотровых и дождеприемных колодцев - 10шт. (четная сторона: Болыпевистская,48; ООТ «Днепрогэсовская»; Большевистская, 130в; перед ООТ «Храм» над р. Плющиха; нечетная сторона: под надземным пешеходным переходом Болыневистская,229; после ООТ «Храм» над р. Плющиха; на повороте на ул. Днепрогэсовскую; ООТ «Днепрогэсовская»; Большевистская, 175/6 напротив стоматологии №4; Большевистская, 151 напротив «Wildberris» правая полоса).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Перлит-Строй" (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета расходы на оплату государственной пошлины в размере 3 600 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

Судья                                                                                                             В.Г.  Осипов