93/2019-64157(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ  428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4  

http://www.chuvashia.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-360/2019

г. Чебоксары

21 июня 2019 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе: судьи  Данилова А.Р.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 и помощником судьи Ивановской С.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Стройсфера»  

(

<

...>, ОГРН 

<

***>),  к администрации города Канаш Чувашской Республики  

(

<

...> Победы, д. 24, ОГРН 

<

***>),  о понуждении заключить дополнительное соглашение  

и встречному иску администрации города Канаш Чувашской Республики 

(

<

...> Победы, д. 24, ОГРН 

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Стройсфера»  

(

<

...>, ОГРН 

<

***>),  о понуждении выполнить работы,  

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, -  

акционерного общества «Головной проектно-изыскательский институт  «Чувашгражднпроект»,  

при участии представителя истца ФИО2 на основании доверенности от 01.11.2017, 

представителя ответчика ФИО3 на основании доверенности от 14.01.2019   № 11, ФИО4 на основании доверенности от 16.01.2019 № 14,  

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

производство по иску общества с ограниченной ответственностью  

«Строительная компания «Стройсфера» прекратить. 

Встречный иск администрации города Канаш Чувашской Республики  

удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная  

компания «Стройсфера» выполнить следующие работы: 

 № п/п 

Наименование  работ  

Виды, характеристики, описание 

Объемы  работ  

Дата 

окончания  работ  

1 

Блок емкостей  

механической  

очистки и  обработки  осадка  

Устройство блока емкостей  механической очистки и обработки  осадка предусматривается в  монолитном железобетонном  исполнении. Общие габариты 33×27 м,  строительная глубина 5,3м.  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

2 

Блок емкостей  биологической  очистки секции  1  

Устройство блока емкостей  биологической очистки из монолитного  железобетона. Общие габариты 45×27,  строительная глубина 5,3 м.  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

3 

Блок емкостей  биологической  очистки секции  2  

Устройство блока емкостей  биологической очистки из монолитного  железобетона. Общие габариты 45×27,  строительная глубина 5,3 м.  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

4 

Производственн о- 

вспомогательно е здание  

Площадь застройки - 194,3 м²;  Этажность -1; Количество этажей - 1;  Строительный объем - 1225,7 м3; Общая  площадь здания (в пределах внутренней  поверхностей наружных стен-182,0 м²;  Архитектурная высота - 7,87 м;  Пожарная высота - 0,84 м. Здание с  размерами в осях 10,20 х 16,0 м.  Максимальная высота (по коньку) – 7,82  м. Расходно – хранилищные баки типа  Еврокуб на металлическом поддоне  емкостью 1м3 – 3 шт. Насос – дозатор  GRUNDFOS DME 375-10 B в  количестве 1 рабочий + 1 резервный.  

1 здание  

до 22 июля  2019 года  

5 

Иловая площадка, песковая площадка и площадка 

обезвоженного  осадка  

Устройство песковой площадки  размером 6х8 м; площадки временного  складирования осадка размером 50х20  м; иловой площадки размером 25х12 м  из монолитного железобетона.  

3 

сооружения  

до 22 июля  2019 года  

6 

Здание решеток  

Площадь застройки - 58,7 м²; Этажность  -1; Количество этажей - 1;  Строительный объем - 267,9 м3; Общая  площадь здания (в пределах внутренней  

1 

сооружение  

до 10 июля  2019 года  

поверхностей наружных стен) -54,7 м²;  Архитектурная высота - 5,05 м;  Пожарная высота - 1,35 м. здание с  размерами в осях 6,0 х 9,0 м.  Максимальная высота (по коньку) – 4,90  м. Грузовые ворота (3х3м), площадью  37,7 м2; установка грабельных решеток  - 2 шт. (1 рабочая + 1 резервная) РГЭ  900x900-6(Н); шнековых транспортеров  безосевого типа ТШ (б) Э-220-4,0 - 2  шт.; шнекового обезвоживателя ПШЭ- 

200 – 2 шт. 

7 

Насосная станция опорожнения 

Площадь застройки - 24,8 м²; Этажность  -1; Количество этажей- 2; Строительный  объем - 144,0 м3; Общая площадь  здания (в пределах внутренней  поверхностей наружных стен) - 17,8 м²;  Архитектурная высота- 3,88 м;  Пожарная высота- 0,89 м. Здание с  размерами в осях 4,5 х 4,2 м.  Максимальная высота (по коньку) – 3,58  м.  

1 здание  

до 01 июля  2019 года  

8 

Насосная станция (реконструкция) 

Площадь застройки - 116,0 м²;  Этажность - 1; Количество этажей - 2;  Строительный объем - 1134,5 м3; Общая  площадь здания (в пределах внутренней  поверхностей наружных стен) - 151,9 м²;  Архитектурная высота- 7,44 м;  Пожарная высота- 1,28 м. Здание  одноэтажное, кирпичное, диаметром  10,8 м.  

1 здание  

до 10 июля  2019 года  

9 

Здание 

воздуходувной  станции  

Площадь застройки - 96,5 м²; Этажность  -1; Количество этажей- 1; Строительный  объем - 530,7 м3; Общая площадь  здания (в пределах внутренней  поверхностей наружных стен) - 92,1 м;  Архитектурная высота- 6,05 м;  Пожарная высота- 1,20 м. Здание –  однопролетное с размерами в осях 6,0 х  15,0 м. Максимальная высота (по  коньку) – 5,95 м; установка  воздуходувок многоступенчатых  турбокомпрессоров ТВ-175-1, 6 (1  рабочая, 1резервная).  

1здание  

до 22 июля  2019 года  

10  

Контактные  резервуары  

Устройство контактных резервуаров – 3  шт. В качестве контактных резервуаров  принимаются емкости  стеклопластиковые объемом 100 м3.  Количество емкостей –3 шт.  

3 

сооружения  

до 22 июля  2019 года  

11  

Блок емкостей  биологической  очистки  

Устройство блока емкостей из  монолитного железобетона размерами  36,0 х48 м.  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

12  

Биореактор доочистки 

Устройство монолитного  железобетон\ного резервуара размерами  14,0 х17,0 м.  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

13  

Приемная камера 

Устройство монолитной  железобетонной камеры размерами  L×B×H=1,6×1,6×1,5(Н) м.  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

14  

Распределитель ный лоток  

Устройство монолитного  железобетонного лотка объемом бетона  в сооружении -50,1 м3; установка  шиберных щитовых затворов – 7 шт.  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

15  

Насосная станция избыточного ила 

Устройство корпуса насосной станции  из стеклопластика в габаритах D=1200  мм, H=3800 мм.  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

16  

Колодец с 

расходомером  

Установка колодца: -1шт. Ø 2м  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

17  

Дренажная насосная станция 

Устройство дренажной насосной  станции из стеклопластика в габаритах  D=1200 мм, H=3800 мм. Расход КНС  7м3/ч  

1 

сооружение  

до 22 июля  2019 года  

18  

Комплектная 

трансформаторн ая подстанция  

Установка комплектной  трансформаторной подстанции  наружной установки 2КТП-400  киоскового типа напряжением 6/0,4 кВ  мощностью 2×400 кВА.  

2 

сооружения  

до 22 июля  2019 года  

19  

Административ но-бытовой  

корпус 

Площадь застройки - 182,9 м²;  Этажность -1; Количество этажей – 1;  Строительный объем - 758,3 м3; Общая  площадь -151,4 м²; Архитектурная  высота - 5,06 м; Пожарная высота - 1,5  м. Здание с металлическим каркасом с  размерами в осях 8,8 х 17,76 м.  Максимальная высота (по коньку) – 4,91  м. Площадь венткамеры 9,6 м.  

1 здание 

до 22 июля  2019 года  

20  

Воздушная линия 6кВ 

Подвеска самонесущих проводов – 1145  м СИП-3-10 кВ 1х70мм2,  железобетонных опор – 80 шт.  

1145 м 

до 10 июля  2019 года  

21  

Кабельная  линия 6кВ  

Прокладка кабеля в трубах -265 м,  прокладка кабеля в траншеях – 905 м.  Кабель ААБл-6кВ 3Х95ММ2.  Продавливание футляра методом ГНБ –  60 м  

1170 м 

до 10 июля  2019 года  

22  

Кабельная линия 0,4кВ 

Прокладка кабеля в трубах – 3120 м,  прокладка кабеля в траншеях – 1612 м,  Кабель АПвБШп-1кВ  

4732 м 

до 10 июля  2019 года  

23  

Наружное освещение 

Установка опор железобетонных -31  шт., светильников – 32 шт., подвеска  проводов -890 м СИП-2 3х35+1х54,6- 

0,6/1,0 

890 м 

до 01 июля  2019 года  

24  

Наружные сети  водоснабжения  

Устройство колодцев: - 4шт. Ø 1,5м,  трубопроводов - 559,8 м труба ПЭ100  SDR17 Ø63; методом ГНБ - 58,2 м труба  

618 м 

до 01 июля  2019 года  

ПЭ100 SDR17 Ø63, футляров – 14 м  стальная труба Ø 273.  

25  

Наружные сети  самотечной  

канализации К1  

Устройство колодцев -20 шт. Ø 1,5 м; - 7  

шт. Ø 2м; - 1шт. Ø 2,5 м;  

трубопроводов: 

- 12 м трубы безнапорной муфтовой из  

полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 400;  

- 4 м трубы безнапорной муфтовой из  

полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 500;  

-76 3м трубы безнапорной муфтовой из  

полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 630;  -36 м труба ПЭ 100 SDR 17 Ø 630  

923 м 

до 22 июля  2019 года  

26  

Напорная канализация К1Н 

Устройство колодцев: -2 шт. Ø 1,5м; -  

2шт. Ø 2 м.; трубопроводов:  

-31 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 225;  -24 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 315;  - 1152 м трубы ПЭ 100 SDR17 Ø 500  

1207 м 

до 22 июля  2019 года  

27  

Головная насосная станция 

Площадь застройки - 95,9 м²; Этажность  -1; Количество этажей - 1;  Строительный объем - 436,3 м3; Общая  площадь здания- 91,6 м²; Архитектурная  высота - 5,05 м; Пожарная высота- 1,20  м. Здание с размерами в осях 6,0 х 15,0  м. Максимальная высота (по коньку) –  5,00 м.  

1 здание 

до 22 июля  2019 года  

28  

Наружная  

канализация К1  (внутриплощадо чные сети)  

Устройство колодцев: – 1 шт. Ø 1 м;  трубопроводов:  

- 16 м трубы безнапорной муфтовой из  полиэтилена "КОРСИС" SN 8 Ø 160  

16 м 

до 22 июля  2019 года  

29  

Очищенная 

обеззараженная  вода  

Устройство колодцев - 2шт. Ø 2 м;  трубопроводов: - 43 м труба ПЭ 100  SDR 17 Ø 630  

43 м 

до 22 июля  2019 года  

30  

Внутриплощадо чные сети  

трубопроводов  

Устройство колодцев: -27 шт. Ø 1 м; - 7шт. Ø 1,5 м; - 4шт. Ø 2 м. Система К14  

– 63 м стальная труба Ø 325.  Система К15 - 28,8 м стальная труба Ø  

325; 96 м стальная труба Ø530; 33 м  стальная труба Ø 630.  

Система К16 – 3 м труба НПВХ SDR21  Ø 110  

Система К17 - 5,5 м труба ПЭ 80 SDR  17,6 Ø 630  

Система И6 – 42 м труба ПЭ 80 SDR  17,6 Ø 160  

Система И8 – 115 м стальная труба Ø  159; 8 м труба ПЭ 80 SDR 17,6 Ø 110  Система И8н – 4 м стальная труба Ø 159  

Система И11 – 326 м труба ПЭ 80 SDR  17,6 Ø 160  

Система И12 – 11 м труба ПЭ 80 SDR  17,6 Ø 630  

Система И15 – 344 м труба ПЭ 80 SDR  

2019 м 

до 01 июля  2019 года  

17,6 Ø 225; 130 м труба ПЭ 80 SDR 17,6  

Ø 160 

Система В3 – 563 м труба ПЭ 80 SDR  17,6 Ø 63  

Система К14 - 62,5 м стальная труба Ø 

530; 142 м стальная труба Ø 426; 28 м  стальная труба Ø 219;  

14 м стальная труба Ø 159. 

31  

Вертикальная  планировка  

Разработка и перемещение грунта  

37341 м3  

до 22 июля  2019 года  

32  

Вертикальная  

планировка  подъездной  дороги  

Разработка и перемещение грунта  

849 м3 

до 22 июля  2019 года  

33  

Дорожное покрытие 

Устройство покрытия проезда из  дорожных плит, шириной 3-4,5 м;  подъездной дороги из монолитного  бетона  

3569 м2 

до 22 июля  2019 года  

34  

Озеленение  участка  

Устройство газонов с подсыпкой  растительной земли 0,15 м и торфа - 0.03м и посевом трав  

14892 м2  

до 22 июля  2019 года  

35  

Ограждение  участка  

Установка металлических оград по  железобетонным столбам из сетчатых  панелей, с установкой ворот - 2шт.  

813 м 

до 22 июля  2019 года  

36  

Пусконаладочн ые работы  

очистных 

сооружений  

Произвести пробный пуск и  пусконаладочные работы очистных  сооружения  

1 комплекс  работ  

до 22 

августа  2019 года  

37  

Пусконаладочн ые работы  

Произвести комплекс работ,  выполняемых в период подготовки и  проведения индивидуальных испытаний  и комплексного опробования  оборудования  

1 комплекс  работ  

до 22 

августа  2019 года  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья А.Р. Данилов 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.05.2019 10:03:42

 Кому выдана Данилов Александр Ростиславович