2169/2021-39233(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Казань  

29 марта 2021 года 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  Вербенко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А65-31047/2020,  руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации   

Р Е Ш И Л:

Ходатайство акционерного общества "Северное проектно-конструкторское бюро",  г.Санкт-Петербург об уточнении исковых требований принять.  

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества "Зеленодольский завод имени А.М.Горького", г.  Зеленодольск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества  "Северное проектно-конструкторское бюро", г.Санкт-Петербург (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>):  

- долг по договору от 13.05.2014 № 1418187406971020105007328/3183 в размере  91 426 263 руб. 86 коп.;  

- неустойку по договору от 13.05.2014 № 1418187406971020105007328/3183 по этапам  3.1, 3.2.1 и 3.2.2 в общем размере 3 676 821 руб. 97 коп. за период с 01.12.2020 по 29.03.2021, с  последующим начислением неустойки по день фактической уплаты долга ответчиком,  начиная с 30.03.2021г., исходя из 0,05% от неоплаченной стоимости соответствующего этапа  работ за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной цены этапа работ;  

- неустойку по договору от 13.05.2014 № 1418187406971020105007328/3183 по этапу  3.3 в размере 2 837 880 руб. 73 коп. за период с 24.10.2019 по 18.12.2020;  

- долг по договору от 27.11.2015 № 1418187406971020105007328/3216 в размере  161 938 583 руб. 06 коп.;  

- неустойку по договору от 27.11.2015 № 1418187406971020105007328/3216 по этапам 2,  3, 4 в общем размере 15 465 134 руб. 68 коп. за период с 25.01.2020 по 29.03.2021, с  последующим начислением неустойки по день фактической уплаты долга ответчиком,  начиная с 30.03.2021г., исходя из 0,05% от стоимости неоплаченного окончательного платежа  по этапу за каждый день просрочки, но не более 10% от установленной стоимости этапа (в  общем размере по всем этапам 20 613 449 руб. 03 коп.).  

- неустойку по соглашению о реструктуризации задолженности от 21.05.2020 в размере  1 131 783 руб. 46 руб. за период с 07.10.2020 по 30.11.2020, а также расходы по оплате  государственной пошлине в размере 200 000 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение моЭжлеектт рбоыннтьая  опбождпаилсоьв даенйост вви Отедльиннан.адцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок. Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного 

 департамента

Дата 26.11.2020 8:15:11

Судья А.А. Вербенко  

Кому выдана Вербенко Анна Александровна