1439/2020-85724(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-157/2020

г. Ярославль

05 августа 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 29 июля 2020 года.  

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  помощником судьи Давыдовой М.В.  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление публичного акционерного общества  "Межрегиональное бюро кадастровых работ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к государственному казённому учреждению Ярославской области "Ярославская областная  дорожная служба" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 186625.68 руб., 

при участии от истца ФИО2 - представитель по доверенности от 29.01.2020, диплом.  от ответчика ФИО3 - представитель по доверенности от 01.06.2020 № 30; 

установил:

Публичное акционерное общество "Межрегиональное бюро кадастровых работ"  обратилось в суд с иском к государственному казённому учреждению Ярославской  области "Ярославская областная дорожная служба" о взыскании с учетом уточнения по  контракту от 31.12.2013 № 2013.265472 в размере 11 462, 64 руб. за период с 21.04.2018 по  13.06.2018, по контракту от 29.11.2013 № 2013.201624 в размере 3 801, 09 руб. за период с  21.04.2018 по 14.06.2018, по контракту от 15.05.2013 № 2013.68935 в размере 172 771, 11  руб. за период с 27.04.2018 по 22.11.2018.  

В судебном заседании представитель истца уточненные требования поддержал в  полном объеме.  

Представитель ответчика представил письменные пояснения, развернутый  контррасчет, полагает, что в расчете неустойки должна применима ставка, действующая  на момент вынесения судебного акта.  

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил. 

15.05.2013 между государственным казённым учреждением Ярославской области  "Ярославская областная дорожная служба" /Заказчик/ и открытым акционерным  обществом "Межрегиональное бюро кадастровых работ" (правопредшественник  ответчика) /Подрядчик/ заключен государственный контракт № 2013.68935, согласно п.п.  1.1, 2.1, 2.2, 3.3, 6.2 которого Подрядчику поручается выполнить кадастровые работы в  отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования  регионального значения Ярославской области, сопровождение процедур получения  правоустанавливающих документов о предоставлении земельных участков, постановки на  кадастровый учет земельных участков, государственной регистрации прав  государственной собственности Ярославской области на земельные участки, занятые  автомобильными дорогами, и на автомобильные дорога, как комплексы недвижимого  имущества в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области (далее - работы) в  объемах в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту),  Календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять  

их и оплатить в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Сроки реализации  этапов Контракта определяются в соответствии с Календарным планом работ  (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Срок  выполнения работ: с момента заключения Контракта по 25 декабря 2014 года. Цена  Контракта составляет 8 567 552,28 руб., в том числе НДС 18%, из них на 2013 год  3 427 020,91 руб., на 2014 год 5 140 531,37 руб. Цена Контракта указана с учетом расходов  на перевозку, налога и других обязательных платежей. Цепа Контракта является твердой и  не подлежит изменению в ходе его исполнения.  

31.12.2013 между государственным казённым учреждением Ярославской области  "Ярославская областная дорожная служба" /Заказчик/ и открытым акционерным  обществом "Межрегиональное бюро кадастровых работ" (правопредшественник  ответчика) /Подрядчик/ заключен государственный контракт № 2013.265472, согласно  п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 3.3, 6.2 которого Подрядчику поручается выполнить комплекс  кадастровых работ по формированию технического плана и получению кадастрового  паспорта на объекты капитального строительства в ФИО4 Ярославской  области в объемах в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять  их и оплатить в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Сроки реализации  этапов Контракта определяются в соответствии с Календарным планом работ  (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Срок  выполнения работ: в течение 7 месяцев со дня заключения контракта. Цена Контракта  составляет 2 195 908, 72 руб. руб., в том числе НДС 18%, из них на 2013 год 439 181,85  руб., на 2014 год 1 756 726,87 руб. Цена Контракта указана с учетом расходов на  перевозку, налога и других обязательных платежей. Цепа Контракта является твердой и не  подлежит изменению в ходе его исполнения.  

Все расчеты по Контракту ведутся в российских рублях в форме безналичных  расчетов. Оплата работ производится при выполнении Подрядчиком условий и сроков,  предусмотренных Техническим заданием и календарным планом работ.  

Оплата работ осуществляется на основании подписанного обеими сторонами акта  приема-сдачи выполненных работ законного этапа в течение 45 календарных дней со дня  предъявления платежных документов, с применением коэффициента понижения  стоимости равного соотношению цены контракта , определенной в результате проведения  открытого аукциона в электронной форме, к начальной (максимальной) цене Контракта,  окончательный расчет – не позднее трех месяцев со дня подписания акта приема-сдачи  выполненных работ.  

Согласно п. 6.2 в случае просрочки оплаты за выполненные объемы работ по вине  заказчика, подрядчик вправе требовать уплату неустойки (пени) в размере одной  трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от  суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки оплаты.  

29.11.2019 между государственным казённым учреждением Ярославской области  "Ярославская областная дорожная служба" /Заказчик/ и открытым акционерным  обществом "Межрегиональное бюро кадастровых работ" (правопредшественник  ответчика) /Подрядчик/ заключен государственный контракт № 2013.265472, согласно  п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 3.3, 6.2 которого Подрядчику поручается выполнить комплекс  кадастровых работ по формированию технического плана и получению кадастрового  паспорта на объекты капитального строительства в Гаврилов-Ямском МР Ярославской  области в объемах в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять  их и оплатить в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Сроки реализации  этапов Контракта определяются в соответствии с Календарным планом работ  (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Срок  выполнения работ: в течение 7 месяцев со дня заключения контракта. Цена Контракта  составляет 714 938,79 руб., в том числе НДС 18%, из них на 2013 год 142 987,73 руб., на  

2014 год 571 951,06 руб. Цена Контракта указана с учетом расходов на перевозку, налога  и других обязательных платежей. Цепа Контракта является твердой и не подлежит  изменению в ходе его исполнения.  

В разделе 3 договоров стороны согласовали цену контрактов и порядок расчетов. 

В п. 6.2 договоров стороны установили, что в случае просрочки оплаты за  выполненные объемы работ по вине заказчика, подрядчик вправе требовать уплату  неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неоплаченных работ за каждый день  просрочки оплаты.  

Претензиями № 2074 от 18.11.2019, 2075 от 18.11.2019, 2076 от 18.11.2019 истец  предложил оплатить задолженность в полном объеме.  

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств со стороны истца и  принятия результатов работы ответчиком подтверждается материалами дела, в том числе  Актами приема-сдачи выполненных работ № 3, 5 от 23.03.2018 г., актом приема-сдачи  выполненных работ № 3 от 06.03.2018 г, актом приема-сдачи выполненных работ № 4 от  12.03.2018 г  

Нарушение сроков оплаты послужило основанием для обращения истца в суд с  настоящим иском.  

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, суд считает заявленные требования подлежащими  

удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную  работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Проверив расчет истца, суд полагает, что расчет произведен в соответствии с  условиями государственных контрактов.  

В соответствии с условиями контракта к расчету неустойки применяется ставка  рефинансирования Центрального банка РФ (ключевая ставка), действующая на дату  уплаты пени.  

При взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия  решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.  

Указанный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в Обзоре судебной  практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), а также Обзоре судебной  практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017.  

Вместе с тем, в абз. 1 п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  

обязательств" разъяснено судам, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать  присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности,  фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).  

Поскольку обязательство истца по оплате выполненных работ было исполнено,  постольку определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки,  подлежащей уплате в связи с допущенной ответчиком просрочкой оплаты работ,  наступила в момент окончания исполнения таких обязательств, в связи с чем при  расчете неустойки необходимо руководствоваться ставкой Центрального банка  Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства.  

Разъяснения, содержащиеся в Обзорах, не затрагивают ситуацию, когда спорное  обязательство было исполнено.  

Аналогичная позиция изложена в Определении Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.12.2018 № 302-ЭС18-10991 по делу №  А33-16241/2017.  

Оснований для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда не  имеется.  

Учитывая изложенное, требование о взыскании неустойки подлежит  удовлетворению в размере 188 034, 84 руб.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с государственному казённому учреждению Ярославской области  "Ярославская областная дорожная служба" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу публичного акционерного общества "Межрегиональное бюро кадастровых работ"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 188 034, 84 руб. пени, 6 641 руб. в возмещение  расходов по уплате госпошлины. Исполнительный лист выдать по ходатайству  взыскателя после вступления решения в законную силу.  

Возвратить публичному акционерному обществу "Межрегиональное бюро  кадастровых работ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета  171 руб. 50 коп. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 1766  от 26.12.2019 на основании ст. 333.40 п.1 п/п 1 Налогового кодекса РФ (платежное  поручение находится в материалах дела).  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его  в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Шадринова Л.А.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.05.2019 7:23:47

Кому выдана Шадринова Любовь Александровна