АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

А23-10697/2023

07 марта 2024 года                                                                                   г. Калуга

Резолютивная часть решения оглашена 29 февраля 2024 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 07 марта 2024 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., при ведении протокола секретарем судебного заседание ФИО1, рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Атлант" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 249210, 

<

...>, эт. 2, оф. 1 к обществу с ограниченной ответственностью "Стройснаб 21" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 429500, Чувашская республика - Чувашия, 

<

...>, К. Б, пом. 2

О взыскании 5 605 107 руб. 30 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца - представителя ФИО2 по доверенности от 09.11.2023 № 5,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "Атлант"  (далее также – истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Стройснаб 21" (далее также – ответчик) о взыскании задолженности по договору субподряда № 31/03/21 от 31.03.2021 на сумму 4 756 785 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.10.2021 по 05.10.2023 на сумму 848 322 руб. 30 коп.

15.02.2024 от истца поступили пояснения к исковому заявлению, в которых поддержал позицию, изложенную в исковом заявлении.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. В силу норм ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в их отсутствие.

Как усматривается из материалов дела, 31.03.2021 между ООО «Стройснаб 21» (Ответчик, Подрядчик) и ООО «Атлант» (Истец, Субподрядчик) заключен договор № 31/03/2021, (далее - Договор).

Согласно н. 2.1 Договора Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные Работы по монтажу кровли на объекте «Склад готовой продукции с зоной таможенного контроля, расположенный по адресу: РТ, Набережные Челны, ул. Промышленная, д. 130».

В соответствии с и. 4.1 Договора общая стоимость ориентировочно составляет 4 956 500,00 руб. в том числе НДС 20%.

Стоимость работ согласно Приложению №3.1 к договору по монтажу кровли составила 2 551000,00 руб., согласно Приложению № 3.2 Договора стоимость монтажа стеновых сэндвич панелей составила 2 405 500,00 руб.

Согласно п. 12.1 Договора оплата строительных работ осуществляется в следующем порядке:

12.1.1. Монтаж кровли.

Промежуточные платежи в размере 95% от цены монтажа оплачиваются Подрядчиком Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Подрядчиком счета на оплату и предоставления Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 при условии подписания Заказчиком Актов по форме КС-2 и Справок по форме-КС-3 и предоставления счет-фактур.

Платеж Гарантийного удержания в размере 5% Цены Договора, в том числе НДС 20%, подлежит уплате Подрядчиком Субподрядчику в течение 20 рабочих дней по истечении 2 (двух) лет после получения Заключения о соответствии.

12.1.2 Монтаж сэндвич панелей:

Промежуточные платежи в размере 97% от цены монтажа оплачиваются Подрядчиком Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Подрядчиком счета на оплату и предоставления Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ но форме КС-3 при условии подписания Заказчиком Актов по форме КС-2 и Справок по формс-КС-3 и предоставления счет-фактур.

Платеж Гарантийного удержания в размере 3% Цены Договора, в том числе НДС 20%, подлежит уплате Подрядчиком Субподрядчику в течение 20 рабочих дней по истечении 2 (двух) лет после получения Заключения о соответствии.

В рамках вышеуказанного Договора Субподрядчиком работы выполнены в полном объеме на общую сумму в размере 4 956 500,00 руб., из которых 2 551 000,00 руб. монтаж кровли (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 05.10.2021, Справка о стоимости выполненных работ и затрат но форме КС-3 №1 от 05.10.2021 на сумму 887 236,00 руб., Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №3 от 06.12.2021, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №3 от 06.12.2021 на сумму 1 663 764,00 руб.), 2 405 500,00 руб. монтаж стеновых сэндвич панелей (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №2 от 05.11.2021, Справа о стоимости выполненных работ  и   затрат   но   форме   КС-3   №2   от   05.11.2021   на   сумму   2 405 500,00   руб.)

Работы истца ответчиком не оплачены, ввиду чего, последний обратился к ответчику с требованием оплатить образовавшуюся задолженность.

Требование истца осталось без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии частью 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации,  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Положения названной нормы направлены на защиту интересов подрядчика, в случае если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Между сторонами подписаны акты выполненных работ по монтажу кровли и сэндвич-панелей на общую сумму 4 956 500,00 руб., при этом с учетом условий договора, работы истца на сумму 4 756 785 руб. ответчиком не оплачены.

С учетом изложенного, исковые требования в части взыскания задолженности на сумму 4 756 785 руб. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с за период с 21.10.2021 по 05.10.2023 на сумму 848 322 руб. 30 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", уплата процентов за пользование чужими денежными средствами является ответственностью за неисполнение денежного обязательства.

Принимая во внимание обстоятельства дела, положения гражданского законодательства, условия спорного договора об оплате выполненных работ, расчет истца судом проверен, признан верным и обоснованным.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 848 322 руб. 30 коп. подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины судом распределяются на основании ст.ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройснаб 21" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Атлант" задолженность на сумму 4 756 785 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 848 322 руб. 30 коп., расходы по уплате государственной пошлины на сумму 51 026 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья                                                                                                                В.В. Жадан