Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-101433/23-107-778

19 октября 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть решения изготовлена 19 сентября 2023 года

Полный тест решения изготовлен 19 октября 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола помощник судьи А.Э. Гогиберидзе, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-101433/23-107-778 по иску ООО "А-ПРОЕКТ.К" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ООО "БЮРО 22" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса № Б22-0701Н/24 от 01.07.2021 в размере 9 874 209,24 р., при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 10.01.2023, паспорт, диплом, представителей ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО "А-ПРОЕКТ.К" (далее – истец, Заказчик) обратилось в суд к ООО "БЮРО 22" (далее – ответчик, Исполнитель) с требованием о взыскании суммы неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса № Б22-0701Н/24 от 01.07.2021 в размере 9 874 209,24 р.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом, ответчик отзыв на иск не представил, суд на основании статьи 156 АПК РФ рассмотрел дело в отсутствии их представителей.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, пришел к выводу об обоснованности требований ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, между ООО «А-Проект.к» и ООО «Бюро 22») был заключен Договор №Б22-0701Н/24 от 01.07.2021 г. на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ, на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора на объект «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, ул. внутригородское муниципальное образование Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, влд. 24/1 (Северо-Западный административный округ)» (далее - Договор) (Приложение №6).

В соответствии с п. 2.1. Договоров Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по сбору исходных данных, проведению инженерных изысканий, разработке Проектной документации (включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы) и получению положительного заключения Мосгосэкспертизы (государственной экспертизы) на указанную документацию, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, по разработке в полном объеме, необходимом для строительства, Рабочей документации, оказанию услуг по исполнению функций технического заказчика на период проектирования, по ведению авторского надзора, оплату и получение всех необходимых согласований и разрешений на Объект, а Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных Работ (оказанных услуг).

Согласно п. 4.1. Договора Исполнитель обязуется приступить к началу Работ по разработке Проектной и Рабочей документации в дату подписания Договора.

Дата окончания Работ по разработке Проектной и Рабочей документации по договору - не позднее 31.05.2022 г.

Промежуточные сроки определяются Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), работы выполняются поэтапно в следующие сроки:

1)Разработка Проектной документации (вкл. сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий) - не позднее 30 августа 2021 г.;

2)Получение положительного заключения Мосгосэкспертизы - не позднее 30 сентября 2021 г.;

3)Разработка Рабочей документации - не позднее 31 мая 2022 г.

Исполнитель обязан выполнить Работы (оказать услуги) в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (п. 7.1.1 Договора).

Результатом выполненных Работ по Договору, в соответствии с пунктом 2.4., является Проектная документация и отчеты по инженерно-изыскательским работам, получившие положительное заключение Мосгосэкспертизы, и Рабочая документация, разработанная в соответствии с Проектной документацией, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы, в объеме необходимом и достаточном для осуществления строительно- монтажных работ и сдачи Объекта в эксплуатацию, оформленные в электронном и бумажном виде, сводный отчет по результатам осуществления авторского надзора, содержащий материалы, анализирующие и объединяющие полученную на основании ежемесячных отчетов специалистов информацию (далее - «Документация»).

В рамках Договора Заказчиком в адрес Исполнителя был перечислен авансовый платеж на выполнение проектно- изыскательских работ в размере 9 874 209,24 рубль 24 коп., в том числе НДС 20%.

Исполнитель не выполнил надлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Договором, результат работ не передан Заказчику.

В соответствии с пунктом 17.3.1. Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ (оказания услуг) и отдельных видов Работ (услуг), установленных в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору).

Уведомлением исх.№1843/ПТИ-1 от 22.09.2022 г. Заказчик в связи с тем, что Исполнителем допущен существенный срыв сроков выполнения своих обязательств по Договору, как промежуточных, так и общего срока проектирования, уведомил Исполнителя об одностороннем отказе от Договора. 

Согласно ч. 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 17.5., Договор считаются расторгнутыми с момента получения Исполнителем уведомления - то есть с 14.10.2022 г., согласно отчету Почты России об отслеживании отправления.

Поскольку работы по Договору не выполнены, Договор расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в связи с существенным нарушением Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик потребовал у Исполнителя вернуть сумму неотработанного аванса - требование исх. №01-29/2118 от 17.10.2022 г., однако Исполнитель оставил претензии Заказчика без удовлетворения.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящими требованиями в суд, удовлетворяя которые суд исходит из следующего.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу абзацев 1 - 4 пункта 1 статьи 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В соответствии с абзацами 1 и 2 статьи 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с частью 2 статьи 715 АПК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

На основании пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.

Статьей 1107 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Судом установлено, что истец исполнил свои обязательства по оплате и авансированию работ в полном объеме, однако, ответчик свои обязательства по их выполнению, на сумму неотработанного авансового платежа в размере 9 874 209,24 р. не исполнил, на дату рассмотрения дела сумма задолженности ответчика не возвращена, в связи с чем, в силу положений статей 309, 310, 715, 1102 ГК РФ, требование истца о взыскании указанной суммы неосновательного обогащения с ответчика подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины понесенные истцом подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "БЮРО 22" в пользу ООО "А-ПРОЕКТ.К" сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса № Б22-0701Н/24 от 01.07.2021 в размере 9 874 209,24 р., государственную пошлину в размере 72 371 р.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.    

СУДЬЯ

М.В. Ларин