АРБИТРАЖНЫЙ СУД  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

улица А.Невского, дом 29/11, г. Симферополь, Республика Крым, 295000

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А83-16557/2023

г. Симферополь

30 января 2025  года

Резолютивная часть решения оглашена  16.01.2025             

Полный текст решения изготовлен  30.01.2025

             Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Криницын И.О., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Департамента капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым к ООО «Гарант-Строй» о взыскании денежных средств

Участники процесса не явились, 

          Обстоятельства дела:  Департамент капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ООО «Гарант-Строй» о взыскании пени за нарушение обязательств по Контракту в сумме 482 600,49 руб., пеню за несвоевременное предоставление обеспечения исполнения Контракта в сумме 286 119,95 руб., штраф в сумме 659 736,25 руб. 

          Исковые требования обосновываются нарушением обязательств по Контракту. 

Ответчиком отзыва не представлено. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

                                                      УСТАНОВИЛ:

16.02.2022 между Департаментом капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым (далее - заказчик, истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (далее - подрядчик, ответчик) заключен муниципальный контракт  № 10/2022 (далее – Контракт) на выполнение работ по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) парка, расположенного по адресу: 

<

...>».

В соответствии с п. 1.2 Контракта виды и объем работ указаны в Сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

В соответствии с п. 1.3 Контракта идентификационный код закупки - 223910100414291010100100160014299243.

В соответствии с п. 2.1 Контракта цена контракта составляет 13 302 800,05 руб., НДС не предусмотрен и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями контракта. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 контракта. 

В соответствии с п. 2.3 Контракта авансирование по контракту не предусмотрено.

В соответствии с п. 2.6 Контракта оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС- 2 без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В соответствии с п. 3.1 Контракта срок начала выполнения работ: с момента заключения контракта.

Срок завершения работ на объекте: до 01.07.2022 года.

В соответствии с п. 4.2 Контракта показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам. ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами декларациями о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, представляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с пп. 5.1.2 п. 5.1 Контракта Подрядчик обязан выполнить все предусмотренные контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

В соответствии с п. 6.3 Контракта приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на основании исполнительной документации в течение 10 рабочих дней со дня, указанного в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном п. 6.1 контракта.

В соответствии с п. 8.1 Контракта  за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

В соответствии с п. 9.1 Контракта все споры или разногласия, возникающие между сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 рабочих дней со дня ее получения.

В соответствии с п. 12.1 Контракта любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

В соответствии с п. 14.1 Контракта  размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% цены контракта в размере 66 514,00 руб.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5% начальной (максимальной) цены контракта в размере 66 514,00 руб.

В соответствии с пи. 14.1.2 п. 14.1 Контракта  обеспечение, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

В соответствии с п. 15.2 Контракта контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 11.11.2022, но не ранее исполнения сторонами своих обязательств по контракту з полном объеме.

Между заказчиком и подрядчиком к контракту от 16.02.2022 № 10/2022 заключено 10 дополнительных соглашений.

Дополнительным соглашением от 04.03.2022 № 1, внесены изменения в преамбулу контракта.

Дополнительным соглашением от 25.03.2022 № 02, раздел 5 контракта дополнен пунктом 5.1.26.

Дополнительным соглашением от 04.05.2022 № 03, на основании распоряжения Главы Республики Крым от 20.04.2022 № 454-рг «О внесении изменений в некоторые распоряжения главы Республики Крым» внесены изменения в пункт 2.3 изложив его в следующей редакции: «Авансирование работ по контракту предусмотрено.

Раздел 2 контракта от 16.02.2022 № 10/2022 дополнен пунктами:

2.3.1      «Заказчик на основании выписанного Подрядчиком счета, в течении 5 рабочих дней, после поступления финансирования, перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 50% цены контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации, что составляет 6 651 400,03 руб. Погашение авансового платежа производится путем вычетов 50% из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. Подрядчик обязан предоставить документы об использовании авансового платежа (выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) до 15.12.2022».

2.3.2      «Авансовые платежи по настоящему контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021      № 2024 «О правилах казначейского сопровождения, БК РФ, частями 66, 67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми актами РФ, постановлением Совета министров РК от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым».

2.3.3      «Подрядчик обязан открыть лицевой счет для учета операций на участника бюджетного процесса до 20.05.2022 в отдел №1 Управления Федерального казначейства по Республике Крым».

Также внесены изменения в пункт 2.6 контракта от 16.02.2022 № 10/2022.

Раздел 2 контракта от 16.02.2022 № 10/2022 дополнен пунктом 2.6.1 «промежуточная оплата осуществляется ежемесячно, при предоставлении Подрядчиком не позднее 20 числа текущего месяца надлежащим образом оформленных: акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), составленным в соответствии с графиком выполнения работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и счета. Заказчик оплачивает работы в течение 15 календарных дней со дня подписания сторонами и представителем заказчика (организации, с которой заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объекту) акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и предоставления Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

Пунктом 2.6.2 «окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней (со дня подписания сторонами и представителем заказчика акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком) и предоставления Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования».

Пунктом 2.12 «Авансовые платежи по контракту осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения (далее - Постановление) согласно пунктам Постановления Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения».

Также дополнительным соглашением от 04.05.2022 № 03, внесены изменения в п.14.1, изложив его в следующей редакции: «размер обеспечения исполнения контракта составляет 25% цены контракта в размере 3 325 700,00 руб. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта Заказчику в течения 10 рабочих дней со дня подписания настоящего дополнительного соглашения».

Пункт 14.5 изложен в следующей редакции: «... денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере 25% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3 325 700 руб...».

Платежным поручением от 02.06.2022 № 235501 Финансовым управлением Администрации города Алушты (Департамент КС и ЖКХ Администрации города Алушты) ООО «Гарант-строй» перечислен аванс 50 % по контракту от 16.02.2022                     № 10/2022 в размере 6 651 400,03 руб.

Дополнительным соглашением от 18.05.2022 № 04, внесены изменения в преамбулы дополнительных соглашений: от 04.03.2022 № 1, от 25.03.2022 № 02.

Дополнительным соглашением от 26.05.2022 № 05, раздел 1 контракта от 16.02.2022 № 10/2022 дополнен пунктом 1.4 идентификатор государственного контракта 0000009101004142227530072, а также внесены изменения в раздел 15 «Адреса и реквизиты сторон».

Дополнительным соглашением от 27.05.2022 № 06, внесены изменения в раздел 15 «Адреса и реквизиты сторон».

Дополнительным соглашением от 07.09.2022 № 07, пункт 2.3.1 изложен в новой редакции: «Заказчик на основании выписанного Подрядчиком счета, в течении 5 рабочих дней, после поступления финансирования, перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 50% цены контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации, что составляет 6 651 400,03 руб. Погашение авансового платежа производится путем вычетов 100% из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы».

Дополнительным соглашением от 08.11.2022 № 08, стороны пришли к соглашению снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов работ. Пункт 2.1 изложен в новой редакции «Цена контракта составляет 13 302 501,81 руб., НДС не предусмотрен и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями контракта...».

Также стороны пришли к соглашению внести изменение в Приложение № 3 «Сметная документация» муниципального контракта №10/2022 от 16.02.2022, изложив его в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению. Сметная документация, изложенная в Приложении 1 к настоящему дополнительному соглашению, действует до момента получения положительного заключения Государственной строительной экспертизы по корректировке проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту «Благоустройство (капитальный ремонт) парка, расположенного по адресу: 

<

...>».

Приложением № 1 к дополнительному соглашению является Сводный сметный расчет стоимости строительства. Локальный сметный расчет (Смета) №02-01-01 в ценах на 3 квартал 2022 года.

В соответствии с п. 12.2 контракта от 16.02.2022 № 10/2022, изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в следующих случаях:

пп.12.2.1 п.12.2 контракта от 16.02.2022 №10/2022, при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара.

Дополнительным соглашением от 27.12.2022 № 09, стороны пришли к соглашению внести изменения в Приложение № 3 контракта от 16.02.2022 № 10/2022, изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. Сметная документация, изложенная в Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению, получила положительное заключение повторной Государственной проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) парка, расположенного по адресу: 

<

...>» от 26.12.2022 № 91-1-1-2-092788- 2022.

Дополнительным соглашением от 14.02.2023 № 10 стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 2.1 контракта от 16.02.2022 № 10/2022 в части цены контракта, изложив его следующей редакции: «2.1. Цена Контракта составляет 13 194 725,00 (Тринадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе: стоимость выполнения всего объема работ; стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ; стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации); стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны; расходы по вывозу мусора; стоимость гарантийных обязательств; все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта; налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта». Также внесены изменения в п. 2.11, 2.3.1, приложение № 3 к контракту от 16.02.2022 № 10/2022.

Из фактических обстоятельств дела усматривается следующее.

Первично установленное обеспечение контракта от 16.02.2022 № 10/2022 в размере 66 514 руб. в нарушение условий спорного контракта внесено ООО «Гарант-Строй» только 21.02.2022, о чем свидетельствует платежное поручение от 21.02.2022 № 90.

В нарушение п. 1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), п. 1.1, п. 3.1, пп. 5.1.2 п.5.1 контракта от 16.02.2022 № 10/2022, подрядчиком работы по муниципальному контракту от 16.02.2022 №1 0/2022 по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) парка, расположенного по адресу: 

<

...>» не выполнены в полном объеме в установленный срок (до 01.07.2022).

Работы на сумму 3 552 512,40 руб. приняты заказчиком по акту о приемки выполненных работ от 18.11.2022 № 1 и на сумму 8 073 196,84 по акту от 18.11.2022 № 2 - только 22.11.2022.

Работы на сумму 1 045 037,80 руб. приняты заказчиком по акту о приемки выполненных работ от 28.11.2022 № 3 только 02.12.2022.

Работы на сумму 431 779,20 руб. приняты заказчиком по акту о приемки выполненных работ от 13.12.2022 № 4 только 30.12.2022.

Работы на сумму 92 192,76 руб. приняты заказчиком по акту о приемки выполненных работ от 29.12.2022 № 5 только 30.12.2022.

Таким образом, работы по контракту от 16.02.2022 № 10/2022 подрядчиком в полном объеме выполнены только 29.12.2022 и приняты заказчиком 30.12.2022, то есть с нарушением срока, согласованного сторонами в п. 3.1 контракта.

За нарушение п. 3.1 контракта от 16.02.2022 № 10/2022 в соответствии с п. 8.4, п. 8.5 контракта от 16.02.2022; 10/2022 заказчик направил в адрес подрядчика претензию от 22.02.2023 № 02.23-07/159 с требованием в добровольном порядке оплатить неустойку (пеню) в размере 482 600,49 руб., о чем свидетельствует почтовая квитанция от 02.03.2023 № РПО 29851680004230, реестр почтовых отправлений от 02.03.2023, подтверждение отправки по электронной почте от 27.02.2023, а также разместил данную претензию на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru.

Проверив расчет пени суд признает его арифметически верным.

Также истец просит взыскать пеню за просрочку внесения предоставления обеспечения исполнения Контракта. 

В соответствии с п. 14.1 контракта от 16.02.2022 № 10/2022, размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5 процента цены контракта, что составляет                             66 514,00 руб.

В соответствии с пп. 14.1.2 п. 14.1 контракта от 16.02.2022 №10/2022, обеспечение, предоставляется подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения.

Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

В соответствии с ч. 4 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В соответствии с ч. 5 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Подрядчиком исполнение контракта от 16.02.2022 № 10/2022 обеспечено внесением денежных средств в сумме 66 514,00 руб. на счет заказчика только 21.02.2022, что подтверждается платежным поручением от 21.02.2022 № 90.

При этом, в нарушение п.1 ст.425 ГК РФ, ч. 4 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пп.14.1.2 п.14.1 муниципального контракта от 16.02.2022 № 10/2022, подрядчиком не предоставлено обеспечение исполнения контракта в сумме 66 514,00 руб. до заключения контракта.

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 20.04.2022 № 454-рг «О внесении изменений в некоторые распоряжения Главы Республики Крым» обеспечение исполнения контракта с 0,5 % изменено на 25%.

Дополнительным соглашением от 04.05.2022 № 03, внесены изменения в п. 14.1 контракта от 16.02.2022 № 10/2022, изложив его в следующей редакции: «размер обеспечения исполнения контракта составляет 25% цены контракта в размере 3 325 700,00 руб. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта заказчику в течении 10 рабочих дней со дня подписания настоящего дополнительного соглашения».

Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 425 ГК РФ, ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п.14.1 муниципального контракта от 16.02.2022 №102022 (в редакции дополнительного соглашения от 04.05.2022 № 03), п. 8.4 муниципального контракта от 16.02.2022     №10/2022, подрядчиком не предоставлено обеспечение исполнения контракта в течении 10 рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения (до 20.05.2022) на сумму 3 259 186,00 руб. (3 325 700,00 - 66 514,00).

Проверив расчет пени, суд признает его арифметически верным.

Также истец просит взыскать штраф. 

Согласно п. 8.8 контракта от 16.02.2022 № 10/2022 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом размер штрафа рассчитывается в размере 5 % цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб.

Как указывает истец, подрядчиком, в нарушение ч. 2 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, п. 4.2 контракта от 16.02.2022 № 10/2022 при сдаче работ в составе исполнительной документации не предоставлены документы о качестве на плитку «Старый город» (красный) в объеме 94,56 кв.м, и на плитку «Старый город» (серый) в объеме 116,53 кв.м.

За нарушение п. 14.1, п. 14.1.2, п. 4.2 контракта от 16.02.2022 № 10/2022 в соответствии с п. 8.4, п. 8.5 контракта от 16.02.2022; 10/2022 заказчик направил в адрес подрядчика претензию от 05.05.2023 № 02.23-08/476 с требованием в добровольном порядке оплатить неустойку (пеню) в размере 126,38 руб., неустойку (пеню) в размере 285 993,57 руб., штраф в размере 659 736,25 руб., а всего 945 856,20 руб., о чем свидетельствует почтовая квитанция от 11.05.2023 № РПО 29851682006072, реестр почтовых отправлений от 11.05.2023, подтверждение отправки по электронной почте от 08.05.2023, отметка на претензии о получении 12.05.2023 генеральным директором ФИО1, а также разместил данную претензию на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru.

Суд считает, что штраф подлежит взысканию в сумме 5 000,00 руб. при этом исходит из следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, Подрядчиком полностью исполнены работы по Контракту. 

Обосновывая размер штрафа, истец руководствуется п. 8.8 Контракта, 

Однако, Подрядчиком допущено нарушение, которое не имеет стоимостного выражения. 

Согласно п. 8.9 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 5 000,00 руб. 

Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены. 

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Оснований для списания неустойки не имеется. 

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

          Взыскать с       ООО "ГАРАНТ-СТРОЙ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  в пользу ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) пеню в сумме 768 720,44 руб., штраф в сумме 5 000,00 руб. 

          Взыскать с ООО "ГАРАНТ-СТРОЙ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 14 779,00 руб. 

          В удовлетворении требований в части взыскания штрафа в сумме 654 736,25 руб. отказать. 

            Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                                      В.И. Гайворонский