АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://tver.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А66-5970/2024

г.Тверь

16 декабря 2024 года

 

руководствуясь статьями 110, 121-123, 156, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, г. Тверь (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНЦОВСКОЕ СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ", г. Москва (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение тридцати дней с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные недостатки (дефекты) по муниципальному контракту № 0836600003320000567 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 150 мест, 

<

...>», выполнив следующие мероприятия:  

1) устранить следы протечки на поверхности плит подвесного потолка «Армстронг» в коридоре 2-го этажа на площади 0,5 кв.м;  

2) восстановить работоспособность вытяжной вентиляции в сушильных шкафах 2-го этажа;  

3) восстановить теплоизоляцию вводного трубопровода холодного водоснабжения на площади 0,5 кв.м, расположенного в подвале в помещении водоподготовки;  

4) восстановить водоотводные трубы в приямках спусков в подвал и восстановить отделочное покрытие стен в приямках спусков в подвал, расположенных по всему периметру здания;  

5) устранить образование желтого налета на поверхностях пластиковых глухих заполнений дверей из ПВХ в помещениях горячего цеха пищеблока на площади 6 кв.м.;  

6) восстановить 3 торцевые заглушки на трубчатых металлических ограждениях внутренней лестницы между 1-2 этажом;  

7) установить на терморегуляторах с выносными датчиками батарей отопления, механическую защиту капиллярных трубок в 14 местах, площадью 8 п.м.;  

8) устранить скопление водных масс на бетонном полу в помещениях подвала здания в осях 10-12 - Б-В и в осях 8-10 - Б-В;  

9) устранить увлажнение наружной поверхности шахты лифта путем в подвальном помещении и бетонного пола по оси 4 в районе венткамеры;  

10) восстановить работоспособность 9-ти светильников уличного освещения на территории детского сада;  

11) устранить на поверхности стены и потолка в игровой комнате «Шалунишки» на 1 - ом этаже здания следы влажности на площади до 0,5 кв.м;  

12) устранить следы протечки атмосферной влаги в месте примыкания балкона к наружной стене здания, в месте расположения окон группы «Шалунишки», площадью 2,0 кв.м;  

13) устранить следы протечки на внутренней стене на откосе окна в помещении пищеблока в здании, площадью 2,0 кв.м.;  

14) восстановить герметичность стыка пола балкона и наружной стены здания над окнами группы «Шалунишки», по всей длине примыкания;  

15) восстановить затирку между швами плит, устранить отслоение плит покрытия пола балкона и следы плесени, над окнами группы «Шалунишки» наружной стены здания, на площади 5,0 кв.м.  

В случае неисполнения настоящего решения в установленный срок, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КЛИНЦОВСКОЕ СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ", г. Москва (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000 руб. в день, с тридцать первого дня, следующего за днем вступления настоящего решения в законную силу до дня его фактического исполнения.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КЛИНЦОВСКОЕ СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ", г. Москва (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ 6 000 рублей государственной пошлины по делу.  

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи 319 АПК РФ после вступления решения в законную силу.  

Настоящее решение может быть обжаловано по правилам главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда в месячный срок со дня принятия.  

Судья Л.Г.Погосян