Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

28. 09. 2023 года.                                                                                Дело № А40-160716/23-43-1288

Резолютивная часть решения объявлена 21. 09. 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 28. 09. 2023 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " КОСМОС " (ОГРН 

<

***>)

к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 5 374 753 руб. 42 коп. – долга,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность № 8 от 20.09.2021 г., директор, ФИО3, протокол № 01 от 22.01.2023г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителей, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 5 374 753 руб. 42 коп. – долга, на основании статей 309, 310 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителей, которые поддержали заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представили истребованные судом документы, предъявили подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявили.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что между ФКР Москвы (Заказчик, Ответчик) и ООО "КОСМОС" (Генподрядчик, Истец) по результатам электронного аукциона, заключен договор от 17.10.2018 № ПКР-001995-18 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Краснопрудная ул. 11. Общая сумма договора составила 41 346 899,15 рублей.

25.09.2019г ООО «КОСМОС» направило письмо начальнику ТУ ЦАО ФКР г. Москвы ФИО4 с предложением о создании комиссии по приемке выполненных работ по разработки проектной документации и открытию работ по Объекту.

01.11.2019 г. ООО «КОСМОС» и ФКР г. Москвы подписали Акт приемки выполненных работ по разработки проектной документации. Стоимость выполненных работ согласно подписанному Акту, составила 1 048 133,84 руб. В пункте 6 вышеуказанного Акта записано, что недостатки в выполненных работах не выявлены, работы выполнены в полный объем и что проектную документацию, включая сметную документацию переданы в полном объеме, в соответствии с условиями договора. Выполнение работ по разработке проектной документации подтверждается также следующими документами: накладными приема-передачи документации в рамках контроля хода представления и согласования проектной документации при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от 30.09.2019г.; положительным заключением экспертизы проектной документации от 14.08.2019г за №77-1-1-2-021140-2019; КС-3 от 01.11.2019г. выполненных работ по разработки проектной документации;

Все вышеуказанные документы подтверждают, что ООО «КОСМОС» выполнило работы по разработки проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

07.10.2019г и 10.10.2019г. ООО «КОСМОС» направил просьбу о заключении дополнительного соглашения к договору от 17.10.2018 № ПКР-001995-18 в связи с изменением цены, которая произошла по итогам прохождения в ГАУ «Мосгосэкспертиза» проектной документации. Был получен ответ за подписью Зам. генерального директора ФИО5 от 24.10.2019 г, в котором указывалось, что для заключения данного соглашения ООО «КОСМОС» должен сформировать пакет документов. Что и было сделано ООО  «КОСМОС». 24 декабря 2019г. было подписано дополнительное соглашение №2 к договору от 17.10.2018 № ПКР-001995-18. По данному соглашению цена договора была изменена и составила 32 166 855,74 руб. Подписание данного соглашения также подтверждает, что ООО «КОСМОС» выполнил все работы по разработки проектной документации.

Но несмотря на это, 07.10.2020 г, ФКР г. Москвы принял решение о одностороннем расторжении договора от 17.10.2018 № ПКР-001995-18. При этом каких- либо конкретных нарушений со стороны ООО «КОСМОС» высказано не было. Никаких Актов фиксации договорных нарушений со стороны ООО «КОСМОС» представлено не было. Хотя пунктом 17.5. Договора именно Актов фиксации договорных нарушений является основанием для привлечения Генподрядчика к ответственности. ФКР г. Москвы сослались на п. 14.7.6 Договора, в котором указывается, о нарушении Генподрядчиком сроков выполнения продолжительностью более 15 дней по любому из Объектов. Но при этом не было указано на каком именно Объекте были такие нарушения. Кроме этого в решении от 07.10.2020г было указано, что срок окончания работ-10.10.2019г, когда согласно дополнительному соглашению №3 от 13.03.2020г. к Договору, срок окончания работ -31.12.2020г. Одновременно с решением об одностороннем расторжении договора, 7 октября 2020 года заместитель генерального директора ФИО5 направил письмо за №ФКР -KC-6670V20 с продолжением подписать дополнительное соглашение о продлении срока действия Договора до 31.12.2021т и продлить банковскую гарантию.

Несмотря на несогласие ООО «КОСМОС» с данным решением, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» произвел оплату по Банковской гарантии. В связи с этим Руководитель Аппарата генерального директора ФКР г. Москвы ФИО6 письмом от 16.12.2020г, за №ФКР -8499\20 уведомила ООО «КОСМОС» об отмене решения об односторонние расторжения Договора.

23 июня 2021 г ООО «КОСМОС» и ФКР г. Москвы, в рамках исполнения договора от 17.10.2018 № ПКР-001995-18 подписали Акт по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) на сумму 1 574 117,11 руб. С учетом стоимости возвратных средств, на основании акта зачета требований сторон за выполненные работы от 23.06.2021г., итоговая сумма, подлежащая к оплате, составила 1 527 684,65 коп. Выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) подтверждается также следующими документами: КС-2 №1 от 23.06.2021г ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), КС-3 №1 от 23.06.2021 г ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), Акта зачета требований сторон за выполненные работы от 23.06.2021г., Акт приемки выполненных работ по элементу (системе) здания «ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)» от 23.06.2021г., Актами освидетельствования скрытых работ, Акт проведения испытания на герметичность системы от 05.08.2021г., Акт выверки объемов работ объекту по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная д. 11 от 07.02.2022г.

В 2021 году ООО «КОСМОС» в ходе исполнения Договора выполнило также работы по ремонту мусоропровода, что подтверждается КС-2 за №2 на сумму 1 032 545,07 руб. и по ремонту инженерных сетей электроснабжения, что подтверждается КС-2 за №3 на сумму 1 766 389,86 руб.

30 июня 2021 г. ООО «КОСМОС» направил обращение о продлении сроков выполнения работ по договору от 17.10.2018 № ПКР-001995-18, связи с приостановкой работ, связанных с распространением коронавирусной инфекции с 28.03.2020 по 06.07.2020г. На данное обращение был получен ответ от 21.07.2021 г, за №ФКР -09-31140\21 за подписью зам. генерального директора ФКР г. Москвы ФИО7. В нем говорилось, что условия договора проходят согласования.

16.08.2021 Истец направил требование об оплате выполненных работ, что подтверждается почтовым отправлением. На данное требование было получено два ответа от 06.09.2021 и 17.09.2021 г за подписью заместителя генерального директора ФИО6, что данная претензия рассматривается. Но оплата до настоящего времени не произведена. Данные ответы были получены уже после того, как ФКР г. Москвы расторг в одностороннем порядке договор с ООО «КОСМОС».

30 августа 2021 года ООО «КОСМОС» получил уведомление за №ФКР-ПИР-3966\21, за подписью заместителя генерального директора ФКР г. Москвы ФИО6, в котором сообщалось, что 24.08.2021г. ФКР г. Москвы приял решение об одностороннем расторжении договора от 17.10.2018 № ПКР-001995-18, в связи с невыполнением работ по разработке проектной документации (после того, как все необходимые документы по данным работам были подписаны). Факт выполнения работ по разработке проектной документации подтвердил и Арбитражный суд города Москвы от 13.06.2023 года по делу № А40-46130/23-67-366. Суд установил, что оснований у ФКР г. Москвы для досрочного расторжения договора не имелось.

В соответствии п.1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Таким образом расторжение договора от 17.10.2018 № ПКР-001995-18, не освобождает ФКР г. Москвы от обязательств оплаты фактически выполненные ООО «КОСМОС» работ. Но до настоящего времени ФКР г. Москвы не выполнило своих обязательств по оплате фактически выполненных работ, в соответствии с подписанными актами.

07 февраля 2022 года ООО «КОСМОС» и ФКР г. Москвы подписали Акт выверки объемов работ объекту по адресу: 

<

...> в котором ФКР г. Москвы подтвердила, что ООО «КОСМОС» фактически выполнил по договору от 17.10.2018 № ПКР-001995-18 работы на сумму 4 421 231,08 руб. С учетом ранее выполненных работ по разработке проектной документации на сумму 1 048 133,84 руб., также учитывая вычет возвратных средств, общая задолженность ФКР г. Москвы перед ООО «КОСМОС» за фактически выполненные работы по договору № ПКР-001995-18 от 17.10.2018 составила 5 374 753,42 руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

13 мая 2023 года ООО «КОСМОС» направил претензию в адрес ФКР г. Москвы, где предложил в добровольном порядке погасить задолженность перед ООО КОСМОС», но ответа на данную претензию не получил.

Таким образом, у ФКР Москвы в пользу ООО "КОСМОС" возникло обязательство по оплате задолженности в размере 5 374 753,42 руб.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование истца о взыскании долга в сумме 5 374 753 руб. 42 коп.– законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со ст.ст. 106, 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " КОСМОС " (ОГРН 

<

***>) 5 374 753 руб. 42 коп. – долга и расходы по уплате госпошлины в сумме 49 874 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

ФИО1