АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-3822/2020

г. Ярославль

14 июля 2020 года

Резолютивная часть решения принята  07 июля 2020 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Танцевой В.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  Государственного бюджетного клинического учреждения здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к   Индивидуальному  предпринимателю  ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   130499.19  руб.

при участии:

от истца - ФИО3 по доверенности от 03.02.2020

от ответчика - не явился.

установил:

Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" обратилась с уточненным исковым заявлением к индивидуальному  предпринимателю  ФИО2 о взыскании 130 499,19 руб. пени.

Истец в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик в судебное заседание не явился, представил письменное отзыва не предоставил. Направленное в его адрес определение суда возвращено почтовым отделением связи с отметкой "за истечением срока хранения".

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ был объявлен перерыв в течение дня до 16 час. 10 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия сторон.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела, суд установил.

23.11.2018 между Государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" /Заказчик/ и индивидуальным предпринимателем  ФИО2 /Подрядчик/ заключен контракт № 249, согласно п.п. 1.1, 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 10.1 которого, предметом настоящего контракта является: выполнение работ по проведению капитального ремонта пищеблока, согласно техническому заданию (Приложение к контракту) и сметной документации (приложение к техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта. Цена работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, составляет: 204 000,00 рублей (двести четыре тысячи рублей) 00 копеек, НДС не облагается. Место выполнения работ: 150040, 

<

...>. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ (предоставляется Подрядчиком после заключения контракта в течение 3-х (трех) рабочих дней и утверждается Заказчиком в течение 1-го (одного) рабочего дня с даты предоставления его Подрядчиком). В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Работы Подрядчиком были выполнены 31.07.2019 г., что подтверждается актом выполненных работ № 1, подписанный сторонами.

28.11.2018 между Государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" /Заказчик/ и индивидуальным предпринимателем  ФИО2 /Подрядчик/ заключен контракт № 254, согласно п.п. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1 которого, предметом настоящего контракта является: Выполнение работ по проведению капитального ремонта коридора второго этажа главного корпуса (у кабинетов № 7, 8, 39) (далее - работы), согласно техническому заданию (Приложение №1 к контракту) и локальному сметному расчету (приложение к техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта. Цена работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, составляет: 143 000,00 рублей (сто сорок три тысячи рублей) 00 копеек, НДС не облагается. Место выполнения работ: 150040, 

<

...>. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Работы Подрядчиком были выполнены 28.11.2019 г., что подтверждается актом выполненных работ №  1, подписанный сторонами.

13.12.2018 между Государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" /Заказчик/ и индивидуальным предпринимателем  ФИО2 /Подрядчик/ заключен контракт № 263, согласно п.п. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1 которого, предметом настоящего контракта является: Выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений № 24,25 второго этажа главного корпуса (далее - работы), согласно техническому заданию (Приложение №1 к контракту) и локальному сметному расчету (приложение к техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта. 2.1. Цена работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, составляет: 228 400,00 рублей (двести двадцать восемь тысяч четыреста рублей) 00 копеек, НДС не облагается.  Место выполнения работ: 150040, 

<

...>. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Работы Подрядчиком были выполнены 28.11.2019 г., что подтверждается актом выполненных работ № 1, подписанный сторонами.

13.12.2018 между Государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" /Заказчик/ и индивидуальным предпринимателем  ФИО2 /Подрядчик/ заключен контракт № 264, согласно п.п. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1 которого, предметом настоящего контракта является: Выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений № 15,16,17,18 второго этажа главного корпуса (далее - работы), согласно техническому заданию (Приложение №1 к контракту) и локальному сметному расчету (приложение к техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта. Цена работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, составляет: 328 800,00 рублей (триста двадцать восемь тысяч восемьсот рублей) 00 копеек, НДС не облагается. Место выполнения работ: 150040, 

<

...>. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Работы Подрядчиком были выполнены 08.11.2019 г., что подтверждается актом выполненных работ № 1, подписанный сторонами.

13.12.2018 между Государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" /Заказчик/ и индивидуальным предпринимателем  ФИО2 /Подрядчик/ заключен контракт № 266, согласно п.п. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1 которого, предметом настоящего контракта является: Выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений № 13,14 второго этажа главного корпуса (далее - работы), согласно техническому заданию (Приложение №1 к контракту) и локальному сметному расчету (приложение к техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта. Цена работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, составляет: 327 000,00 рублей (триста двадцать семь тысяч рублей) 00 копеек, НДС не облагается. Место выполнения работ: 150040, 

<

...>. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Работы Подрядчиком были выполнены 13.08.2019 г., что подтверждается актом выполненных работ № 1, подписанный сторонами.

13.12.2018 между Государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" /Заказчик/ и индивидуальным предпринимателем  ФИО2 /Подрядчик/ заключен контракт № 265, согласно п.п. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1 которого, предметом настоящего контракта является: Выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений № 19,20 второго этажа главного корпуса (далее - работы), согласно техническому заданию (Приложение №1 к контракту) и локальному сметному расчету (приложение к техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта. Цена работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта, составляет: 233 000,00 рублей (двести тридцать три тысячи рублей) 00 копеек, НДС не облагается. Место выполнения работ: 150040, 

<

...>. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Работы Подрядчиком были выполнены 11.09.2019 г., что подтверждается актом выполненных работ № 1, подписанный сторонами.

13.12.2018 между Государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" /Заказчик/ и индивидуальным предпринимателем  ФИО2 /Подрядчик/ заключен контракт № 268, согласно п.п. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1 которого, предметом настоящего контракта является: Выполнение работ по проведению капитального ремонта коридора второго этажа главного корпуса (от кабинета № 25 до кабинета № 37) (далее - работы), согласно техническому заданию (Приложение №1 к контракту) и локальному сметному расчету (приложение к техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта. Цена работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, составляет: 352 000,00 рублей (триста пятьдесят две тысячи рублей) 00 копеек, НДС не облагается. Место выполнения работ: 150040, г, Ярославль, пр. Октября, д. 52. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Работы Подрядчиком были выполнены 30.04.2019 г., что подтверждается актом выполненных работ № 1, подписанный сторонами.

13.12.2018 между Государственным бюджетным клиническим учреждением здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" /Заказчик/ и индивидуальным предпринимателем  ФИО2 /Подрядчик/ заключен контракт № 267, согласно п.п. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 9.1 которого, предметом настоящего контракта является: Выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений № 12, 21, 22 второго этажа главного корпуса (далее - работы), согласно техническому заданию (Приложение №1 к контракту) и локальному сметному расчету (приложение к техническому заданию), которые являются неотъемлемой частью контракта. Цена работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта, составляет: 358 000,00 рублей (триста пятьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек, НДС не облагается. Место выполнения работ: 150040, 

<

...>. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком производства работ. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Работы Подрядчиком были выполнены 28.11.2019 г., что подтверждается актом выполненных работ № 1, подписанный сторонами.

Согласно п. 9.5. контрактов пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Из материалов дела следует, по состоянию на дату окончания срока выполнения работ, работы подрядчиком были завершены с просрочкой.

Требованиями от 01.08.2019 № 1299, от 13.11.219 № 2010, от 02.12.2019 № 2123, от 16.09.2018 № 1570 истец обращался к ответчику об уплате неустоек в связи с просрочкой обязательств, предусмотренных контрактом.

Уведомлением от 24.12.2019 № 2313 истец потребовал оплаты задолженности по оплате неустойки.

10.02.2020 Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница" обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа к Индивидуальному предпринимателю   ФИО2 о взыскании 136 824,23 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по контрактам № 264, № 169, № 254, № 263, № 267, № 265, № 266, № 249, № 268.

Определением от 21.02.2020 Арбитражный суд Ярославской области по делу А82-2571/2020 заявление о выдаче судебного приказа возвращено.

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Суд считает требование истца о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контрактам в размере 130 499,19 руб. руб. подлежащим удовлетворению.

Основания для применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ у суда отсутствуют.

Возражений по расчету и размеру неустойки ответчиком не заявлено.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

В силу правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 № 12787/11, процессуальные права участвующего в деле лица неразрывно связаны с его обязанностями (части 2, 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Обладание правами без выполнения обязанностей противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом и судом (статья 19 Конституции Российской Федерации, статья 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, получив возможность пользоваться процессуальными правами, ответчик принял на себя и процессуальные обязанности, одной из которых является обязанность по опровержению исковых требований.

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, в соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент.

Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению в уточненном истцом размере.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по уплате госпошлины по делу относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Индивидуального  предпринимателя  ФИО2  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  Государственного бюджетного клинического учреждения здравоохранения Ярославской области "Центральная городская больница"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 130499,19 руб. неустойки, 4925 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить истцу из средств Федерального бюджета госпошлину в сумме 180 руб., уплаченную по платежным поручениям №2383 от 27.02.2020,  №2137 от  11.02.2020.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Танцева В.А.