112/2020-154793(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-22016/2019

г. Хабаровск

26 октября 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Трещевой В.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрел в заседании суда дело по иску Федерального казенного  учреждения «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в  Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «СК Стройдор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 125319, 

<

...>, эт 1 пом I оф 4Е)  

об обязании исполнить обязательства по государственному контракту   № 02-14/СМР от 15.01.2014г.  

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель по доверенности № ДВ-10/3536 от 19.05.2020  ФИО2 (до перерыва),  

от ответчика – представитель по доверенности № 21 от 22.06.2020  ФИО3 (до перерыва),  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СК Стройдор» в  

срок до 30.09.2021г. безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных  

по государственному контракту № 02-14/СМР от 15.01.2014 на выполнение  

дорожных работ по реконструкции мостового перехода через р. Куланда км  

480+942 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,  

республика Саха (Якутия), а именно: 1. Произвести демонтажные работы: - выполнить демонтаж дорожной одежды мостового полотна; - демонтировать существующий водоотвод; 

- демонтировать балки пролетных строений с деформационными  

швами; - демонтировать опорные части пролетных строений; - осуществить демонтаж опор № 2,3; 2.Произвести восстановительные работы: - выполнить устройство новых опор № 2,3; 

- обследовать состояние буронабивных столбов опор № 1,4 (после  

демонтажа пролетных строений и покрытия на участке сопряжения). По  

результатам обследования определить необходимость восстановления  

фундаментной части опор (аналогично опор № 2, 3); - выполнить ремонт балок пролетного строения; - произвести монтаж новых РОЧ; 

- произвести монтаж балок пролетного строения с их  

объединениям в температурно-неразрезную цепь; -выполнить монтаж деформационных швов; 

-выполнить работы по устройству мостового полотна с требуемого  

водоотвода; - восстановить цементобетонное покрытие на проезжей части; - выполнить окраску пролетных строений и опор моста; 

- обеспечить устройство монолитно-упорного блока в основании  укрепления конусов опор № 1,4 по всей длине, выполнить устройство штраб в  монолитном бетоне укрепления с заполнением битумной мастикой;  

- укрепить откосы насыпи правого подхода путем устройства  монолитного упорного блока и усиления основания откоса скальным  грунтом;  

- укрепить откосы насыпи левого подхода путем устройства  монолитного упорного блока и усиления основания откоса скальным  грунтом;  

- разработать проект на восстановительные работы. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СК  Стройдор» в пользу Федерального казенного учреждения  «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в  Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства»  судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья В.Н.Трещева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.06.2020 5:05:31

Кому выдана Трещева Валентина Николаевна