Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

дело № А76-37509/2024

23 июля 2025 г.

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Писаренко Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гранкиной Е.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АвенюИнвест», ИНН 

<

***>, к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ИНН 

<

***>, о  взыскании 82 188 руб. 00 коп., 

при участии в судебном заседании: от истца - ФИО2 (доверенность № 289/АИ/2025),  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АвенюИнвест» 30.10.2024 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании неустойки в размере 82 188 руб. 00 коп. - определением суда от 07.11.2024 исковое заявление принято для рассмотрения в порядке упрощенного производства, 17.01.2025 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), дело рассмотрено в его отсутствие по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ. 

В судебном заседании 17.07.2025, в порядке ст. 163 АПК РФ, объявлялся перерыв до 23.07.2025. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АвенюИнвест» (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) заключен договор строительного подряда (с использованием материалов подрядчика) № 1 от 25.09.2023, в соответствии с пунктами 1.1 – 1.4 которого, подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить работы на условиях, предусмотренных настоящим договором, на Объекте(ах) заказчика, указанном(ых) в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1), (далее - Объект) и передать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Перечень, объем, стоимость и срок выполнения работ и их этапов по настоящему договору определены в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1); общие требования и особые условия выполнения работ установлены в Техническом задании (Приложение № 2). 

Работы по настоящему договору выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Перечень, объем, стоимость материалов и оборудования и срок их предоставления для выполнения работ по настоящему договору определены в Спецификации(ях) на материалы и оборудование (Приложение № 3). 

Работы по договору выполняются с использованием машин и механизмов подрядчика с экипажем при наличии потребности в них. Перечень, объем, стоимость машин и механизмов с экипажем и срок их предоставления для выполнения работ по договору определены в Спецификации(ях) на машины и механизмы (Приложение № 4). 

Приложением № 1 к договору стороны подписали две спецификации от 25.09.2023: 

- Спецификация № Поставка материалов, согласно которой заказчик оплачивает подрядчику стоимость материалов, из которых подрядчик обязуется выполнить работы по устройству противопожарных дверей и люков в период с 01.10.2023 по 31.12.2023, на общую сумму 404 500 руб. Размер аванса 283 150 руб. 00 коп.,

- Спецификация № СМР, согласно которой подрядчик обязуется выполнить работы по устройству противопожарных дверей и люков в период с 01.10.2023 по 31.12.2023, на общую сумму 10 500 руб. 00 коп.,

Согласно пункту 4.1 договора общая стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, складывается из стоимости работ (их этапов) по Спецификации(ям) на работы (Приложение № 1), стоимости материалов и оборудования по Спецификации(ям) на материалы и оборудование (Приложение № 3) и стоимости машин и механизмов по Спецификации(ям) на машины и механизмы (Приложение № 4). 

Заключая настоящий договор стороны предполагают, что заказчик не обладает специальными познаниями, необходимыми в достаточной степени для определения объемов, подлежащих выполнению работ, и в этой части в полной мере заказчик полагается на знания, профессионализм и опыт подрядчика. Подписанные сторонами Приложения к договору в полной мере подразумевают, что по окончанию выполнения работ будет достигнут результат, получение которого предполагал заказчик, подписывая договор. 

Подрядчик подтверждает, что стоимость выполнения работ была рассчитана на основании Технического задания (Приложение № 2). 

В основу расчета подрядчика положены его профессиональный опыт и компетенция квалифицированного подрядчика. Виды работ, прямо не упомянутые в Спецификации(ях) (Приложение № 1,3,4), но указанные в Техническом задании (Приложение № 2), выполняются Подрядчиком своими силами и не подлежат дополнительной оплате со стороны Заказчика. 

Таким образом, общая стоимость работ, выполняемых подрядчиком по договору составляет 415 000 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 4.2 договора, заказчик оплачивает выполняемые подрядчиком работы, предоставляемые подрядчиком материалы и оборудование, машины и механизмы в следующем порядке: 

- в течение 15 рабочих дней с даты подписания Спецификации(ий) (Приложение № 1, №3, №4) заказчик оплачивает подрядчику аванс в размере, указанном в соответствующей(их) Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1), Спецификациях на материалы и оборудование (Приложение №3), Спецификациях на машины и механизмы (Приложение №4). Указанные в настоящем пункте положения о порядке оплаты аванса распространяют свое действие на все Спецификации (Приложение № 1, №3, №4) по договору вне зависимости от даты их подписания (пункт 4.2.1 договора). 

- в течение 15 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ(Приложение № 13) или Универсального передаточного документа (Приложение № 20) заказчик оплачивает подрядчику выполненные работы, предоставленные материалы, оборудование, машины и механизмы в размере стоимости работ, материалов, оборудования, машин и механизмов, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 13) или Универсальном передаточном документе (Приложение № 20), за вычетом в пропорциональном порядке оплаченного заказчиком подрядчику аванса, указанного в п. 4.2.1 договора, и окончательного платежа, указанного в п. 4.2.3 договора (пункт 4.2.2 Договора). 

- случае отсутствия недостатков выполнения работ по договору в 15 рабочих дней по истечению трех месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию заказчик оплачивает подрядчику окончательный платеж в размере 5 (пять) %(процентов) от стоимости выполненных работ, предоставленных материалов, оборудования, машин и механизмов, указанной во всех Актах сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 13) или Универсальных передаточных документах (Приложение №20), за вычетом расходов (затрат) заказчика на устранение недостатков выполненных Подрядчиком работ (пункт 4.2.3 Договора). 

Факт оплаты заказчиком аванса, предусмотренного Спецификацией № материалы, в размере 283 150 руб. подтверждается платежным поручением № 730 от 16.10.2023. 

Срок выполнения работ по договору, согласно требованиям Спецификаций, к договору истек 01.01.2024.

05.06.2024 в адрес заказчика поступил универсальный передаточный документ № 32 от 20.02.2024, подписанный подрядчиком, на сумму 10 500 руб. 00 коп. 

21.06.2024 в адрес заказчика поступил универсальный передаточный документ № 22 от 14.02.2024, подписанный подрядчиком, на сумму 400 400 руб. 00 коп. 

Таким образом, подрядчиком допущено нарушение срока выполнения работ с 01.01.2024. 

В силу пункта 7.1.1 договора, в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ или их этапов, предусмотренных Спецификацией(ями) на работы(Приложение № 1), сроков предоставления для выполнения работ материалов и оборудования, предусмотренных Спецификацией(ями) на материалы и оборудование (Приложение № 3), или сроков предоставления для выполнения работ машин и механизмов, предусмотренных Спецификацией(ями) на машины и механизмы (Приложение № 4), заказчик имеет право потребовать уплаты подрядчиком неустойки (пени) в размере 1 % от общей стоимости работ по договору за каждый календарный день просрочки, но не более 20 % от общей стоимости работ по договору.

Итого, общий размер неустойки, согласно расчету истца, составил 82 188 руб. 00 коп. с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1.1 договора.

Истцом направлена в адрес ответчика досудебная претензия № 334 от 25.04.2024 с требованием оплатить неустойку – неисполнение ответчиком данных требований в добровольном порядке, явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статье 709 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

По смыслу статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Согласно ч. 4, 6 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Таким образом, исходя из положений статей 711, 720 и части 1 статьи 721 ГК РФ оплате подлежат только фактически выполненные работы. 

Истец просит взыскать неустойку за период с 01.01.2024 по 20.02.2024 в размере 82 188 руб. 00 коп.

В силу пункта 7.1.1 договора, в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ или их этапов, предусмотренных Спецификацией(ями) на работы(Приложение № 1), сроков предоставления для выполнения работ материалов и оборудования, предусмотренных Спецификацией(ями) на материалы и оборудование (Приложение № 3), или сроков предоставления для выполнения работ машин и механизмов, предусмотренных Спецификацией(ями) на машины и механизмы (Приложение № 4), заказчик имеет право потребовать уплаты подрядчиком неустойки (пени) в размере 1 % от общей стоимости работ по договору за каждый календарный день просрочки, но не более 20 % от общей стоимости работ по договору.

Судом расчет истца проверен, арифметическая правильность расчета ответчиком, как в части алгоритма расчета, так и в части суммы начисления, надлежащим образом не оспорена (статьи 8, 9 АПК РФ), оснований для применения арбитражным судом статьи 333 ГК РФ, в рассматриваемом споре, суд не усматривает.

Таким образом, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании с ответчика неустойки в общем размере 82 188 руб. 00 коп., являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно положениям статьи 112 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, арбитражным судом, рассматривающим дело, разрешаются вопросы распределения судебных расходов. 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101 АПК РФ). 

При цене иска в размере 82 188 руб. 00 коп. (с учетом заявленных требований о взыскании неустойки по дату принятия судом решения) в федеральный бюджет подлежит уплате государственная пошлина в размере 10 000 руб. 00 коп.

При подаче искового заявления в арбитражный суд истцом уплачена государственная пошлина в размере 10 323 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 769 от 21.06.2024.

Поскольку исковые требования подлежат удовлетворению, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 10 000 руб. 00 коп., государственная пошлина в размере 323 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АвенюИнвест» неустойку в размере 82 188 руб. 00 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000 руб. 00 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АвенюИнвест» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 323 руб. 00 коп., уплаченную платежным поручением № 769 от 21.06.2024.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья                                                                                                                                         Е.В. Писаренко