АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А19-7466/2023

г. Иркутск

18 июля 2023 года.

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БРАТСКА в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, в рамках  выполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам от 02.12.2016   № Ф.2016.358986, от 19.12.2016 № Ф.2016.398488, от 16.01.2017 № Ф.2016.482741,  от 02.12.2016 № Ф.2016.359584, от 19.12.2016 № Ф.2016.407094, от 19.12.2016   № Ф.2016.407037, от 19.12.2016 № Ф.2016.407118, от 02.12.2016 № Ф.2016.359232,  от 19.12.2016 № Ф.2016.407103, от 16.01.2017 № Ф.2016.482741, от 19.12.2016   № Ф.2016.398464, от 19.12.2016 № Ф.2016.406781, от 19.12.2016 № Ф.2016.398350,  от 16.01.2017 № Ф.2016.482741 безвозмездно устранить выявленные недостатки  выполненных работ (результата работ) по строительству жилых многоквартирных домов,  расположенных по адресу: Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица  Набережная, а именно:  

Набережная, д. 30 

 № кв. (помещение,  

территория)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К  

 

Описание дефекта  

 

ЗАСТРОЙЩИКУ  

 

Квартира № 45  

(обращение жильца +  обращение МКУ «ДКСР» в  адрес застройщика исх. 9/241  от 07.02.2022 г.)  

 

В большой комнате на стекле 

Произвести замену стекла  

 

балконной двери с внутренней 

в стеклопакете балконной  

 

стороны трещина 

двери в большой комнате  

 

Набережная, д. 30А 

 № кв. (помещение, территория)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К  

 

Описание дефекта  

 

ЗАСТРОЙЩИКУ  

 

Квартира № 16 

(обращение жильца +  обращение МКУ «ДКСР» в  

адрес застройщика исх. № 

9/2232 от 08.09.2022 г.  

 

Произвести замену

 

Потрескался балконный порог  

 

балконного порога 

 

№ кв. (помещение, территория)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К  

 

Описание дефекта  

 

ЗАСТРОЙЩИКУ  

 

Подъезд  

(обращение жильца с письмом  о дефектах + обращение МКУ  «ДКСР» в адрес застройщика  

исх. 9/554 от 17.03.2022 г.)  

 

Выполнить ремонт 

 

козырька, произвести 

 

просушивание поверхностей, 

 

При входе в подъезд при таянии 

выполнить механическую 

 

снега капает вода с потолка 

расчистку поверхностей, 

 

обработать средством от 

 

патогенной микрофлоры, 

 

покрасить

 

Набережная, д. 32 

 № кв. (помещение, территория)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К  

 

Описание дефекта  

 

ЗАСТРОЙЩИКУ  

 

Квартира № 14  

(обращение жильца письмом о  дефектах + обращение МКУ  «ДКСР» в адрес застройщика  исх. № 9/1536 от 29.06.2022 г.)  

 

Выполнить ремонт кровли, 

 

произвести просушку 

 

поверхности, выполнить 

 

Протечки воды в жилое 

 

механическую расчистку 

 

помещение после таяния снега и 

 

поверхности, обработать 

 

дождя 

 

средством от патогенной 

 

микрофлоры, побелить 

 

потолок 

 

Квартира № 19  

(обращение жильца с письмом о  дефектах + обращение МКУ  «ДКСР» в адрес застройщика  исх. № 9/62 от 08.01.2022 г. и №  9/1550 от 30.06.2022 г.)  

 

Выполнить ремонт кровли, 

 

произвести просушку 

 

В зале во время дождя и таяния 

 

поверхности, выполнить 

 

снега с потолка и по стенам с 

 

механическую расчистку 

 

улицы (со стороны балкона) 

 

поверхности, обработать 

 

протекает вода 

 

средством от патогенной 

 

микрофлоры, побелить 

 

потолок 

в зале 

 

В зале затечные пятна на  потолке (у балконной двери),  отслоение отделочного слоя.  

 

Произвести просушку 

 

поверхности, выполнить 

 

механическую расчистку 

 

поверхности, обработать 

 

средством от патогенной 

 

микрофлоры, побелить 

 

потолок 

в зале 

 

Квартира № 24 

(обращение МКУ «ДКСР» в  адрес застройщика № 9/2055 от  

18.08.2022 г.) 

 

Выполнить ремонт кровли, 

 

произвести просушку 

 

поверхности, выполнить 

 

В комнате и зале на потолке 

 

механическую расчистку 

 

протечка с кровли

 

поверхности, обработать 

 

средством от патогенной 

 

микрофлоры, побелить 

 

потолок 

в зале и комнате 

 

№ кв. (помещение, территория)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К  

 

Описание дефекта  

 

ЗАСТРОЙЩИКУ  

 

Квартира № 36  

(обращение жильца письмом о  дефектах + обращение МКУ  «ДКСР» в адрес застройщика  исх. № 9/2345 от 20.09.2022 г.)  

 

Произвести просушку 

 

поверхности, выполнить 

 

В углу комнаты над окном с 

 

механическую расчистку 

 

правой стороны следы протечек 

 

поверхности, обработать 

 

с отслоением окрасочного слоя 

 

средством от патогенной 

 

на потолке и повреждением 

 

микрофлоры, побелить 

 

обоев (3 этаж) 

 

потолок 

 

и переклеить обои в 

 

комнате 

 

Квартира № 43  

(обращение жильца письмом о  дефектах + обращение МКУ  «ДКСР» в адрес застройщика  исх. № 9/1588 от 05.07.2022 г.)  

 

Выполнить ремонт кровли, 

 

В большой комнате на потолке 

произвести просушку 

 

возле окна следы протечек по 

поверхности, выполнить 

 

шву между плитами перекрытия 

механическую расчистку 

 

(прогиб желоба и отсутствие 

поверхности, обработать 

 

водоотвода, попадание воды за 

средством от патогенной 

 

обшивку фасада) 

микрофлоры, побелить 

 

потолок 

в большой комнате 

 

Набережная, д. 34 

 № кв. (помещение, территория)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К  

 

Описание дефекта  

 

ЗАСТРОЙЩИКУ  

 

Квартира № 34  

(обращение МКУ «ДКСР» в  адрес застройщика исх. №  9/2009 от 12.08.2022 г.)  

 

Продувание из под пола и  

Устранить продувание из 

 

батареи 

под пола и батареи

 

В спальне запотевает и протекает  окно  

 

Произвести герметизацию 

 

оконного блока 

 

Набережная, д. 36А 

 № кв. (помещение, территория)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К  

 

Описание дефекта  

 

ЗАСТРОЙЩИКУ  

 

Квартира № 9  

(обращение МКУ «ДКСР» в  адрес застройщика исх. №  9/1482 от 14.06.2022 г.)  

 

Провести ремонтно- 

 

восстановительные работы 

 

Трещины в стене 

 

по устранению трещин в 

 

стене

 

Протечка воды в жилое  помещение после дождя  

 

Выполнить ревизию фасада 

 

дома и устранить протечки  

 

Взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДИРЕКЦИЯ  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.  

Судья О.В. Епифанова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 26.04.2023 2:28:00

Кому выдана Епифанова Ольга Владимировна