090/2023-89075(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Климова, 62, Курган, 640021, https://kurgan.arbitr.ru, тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-15562/2022

г. Курган

22 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2023 года.  В полном объеме решение изготовлено 22 августа 2023 года.  

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Елесиной А.Ф., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ «КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании 1007410 руб. 80 коп., 

третьи лица: 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), 2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМФОРТ-ПЛЮС» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), 3. индивидуальный предприниматель ФИО2  (ОГРНИП 309450132400046, ИНН 

<

***>),  

о взыскании 206093 руб. 33 коп. при участии в судебном заседании: от истца: явки нет, извещен, 

от ответчика: ФИО3, паспорт, доверенность от 31.08.2022, диплом,  от третьих лиц: 1,2,3 – явки нет, извещены,  

установил:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУРГАНСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА № 2» в рамках дела № А34-20880/2021 обратилось в Арбитражный  суд Курганской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» о взыскании задолженности в сумме  767533 руб. 00 коп., судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Определением от 07.02.2022 исковое заявление принято к производству, дело №  А34-20880/2021 назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без  вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Определением от 04.04.2022 по делу № А34-20880/2021 судом принято к  производству встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» к ГОСУДАРСТВЕННОМУ  БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» о  

взыскании задолженности по оплате фактически выполненных работ на сумму 1007410  руб. 80 коп. Указанным определением суда ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» предоставлена отсрочка уплаты  государственной пошлины до рассмотрения настоящего дела по существу, но не более  чем на срок, установленный пунктом 1 статьи 64 Налогового кодекса Российской  Федерации.  

Определением от 04.04.2022 судом осуществлен переход к рассмотрению дела   № А34-20880/2021 по общим правилам искового производства.  

Определением суда от 31.05.2022 к участию в деле № А34-20880/2021 в качестве  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета  спора, привлечены: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»,  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМФОРТ-ПЛЮС»,  индивидуальный предприниматель ФИО2.  

Определением от 22.09.2022 суд выделил в отдельное производство из дела №  А34-20880/2021 требование ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, далее также – истец) к ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ «КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, далее также – ответчик) о взыскании задолженности по оплате  фактически выполненных работ на сумму 1007410 руб. 80 коп., присвоив делу № А3415562/2022. Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований  относительно предмета спора, по делу № А34-15562/2022 также являются:  ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (далее также –  третье лицо-1), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КОМФОРТ-ПЛЮС» (далее также – третье лицо-2), индивидуальный  предприниматель ФИО2 (далее также – третье лицо-3).  

Истец, третьи лица, извещенные о времени и месте судебного заседания с  соблюдением требований статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, явку своих представителей в судебное заседание не  обеспечили; ходатайств, обоснований по делу в адрес суда не поступало.  

Вместе с тем, согласно позиции ООО «АПС ТЕХНОЛОДЖИ», изложенной в  исковом заявлении, в письменных дополнениях к исковому заявлению, между истцом и  ответчиком были заключены ряд контрактов; позже между сторонами подписаны  соглашения о расторжении указанных контрактов, согласно которым истцу была  выплачена стоимость фактически выполненных работ; указанное не оспаривается  сторонами. Однако при подписании указанных соглашений не было учтено, что истец  направлял в адрес ответчика письма о проведении дополнительных работ, к которым  истец фактически был допущен на основании акта освидетельствования демонтажных  работ от 28.10.2021 года. Согласно доводам иска, истец фактически выполнил  дополнительные работы, которые впоследствии не были оплачены ответчиком; в  качестве дополнительных работ истцом предъявлены работы по сплошному  выравниванию внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих  растворных смесей; согласно позиции истца, ответчик ссылается на заключенные  договоры с ООО «Комфорт Плюс» (договор № 196 от 15.12.21) и ИП ФИО2  (договор № 202 от 15.12.21), однако предмет указанных договоров не совпадает с  работами, которые были выполнены истцом (т.1, л.д. 2-3, т.2, л.д. 124, 148-149).  

В судебном заседании представитель ответчика просил в иске отказать, с  заявленными требованиями не согласен, с учетом доводов, ранее изложенных в  письменных отзывах; согласно позиции ответчика – стороны согласовали только  выполнение необходимых дополнительных работ по контрактам на сумму 19375 руб. и  применительно к объекту ремонта – ГБУ «Курганская поликлиника № 2», по адресу г.  

Курган, ул. Кравченко, 53, работы на указанную сумму истцом выполнены (т.1, л.д. 5-6,  39-40, т.2 л.д. 156-158, 159-163).  

Согласно позиции третьего лица (ГКУ «Управление капитального строительства  Курганской области»), по контрактам, перечисленным обществом в обоснование  заявленных требований, исполнительная документация, акты приемки выполненных  работ для проверки результатов выполнения подрядчиком строительно-монтажных  работ по капитальному ремонту объектов: ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по  адресу: 

<

...>, ГБУ «Курганская поликлиника № 2», по адресу  

<

...> в ГКУ «УКС Курганской области» не передавались,  соответственно, объемы и стоимость работ и затрат строительным контролем не  принимались; в связи с отсутствием подписанных документов - учреждение не имеет  информации об объемах и стоимости выполненных подрядчиком по этим  обязательствам работ и затрат (т.2, л.д. 136).  

В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие истца, третьих лиц по  имеющимся в деле доказательствам.  

Исследовав письменные материалы дела, и оценив имеющиеся доказательства в  соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в их совокупности и взаимосвязи, суд находит иск обоснованным и  подлежащим частичному удовлетворению.  

Как следует из материалов дела, 03.09.2021 между ответчиком (заказчик) и  истцом (подрядчик) заключен контракт № П-ИМЗ-2021-003910-24 капитальный ремонт  помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в  установленный контрактом срок и в соответствии с утвержденным заказчиком  техническим заданием (приложение № 1), локальным сметным расчетом (приложение   № 2) осуществить капитальный ремонт помещений 4-го этажа отделения ГБУ  «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом  подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат выполненных работ в  порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством  Российской Федерации (т.1, л.д. 43-49).  

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен  соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной  документации, требованиям действующего законодательства в области строительства,  ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также  требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям  заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются  организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации),  органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные  контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными  полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта).  

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик обязуется принять  надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями  Контракта.  

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в  частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего  контракта составляет 488 000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет  специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения Контракта.  

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по  Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта  

Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 146 400  рублей 00 копеек на основании счета на оплату.  

Оставшаяся часть в размере 341600 руб. оплачивается поэтапно на основании  принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы  КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры  не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым  унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной  в п.2.1 контракта и выплаченного аванса.  

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10  рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам  КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п.2.1 настоящего  контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.  

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами  в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после  заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения  контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту);  работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3)  (пункты 3.1, 3.2 контракта).  

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ  согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по  окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3,  организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем  заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан  письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов  выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по  контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д.,  подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в  течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную  документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный  мотивированный отказ от приемки.)  

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный  результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты  подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости  выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3,  составленным с учетом цены, установленной в п.2.1 настоящего Контракта.  

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить  работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком  Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы  на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего  Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных  актов Российской Федерации.  

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и  расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по  соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны  контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации (пункт 11.1 контракта).  

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская  поликлиника № 2 платежным поручением № 381880 перечислило ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный  счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ- 2021-003910-24 от 03.09.2021.  

Предусмотренные контрактом работы выполнены истцом на общую сумму 9806  руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений,  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.11.2021 в размере 9806  руб., а также актом о приемке выполненных работ № 1 от 15.11.2021 в размере 9806  руб. (т.1, л.д. 66-73).  

16.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта,  согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта  общая стоимость фактически выполненных работ составила 9806 руб., НДС не  облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают себя связанными  обязательствами по настоящему контракту, за исключением обязательств по возврату  выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 136594 руб., НДС не  облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту; также  сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен поставщиком в  течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (пункты 2,3  соглашения) (т.1, л.д. 73).  

03.09.2021 между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) заключен  контракт № П-ИМЗ-2021-003912-25 капитальный ремонт помещений 4-го этажа  отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>,  в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в  соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1),  локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт  помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать  заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим  контрактом и действующим законодательством Российской Федерации (т.1, л.д. 75-81).  

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен  соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной  документации, требованиям действующего законодательства в области строительства,  ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также  требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям  заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются  организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации),  органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные  контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными  полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта).  

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик обязуется принять  надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями  Контракта.  

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в  частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего  контракта составляет 333 000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет  специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения Контракта.  

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по  Контракту: Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта  Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***>  рублей 00 копеек на основании счета на оплату.  

Оставшаяся часть в размере 233100 руб. оплачивается поэтапно на основании  принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы  КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры  не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым  

унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной  в п.2.1 контракта и выплаченного аванса.  

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10  рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам  КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п.2.1 настоящего  контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.  

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами  в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после  заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения  контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту);  работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3)  (пункты 3.1, 3.2 контракта).  

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ  согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по  окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3,  организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем  заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан  письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов  выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по  контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д.,  подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в  течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную  документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный  мотивированный отказ от приемки.)  

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный  результат выполненной работы по Контракту считается принятым  Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам  КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной в п.2.1 настоящего  Контракта.  

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить  работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным  Заказчиком Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством  выполнить работы на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях  настоящего Контракта, действующих нормативных технических норм и правил,  законодательных актов Российской Федерации.  

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и  расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по  соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны  контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации (пункт 11.1 контракта).  

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская  поликлиника № 2 платежным поручением № 381883 перечислило ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный  счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021- 003912-25 от 03.09.2021.  

Предусмотренные контрактом работы истцом не выполнены. 

29.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта,  согласно которому стороны пришли к следующему: на момент расторжения контракта  работы подрядчиком не выполнены в полном объеме; цена контракта при заключении  составила 333000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3 контракта заказчиком на  расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере 30% от суммы контракта в  

размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета на оплату, возврат  заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть произведен подрядчиком в  течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения (т.1, л.д. 97).  

03.09.2021 между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) заключен  контракт № П-ИМЗ-2021-003913-26 капитальный ремонт помещений 4-го этажа  отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>  в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в  соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1),  локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт  помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать  заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим  контрактом и действующим законодательством Российской Федерации (т.1, л.д. 99- 105).  

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен  соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной  документации, требованиям действующего законодательства в области строительства,  ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также  требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям  заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются  организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации),  органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные  контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными  полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта).  

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик обязуется принять  надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями  Контракта.  

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в  частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего  контракта составляет 353 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет  специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения Контракта.  

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по  Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30 % от суммы контракта: в  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта  Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***>  рублей 00 копеек на основании счета на оплату.  

Оставшаяся часть в размере 247100 руб. оплачивается поэтапно на основании  принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы  КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры  не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым  унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной  в п.2.1 контракта и выплаченного аванса.  

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10  рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам  КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п.2.1 настоящего  контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.  

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами  в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после  заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения  контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту);  

работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3)  (пункты 3.1, 3.2 контракта).  

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ  согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по  окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3,  организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем  заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан  письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов  выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по  контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д.,  подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в  течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную  документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный  мотивированный отказ от приемки.)  

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный  результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты  подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости  выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3,  составленным с учетом цены, установленной в п.2.1 настоящего Контракта.  

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить  работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком  Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы  на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего  Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных  актов Российской Федерации.  

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и  расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по  соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны  контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации (пункт 11.1 контракта).  

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская  поликлиника № 2 платежным поручением № 381882 перечислило ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный  счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ- 2021-003913-26 от 03.09.2021.  

Предусмотренные контрактом работы выполнены истцом на общую сумму  16314 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и  возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.11.2021 в  размере 16314 руб., а также актом о приемке выполненных работ № 1 от 08.11.2021 в  размере 16314 руб. (т.1, л.д. 128-135).  

16.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта П- ИМЗ-2021-003913-26, согласно которому стороны пришли к следующему: на момент  расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ составила  16314 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не считают  себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением  обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере 89586  руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по контракту;  также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен  поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего  соглашения (пункты 2,3 соглашения) (т.1, л.д. 136).  

03.09.2021 между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) заключен  контракт № П-ИМЗ-2021-003914-27 капитальный ремонт помещений 4-го этажа  отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>,  

в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в  соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1),  локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт  помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать  заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим  контрактом и действующим законодательством Российской Федерации (т.1, л.д. 138- 144),  

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен  соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной  документации, требованиям действующего законодательства в области строительства,  ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также  требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям  заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются  организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации),  органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные  контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными  полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта).  

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик обязуется принять  надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями  Контракта.  

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в  частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего  контракта составляет 288000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет  специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения Контракта.  

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по  Контракту: Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта  Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***>  рублей 00 копеек на основании счета на оплату.  

Оставшаяся часть в размере 201600 руб. оплачивается поэтапно на основании  принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы  КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры  не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым  унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной  в п.2.1 контракта и выплаченного аванса.  

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10  рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам  КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п.2.1 настоящего  контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.  

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами  в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после  заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения  контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту);  работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3)  (пункты 3.1, 3.2 контракта).  

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ  согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по  окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3,  организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем  

заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан  письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов  выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по  контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д.,  подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в  течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную  документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный  мотивированный отказ от приемки.)  

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный  результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты  подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости  выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3,  составленным с учетом цены, установленной в п.2.1 настоящего Контракта.  

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить  работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком  Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы  на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего  Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных  актов Российской Федерации.  

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и  расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по  соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны  контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации (пункт 11.1 контракта).  

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская  поликлиника № 2 платежным поручением № 381881 перечислило ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный  счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ-2021- 003914-27 от 03.09.2021.  

Предусмотренные контрактом работы истцом не выполнены. 

29.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта   № П-ИМЗ-2021-003914-27, согласно которому стороны пришли к следующему: на  момент расторжения контракта работы подрядчиком не выполнены в полном объеме;  цена контракта при заключении составила 288000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3  контракта заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере  30% от суммы контракта в размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета  на оплату, возврат заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть  произведен подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего  соглашения (т.1, л.д. 152).  

03.09.2021 между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) заключен  контракт № П-ИМЗ-2021-003979-28 капитальный ремонт помещений 4-го этажа  отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>,  в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и в  соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1),  локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт  помещений 4-го этажа отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать  заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим  контрактом и действующим законодательством Российской Федерации (т.1, л.д. 154- 160).  

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен  соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной  документации, требованиям действующего законодательства в области строительства,  

ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также  требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям  заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются  организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации),  органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные  контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными  полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта).  

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик обязуется принять  надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями  Контракта.  

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в  частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего  контракта составляет 488000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет  специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения Контракта.  

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по  Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта  Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***>  рублей 00 копеек на основании счета на оплату.  

Оставшаяся часть в размере 341600 руб. оплачивается поэтапно на основании  принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы  КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры  не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым  унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной  в п.2.1 контракта и выплаченного аванса.  

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10  рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам  КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п.2.1 настоящего  контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.  

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами  в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после  заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения  контракта в течении 60 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту);  работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3)  (пункты 3.1, 3.2 контракта).  

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ  согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по  окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3,  организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем  заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан  письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов  выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по  контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д.,  подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в  течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную  документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный  мотивированный отказ от приемки.)  

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный  результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты  подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости  

выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3,  составленным с учетом цены, установленной в п.2.1 настоящего Контракта.  

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить  работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком  Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы  на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего  Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных  актов Российской Федерации.  

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и  расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по  соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны  контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации (пункт 11.1 контракта).  

В соответствии с условиями контракта, 20.09.2021 ГБУ «Курганская  поликлиника № 2 платежным поручением № 381884 перечислило ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный  счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ- 2021-003979-28 от 03.09.2021 (т.1, л.д. 67).  

Предусмотренные контрактом работы истцом не выполнены. 

29.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта   № П-ИМЗ-2021-003979-28, согласно которому стороны пришли к следующему: на  момент расторжения контракта работы подрядчиком не выполнены в полном объеме;  цена контракта при заключении составила 488000 руб., без НДС; в соответствии с п. 2.3  контракта заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен аванс в размере  30% от суммы контракта в размере 

<

***> руб., НДС не облагается, на основании счета  на оплату, возврат заказчику выплаченного по контракту аванса должен быть  произведен подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего  соглашения (т.1, л.д. 167).  

24.09.2021 между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) заключен  контракт № П-ИМЗ-2021-004459-500 капитальный ремонт помещения отделения ГБУ  «Курганская поликлиника № 2», расположенных по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и  в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1),  локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт  помещения отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику  результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и  действующим законодательством Российской Федерации (т.1, л.д. 169-175).  

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен  соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной  документации, требованиям действующего законодательства в области строительства,  ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также  требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям  заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются  организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации),  органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные  контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными  полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта).  

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик обязуется принять  надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями  Контракта.  

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в  частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего  

контракта составляет 375000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет  специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения Контракта.  

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по  Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта  Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***>  рублей 00 копеек на основании счета на оплату.  

Оставшаяся часть в размере 262500 руб. оплачивается поэтапно на основании  принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы  КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры  не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым  унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной  в п.2.1 контракта и выплаченного аванса.  

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10  рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам  КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п.2.1 настоящего  контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.  

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами  в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после  заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения  контракта в течении 45 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту);  работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3)  (пункты 3.1, 3.2 контракта).  

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ  согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по  окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3,  организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем  заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан  письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов  выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по  контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д.,  подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в  течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную  документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный  мотивированный отказ от приемки.)  

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный  результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты  подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости  выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3,  составленным с учетом цены, установленной в п.2.1 настоящего Контракта.  

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить  работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком  Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы  на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего  Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных  актов Российской Федерации.  

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и  расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по  соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны  

контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации (пункт 11.1 контракта).  

В соответствии с условиями контракта, 06.10.2021 ГБУ «Курганская  поликлиника № 2 платежным поручением № 484806 перечислило ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный  счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ- 2021-004459-500 от 24.09.2021.  

Предусмотренные контрактом работы выполнены истцом на общую сумму 4036  руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и возражений,  справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 03.11.2021 в размере 4036  руб., а также актом о приемке выполненных работ № 1 от 03.11.2021 в размере 4036  руб. (т.1, л.д. 188-190).  

12.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта №  П-ИМЗ-2021-004459-500, согласно которому стороны пришли к следующему: на  момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ  составила 4036 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не  считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением  обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере  108464 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по  контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен  поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего  соглашения (пункты 2,3 соглашения) (т.1, л.д. 191).  

24.09.2021 между ответчиком (заказчик) и истцом (подрядчик) заключен  контракт № П-ИМЗ-2021-004460-501 капитальный ремонт помещения отделения ГБУ  «Курганская поликлиника № 2», расположенных по адресу: 

<

...>, в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный контрактом срок и  в соответствии с утвержденным заказчиком техническим заданием (приложение № 1),  локальным сметным расчетом (приложение № 2) осуществить капитальный ремонт  помещения отделения ГБУ «Курганская поликлиника № 2» по адресу: 

<

...>, при этом подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику  результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и  действующим законодательством Российской Федерации (т.2, л.д. 2-8).  

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен  соответствовать техническому заданию, проектной документации, исполнительной  документации, требованиям действующего законодательства в области строительства,  ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также  требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям  заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются  организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации),  органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные  контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными  полномочиями в отношении выполняемых работ (пункт 1.1 контракта).  

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик обязуется принять  надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями  Контракта.  

Цена контракта и порядок расчетов согласованы в разделе 2 контракт, в  частности пунктом 2.1 контракта предусмотрено следующее: цена настоящего  контракта составляет 407000 рублей 00 копеек, без НДС (Подрядчик применяет  специальный режим налогообложения - УСН). Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения Контракта.  

Пунктом 2.3 контракта сторонами согласован график оплаты работ по  Контракту: авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы контракта: в  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта  

Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму аванса в размере 

<

***>  рублей 00 копеек на основании счета на оплату.  

Оставшаяся часть в размере 284900 руб. оплачивается поэтапно на основании  принятых объемов по актам приемки выполненных работ унифицированной формы  КС-2, справкам унифицированной формы КС-3, и наличия счета и/или счета-фактуры  не более чем в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по развернутым  унифицированным формам КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены, установленной  в п.2.1 контракта и выплаченного аванса.  

Окончательная оплата за выполненные работы производится в течение 10  рабочих дней после подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ и  справки о стоимости выполненных работ по развернутым унифицированным формам  КС-2 и КС-3, составленным с учетом цены установленной в п.2.1 настоящего  контракта, наличия счета и/или счета-фактуры.  

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ согласован сторонами  в разделе три контракта, а именно: подрядчик приступает к выполнению работ после  заключения настоящего контракта; сроки выполнения работ-с момента заключения  контракта в течении 45 дней (допускается досрочное выполнение работ по контракту);  работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3)  (пункты 3.1, 3.2 контракта).  

Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ  согласован сторонами в пункте 3.3 контракта: подрядчик сдает выполненные работы по  окончанию всех работ в полном объеме, до представления форм КС-2, КС-3,  организовывает сдачу объемов работ с подписанием ответственным представителем  заказчика журнала учета выполненных работ; подрядчик за три рабочих дня обязан  письменно известить заказчика о времени и месте осуществления сдачи объемов  выполненных работ. Акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ по  контракту (КС-2, КС-3) исполнительная документация, акты на скрытые работы и т.д.,  подписанные подрядчиком, передаются на рассмотрение заказчику, заказчик обязан в  течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленную  документацию либо в этот же срок представить Подрядчику письменный  мотивированный отказ от приемки.)  

Пунктом 3.7 контракта сторонами также согласовано, что окончательный  результат выполненной работы по Контракту считается принятым Заказчиком с даты  подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости  выполненных работ по развернутым унифицированным формам КС-2 и КС-3,  составленным с учетом цены, установленной в п.2.1 настоящего Контракта.  

В соответствии с пунктами 4.1, 4.6 контракта подрядчик обязан выполнить  работы на условиях настоящего Контракта, в соответствии с утвержденным Заказчиком  Техническим заданием; в полном объеме и с надлежащим качеством выполнить работы  на объекте и сдать их результат Заказчику в порядке и на условиях настоящего  Контракта, действующих нормативных технических норм и правил, законодательных  актов Российской Федерации.  

В разделе 11 контракта сторонами также согласован порядок изменения и  расторжения контракта, а именно: стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по  соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны  контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством  Российской Федерации (пункт 11.1 контракта).  

В соответствии с условиями контракта, 06.10.2021 ГБУ «Курганская  поликлиника № 2 платежным поручением № 484807 перечислило ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» на расчетный  счет 

<

***> руб., где в назначении платежа имеется ссылка на контракт № П-ИМЗ- 2021-004460-501 от 24.09.2021.  

Предусмотренные контрактом работы выполнены истцом на общую сумму  21911 руб., что подтверждается, подписанными сторонами без замечаний и  возражений, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 03.11.2021 в  размере 21911 руб., а также актами о приемке выполненных работ № 1, № 2 от  03.11.2021 (т.2, л.д. 31-36).  

12.11.2021 между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта №   № П-ИМЗ-2021-004460-501, согласно которому стороны пришли к следующему: на  момент расторжения контракта общая стоимость фактически выполненных работ  составила 21911 руб., НДС не облагается; с момента расторжения контракта стороны не  считают себя связанными обязательствами по настоящему контракту, за исключением  обязательств по возврату выплаченного заказчиком поставщику аванса в размере  100189 руб., НДС не облагается, уменьшенного на сумму выполненных работ по  контракту; также сторонами обусловлено, что возврат аванса должен быть произведен  поставщиком в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего  соглашения (пункты 2,3 соглашения) (т.2, л.д. 37).  

Как следует из материалов дела истцом, применительно к контрактам от  24.09.2021 на объекте отделение ГБУ «Курганская поликлиника № 2», расположенном  по адресу: 

<

...>, выполнены работы на сумму 19375 руб.,  выполнение указанных работ было согласовано заказчиком, выполнено до расторжения  контрактов.  

Как следует из сведений Картотеки арбитражных дел, решением Арбитражного  суда Курганской области от 12.10.2022 года по делу № А34-20880/2021, вступившим в  законную силу, с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС  ТЕХНОЛОДЖИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУРГАНСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА № 2» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взысканы денежные  средства в размере 767533 руб.; судебные расходы на уплату государственной  пошлины в размере 10875 руб. 33 коп.  

Согласно выводам суда, -по условиям соглашений о расторжении контрактов в  течение 5 рабочих дней с момента их подписания подрядчик должен был возвратить  заказчику полученный и неотработанный аванс по контрактам за вычетом стоимости  фактически выполненных подрядчиком работ. Локальные сметные расчеты на общую  сумму 1007410 руб. 80 коп. (175634,40 руб. + 480508,80 руб. + 351267,60 руб.) на  выполнение скрытых работ, на которые ответчик (истец по настоящему делу)  ссылается в обоснование возражений, с заказчиком согласованы не были, доказательств  иного ответчиком (истец по настоящему делу) не представлено.  

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от  13.03.2023 решение Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 по делу №  А34-20880/2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества с  ьограниченной ответственностью «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» - без удовлетворения.  

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 30.06.2023 решение  Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 по делу № А34-20880/2021 и  постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2023 по  тому же делу оставлены без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной  ответственностью «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» – без удовлетворения.  

Стороны не заявили ходатайств о необходимости представления  дополнительных доказательств, в связи с чем, суд рассматривает дело исходя из  совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые  оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статья 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

При этом лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по  представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд  первой инстанции считает заявленные исковые требования подлежащими частичному  удовлетворению.  

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом  и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые  хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

В рассматриваемом случае правоотношения сторон в рамках настоящего дела  регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным  актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при  рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

Решением Арбитражного суда Курганской области от 12.10.2022 года по делу №  А34-20880/2021, вступившим в законную силу, установлено, что ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС ТЕХНОЛОДЖИ» работы  выполнило не в полном объеме, в силу чего общество утратило право на удержание  полученной и не освоенной суммы авансового платежа.  

Установленные обстоятельства, по мнению суда, имеют преюдициальное  значение для рассмотрения данного дела в силу статьи 69 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в настоящем деле  предъявляются требования общества на основании контрактов, являющихся предметом  спора в рамках дела № А34-20880/2021.  

Преюдициальная связь судебных актов обусловлена указанным свойством  обязательности как элемента законной силы судебного акта, в силу которой в процессе  судебного доказывания суд не должен дважды устанавливать один и тот же факт в  отношениях между теми же сторонами. Иной подход означает возможность  опровержения опосредованного вступившим в законную силу судебным актом вывода  суда о фактических обстоятельствах другим судебным актом, что противоречит  общеправовому принципу определенности, а также принципам процессуальной  экономии и стабильности судебных решений (Постановление Конституционного Суда  Российской Федерации от 05.02.2007 № 2-П).  

В рамках дела № А34-20880/2021 судами установлено, что заказчиком  обязательства по оплате авансовых платежей были исполнены, однако подрядчиком  работы выполнены частично, в частности по контракту от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021- 003910-24 на сумму 9806 руб., по контракту от 03.09.2021 № П-ИМЗ-2021-003913-26 на  сумму 16314 руб., по контракту от 24.09.2021 № П-ИМЗ-2021-004459-500 на сумму  4036 руб., по контракту от 24.09.2021 № П-ИМЗ-2021-004460-501 на сумму 21911 руб.  

Таким образом, работы по контрактам № П-ИМЗ-2021-003910-24, № П-ИМЗ- 2021-003913-26, № П-ИМЗ-2021-004459-500 и № П-ИМЗ-2021-004460-501 были  выполнены частично и с нарушением срока их выполнения; работы по контрактам №  

П-ИМЗ-2021-003912-25, № П-ИМЗ-2021-003914-27 и № П-ИМЗ-2021-003979-28 не  выполнены в полном объеме.  

Учитывая необходимость выполнения работ, которые фактически не были  выполнены истцом, 15.12.2021 между ответчиком и ООО «КОМФОРТ-ПЛЮС» (третье  лицо-2 по настоящему делу) был заключен договор № 196 на выполнение необходимых  работ по адресу: 

<

...> (флюорографический кабинет) и договор   № 212 с ИП ФИО2 (третье лицо-3 по настоящему делу) на выполнение  необходимых работ по адресу: 

<

...> (рентгенологический  кабинет). Работы, предусмотренные условиями договоров, были выполнены ООО  «КОМФОРТ-ПЛЮС» и ИП ФИО2 в полном объеме и приняты ответчиком.  

При этом доводы общества о том, что выполненные работы не являлись  предметом заключенных ранее контрактов признаются голословными,  неподтвержденными материалами дела.  

Вместе с тем, судом установлено, что по результатам фактического выполнения  работ по контрактам от 24.01.2021 №№ П-ИМЗ-2021-004459-500, П-ИМ3-2021-004460501 на осуществление капитального ремонта помещения отделения ГБУ «Курганская  поликлиника № 2», расположенного по адресу: 

<

...> сторонами  были освидетельствованы работы, выполненные истцом согласно локальному  сметному расчету (т.2, л.д. 156-163).  

По результатам освидетельствования, с учетом представленной переписки  сторон (письма № 3851 от 29.10.2021, № 02-11 от 02.11.2021) учреждением 10.11.2021  было согласовано выполнение необходимых для исполнения обязательств по  контрактам работ на объекте ремонта 

<

...> (в т.ч.  оштукатуривание стен), что подтверждается направлением в адрес истца локального  сметного расчета (сметы) № 02-01-01/01 изм. на сумму 19375 руб.; указанный  локальный сметный расчет был также согласован истцом и направлен адрес заказчика.  

В ходе судебного разбирательства факт выполнения истцом работ на сумму  19375 руб. по согласованной заказчиком 10.11.2021 смете ответчик не отрицал, при  этом также пояснив, что данные работы были необходимы для надлежащего  исполнения подрядчиком обязательств по контрактам на спорном объекте ремонта, но  не были учтены в первоначальной смете, выполнены истцом до расторжения  контрактов, результат работ представляет для заказчика потребительскую ценность.  

Необходимость выполнения работ на сумму 19375 руб. также следует из  представленной переписки, согласно которой заказчик и подрядчик обсуждали вопрос  о необходимости подготовки сметы на соответствующий вид ранее неучтенных работ  на объекте.  

Дополнительными работами являются работы, не учтенные в технической  документации, необходимость проведения которых обнаруживается подрядчиком в  ходе проведения строительных работ, без проведения которых продолжение  строительства невозможно. В частности, дополнительными могут быть признаны  только те работы, которые не были учтены в технической документации, но должны  были быть учтены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступить к  другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и  достичь предусмотренного контрактом результата работ. При этом не могут быть  признаны дополнительными работы, которые по своей сути являются самостоятельным  объектом строительства.  

Согласно пункту 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение  существенных условий государственного (муниципального) контракта допускается  только при одновременном соблюдении, в том числе следующих условий: если  возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о  закупке и контрактом; при снижении цены контракта без изменения предусмотренных  контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого  товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; если по  

предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество  товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются  предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой  работы или оказываемой услуги не более чем на 10%.  

В связи с изложенным, стороны согласовали выполнение работ по локальному  сметному расчету (смете) № 02-01-01/Ф1 изм. на сумму 19375 руб., что не превышает  10% от цены контрактов.  

 Таким образом, у суда имеются основания для удовлетворения исковых  требований в размере 19375 руб., при этом данные работы выполнены истцом до  расторжения контрактов. Выполнение спорных работ являлось объективно  необходимым для достижения конечного результата, который фактически заказчиком  согласован и используется; судом также учитывается, что спорные работы на  указанную сумму не являются самостоятельным объектом строительства  (доказательств иного ответчиком не представлено).  

Вместе с тем, в рамках дела № А34-20880/2021 судами также дана оценка тому  обстоятельству, что представленные обществом локальные сметные расчеты на общую  сумму 1007410 руб. 80 коп. (175634,40 руб. + 480508,80 руб. + 351267,60 руб.) на  выполнение скрытых работ с заказчиком согласованы не были, объективных  доказательств, свидетельствующих о достижении между сторонами соглашения об  изменении объемов работ, согласования выполнения дополнительных работ, в  материалах дела не имеется.  

В ходе судебного разбирательства представитель ответчика пояснил, что  заказчик не имел намерений заключать дополнительные соглашения к контрактам на  выполнение дополнительных работ с подрядчиком, и соответственно не направлял и не  подписывал дополнительных соглашений.  

Доказательств того, что дополнительный объем работ был выполнен истцом в  связи с тем, что данные выполненные работы являются обязательными для ответчика  вне зависимости от его волеизъявления, являются экстренными в связи с аварией, иной  чрезвычайной ситуацией природного или техногенного характера, а также угрозой их  возникновения, истцом в материалы дела не предоставлено.  

В рамках настоящего дела истцу неоднократно предлагалось представить  сведения о приостановлении работ при выявлении необходимости выполнения  дополнительных работ по контрактам, переписку, доказательства наличия согласования  со стороны заказчика на выполнение дополнительных работ; дополнительные  доказательства в обоснование исковых требований, в том числе применительно к  положениям Федерального закона № 44-ФЗ, нормам статьи 743 ГК РФ.  

Согласно пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний  приостановить работу при обнаружении иных не зависящих от подрядчика  обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой  работы либо создают невозможность ее завершения в срок.  

В силу пункта 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1  настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в  договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение  или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе  при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться  на указанные обстоятельства.  

Как указано в пункте 5 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения  указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на  оплату работы по цене, определенной в договоре.  

Согласно пунктам 3,4 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации  Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической  документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных  работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом  заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти  дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого  иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением  убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от  возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении  дополнительных работ. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной  пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты  выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если  не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в  связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению  объекта строительства.  

Доказательств того, что истец, действуя в паритетных началах с ответчиком,  добросовестно следуя вышеуказанным требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,  Гражданского кодекса Российской Федерации, исполняя обязательства по контрактам,  не имел объективной возможности приостановить работы, истцом в нарушение статьи  65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не  предоставлено.  

Суд отмечает, что согласно части 7 статьи 50, части 3 статьи 65 Федерального  закона № 44-ФЗ любой участник закупки вправе направить организатору закупки  запрос о даче разъяснений положений документации о такой закупке.  

В настоящем случае, из материалов следует, что до подписания контрактов  истец не мог не знать об условиях исполнения контрактов, однако принял на себя  обусловленные контрактом обязательства, не заявив ответчику о наличии препятствий  для его исполнения. При ознакомлении с документацией при проявлении должной  степени заботливости и осмотрительности имел возможность оценить весь объем и  стоимость необходимых для выполнения работ, а также предварительно направить  соответствующие запросы ответчику о разъяснении тех или иных условий контракта до  его заключения.  

Истец, являясь профессиональным участником рынка, ознакомившись с  документацией, действуя без принуждения и в условиях конкурентной среды, принял  на себя обязательство по выполнению согласованного объема работ, что исключает  возможность ссылаться впоследствии на необходимость проведения дополнительных  работ. Истец должен был предвидеть возможные риски, связанные с выполнением  дополнительных работ, не согласованных заблаговременно с заказчиком и не  предусмотренных дополнительным соглашением к контрактам.  

Ссылки истца на то, что без проведения дополнительных работ объект  невозможно было сдать в эксплуатацию, что дополнительные работы отвечали  необходимым потребностям заказчика, судом приняты быть не могут, поскольку  являются документально не подтвержденными.  

Как видно из материалов дела, ходатайств о проведении судебной экспертизы  истцом заявлено не было.  

Учитывая изложенное, поскольку подрядчиком нарушен порядок согласования  выполнения дополнительных работ на спорную сумму и в материалы дела не  представлено доказательств, свидетельствующих о необходимости немедленных  действий в интересах заказчика в порядке, установленном пунктом 4 статьи 743  Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что истец  не вправе требовать от ответчика оплаты дополнительных работ.  

Кроме того, по смыслу пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской  Федерации не подлежат взысканию плата за работы, использованные при выполнении  

дополнительных несогласованных работ в отсутствие заключенного договора либо  соглашения.  

К представленным истцом фотографиям суд относится критически, поскольку из  представленных фотографий не представляется возможным достоверно установить  место и время съемки, происхождение фотографий и их относимость к  рассматриваемому спору, спорным объектам ремонта.  

Иные заявленные истцом доводы судом исследованы и оценены по правилам  статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат  отклонению, поскольку не влияют на выводы суда, сформированные в ходе  рассмотрения настоящего дела.  

Кроме того, как следует из материалов настоящего дела, также установлено в  рамках дела № А34-20880/2021, учитывая необходимость выполнения работ, которые  фактически не были выполнены истцом, между ответчиком и ООО «КОМФОРТ- ПЛЮС», ответчиком и ИП ФИО2 были заключены договоры на выполнение  необходимых работ по адресам спорных объектов: 

<

...>  (рентгенологический кабинет), 

<

...> (рентгенологический  кабинет). Работы, предусмотренные условиями договоров, третьими лицами были  выполнены в полном объеме и приняты ответчиком.  

Как указано выше, представленные обществом локальные сметные расчеты на  общую сумму 1007410 руб. 80 коп. (175634,40 руб. + 480508,80 руб. + 351267,60 руб.)  на выполнение скрытых работ с заказчиком согласованы не были, объективных  доказательств, свидетельствующих о достижении между сторонами соглашения об  изменении объемов работ, согласования выполнения дополнительных работ, в  материалах дела не имеется.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации,  прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения взаимных  предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей обязанности  одной стороны в отношении другой (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №  2 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018, Обзор судебной практики  Верховного Суда РФ № 3 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018).  

Судом учитывается, что разрешение настоящего спора по существу не должно  порождать иных споров в рамках данных правоотношений сторон. Это противоречит  принципу правовой определенности.  

Материалами дела подтверждается наличие на стороне ответчика задолженности  перед истцом в размере 19375 руб.  

При указанных обстоятельствах, применительно к спорным взаимоотношениям  сторон, у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований о  взыскании с ответчика денежных средств в сумме 988035 руб. 80 коп. (1007410,80 –  19375,00), взысканию с ответчика подлежит 19375 руб.  

В соответствии частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,  в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц,  участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в  размере 23074 руб., что подтверждается платежным поручением № 161 от 30.03.2022 (в  деле). Таким образом, с учетом частичного удовлетворения заявленных требований, в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины с ответчика в пользу истца  подлежит взысканию 444 руб.  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПС  ТЕХНОЛОДЖИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

- денежные средства в размере 19375 руб. 00 коп.; 

- судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 444 руб. 00  коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия  решения (изготовления его в полном объёме) через Арбитражный суд Курганской  области.  

Судья А.Ф. Елесина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.04.2023 1:22:00

Кому выдана Елесина Анна Федоровна