АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

12 марта 2018 года

 

Дело № А33-404/2018

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05 марта 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 12 марта 2018 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бычковой Л.К., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Промоборудование" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

к акционерному обществу "Буреягэсстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Благовещенск Амурской области,

о взыскании задолженности,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности №04 от 20.10.2017 г. (сроком действия до 20.10.2020 г.), личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности № 2 от 07.01.2018 г. (сроком действия до 24.05.20185 г.), личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Промоборудование" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу "Буреягэсстрой" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору на выполнение строительно-монтажных работ № 01-1-2379 от 15.10.2015 г. в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ в размере 5 208 309 руб. 55 коп.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 15.01.2018 возбуждено производство по делу.

Представитель истца исковые требования поддерживает в полном объеме, в соответствии с заявленными требованиями.

Представитель ответчика исковые требования не оспаривает.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

15.10.2015 года между акционерным обществом "Буреягэсстрой" (далее – генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Промоборудование" (далее – субподрядчик) заключен договора на выполнение строительно-монтажных работ « 01-1-2379, по условиям которого, согласно пункту 2.1. генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте: «Создание опытно-демонстрационного центра (пусковой комплекс) по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий, включая проектно-изыскательские работы федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский край)», по видам работ и по объемам работ - в соответствие с Приложением № 1 к настоящему договору «Календарный график выполнения работ» и ежемесячным тематическим заданием (Приложение № 5 к настоящему Договору), и передать результат работы Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется создать необходимые условия, принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

Общая стоимость всех поручаемых субподрядчику работ по настоящему договору в текущих ценах составляет 208 505 270,76 (двести восемь миллионов пятьсот пять тысяч двести семьдесят рублей 76 копеек), в том числе НДС-18% составляет 31 805 888,76 руб.  Состав и виды работ, а также стоимость каждого из видов работ определены в Наборе СМР (Приложение № 2) к настоящему договору. При изменении стоимости работ заказчиком генподрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней направить субподрядчику дополнительное соглашение (пункт 3.1. договора).

В соответствии с пунктом 3.3. договора оплата выполненных субподрядчиком работ производится генподрядчиком ежемесячно, при условии поступления бюджетных денежных средств от заказчика, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на основании оригиналов счета, счета-фактуры, выставленных Субподрядчиком работ Генподрядчику.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Генподрядчиком после полного завершения работ, устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе приемки работ, на Объекте, приемки всей исполнительной документации и актов на скрытые работы (пункт 3.4.).

Согласно пункту 4.1. договора календарные сроки выполнения работ и сроки начала и завершения работ определяются календарным графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к настоящему Договору). При этом устанавливаются следующие сроки:

- Начало работе момента подписания настоящего договора;

- Окончание работ: 31.12.2015 г.

Пунктом 7.1.4. договора предусмотрено, что генподрядчик обязан обеспечить своевременную оплату принятых работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров (пункт 15.1.).

В приложении № 1 между сторонами согласован график выполнения работ.

14.12.2015 между сторонами подписано дополнительное соглашение № 1, согласно которому пункты 3.1., 2.1. изложены в следующей редакции:

«Пункт 3.1., стоимость всех поручаемых субподрядчику работ по настоящему договору в текущих ценах составляет 106 933 545,82 (сто шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок пять рублей 82 копейки), в том числе НДС-18% составляет 16 311 896,82 (шестнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 82 копейки). Состав, виды и стоимость выполняемых строительно-монтажных работ определяется в соответствии с «Набором строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 14.12.2015 г. № 1 к Договору).

Пункт 3.1.1., сумма Авансового платежа определяется в размере 20 000 000,00 (двадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС-18% составляет 3 050 847,46 (три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь рублей 46 копеек), который подлежит оплате до 31.12.2015 г. Зачет выплаченного аванса производится при каждом последующем перечислении денежных средств Генподрядчиком за выполненные работы по форме КС-3 пропорционально их объему

Пункт 2.1. «Календарным графиком выполнения работ» (Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 14.12.2015 г. № 1 к Договору):

Начало работ:  15.10.2015 года Окончание работ: 31.03.2016 года.»

25.01.2016 года между сторонами подписано дополнительное соглашение № 2, согласно которому, стороны пришли к следующему соглашению:

«Стоимость всех поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору в текущих ценах составляет 122 091 133,16 (сто двадцать два миллиона девяносто одна тысяча сто тридцать три рубля 16 копеек), в том числе НДС-18% составляет 18 624 071,16 (восемнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи семьдесят один рубль 16 копеек).

Из общей стоимости Договора стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему дополнительному соглашению в текущих ценах составляет 15 157 587,34 (пятнадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 34 копейки) в том числе НДС-18% составляет 2 312 174,34 (два миллиона триста двенадцать тысяч сто семьдесят четыре рубля 34 копейки). Состав, виды и стоимость выполняемых строительно-монтажных работ определяется в соответствии с «Набором строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 25.01.2016 г. № 2 к Договору).

Стороны установили следующие сроки выполнения работ, которые определяются «Календарным графиком выполнения работ» (Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 25.01.2016 г. X» 2 к Договору):

Начало работ: с момента подписания настоящего дополнительного соглашения Окончание работ: 31.03.2016 года.».

Исполняя условия договора, истец выполнил строительно-монтажные работы на сумму 16 691 243 руб. 96 коп., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1, актом о приемке выполненных работ № 1 по смете № 2-1039, актом о приемке выполненных работ № 2 по смете № 2-1036-к2 от 28.12.2015 за отчетный период с 01.12.2015 по 31.12.2015 на сумму 1 067 676 руб. 98 коп.; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2, актом о приемке выполненных работ № 3 по смете № 2-1036, актом о приемке выполненных работ № 4 по смете № 2-1040 от 26.01.2016 за отчетный период с 01.01.2016 по 31.01.2016 на общую сумму 1 148 543 руб. 56 коп.; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3. актом о приемке выполненных работ № 5 по смете № 2-1036, актом о приемке выполненных работ № 6 по смете № 2-1040 от 26.02.2016 за отчетный период с 01.02.2016 по 29.02.2016 на общую сумму 2 635 990 руб. 20 коп.; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4, актом о приемке выполненных работ № 7 по смете № 2-1036, актом о приемке выполненных работ № 8 по смете № 2-1040 от 31.03.2016 за отчетный период с 01.03.2016 по 31.03.2016 на общую сумму 4 500 491 руб. 68 коп.; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5, актом о приемке выполненных работ № 9 по смете № 2-1036, актом о приемке выполненных работ № 10 по смете № 2-1040 от 29.04.2016 за отчетный период с 01.04.2016 по 29.04.2016 на общую сумму 3 510 372 руб. 56 коп.; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6, актом о приемке выполненных работ № 11 по смете № 2-1036, актом о приемке выполненных работ № 12 по смете № 2-1040 от 31.05.2016 за отчетный период с 01.05.2016 по 31.05.2016 на общую сумму 3 592 685 руб. 82 коп.; Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7, актом о приемке выполненных работ № 13 по смете № 2-1036, от 31.07.2016 за отчетный период с 01.07.2016 по 31.07.2016 на общую сумму 235 483 руб. 16 коп.

В связи с частичной оплатой выполненных работ ответчиком и неисполнением обязательства по оплате долга 5 208 309 руб. 55 коп. истец 03.02.2017 направил ответчику претензию с требованием в пятнадцатидневный срок оплатить долг. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

В подтверждение факт наличия задолженности истец представил в материалы дела подписанный между сторонами акт сверки взаимных расчетом за период с 01.11.2015 по 26.09.2016 на сумму 5 208 309 руб. 55 коп.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ в установленные договором сроки истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе, гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства, возникшие из договоров, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Как следует из материалов дела, между сторонами имеются отношения, вытекающие из договора строительного подряда, предусмотренных статьями 740, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу положений статей 702, 711, 720, 740, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, по результатам которой составляется акт о приемке выполненных работ с указанием их видов и стоимости по форме КС-2. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон.

Из материалов дела следует, что истцом выполнены подрядные работы на сумму 16 691 243 руб. 96 коп., которые приняты ответчиком, что подтверждается имеющимися в материалах дела актами о приемке выполненных работ, подписанным сторонами без разногласий по объему и качеству. Данное обстоятельство сторонами не оспаривалось.

Исходя из положений статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре.

В соответствии с пунктом 3.3. договора оплата выполненных субподрядчиком работ производится генподрядчиком ежемесячно, при условии поступления бюджетных денежных средств от заказчика, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на основании оригиналов счета, счета-фактуры, выставленных Субподрядчиком работ Генподрядчику.

Генподрядчик частично оплатил выполненные подрядчиком работы в сумме 11 482 934 руб. 40 коп.. Таким образом, задолженность перед подрядчиком составила 5 208 309 руб. 55 коп. Истцом в материалы дела представлен подписанный между сторонами акт сверки взаимных расчетом за период с 01.11.2015 по 26.09.2016 на сумму 5 208 309 руб. 55 коп.

Ответчик доказательства надлежащего исполнения обязательств по оплате выполненных в полном объеме не представил. В ходе судебного разбирательства пояснил, что исковые требования не оспаривает.

Суд, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь вышеизложенными нормами материального права, установив факт выполнения истцом работ по спорному договору в общей сумме 16 691 243 руб. 96 коп. и принятие их ответчиком (подписание актов о приемке выполненных работ) без полной оплаты, признает требования истца в сумме 5 208 309 руб. 55 коп. подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Буреягэсстрой", г. Благовещенск Амурской области, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Промоборудование", 

<

...> 208 309 руб. 55 коп. основного долга, в доход федерального бюджета Российской Федерации 49 042 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

 

 

Судья

Л.К. Бычкова